산림녹지과

□ 2021년도 명시․사고 이월사업 추진상황

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	예산액	집행액	이월액	추진상황 및 금후계획
합 계		36,945,524	30,980,663	5,461,804
명시	소 계	2,580,446	223,208	2,349,238
	목재산업시설 현대화사업	92,000	0	92,000	◦사업대상자 공모선정 : 22. 2. 14. ◦사업계획서 제출 및 사업추진 : 22. 3. ~ 10.
	함파우 지방정원 조성사업	2,488,446	223,208	2,257,238	◦실시계획인가 및 관련부서 협의 중 - 일상감사, 원가심사 : 4월중 - 사업시행 : 22.5.~ 23.12.31.
사고	합 계	34,365,078	30,757,455	3,112,566
	산지호우피해 복구지원(산림청)	23,457,306	22,701,377	408,414	◦집행완료 : 25,552천원 ◦동절기 공사중지 중(5건) - 상반기 내 집행 완료
	산지호우피해 복구지원(행안부)	6,522,053	5,763,555	667,591	◦집행완료 : 4,000천원 ◦동절기 공사중지 중(9건) - 상반기 내 집행 완료
	2021년 산불대응센터 경관조성사업	400,000	361,956	29,551	◦사업 완료(22.3.4.)
	2022년 소나무재선충병 방제사업 실시설계용역	204,539	197,789	6,750	◦사업 완료(22.1.28.)
	2021년 산림보호구역 재정비용역	28,100	18,600	9,500	◦산림청 심의 진행 중 - 2022년 6월 완료 예정
	함파우 지방정원 조성사업 소규모환경영향평가 용역	19,170	0	19,170	◦용역기간:21.3.23 ~ 22.3.18. - 기한 내 완료 추진
	함파우 지방정원 조성사업 사전재해영향평가 용역	33,384	0	33,384	◦용역기간:21.3.23 ~ 22.3.18. - 기한 내 완료 추진
	미세먼지 차단숲 조성사업	1,884,000	763,000	1,027,613	◦사업기간:21.9.28.~22.1.25. - 동절기 공사중지중/ 4월한 준공예정
	미세먼지 차단숲 조성사업 관급자재(파고라)		0	48,259	◦사업기간:21.9.28.~22.1.25. - 동절기 공사중지중/ 4월한 준공예정
	미세먼지 차단숲 조성사업 관급자재(야자매트)		0	7,296	◦사업기간:21.9.28.~22.1.25. - 동절기 공사중지중/ 4월한 준공예정
	미세먼지 차단숲 조성사업 감리용역		0	23,077	◦감리기간:21.2.26.~22.2.8. - 동절기 공사중지중/ 4월한 준공예정
	임산물 상품화 지원사업	200,000	164,586	34,911	◦집행완료 : 24,911천원 ◦3월 중 집행 완료 예정
	산림소득작물 재배지원사업	83,000	64,987	17,920	◦집행 완료 : 3,900천원 ◦겨울철은 모종 식재시기에 부적절하여 5월 중 집행 완료 예정
	2021년 간선임도 신설사업(대강사석)	1,516,604	721,605	241,402	◦공사착공 : 21. 11월 ◦동절기 중지 : 21.12.~’22.2. ◦공사 재착공 : 22. 3월 ◦공사 준공 예정 : 22. 6월
	2021년 간선임도 신설사업(대강사석) 감리용역			6,950
	2021년 간선임도 신설사업(산동대상)			250,131	◦공사착공 : 21. 7월 ◦동절기 중지 : 21.12.~’22.2. ◦공사 재착공 : 22. 3월 ◦공사 준공 예정 : 22. 6월
	2021년 간선임도 신설사업(산동대상) 감리용역			6,600
	2022년 간선임도 신설사업(산동대상) 실시설계용역			26,349	◦용역착수 : 21. 12월 ◦공사 중지 : 22.1. ~‘22. 3. - 토지소유주 동의 등 사전절차 이행 ◦용역 재착수 : 22. 3월 ◦공사 시행 : 22. 4월
	2022년 간선임도 신설사업(산동대상) 감리용역			7,650
	2021년 작업임도 신설사업(대강월탄)			120,927	◦공사착공 : 21. 7월 ◦공사 중지 : 21. 9. ~ 11. - 민원발생에 따른 설계변경 추진 ◦공사재착공 : 21. 11월 ◦동절기 중지 : 21.12.~ 22.2. ◦공사 재착공 : 22. 3월 ◦공사 준공 예정 : 22. 6월
	2021년 작업임도 신설사업(대강월탄) 감리용역			4,650
	2021년 임도구조개량사업 (주천배덕임도)			61,372	◦공사착공 : 21. 12월 ◦동절기 중지 : 21.12.~ 22.2. ◦공사 재착공 : 22. 3월 ◦공사 준공 : 22. 6월
	2021년 임도구조개량사업 관급자재			6,067	◦사업 완료(22.1.)
	2022년 작업임도 신설사업 실시설계용역			15,660	◦용역착수 : 21. 12월 ◦공사 중지 : 22.1. ~ 22. 2. - 토지소유주 동의 등 사전절차 이행 ◦용역 재착수 : 22. 3월 ◦공사 시행 : 22. 3월
	2022년 작업임도 신설사업 감리용역			4,500
	2022년 임도구조개량사업 실시설계용역			9,950	◦용역완료(22. 2월)
	의총로 은행나무 가로수 전지사업	16,922	0	16,922	◦사업완료(22.1.5.)