문화예술과

□ 2021년도 명시․사고 이월사업 추진상황

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	예산액	집행액	이월액	추진상황 및 금후계획
총 합 계		9,495,433	4,356,248	3,768,903
명시	소 계	5,730,848	3,035,656	2,695,192
	남원시 복합형 공공도서관 건립	2,050,000	1,859,398	190,602	·계약심사 및 일상감사(’22. 3. ~ 4.) ·공사 발주 예정(’22. 5.)
	남원시 미술 에듀센터 건립	1,300,000	47,800	1,252,200	·계약심사 및 일상감사(’22. 4.) ·공사 발주 예정(’22. 5.)
	남원읍성 토지매입	1,000,000	783,075	216,925	·미협의 필지(4필지/345㎡) 토지수용절차 진행중 (3월 심의, 6월 공탁 예정)
	남원읍성 시설물 정비	300,000	29,726	270,274	·착 공 : ’22.2.23. ·준공(예정) : ’22.6.22.
	용장서원 방충사업	57,272	7,006	50,266	·착 공 : ’22.2.22. ·준공(예정) : ’22.4.2.
	풍계서원 방충사업	62,852	7,564	55,288	·착 공 : ’22.2.22. ·준공(예정) : ’22.4.2.
	실상사 극락전 기단보수	26,000	3,240	22,760	·착 공 : ’22.2.23. ·준공(예정) : ’22.4.13.
	사계정사 기단보수 및 마당정비	38,173	4,860	33,313	·착 공 : ’22.2.23. ·준공(예정) : ’22.4.13.
	남원 교룡산성 시발굴조사	270,000	180,148	89,852	·착 공 : ’22.3. ·준공(예정) : ’22.9.
	남원 유곡리와 두락리 고분군 홍보관 건립	550,000	112,839	437,161	·도시계획 결정(변경) 완료 :’22.3. ·매장문화재조사 : ’22.4. ·실시설계용역추진 : ’22.4.
	남원아트센터 시설보수	71,551	0	71,551	· ’22.6월 집행예정(설계중)
	가마전기 배선 교체 및 차단기 설치	5,000	0	5,000	·집행완료(2022.1.)
사고	합 계	3,764,585	1,320,592	1,073,711
	남원읍성 북성문 및 북성벽 일원 디지털 고증조사 기록화 용역	145,500	72,750	72,750	·착 수 : ’21.11.05. ·착수보고회 : ’21.11.23. ·준 공(예정) : ’22.10.31.
	남원 실상사 동·서 삼층석탑 2차년도 정기계측 용역	18,700	0	18,700	·사업완료 : ’22.10.21.
	남원 실상사 백장암 석등 보주 복원	19,000	0	19,000	·사업완료 : ’22.3.15.
	남원 실상사 종합정비 예정부지내 유적 시굴조사	30,000	0	30,000	·착 공 : ’21.11.15. ·준공(예정) : ’22.3.22.
	남원 유곡리와 두락리 고분군 홍보관 조성에 따른 도시관리계획 결정(변경) 용역	95,648	47,800	47,848	·용역완료 : ’22.3.
	남원 척문리산성 시굴 및 발굴조사	111,789	0	111,789	·착 공 : ’21.7.26. ·준공(예정) : ’22.3.27.
	남원시민도예대학 0.2㎥전기(환원)가마 구입	9,400	0	9,400	·집행완료 : ’22.2월
	남원시민도예대학 0.3㎥전기(환원)가마 구입	10,300	0	10,300	·집행완료 : ’22.2월
	국악 아카이빙 구축을 위한 연구용역	48,000	0	48,000	·용역착수 ’21.06.14. ·용역완료 ’22.01.09.
	남원시 복합형 공공도서관 건립	1,992,718	1,200,042	657,074	·행정절차 이행에 따른 용역중지(22. 2. 24.) ·계약심사 및 일상감사(22. 3. ~ 4.) ·준공예정(22. 4.)
	남원시 미술 에듀센터 건립	1,282,480	0	47,800	·사용자 협의 지연에 따른 용역중지(22. 3. 3.) ·계약심사 및 일상감사(22. 4.) ·준공예정(22. 5.)
	제27회 남원시립 소년소녀합창단 정기공연 기록물 제작	1,050	0	1,050	·지급완료 : 22.01.19.