관 광 과

□ 2021년도 명시․사고 이월사업 추진상황

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	예산액	집행액	이월액	추진상황 및 금후계획
총 합 계		13,924,720	4,420,499	9,504,221
명시	소 계	7,527,870	2,883,882	4,643,988
	읽기 쉬운 관광안내 체계 구축	400,000	279,500	120,500	·기본용역 완료(6월말) 후 추진예정
	남원 드래곤 관광단지 기반시설 설치공사 (전환사업)	2,100,000	540,097	1,559,903	·동절기 공사 중지: `21.12.31. ·남원 드래곤 관광단지 기반시설 설치공사 추진: `21.12.28.~
	오리정·버선밭 연계 관광지화 사업 (전환사업)	1,200,000	247,815	952,185	·오리정 테마공원 사업 및 오리정 주변정비사업 원가심사 의뢰 ·오리정 테마공원 및 주변정비사업 공사 시행: `22.03.~ ·관급자재 구입: 19,350천원
	교룡산 국민관광지 활성화 사업	1,600,000	1,000,000	600,000	·교룡산 국민관광지 활성화사업 전기공사 원가심사 의뢰 ·교룡산 국민관광지 활성화사업 전기공사 시행: `22.03.~
	남원관광지 민간투자 개발사업	687,870	568,774	119,096	·남원관광지 민간투자개발사업 추진을 위한 용지보상 추진
	남원관광지 RE-PLUS사업	720,000	9,990	710,010	·건축설계용역 원가심사 추진 예정: `22. 3월중
	지리산 관문 관광공원 조성사업	400,000	237,706	162,294	·원가심사 완료 및 계약예정 ·BF인증관련 설계변경 추진
	지리산권 스마트관광 콘텐츠 개발	300,000		300,000	·지리산권 스마트관광 콘텐츠 개발 사업 추진 예정: `22. 4월중
	관광상품개발 및 마케팅	120,000		120,000	·음식점 시설개선사업 추진예정 : `22. 3월중
사고	합 계	6,396,850	1,536,617	4,860,233
	광한루원 주변 스마트관광 생태계 개발용역	17,900		17,900	·`22.02. 완료
	남원시 관광안내판 신규 설치 및 철거 (백두대간)	14,490		14,490	·`22.02. 완료
	남원시 읽기 쉬운 관광안내체계 구축 1단계(조사,디자인) 용역	279,500	130,000	149,500	·`22.3월중 중간 용역보고회 개최 ·`22.6월 준공예정
	남원 관광개발사업 기본계획수립 및 타당성조사 용역	70,000		70,000	·`21~`25 동부권 개발사업 사업계획수립 ·시내권 관광지와 연계방안 검토 중
	남원 드래곤 관광단지기반시설 설치공사(전환사업)	693,448		693,448	·동절기 공사 중지: `21.12.31. ·남원 드래곤 관광단지 기반시설 설치공사 추진 : `21.12.28. ~ `22.12.22.
	오리정·버산밭 연계 관광지화 사업(전환사업)	196,698		196,698	·버선밭 정비사업 : `21.12.06. ~ `22.06.03. ·동절기 공사 중지 : `22.01.04. ~ `22.03.07.
	이성계장군 전승길 주변 개발사업(전환사업)	336,658		336,658	·삼산마을 솔밭공원 정비사업 : `21.12. ~ `22.12. ·동절기 공사 중지 : `22.01.04. ~ `22.03.07.
	지리산 테마관광공원 조성사업(전환사업)	283,955		283,955	·동절기 공사 중지: `22.2월까지 ·조형물 제작설치 및 기반조성 공사 추진: `22.5월까지
	제2차 대표관광지 육성사업	188,920		188,920	·동절기 공사 중지: `22.1. ~ 2. ·대표관광지 사랑의정원 조성 공사(예루원마당 꽃담장) : 142,869천원/3월말 준공예정 ·관급자재 37,692천원 지급완료
	교룡산 국민관광지 활성화사업(전환사업)	1,000,000		1,000,000	·동절기 공사 중지 : `22.01.04. ~ `22.03.07. ·공사 추진: `21.12.24. ~ `22.07.11.
	함파우 유원지 개발	19,980		19,980	·관광개발사업 추진을 위한 용지보상 추진
	서부내륙권 광역관광개발	2,783,159	1,121,937	1,661,222	·남원 옛다솜이야기원 사랑체험관 건립공사(1차분) 추진 : `21.03.04. ~ `23.07.31. ·기성금 284,910천원 지급완료
	남원관광지 민간투자 개발사업	45,418		45,418	·남원관광지 민간투자개발사업 추진을 위한 용지보상 추진 ·용역비 7,150천원 지급완료
	남원예촌 전통한옥 체험시설 객실황토벽보수	29,824		29,824	·동절기 등 공사 중지 - 3월초 재착공 및 3월말 준공예정
	남원예촌 전통문화 체험지구 관리	36,900		36,900	·남원예촌 SNS 운영 활성화 게시물 디자인용역: 9,500천원/ 7월말 용역 완료예정 ·남원예촌 SNS 운영 활성화 시민 취재단 운영 및 카드뉴스 기획 용역: 9,500천원/ 8월초 용역 완료예정 ·조갑녀살풀이명무관 정체성 확립 및 활용방안 연구용역 : 17,900천원/2월말 용역 완료예정 - 기성금 9,815천원 지급완료
	지리산 친환경 전기열차 시험노선 대응정책성 용역	400,000	284,680	115,320	·`22. 8. 준공예정(친환경 전기열차 시범사업 공모 완료 시점)