교 육 체 육 과

국립 전북 스포츠 종합훈련원 건립사업

【국가예산】

□ 필 요 성

◦ 국가대표 선수촌이 서울(태릉), 강원(태백), 충북(진천) 등 3개 지역에 설치되어 있으며, 중부권 이남 지역에는 선수촌이 없음.

◦ 충청권 및 영호남을 아우르고, 육상, 구기 및 투기종목 등 하계종목 훈련에 집중할 수 있도록 전북지역에 스포츠 종합훈련장을 조성하여 중부 이남지역 체육 선수들의 사기 진작과 경기력 극대화 도모

◦ 스포츠복지는 국민의 권리이자 국가의 의무로 국민이 스포츠를 즐기며 건강하게 살 수 잇도록 국가가 책임지고 지원

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 운봉읍 덕산리 1099-6 일원

◦ 사업기간 : 2023 ~2028년(6년)

◦ 부지면적 : 180,000㎡정도

◦ 사업내용 : 25여 종목

- 육상, 축구, 야구, 테니스, 스쿼시, 농구, 배구, 배드민턴, 볼링, 복싱, 수영, 체조, 레슬링, 양궁, 역도, 우슈, 유도, 가라테, 자전거, 정구, 철인3종, 탁구, 태권도, 펜싱, 핸드볼 등

- 숙소, 관리동, 스포츠 재활센터, 휴게시설 등 기타 부대시설

◦ 총사업비 : 2,000억원(국비)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	2,000.00			14.00	1,986.00
국 비	2,000.00			14.00	1,986.00
도 비
시 비
기 타

□ 금후계획

◦ 예비타당성조사 및 설계 용역	: 2023

◦ 부지정리 및 기반시설 조성	: 2024

◦ 기반시설 및 단지조성	: 2025

◦ 단지조성 및 체육시설 조성	: 2026 ~ 2027

◦ 조성완료	: 2028

남원 공공체육시설 광장 및 도로정비사업

【기금】

□ 필 요 성

◦ 매년 국제 및 국내 대회를 치루고 전지훈련 등을 유치하는 공공체육시설의 노후된 시설을 정비함으로, 이용자의 편의를 증진함은 물론 안전사고를 예방하고자 함.

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 충정로 341(춘향골체육공원),

남원시 이백면 이백로 333(남원문화체육센터)

◦ 사업기간 : 2023년

◦ 사업내용

- 춘향골체육공원 ┌ 광장 및 주차장 정비 A=15,000㎡

└ 도로 정비 L=1.2㎞

- 남원문화체육센터┌ 광장 및 주차장 정비 A=14,000㎡

└ 도로 정비 L=0.3㎞

◦ 총사업비 : 19억원(국비 5.7, 시비 13.3)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	19.00			19.00
국 비	5.70			5.70
도 비
시 비	13.30			13.30
기 타

□ 추진상황

◦ 사업 계획 수립	: 2022. 1.

□ 금후계획

◦ 국가예산 확보를 위한 일제출장(1차)	: 2022. 4.

◦ 2023년 공공체육시설 개보수 지원사업 신청	: 2022. 5.

◦ 국가예산 확보를 위한 일제출장(2차)	: 2022. 6.

◦ 2023년 국고보조금 예산(안) 통보	: 2022. 9.

◦ 사업 추진	: 2023. 1. ~ 12.

춘향골 체육공원 시설물 개보수사업

【기금】

□ 필 요 성

◦ 시설의 노후화로 지붕 누수가 발생하여 건물 내구성 저하 우려가 있어 보수가 필요함.

◦ 롤러트랙경기장 바닥 크랙 및 들뜸 현상으로 안전사고 우려가 있어 보수가 필요함.

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 월락동 248(춘향골 체육공원) 내

◦ 사업기간 : 2023년

◦ 사업내용 : 춘향골 실내체육관 지붕(A=4,600㎡) 및 인공암벽장 개보수A=253㎡, 롤러트랙경기장 우레탄교체 A=3,500㎡

◦ 총사업비 : 8.5억원(국비 2.55, 시비 5.95)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	8.50			8.50
국 비	2.55			2.55
도 비
시 비	5.95			5.95
기 타

□ 추진상황

◦ 사업 계획 수립	: 2022. 1.

□ 금후계획

◦ 국가예산 확보를 위한 일제출장(1차)	: 2022. 4.

◦ 2023년 공공체육시설 개보수 지원사업 신청	: 2022. 5.

◦ 국가예산 확보를 위한 일제출장(2차)	: 2022. 6.

◦ 2023년 국고보조금 예산(안) 통보	: 2022. 9.

◦ 사업 추진	: 2023. 1. ~ 12.

남원문화체육센터 시설물 개보수사업

【기금】

□ 필 요 성

◦ 지붕재가 파손되어 누수가 되고, 지붕마감재가 노후화되고 탈락되어 건물 내구성 저하 우려가 있어 보수가 시급함.

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 이백면 이백로 333

◦ 사업기간 : 2023년

◦ 사업내용 : 실내체육관 지붕보수 A=1,930㎡

◦ 총사업비 : 3억원(국비 0.9, 시비 2.1)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	3.00			3.00
국 비	0.90			0.90
도 비
시 비	2.10			2.10
기 타

□ 추진상황

◦ 사업 계획 수립	: 2022. 1.

□ 금후계획

◦ 국가예산 확보를 위한 일제출장(1차)	: 2022. 4.

◦ 2023년 공공체육시설 개보수 지원사업 신청	: 2022. 5.

◦ 국가예산 확보를 위한 일제출장(2차)	: 2022. 6.

◦ 2023년 국고보조금 예산(안) 통보	: 2022. 9.

◦ 사업 추진	: 2023. 1. ~ 12.

춘향골 체육공원 축구장 개량사업

【기금】

□ 필 요 성

◦ 매년 국내 및 국제대회, 전지훈련 등을 치루는 춘향골 체육공원 내 주경기장의 낙후된 축구장을 개량하여 축구대회 및 전지훈련 시 제공하기 위함.

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 월락동 248(춘향골 체육공원) 내

◦ 사업기간 : 2023년

◦ 사업내용 : 축구장(천연잔디) 개량 1식

◦ 총사업비 : 12억원(국비 3.6, 시비 8.4)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	12.00			12.00
국 비	3.60			3.60
도 비
시 비	8.40			8.40
기 타

□ 추진상황

◦ 사업 계획 수립	: 2022. 1.

□ 금후계획

◦ 국가예산 확보를 위한 일제출장(1차)	: 2022. 4.

◦ 2023년 공공체육시설 개보수 지원사업 신청	: 2022. 5.

◦ 국가예산 확보를 위한 일제출장(2차)	: 2022. 6.

◦ 2023년 국고보조금 예산(안) 통보	: 2022. 9.

◦ 사업 추진	: 2023. 1. ~ 12.

운봉 축구장 스포츠 조명설치 사업

【특별조정교부금】

□ 필 요 성

◦ 지역주민들의 체육시설 이용 증가

◦ 야간 체육활동을 원활하게 하여 주민의 체육시설 이용 활성화

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 운봉읍 서천리 40-3

◦ 사업기간 : 2022년

◦ 사업내용 : 조명타워 4개소 설치

◦ 총사업비 : 6억원(도비 3, 시비3)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	6.00		6.00
국 비
도 비	3.00		3.00
시 비	3.00		3.00
기 타

□ 추진상황

◦ 전라북도 보조금 교부 신청	: 2022. 3.

□ 금후계획

◦ 실시설계 및 원가심사	: 2022. 4. ~ 5.

◦ 사업 추진	: 2022. 5. ~ 7.

주천 파크골프장 조성사업

【균특】

□ 필 요 성

◦ 주천면 관내 주택단지로 주천 문화마을과 숲속전원마을, 솔빛마을이 조성되고 있어 파크골프장 조성을 위한 요구 증가

◦ 관내 파크골프 동호인 증가로 인해 파크골프장 조성으로 노인복지 증진 및 생활체육활성화에 기여하고자 함.

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주천면 주천리 10-5 일원

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2024(2개년)

◦ 사업내용 : 파크 골프장 9홀 이상(A=10,185㎡), 부대시설 등 조성

◦ 총사업비 : 18억원(국비 3.6, 시비 14.4)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	18.00			6.00	12.00
국 비	3.60				3.60
도 비
시 비	14.40			6.00	8.40
기 타

□ 추진상황

◦ 사업 건의(주천면 → 시)	: 2021. 12.

◦ 관련부서 협의 및 사업 검토	: 2022. 3. ~ 6.

□ 금후계획

◦ 사업 계획 수립	: 2022. 7.

◦ 부지 매입 절차 이행	: 2023. 1. ~ 12.

◦ 2024년 체육진흥시설 지원사업 신청	: 2023. 2.

◦ 2024년 국고보조금 예산(안) 통보	: 2023. 9.

◦ 사업 추진	: 2024. 1. ~ 12.