보건지원과

□ 2021년도 명시․사고 이월사업 추진상황

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	예산액	집행액	이월액	추진상황 및 금후계획
총 합 계		5,350,519	441,510	4,909,009
명시	소 계	4,013,989	153,449	3,860,540
	공공건축물 그린리모델링	3,797,829	153,449	3,644,380	◦설계용역(완료) - ‘21.11.01.~‘21.12.20. ◦그린리모델링 공사 추진 - ‘22. 3월 ~ 6월
	코로나19 재택치료 이송비	10,000	-	10,000	◦확진자 재택치료 이송 지원 - 8건, 1,989,000원
	코로나19 방역비	30,000	-	30,000	◦코로나19 방문접종 추진(3월~)
	호흡기전담클리닉 설치․운영지원	100,000	-	100,000	◦호흡기전담클리닉 신청완료 - 미래연합의원(2022.3.2.) ◦보조금 지급 및 정산 : 4월
	보건소 한시인력 지원사업(추가)	76,160	0	76,160	◦보건소 한시인력 채용 : 8명
사고	합 계	1,336,530	288,061	1,048,469
	농어촌보건소 등 이전신축(농어촌 의료서비스 개선사업)	1,336,530	288,061	1,048,469	◦정신건강복지센터 증축공사(완료) - 착공 : 2021. 8. 27. - 준공 : 2022. 2. 21. * 전국적 관급자재 수급 불안에 따른 관급자재(철근 등) 납품 지연으로 공사기간 연장함 (당초) ‘21.08.27. -‘21.12.24. (변경) ‘21.08.27. -‘22.02.21.