여 성 가 족 과

여아전용 학대피해아동 쉼터 설치

【신규】

□ 필 요 성

◦ 2021. 3. 30.일부터 즉각 분리제도 시행으로 시설 입소조치가 많아지고 있는 상황임.

◦ 현재 우리시는 남아전용 쉼터만 소재하고 있어 여아의 학대피해 발생 시 보호 조치에 어려움이 있어 설치가 필요함

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월

◦ 위    치 : 시 소유 부지

◦ 규    모 : 연면적 152㎡(약 46평)

- 산출내역 : 3,330천원/㎡ × 152㎡ = 506,160천원

◦ 사업내용 : 여아전용 학대피해아동쉼터 신축

- 시설기준 : 아동용방 2개, 직원용방 1개, 심리치료실 1개, 화장실 2개

◦ 총사업비 : 5.1억원(국비 1.3  도비 1  시비 2.8)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	5.10	0.00	0.00	5.10
국 비	1.30			1.3
도 비	1.00			1
시 비	2.80			2.8

□ 추진상황

◦ 시 소유 부지 중 적합한 장소(2~3곳) 협의(재정과)	: 2021. 12월

□ 금후계획

◦ 보건복지부에 쉼터 설치 신청	: 2022. 6월

◦ 학대피해아동쉼터 신축 부지 결정	: 2022. 7월