2022. 7.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

시정질문·5분발언 추진상황

환경사업소

목        차

□ 일 반 현 황
□ 2022 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향
□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획
◦ 남원하수처리장 운영 및 시설개선
◦ 스마트 남원하수처리장 사업
◦ 하수처리장 태양광 발전시설 설치사업
◦ 공공하수도시설 민간위탁 관리대행 사업
◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업
◦ 소규모 마을하수도 및 중계펌프시설 보강사업
◦ 남원(3단계) 하수관로 정비사업
◦ 남원처리구역 하수관로 정비사업
◦ 아영 인풍지구 하수관로 정비사업
◦ 산내지구 하수관로 정비사업
◦ 남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업
◦ 요천생태습지공원 운영 관리

일  반  현  황

□ 기    구

									환경사업소장
									왕 길 성
하수경영담당					하수시설담당								하수처리담당										마을하수담당
김 진 홍					문 인 구								박 기 정										문 하 성
∘행정 종합계획 수립 ∘공공 시설물 관리 ∘공기업 특별회계 운영 ∘요천생태습지공원 관리 ∘하수도 요금 부과징수 ∘빗물이용시설 관리					∘하수도 중장기계획 수립 ∘하수관거정비 사업 추진 (남원3단계, 남원처리구역, 아영, 산내 등) ∘오수중계펌프장 관리 ∘배수설비 설치신고 및 관리 ∘하수도 원인자 부담금 부과징수								∘하수처리 종합계획 수립 ∘남원하수처리장 운영 ∘분뇨처리시설 운영 ∘슬러지 처리 탄화시설 운영 ∘음식물폐기물 처리시설 운영										∘운봉·인월 하수처리장 관리 ∘소규모 마을하수처리장 관리 ∘노후 마을하수시설 개량사업 추진 ∘낙동강수계 기금관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	22	1	4	5	6	6	청 경 2 환경관리원 3 공 무 직 5
현 원	21	1	9	4	5	2	청 경 2 환경관리원 3 공 무 직 5
증 감	△1	-	5	△1	△1	△4

□ 하수처리시설 현황

주요 하수처리시설 현황

구 분		시설용량 (㎥/일)	처리방법	면적(㎡)	준공일	비 고
남원 하수 처리 장	하수처리장	50,000	심바이오공법	36,505	1995.11.04
	분뇨처리장	50	B3	744	2004.11.08
	음식물처리장	20	혐기성소화	554	2017.05.31
	슬러지처리시설	30	건조‧탄화	906	2011.11.21
운봉하수처리장		800	회분식활성슬러지공법	3,735	2006.05.30
인월하수처리장		1,000	회분식활성슬러지공법	3,616	2006.05.30

소규모 마을하수처리시설 현황 : 62개소, 5,019㎥/일

□ 요천 생태습지공원 현황

위치	조성 규모	준공일자	주요시설
주생면 중동리 1297	145,298㎡	2014.12.01.	생태탐방로, 야구장, 다목적구장, 애견놀이터, 모정 등

2022년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 산내지구 및 일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업 착공 ◦ 운봉□인월 및 소규모마을하수처리시설 관리대행 실시 ◦ 하수처리 노후 시설물 개선 및 최적운영으로 청정하천 수질보전 ◦ 요천생태습지공원 시설환경 정비 및 시설물 보완 추진

□ 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리

◦ 남원(3단계) 하수관로 정비사업 공사 추진(공정률 73%)

◦ 산내지구 및 일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업 착공

◦ 남원처리구역 및 아영인풍지구 하수관로 정비사업 행정절차 이행

◦ 농촌지역 마을하수처리시설 개량사업 추진

- 양촌, 내기 마을하수 설계(공정률 30%), 비전 마을하수 공사(공정률 40%) 추진

□ 하수처리 노후시설물 개선 및 최적운영으로 청정하천 수질보전

◦ 인공지능 기반 첨단제어시스템 스마트 남원하수처리장 사업 추진

◦ 하수처리시설 노후시설물 정비로 방류수 수질기준 준수

- 처리상태 : BOD 2.2㎎/L, SS 4.7㎎/L, T-N 15.450㎎/L, T-P 0.075㎎/L

(법적기준 : BOD 5㎎/L, SS 10㎎/L, T-N 20㎎/L, T-P 0.3㎎/L)

□ 시민 휴식과 힐링을 함께하는 생태습지공원 운영·관리

◦ 요천생태습지공원 준설, 수목 및 잔디 식재, 시설물(모정 등)정비 등 추진

◦ 공원야구장 등 체육시설 시민동호회 활성화로 건강한 시민 삶 제고

◦ 쓰레기매립장 및 하수처리수를 활용한 생태 복원 친수 공간으로 운영

	하반기 추진방향
◦ 하수도시설 지속적인 확충(남원처리구역 및 아영 인풍지구 착공) ◦ 스마트 하수처리사업 추진 및 노후시설 개선으로 방류수질 법적기준 준수 ◦ 농어촌지역 마을하수도 처리시설 개량 완료 및 정상가동 ◦ 요천생태습지공원 지속적인 시설 정비 및 보강으로 시민힐링 공간제공

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

남원하수처리장 운영 및 시설개선

□ 개    요

◦ 시설현황                                                 (단위 : ㎥/일)

구 분	하수	분뇨	음식물	하수슬러지	비 고
설치년도	1995년	1982년	2017년	2011년
처리공법	Symbio	B3	혐기성소화	건조‧탄화
시설용량	50,000	50	20	30
유입량 / 처리량	28,259 / 27,099	25 /25	18 / 18	30 / 30

※ 처리방식 : 생활하수, 분뇨 및 음식물류 폐기물의 병합처리

□ 추진실적

◦ 철저한 수질관리로 방류수질기준 준수                  (단위 : ㎎/L, 개)

항목 구분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수	비고
유입수	136.9	137.7	231.9	61.601	5.617	98,775
방류수 / 기준	2.2 / 5	10.1 / 15	4.7 / 10	15.450 / 20	0.075 / 0.3	12 / 1,000

◦ 처리시설 점검(매주)‧시설정비(상시)로 안정적인 처리시설 운영

◦ 수질관리를 위한 노후 처리시설 보강공사 실시(143백만원) : ‘22. 04. ~ 06.

◦ 악취기술진단 실시(76백만원)                  : ‘22. 05. ~ 08.

□ 금후계획

◦ 정기적인 실험 데이터 분석을 통한 최적의 하수처리 시스템 운영

▸실험데이터를 기반으로 공정별 운영요원 토론회 실시(1회/주)

▸공정별 처리수 계절별‧시간대별 24시간 수질데이터 자료 구축(1회/분기)

◦ 연중 방류수질 실시간 모니터링 시스템 가동

▸「물환경보전법」개정에 따른 측정기기 교체(COD → TOC) : ‘22. 07. ~ 09.

▸ 24시간 상시 모니터링으로 안정적인 방류수질 확보

◦ 스마트 하수처리장 사업 추진으로 처리시설 설치 및 개선      : ‘22. 09. ~ ‘23. 12.

스마트 남원하수처리장 사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 요천로 1036-207(남원하수처리장)

◦ 총사업비 : 4,074백만원(국비 2,037, 도비 1,018, 시비 1,019)

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2023년(2개년)

◦ 사업내용

▸하수처리공정 지능화 운전, 에너지 관리 소프트웨어 적용

▸실시간 계측장비 구축을 통한 신뢰도 높은 데이터 생산

▸지능형 제어를 위한 처리시설 기능보강

➣운영 효율화에 의한 운영비 절감 및 안정적인 방류수질 확보

□ 추진실적

◦ 실시설계 용역 착수                         : ‘22. 01.

◦ 스마트 하수처리장 벤치마킹 2회 실시(김제, 여주)   : ‘22. 02. ~ 03.

◦ 환경부 스마트 하수처리장 협의체 회의 참석  : ‘22. 04.

◦ 남원하수처리장 공정별 시설보강 항목조사    : ‘22. 04. ~ 06.

□ 금후계획

◦ 수질개선을 위한 시설보강 및 지능화시스템 구축 병행 실시

◦ 환경부 재원협의 및 실시설계 용역 완료    : ‘22. 07. ~ 08.

◦ 공사착공 및 준공                          : ‘22. 09. ~ ‘23. 12

하수처리장 태양광 발전설비 설치사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2022년도

◦ 대    상 : 4개소(남원, 운봉, 산내면 달궁, 금지면 하도)

◦ 총사업비 : 726백만원(국비 363, 시비 363)

◦ 사업내용 : 공공하수처리장 태양광 발전설비 설치(257.535kW)

□ 추진실적

◦ 남원처리장 태양광 발전설비 설치 운영(100kW)     : ‘10. 01.

◦ 남원처리장 태양광 발전설비 추가설치 운영(145kW) : ‘19. 08.

◦ 실시설계 및 구조계산용역 착수 및 완료	: ‘22. 02. ~ 05.

◦ 공사 착공 및 관급자재(모둘, 인버터, 지지대) 제작 착수	: ‘22. 05.

□ 쟁점 및 대책

◦ 하수처리장 3개소(운봉, 달궁, 하도) 전력 사용량 추이에 따른 사업량 변경필요

- (1차)타당성 검토 및 사업량 변경 승인(환경부, 5월)

- (2차)모듈 제작사양 변경(480W→485W) 및 잔여예산 추가설치

시설명	설치용량(kW)				비고
	당초	1차변경	2차변경	증△감
계	300	217.92	257.535	△42.465
남원	100	124.8	163.93	63.93
운봉	100	49.92	49.955	△50.045
달궁	50	24.96	25.22	△24.78
하도	50	18.24	18.43	△31.57

□ 금후계획

◦ 태양광 사용전검사 및 전기안전관리자 선임(전기안전공사)	: ‘22. 07. ~ 09.

◦ 공사 준공 및 설비 가동	: ‘22. 09.

공공하수도시설 민간위탁 관리대행 사업

□ 개    요

구 분	공공하수처리시설	하수슬러지처리시설	비 고
위 탁 비	1,691백만원	1,650백만원
위 탁 기 간	2020년 ~ 2022년(3년)	2020년 ~ 2024년(5년)	5년 이내 갱신가능
위 탁 시 설	마을하수 64개소, 중계펌프장 68개소	1개소
관리대행사	(유)일토씨엔엠(90%), ㈜에코비트워터(10%)	(유)일토씨엔엠(51%), ㈜에코비트워터(49%)
관 리 인 원	16명	10명

□ 추진실적

[공공하수처리시설]

◦‘22년도 관리대행 변경협약 체결	: ‘22. 01.

- 서도, 하도지구 신설 하수도시설 관리주체 전환(마을하수1, 중계펌프 17)

◦ 소규모 마을하수처리시설 점검 및 정비	: ‘22. 01. ~ 06.

- 옥외선로, 내선, 누전차단기 등 전기설비 일제정비(62개소)

- 방류수질 5개항목(TN, TP, SS, TOC, 대장균) 자체점검(매주)

◦ 운봉·인월 공공하수처리시설 구조물 및 시설물 정밀점검	: ‘22. 04. ~ 06.

[하수슬러지처리시설]

◦ 하수 처리시설 슬러지 및 탄화물 처리 : 슬러지 2,446톤, 탄화물 272톤 재활용

※ 슬러지 처리 후 발생된 탄화물은 발전소 보조연료 재활용 : 중부발전소(충남 보령)

◦ 시설물 점검 및 정비, 안전교육 실시로 설비의 효율적인 운영

- 공정별 시설물 세부점검(상시) 및 정비(31백만원, 23건)

- 안전사고, 소방안전 교육(매달), 악취 및 탄화물 성분분석(분기별)

□ 금후계획

[공공하수처리시설]

◦ 공공하수처리시설 관리대행 원가산정 용역 완료	: ‘22. 07.

◦ ‘22년도 관리대행 평가위원회 구성 및 성과 평가	: ‘22. 07. ~ 08.

◦ 민간위탁 관리대행 심의 및 의회 동의(안) 제출	: ‘22. 08. ~ 09.

[하수슬러지처리시설]

◦ 대보수를 위한 기기 정밀점검 및 정비실시	: ‘22. 07. ~ 10.

소규모 마을하수처리시설 개량사업

(신규, 계속사업)

□ 개    요

시설명	내 용	총사업비	사업기간	비고
계	3개소	2,591백만원 (국944, 시1,647)
보절면 양촌(진목)	·양촌(진목) 통합개량(Q=50㎥/일) ·하수관로 신설(L=1.6km)	1,000백만원 (국300, 시700)	2022~2023	신규사업
주천면 내기	·전면 개량(Q=30㎥/일)	467백만원 (국140, 시327)	2022~2023	신규사업
운봉읍 비전	·전면 개량(Q=60㎥/일)	1,124백만원 (국504, 시620)	2020~2022	계속사업

□ 추진실적

◦ [비전] 기본 및 실시설계용역 완료	: ‘21. 12.

◦ [비전] 공사 착공	: ‘22. 03.

- 토목공사 완료	(‘22. 06.)

◦ [양촌, 내기] 기본 및 실시설계용역 착수	: ‘22. 02.

- 하수처리공법 기술제안서 접수	(‘22. 03.)

- 1차(기관), 2차(위원) 평가 완료 및 공법선정	(‘22. 04. ~ 05.)

□ 금후계획

◦ [비전] 공사 준공 및 시운전	: ‘22. 12한

- 건축공사 추진	(‘22. 06. ~ 07.)

- 기계 및 전기공사 추진	(‘22. 07. ~ 08.)

- 시운전 및 준공	(‘22. 09. ~ 12.)

◦ [양촌, 내기] 실시설계 완료 및 행정절차 추진	: ‘22. 10한

- 환경부 재원협의	(‘22. 07. ~ 08.)

- 전라북도 원가심사 및 설치인가	(‘22. 09. ~ 10.)

◦ [양촌, 내기] 공사 착공 및 준공	: ‘22. 11. ~ ‘23. 10.

- 소규모 마을하수 및 중계펌프 시설 -

마을 하수도시설 보강사업 추진

□ 개    요

◦ 시설현황 : 132개소(공공하수처리시설 64개소, 중계펌프장 68개소)

◦ 사업기간 : 2022년도

◦ 사 업 비 : 513백만원

◦ 사업내용

- (처리시설) 자동스크린 설치 4개소(대산 대곡, 보절 도촌, 아영 일대․광평)

- (중계펌프) 원격감시제어 구축 12개소, 모터제어반 교체 2개소

□ 추진실적

◦ (구)용전 처리장 철거사업(65백만원)	: ‘22. 01. ~ 03.

- 하도처리장(250㎥/일) 신설 및 연계처리에 따른 (구)처리장 폐쇄 및 철거

◦ 기계설비(스크린) 정비사업(146백만원)

- 광평, 일대 마을하수처리장 드럼스크린 설치	: ‘22. 04. ~ 06.

- 대곡, 도촌 마을하수처리장 세목스크린 설치	: ‘22. 04. ~ 06.

◦ 전기 및 계측제어 설비 정비사업(280백만원)

- 용산, 동천 중계펌프장 모터제어반 교체	: ‘22. 04. ~ 06.

- 금지 중계펌프장 12개소 원격감시제어 구축	: ‘22. 05. ~ 06.

◦ 원천, 방동 마을하수처리장 기술진단 착수	: ‘22. 05.

□ 금후계획

◦ 스크린 설치사업 종합시운전 및 조립식판넬 설치	: ‘22. 07. ~ 08.

◦ 원천, 방동 마을하수처리장 기술진단 완료 및 개선대책 수립	: ‘22. 08.

◦ 마을 하수도시설 기계·전기설비 점검 및 보수	: 연중

남원(3단계) 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원처리구역 및 운봉처리구역

◦ 총사업비 : 37,818백만원(국비 22,128, 시비 15,690)

※ 2022년 사업비 : 10,967백만원 (국비 317, 시비 10,650)

◦ 공사기간 : 2020년 ~ 2023년 (4개년)

◦ 사업내용

- 남원처리구역 : 오수관로 설치 L=39.9km, 배수설비 1,966가구

- 운봉처리구역 : 오수관로 설치 및 개량 L=15.2km

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역시행	: ‘17. 11. ~ ’19. 3.

◦ 공사착공	: ‘20. 02.

- 공 정 율 : 73% (2022. 6월 현재)

(하수관로 39.9km 중 35.8km완료, 배수설비 1,966가구 중 1,559가구 완료)

□ 쟁점 및 대책

◦ 2022년 국비(2,896백만원) 미교부로 인하여 금년내 공사 완료 어려움

□ 2023년 잔여예산 4,137백만원(국 2,896 시 1,241) 확보하여 사업 완료

□ 금후계획

◦ 공사시행	: ‘22. 07. ~ ’23. 12.

- 현장 및 민원관리를 위해 매주 1회 공정회의 시행 (감리단, 시공사)

- 현장관리(안내간판, 안전시설물 점검)를 위해 매주1회 합동현장점검 시행

남원처리구역 하수관로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 용담외 15개마을

- 주천(용담ㆍ안곡), 송동(태동), 주생(부동ㆍ중동ㆍ상동ㆍ대지ㆍ소지ㆍ제천ㆍ서만), 대산(서원초),  산동(목동), 신촌동, 왕정동(화정ㆍ한우물), 광치동(광석)

◦ 총사업비 : 27,253백만원(국비 19,079, 시비 8,174)

※ 2022년 사업비 : 1,601백만원 (국비 1,156 시비 445)

◦ 공사기간 : 2022년 ~ 2024년 (3개년)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=27.0km, 배수설비 664가구

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 착수 (시비 우선 투입)	: ‘20. 06.

◦ 2021년 신규사업지구 선정	: ‘20. 09.

◦ 남원시 배수구역 및 하수처리구역 변경 공고	: ‘22. 01. 25.

◦ 재원협의	: ‘22. 03. ~ 04.

사업비	사업비			사업량	사업기간	비 고
	합 계	국 비	시 비
당 초	17,270	12,089	5,181	16㎞	2021~2024
변 경	27,253	19,079	8,174	27㎞	2021~2024
증△감	9,983	6,990	2,993	11㎞	-

◦ 실시설계 경제성 검토(VE) 용역 시행	: ‘22. 05. ~ 06.

□ 쟁점 및 대책

◦ 사업구역 확대(9개마을 → 16개마을) 및 환경부 재원협의에 따른 사업비 증액으로 추가 행정절차(실시설계 경제성 검토용역, 건설기술심의 등) 이행에 따른 상반기 발주 불가

□ 신속한 행정절차 이행으로 8월 공사 착공 예정

□ 금후계획

◦ 지방건설기술심의(전라북도)	: ‘22. 07.

◦ 공사 시행	: ‘22. 08. ~ ’24. 12.

아영 인풍지구 하수관로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면, 인월면 일원

- 아영(봉대ㆍ외인ㆍ내인ㆍ매산ㆍ서갈ㆍ동갈),

- 인월(덕실ㆍ연실ㆍ자래ㆍ외건ㆍ내건ㆍ지산ㆍ흥부놀부촌ㆍ흥부골)

◦ 총사업비 : 19,556백만원(국비 12,585, 시비 6,971)

※ 2022년 사업비 : 1,508백만원 (국비 1,175 시비 333)

◦ 공사기간 : 2022년 ~ 2024년 (3개년)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=20.5km, 배수설비 473가구

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 착수 (시비 우선 투입)	: ‘20. 06.

◦ 2021년 신규사업지구 선정	: ‘20. 09.

◦ 남원시 배수구역 및 하수처리구역 변경 공고	: ‘22. 01. 25.

◦ 재원협의	: ‘22. 03. ~ 04.

사업비	사업비			사업량	사업기간	비 고
	합 계	국 비	시 비
당 초	16,000	11,200	4,800	16.4㎞	2021~2024
변 경	19,556	12,585	6,971	20.5㎞	2021~2024
증△감	3,556	1,385	2,171	4.1㎞	-

◦ 실시설계 경제성 검토(VE) 용역 시행	: ‘22. 05. ~ 06.

□ 쟁점 및 대책

◦ 사업구역 확대(12개마을 → 14개마을) 및 환경부 재원협의에 따른 사업비 증액으로 추가 행정절차(실시설계 경제성 검토용역, 건설기술심의 등) 이행에 따른 상반기 발주 불가

□ 신속한 행정절차 이행으로 8월 공사 착공 예정

□ 금후계획

◦ 지방건설기술심의(전라북도)	: ‘22. 07.

◦ 공사 시행	: ‘22. 08. ~ ’24. 12.

산내지구 하수관로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산내면 일원(상황, 중황, 하황, 중기, 삼화)

◦ 총사업비 : 7,865백만원(국비 5,506 시비 2,359)

※ 2022년 사업비 : 5,522백만원 (국비 3,922 시비 1,600)

◦ 공사기간 : 2022년 ~ 2023년 (2개년)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=6.9km, 배수설비 214가구

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 착수 (시비우선투입)	: ‘20. 06.

◦ 2021년 신규사업지구 선정	: ‘20. 09.

◦ 재원협의	: ‘21. 11. ~ 12.

사업비	사업비			사업량	사업기간	비 고
	합 계	국 비	시 비
당 초	6,500	4,550	1,950	L=6.6㎞	2021~2022
변 경	7,865	5,506	2,359	L=6.9㎞	2021~2023
증△감	1,365	956	409	L=0.3㎞	1년 연장

◦ 공사 착공	: ‘22. 05. 09.

□ 쟁점 및 대책

◦ 하수도정비 기본계획 외 지역 독립 가옥의 분류식 관로 설치에 대한 민원이 지속적으로 접수되고 있으나, 마을 단위가 아닌 독립 가옥에 대한 기본계획 반영은 어려운 실정으로 국비 확보 불가

□ 기존 하수관로와 인접한 독립 가옥에 대해서는 별도 시비를 확보하여 분류식 하수관로 정비사업 추진(원거리 독립 가옥은 정화조 설치)

□ 금후계획

◦ 공사 시행	: ‘22. 07. ~ ’23. 12.

남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 사매면 일원(손율, 수월, 덕평, 인화)

◦ 총사업비 : 7,735백만원(국비 3,518 시비 4,217)

※ 2022년 사업비 : 1,768백만원 (국비 1,237 시비 531)

◦ 공사기간 : 2022년 ~ 2023년 (2개년)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=6.7km, 배수설비 99가구

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 착수 (시비우선투입)	: ‘20. 06.

◦ 2021년 신규사업지구 선정	: ‘20. 09.

◦ 재원협의	: ‘21. 11. ~ 12.

사업비	사업비			사업량	사업기간	비 고
	합 계	국 비	시 비
당 초	5,870	4,109	1,761	6.4㎞	2021~2022
변 경	7,735	3,518	4,217	6.7㎞	2021~2023
증△감	1,865	△591	2,456	0.3㎞	1년 연장

◦ 공사 착공	: ‘22. 05. 09.

□ 쟁점 및 대책

◦ 환경부 방침 상 기본계획 미반영 지역(인화마을)은 국비지원 불가

□ 기본계획 미반영 지역(인화마을)은 현재 시행중인 기본계획(변경) 용역을 통한 해당지역 부분 변경을 우선 추진하여 총사업비 변경 및 국비확보 추진

□ 금후계획

◦ 공사 시행	: ‘22. 07. ~ ’23. 12.

요천생태습지공원 운영 관리

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 중동리 1295번지 일원

◦ 시설규모 : 145,298m2 (공원부 75,562m2 / 습지부 69,736m2)

◦ 주요시설물

- 공 원 부 : 모정, 야구장외 생활체육시설, 화장실, 주차장, 개수대 등

- 습 지 부 : 생태탐방로, 수생식물등 관찰데크, 파고라 등

- 애견놀이터 : 1,260m2 (중·대형견 600m2, 소형견 660m2)

◦ 방문객수 : 14,752명 (공원 10,749명, 애견놀이터 4,003명)

- 2021년 방문객 : 26,113명 (공원 19,900명, 애견놀이터 6,213명)

♣ 공원부 : 사용종료된 쓰레기매립장 상단부에 조성 / 습지부 : 남원하수처리장 처리수 15천톤, 하천수 유입 운영

□ 추진실적

◦ 요천생태습지공원 야구장 사용협약 체결              : ‘22. 2. 4.

- 기간/협약자 : ‘22.2.4 ~ ’25.2.3(3년) /남원시와 남원시야구연합회

◦ 공원부 잔디 미식재 구간 잔디식재 (1,344㎡)         : ‘22. 2. ~ 3.

◦ 습지부 산책로 태양광 가로등 추가 설치 (5본)        : ‘22. 2. ~ 3.

◦ 습지부 관상용 관목류 식재 (땅장미 1,240주)          : ‘22. 4. ~ 5.

◦ 시설물 보수 및 정비                                : ‘22. 2. ~ 5.

- 도색 및 야외탁자 추가 비치 : 벤치, 탁자, 그네 등 총 88개소

- 보수 및 준설 공사 : 분수 및 모정, 개수대, 데크, 습지부 준설 등

◦ 공원 휴게시설(모정 등) 취사구간 활성화 (취사허용구간 3,000㎡)

◦ 애견놀이터 설문 조사후 애견인 희망 놀이용품 비치(공, 원반등) : ‘22. 1. ~ 2.

◦ 야구장 전기요금 저감방안 조사 저감 추진(2,700천원/년) : ‘22. 3.

□ 금후계획

◦ 시설물 지속적 정비 및 관리 (모정, 산책로 등)        : 연중

◦ 생태습지공원 제초, 예초, 전정 작업 등               : 연중

◦ 시민 볼거리 제공용 수목류 식재                     : ‘22. 7. ~