2022. 10.

2022년 주요업무 추진실적

관   광   과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2022년 주 요 업 무  결산

□ 2022년 주요업무 추진실적

◦ 관광 타깃별 다양한 콘텐츠 운영

◦ 전략적인 홍보마케팅 추진

◦ 남원 스마트관광도시 조성사업

◦ 제92회 춘향제

◦ 제30회 흥부제

◦ 2022 남원 막걸리축제

◦ 2022 소규모 축제 지원

◦ 남원관광지 민간개발사업

◦ 남원 드래곤관광단지 조성사업

◦ 오리정□버선밭 연계 관광지화 사업

◦ 이성계장군 전승지 주변 개발사업

◦ 교룡산 국민관광지 활성화사업

◦ 옛다솜이야기원 조성사업

◦ 남원관광지 RE-PLUS 사업

◦ 제2차 대표관광지 육성사업

◦ 남원 한옥체험시설 조성사업

◦ 지역특화형 친환경 숙박시설 조성사업

◦ 2022 열린관광지 조성사업

◦ 남원예촌 전통한옥체험시설 관리□운영

◦ 한복체험관 화인당 운영

◦ 복합문화공간 예루원 운영

◦ 남원예촌 활성화 프로그램 운영

◦ 2022 한복문화 지역거점 지원사업

◦ 지리산 친환경 전기열차 도입

◦ 다양한 숙박□음식 특화거리 조성

◦ 축제와 빛의 향연을 활용한 문화축제 조성

일  반  현  황

□ 기    구

										관 광 과 장
										양 인 환
관광진흥담당					축제기획담당						관광개발담당							관광시설운영담당						친환경전기열차담당
김영미					김도형						박동규							이석선						홍동원
관광사업체관리					춘향제추진						관광(단)지조성							남원예촌종합 운영계획수립						지리산친환경 전기열차사업추진
관광상품개발및홍보					흥부제추진						대표관광지육성							남원예촌전통한옥 체험관위탁운영
관광수요창출마케팅					소규모축제지원						함파우유원지조성							남원예촌문화체험 지구관리․운영
스마트관광도시조성					지역축제육성 위원회지원						관광종합개발 계획수립							예루원,화인당,예촌 The이음관리운영

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	17	1	4	3	4	5
현 원	19	1	6	4	2	6	임기제 4 공무직 4
증 감	2	-	2	1	△2	1

2022년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ ‘22 스마트관광도시 조성사업 공모 선정 : 10,500백만원 ◦ 지역특화형 친환경 숙박시설 조성사업 공모 선정 : 7,900백만원 ◦ ‘22 생태녹색관광 활성화 사업 공모 선정 : 231백만원 ◦ ‘22 한복문화 지역거점 지원사업 공모 선정 : 250백만원 ◦ ‘22~‘23 테마가 있는 공공디자인 사업 공모 선정 : 500백만원 ◦ 철도연 ｢산악용 친환경 운송시스템 시범사업｣ 시범사업 유치 : 27,850백만원 ◦ ‘22 관광지 방역 수용태세 개선지원 사업 추진 : 930백만원

□ 관광트렌드를 반영한 관광상품 개발 및 관광객 유치

◦ (스마트관광) 관광산업의 디지털 전환과 맞춤형 스마트 관광서비스 제공으로 미래성장 동력 기반 마련

- 스마트 관광도시 조성사업 공모선정(국비45억, 도비10억, 민자15.7억별도)

◦ (콘텐츠개발) 여행트렌드 변화에 맞는 다양한 프로그램 운영

- 남원관광택시 운영(62회,186명) / 전북(남원)투어패스 운영(13,026명)

- 대표관광지(광한루원) 연계 상설공연 및 체험프로그램 운영(13개,675회)

※ 2022.8월 기준 관광객 226만명 (전년대비 17% 증가)

◦ (감성관광지 잠재력 강화) 남원의 인문‧생태적 특성을 살린 관광자원 발굴

- 생태녹색관광 활성화 사업 공모 선정(국비 1.15억원)

- 생태녹색관광 프로그램운영(2개 프로그램/56회,998명)

□ 남원의 관광자원을 활용한 차별화된 지역축제

◦ (춘향제) 대면/비대면 투트랙 체제의 축제 준비로 급변한 거리두기 정책에 탄력적 대응, 3년만의 대면 제92회 춘향제 성공적 개최

- 안전한 축제 환경조성을 위한 동선 간소화 및 효율적 공간 배치

- ‘스피릿춘향 & 몽룡파이터’ 춤 경연대회, 전통예술공연, 시민참여공연 등 테마별 공간을 구성하여 다양한 장르의 공연 연출

◦ (막걸리축제) 지역경제 활성화 및 관광객과 시민이 직접 참여하는 축제

- 제59회 전북도민체전 기간 내 남원막걸리 홍보 및 배달앱 ‘월매요’와 연계한 주막 운영으로 지역 상권 활성화 기여

- 막걸리 무료 시음과 다양한 공연 제공으로 시민 소통의장 마련

□ 도심관광지를 통한 체류형 관광 인프라 구축

◦ (체류형 관광인프라 구축) 남원관광지 민간개발사업, 옛다솜 이야기원       조성 등 광한루원과 남원관광지 연계

◦ (신규 관광개발사업 추진) 오리정・버선밭 관광연계지화, 교룡산국민관광지        활성화, 이성계 장군 전승지 주변 개발사업 등 예산확보 및 실시설계 추진

□ 남원예촌의 관광거점 구축 및 권역 확장

◦ (명품한옥과 어우러진 문화와 예술) 광한루와 예촌일원 명품한옥을           활용한 국가예산 확보* 및 한복문화 관광자원 개발

* 지역특화형 친환경 숙박시설 조성 공모(국비 39억원), 한복문화 지역거점    공모(국비 0.9억원), 전통한옥 브랜드화 공모(국비 0.24억원), 거리극축제     노상놀이야 공모(도비 0.24억원), 테마가 있는 공공디자인 공모(도비 1.44억원)

- 한복체험관 화인당 운영(‘22.08.31.기준) : 9,363명 / 27백만원

- 한복문화 지역거점 지원사업 3년 연속 공모 선정

◦ (체류형 관광객 증가) 명품한옥 스테이 남원예촌 전통한옥체험시설

8월말 기준 : 평균가동률 86%(숙박 13,036명) / 매출액 1,056백만원

□ 지리산 친환경 전기열차 도입

◦ (친환경 전기열차) 철도연 ｢산악용 친환경 운송시스템 시범사업｣ 우선협상대상기관 선정

- 위    치 : 주천면 고기삼거리 ~ 고기댐 일원(L=1km)

- 사 업 비 : 국비 278.5억원

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.

- 시행기관 : 한국철도기술연구원(주관연구기관)·남원시(유치기관)

- 사업내용 : 시범노선 건설, 차량 제작(3량 1편성), 시스템 검증 및 시범운영

2022년 주요업무 추진실적

관광 타깃별 다양한 콘텐츠 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 전통문화와 생태관광을 남원의 주요 관광콘텐츠로 운영

◦ 관광객 중심의 수용태세 구축과 서비스 제공으로 향후 재방문율 제고

□ 추진실적

【 관광진흥을 위한 각종 공모 및 협약 】

◦ 문체부) 읽기 쉬운 관광안내체계 구축사업 1단계(조사·디자인) 완료

◦ 문체부) 생태녹색관광 활성화 공모 선정 : 운봉 서어나무 숲

◦ 행안부) 지역관광 청년미디어기획자 양성 사업 추진 : 청년 5명, 4개 업체

◦ 코레일과 연계) 자전거여행 활성화를 위한 업무협약 : ‘22. 5. 20.

◦ 전통한옥 브랜드화 공모 선정 사업 추진 : 남원예촌, 지리산한옥마을

【 관광객 유치를 위한 다양한 프로그램 운영 】

◦ 남원관광택시 운영 : 62회,186명 / 전북(남원)투어패스 운영 : 13,026명

◦『자전거RO 남원여행』대여실적 : 97대(`22.8~9월)

◦ 생태녹색관광 프로그램 운영(2개 프로그램 : 숲멍피크닉, 힐링소리체험) : 56회/998명

◦ 관광객 유치 여행업체 인센티브 지급 : 119건/48,749천원

◦ 남원스탬프 투어 운영 : 30개소/631명

◦ 2022 청년아카데미 운영 : 10회/15명

◦ 대표관광지(광한루원) 연계 상설공연 및 체험프로그램 운영: 13개/675회

【 관광업계 지원사업】

◦ 2022년 여행업체 민생회복 지원 사업 : 19개소/도비 14백만원

◦ 주요 관광지, 다중이용시설 방역요원 배치 : 22개소, 59명/국비 930백만원

□ 금후계획

◦ 음식점(관광식당) 시설개선사업 추진(1개소)          : `22. 9. ~ 12.

◦ 안내체계구축을 위한 관광안내판 보수 및 신규 설치   : `22. 10. ~ 12.

◦「남원 여행가는 날」 여행주간 프로그램 운영           : ‘22. 10. ~ 11.

◦ 읽기 쉬운 관광안내체계 구축사업 2단(제작·설치)     : ‘22. 10. ~ 12.

전략적인 홍보마케팅 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 매체별 특성에 따른 홍보 다양화 및 영상 콘텐츠 확대

◦ 다양한 홍보매체 연계로 남원의 매력적인 관광명소 콘텐츠 지속 노출

□ 추진실적

◦ TV방송 : 예루원 밤풍경, 변사극 춘향전, 완월정 풍류 등 전라북도        대표관광지(광한루원) 상설공연 홍보 , 화첩기행(지역방송)/남원편

◦ 다중집합장소 관광홍보 : 전광판 2개소(서울‧전주), 고속도로 휴게소        DID(디지털 정보 디스플레이) 홍보 28개소(59대)

◦ 관광지 홍보 감성 스냅사진 촬영 제작 : 광한루원 등 5개소, 85컷

◦ 관광홍보물 제작 : 지리산둘레길, 고속도로 관광지도 등

◦ 『전북에 온(on)페스타』서울관광설명회, 『내나라 여행박람회』참가

◦ `22 전북 특별한 관광지발굴 홍보영상 제작 : 한국어 3분(영, 중 자막)

◦ 여행홍보관계자 팸투어 : 8회 (한국관광공사 트래블리더 외 7)

◦ 여행트렌드 변화대응을 위한 남원 관광설명회 : 8회(서울, 부산 여행업체 등)

□ 금후계획

◦ 지도가 여행이 되는 남원 이색여행 지도 제작         : ‘22. 9. ~ 11.

◦ 다국어관광안내지도, 책자(한,영,일,중)                  : ‘22. 9. ~ 12.

◦ 야간관광활성화사업 기반시설(전기,건축) 구축        : `22. 10. ~ 12.

◦ 민간 공동 협력으로 여행상품 발굴 추진(남원테마파크(주), 아담원 등) : ‘22. 10. ~ 12.

◦ 남원시 주요 관광지 영상 시스템 구축 추진              : ‘22. 10. ~ 12.

남원 스마트관광도시 조성사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 광한루원 일원 ~ 요천 ~ (구)비사벌콘도

◦ 사업기간 : 구축(1년) ‘22. 3. ~ ’23. 3. / 운영(3년) ‘23. 3. ~ ’26. 3.

◦ 총사업비 : 105억원(국비 45, 도비 10, 시비 50), 민간현물출자 15.7억원 별도

◦ 사업내용 : 민관협력을 통한 ICT(정보통신기술)기반의 관광서비스 및 인프라 육성

- 흥얼남원 (전통 복식·문화 체험, AR증강현실 콘텐츠, 흥얼버스킹, 3D문화예술공연)

- 풍류남원 (스마트주막, 슈퍼트리&미디어월)

- 달빛남원 (요천수상공연, 달빛버스킹)

- 스마트 인프라 (관광 앱, 빅데이터, 공공 와이파이, on-off통합관제, )

- 기타 (메타버스, 디자인가이드 및 브랜딩, 거버넌스 구축, 청년창업지원 등)

□ 추진실적

◦ 스마트관광도시 조성사업 관광명소형 최종 선정       : ‘22. 3. 8.

◦ 남원시-한국관광공사-전라북도 3자 업무 협약체결     : ‘22. 6. 9.

◦ 민관 컨소시엄 재구성(기관2, 민간7)                  : ‘22. 6. 13.

◦ 스마트관광도시 조성사업 교부결정(국비, 도비)        : ‘22. 8. 28.

◦ 전북콘텐츠융합진흥원, 컨소시엄 업체와 업무 협약체결      : ‘22. 9. 20.

□ 금후계획

◦ 정보화사업 행정절차 추진(과업심의, 보안성검토 등)   : ‘22. 10.

◦ 스마트관광도시 조성사업 구축 시행(스마트주막 등)    : ‘22. 10.

◦ 스마트관광도시 체험단 테스트 및 홍보 시행          : ‘23. 1.

◦ 스마트관광도시 운영 시행(3년)                       : ‘23 ~ ‘26

제92회 춘향제

(계속사업)

□ 개    요

◦ 일    시 : 2022. 5. 4.(수) ~ 5. 8.(금) / 5일간

◦ 위    치 : 광한루원 일원

◦ 종    목 : 3개 분야 23개 종목

◦ 주 제 어 : 다시, 사랑

□ 추진실적

◦제92회 춘향제 춘향제전위원회 회의     : ‘22. 2. ~ 6. (5회 실시)

◦제92회 춘향제 추진상황보고회          : ‘22. 4. 21.

◦제92회 춘향제 현장보고회              : ‘22. 5. 2.

◦제92회 춘향제                         : ‘22. 5. 4. ~ 5. 8.

◦제92회 춘향제 춘향제전위원회 자체감사 : ‘22. 6. 9. ~ 6. 10.

◦제92회 춘향제 결과보고회              : ‘22. 6. 27.

◦제92회 춘향제 의회결과보고            : ‘22. 8. 18.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 출연료, 인건비, 물가상승 등의 이유로, 공연행사 비용 전년대비 30%       정도 추가 소요 됨

□ 행사 및 공연의 수준 유지를 위해서 제93회 춘향제 예산 30% 수준의        증액 필요

◦ 코로나 이전 수준의 축제는 12명 정도의 공무원 파견(2~6월)이 필요하며, 파견직원 전문성, 연속성 부족 및 차출부서 업무부담 가중의 문제점을 유발

□ 기존 춘향제전위 사무직원 2명(팀장1, 총무1)에, 행사스텝 5명 내외        단기간 충원 시 파견 직원 최소화 가능

◦ 춘향제마다 광한루원 무대 행사부스 설치·철거로 인한 시설부분 지출 과다

□ 상설축제의 장소 조성 필요 예)함파우유원지, 예촌지구 내 공간확보 검토 등

□ 금후계획

◦ 제93회 춘향제 기본계획(안) 수립                    : ‘22. 12. ~

제30회 훙부제

(계속사업)

□ 개    요

◦ 기    간 : 2022. 10. 7.(금) ~ 10. 9.(일) / 3일간

※ 고유제 : 10. 4.(음 9. 9.)

◦ 위    치 : 사랑의광장 및 인월면 일원

□ 추진방향

◦ 시민이 참여하는 화합과 나눔 축제

- 시민 및 단체들의 참여를 통해 모두가 함께 만드는 화합·나눔 축제 지향

- 기관․단체간 연계 협력 행사 강화

◦ 모두가 즐길 수 있는 행사 구축

- 남원의 주요 관광거점을 중심으로 판소리 위주에서 다양한 장르 공연으로 대중성 강화

- 가족단위 관광객을 확보하기 위한 행사장 조성 및 체험프로그램 기획

◦ 소외계층 없이 전 연령층 참여 축제

- 소외계층과 함께하는 화합 축제 지향

- 어린이 참여 프로그램 기획으로 전 연령층 참여 축제 지향

□ 추진실적

◦제30회 흥부제 흥부제전위원회 회의     : ‘22. 9. 1. ~ 9. 29. (3회 실시)

◦제30회 흥부제 기본계획(안) 수립       : ‘22. 9. 20.

◦제30회 흥부제 추진상황보고회         : ‘22. 9. 30.

□ 금후계획

◦ 제30회 흥부제 현장상황보고회                 : ‘22. 10. 6.

◦ 제30회 흥부제 종합안전점검	: ‘22. 10. 6.

◦ 제30회 흥부제 개최                           : ‘22. 10. 7. ~ 9.

2022 남원 막걸리축제

(계속사업)

□ 개    요

◦ 기    간 : ’22. 9. 2.(금) ~ 9. 3.(토) 17:00 ~ 23:00 ※ 9월 3일 축하공연

◦ 위    치 : 요천둔치(승월교)

◦ 내    용 : 막걸리 홍보관 운영, 남원 화합 춘향골 열린음악회, 거리공연, 무료 막걸리 체험, 막걸리 홍보이벤트, 막걸리 무료 제공

□ 추진상황

◦ 막걸리 관련 업체 간담회 개최  : ‘22. 8. 1.

- 참석인원 : 9명(업체 6, 시 3)

- 주요내용 : 막걸리 축제 관련 의견 수렴

◦ 막걸리축제 기본계획 수립      : ‘22. 8. 3.

◦ 막걸리 축제                    :  ‘22. 9. 2. ~ 9. 3.

◦ 지역 내 참여 업체 현황

- 막걸리 업체

․ 7개업체(술소리, 남원서남탁주합동 양조장, 남원탁주합동 양조장, 농업회사법인 ㈜천년주가, 이백주조장, 운봉주조 영농조합, 촌사람 영농조합 지리산 양조장)

- 음식판매

․ 남원시니어 클럽(두부김치, 오징어파전, 도토리묵 무침)

․ 배달앱 월매요 이용

- 프리마켓

․ 21개 업종(쑥쑥농부들)

□ 주요쟁점 및 애로사항

◦ 막걸리 안주 판매 장소가 적어 시민들의 대기 시간 증가

□ 막걸리 안주 판매 장소 추가, 배달앱 월매요 사용 촉진

2022 소규모 축제 지원

(계속사업)

□ 개    요

◦ 2022년 소규모축제 추진방안

- 스스로 발전하는 소규모 축제 : 간담회, 용역자료 제공 등 행정지원

- 안전하고 질서 있는 축제     : 사전 안전점검

◦ 바래봉 눈꽃축제(취소)    : 20백만원 / 운봉읍애향회

◦ 고로쇠 약수제(2.25.)      : 15백만원 / 산내면발전협의회

◦ 바래봉 철쭉제(4~5월)     : 15백만원 / 운봉읍애향회

◦ 봉화산 철쭉제(취소)      : 10백만원 / 흥부골아영발전협의회

◦ 지리산 단풍축제(10월)    : 10백만원 / 산내면발전협의회

◦ 도비보조금 축제

- 혼불문학 신행길축제(11월)  : 32백만원(도 12, 시 20) / 노봉혼불문학마을회

□ 추진실적

◦ 남원시 소규모축제 역량강화 워크숍 : ´22. 2. 9.

- 축제단체 : 5개 단체 /  대상 : 7개 축제

· 축제기획 및 계획서 작성, 온라인홍보 및 전략, 발전방향 토론

◦ 뱀사골 고로쇠 약수제 : `22. 2. 14. ~ 3. 31. (기념식 2. 18.)

- 고로쇠 판매 촉진을 위한 온라인 홍보(홍보영상 제작 등) 강화

◦ 지리산 운봉바래봉 철쭉제 : `22. 4. 28. ~ 5. 22. (산신제 5. 6.)

- 바래봉 철쭉제 홍보, 농·특산물 홍보 및 판매

※ 코로나19로 인해 눈꽃축제, 봉화산 철쭉제 취소

□ 주요쟁점 및 애로사항

◦ 코로나 19로 인해 미 개최 되었던 축제 운영 효율화 방안

□ 마을 자원을 충분하게 활용한 주민 주도 마을축제로 육성

□ 금후계획

◦ 지리산 단풍제                                      : ‘22. 10.

◦ 혼불문학 신행길축제                                : ‘22. 11.

남원관광지 민간개발사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원관광지 및 함파우유원지 일원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년

◦ 사 업 비 : 383억원(민간자본)

◦ 사업내용

- 모노레일(8인승 20대, 총연장 2.44㎞), 짚와이어(총연장 1.26㎞)

- 어드벤처 : 짚타워(H=78m), 스카이워크

□ 추진실적

◦ 남원관광지 민간개발사업 투자협약 체결	: ‘19. 6. 5.

◦ 남원관광지 민간개발사업 실시협약(안) 의회 동의	: ‘20. 5. 8.

◦ 남원관광지 민간개발사업 실시협약 체결	: ‘20. 6. 4.

◦ 남원관광지 민간개발사업 기공식 개최             : ‘20. 7. 24.

◦ 모노레일 및 짚와이어 공사 추진                  : ‘20. 8 ~

◦ 짚와이어 도착장 수용 재결	: ‘21. 8. 27.

◦ 남원관광지 민간개발사업 완료	: ‘22. 6. 27.

◦ 기부채납 및 사용수익허가 신청	: ‘22. 6. 28.

◦ 남원관광지 민간개발사업 특정감사 실시 안내	: ‘22. 7. 7.

◦ 남원관광지 민간개발사업 소송 제기	: ‘22. 7. 25.

◦ 남원관광지 민간개발사업 특정감사 보고	: ‘22. 8. 18.

◦ 특정감사 결과 및 영업 안내에 따른 유의사항 알림 : ‘22. 8. 29.

◦ 영업안내에 따른 운영개시 알림(남원테마파크)	: ‘22. 8. 31.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 기부채납 및 사용수익허가 접수하여 절차 진행 중

□ 자산평가, 안정성 검토, 절차의 투명성을 검토하였음

◦ 손해배상 소송에 진행함에 따라 추후 결과를 통해 기부채납 및 사용수익허가 절차 진행 검토

□ 개별법(궤도운송법 등)으로 운영개시 중이나 남원테마파크(주)에서 실시협약 이행 촉구

□ 금후계획

◦ 손해배상 소송 변론기일                          : ‘22. 10. 17.

남원 드래곤관광단지 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 대산면 옥율리 산131번지 일원

◦ 총사업비 : 190,272백만원(민자100%)

◦ 사업내용 : 드래곤 관광단지 조성(A=798,250㎡)

- 가족･한옥호텔, 골프장(9홀), 실내·외 수영장, 아트뮤지엄 등

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년(5년)

◦ 사업시행자 : 신한레저㈜

□ 추진실적

◦ 관광단지 지정 및 조성계획 승인(전라북도) 통보/고시(남원시) : ‘18. 9. 3. / 9. 7.

◦ 관광단지 조성사업 착공(공정률 전체 30%, 골프장 100%) : ‘19. 1. 2.

◦ 호텔· 수영장, 아트뮤지엄 등 기본 및 실시설계 시행   : ‘20. 4. ~

◦ 드래곤관광단지 조성계획(변경) 고시(1차)              : ‘20. 6. 12.

◦ 진입도로 개설공사 실시설계용역 추진                 : ‘21. 2. ~ 11.

◦ 드래곤관광단지 지정 및 조성계획(변경) 고시(2차)	: ‘21. 3. 12.

- 관광단지 지정면적 변경 : 795,133㎡ → 798,250㎡(증3,177㎡)

◦ 드래곤 관광단지 조성계획(변경) 고시(3차)               : ‘22. 6. 27.

- 관리시설(장비동) 규모 변경, 운동오락시설지구 중 보전녹지 확대 등

◦ 체육시설업 조건부 등록 변경(공동명의 등록 : ㈜골프존카운티): ‘22. 7.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 드래곤 골프장 임대 및 드래곤 관광단지 조성계획 승인 기간 도래(22.12.31.)에 따른 기간연장

□ 남원 관광단지 조성공사 조속 시행 촉구에 따른 신한레저 이행계획서 제출

□ 금후계획

◦ 남원 드래곤 관광단지 조성계획 변경(기간 연장)       : ‘22. 10.

◦ 숙박 및 휴양문화시설 기본계획 변경 및 설계용역 착수 : ‘22. 10.

오리정·버선밭 연계 관광지화 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 사매면 오리정, 버선밭 주변

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2025년

◦ 사업내용 : 오리정 테마공원(오리정 주변정비, 눈물정원, 주차장) 조성, 버선밭 및 유휴공간 조성 등

◦ 사 업 비 : 6,800백만원(균이 3,500, 도비 1,550, 시비 1,750)

- ‘21년도 : 12억원(균이 6, 도 3, 시 3) / ’22년도 : 8억원(균이 5, 도 0.5, 시 2.5)

□ 추진실적

◦ 오리정·버선밭 연계 관광지화 기본계획 용역      : ‘19. 11. ~ ’20. 5.

◦ 사전절차이행(재정투자심사, 중기지방재정계획)    : ‘20. 7. ~ 10.

◦ 오리정·버선밭 연계 관광지화사업 실시설계용역 완료 : ‘20. 8. ~ ’22. 1.

◦ 문화재 현상변경허가 심의(전북도)                : ‘21. 11. ~ 12.

◦ 버선밭 정비사업 시행                           : ‘21. 11. 17.

◦ 원가심사 및 일상감사 완료                      : ‘22. 4. ~ 5.

◦ 오리정 정비공사 시행                           : ‘22. 4. 21.

◦ 오리정 테마공원 조성사업 시행                  : ‘22. 5. 16.

□ 쟁점 및 대책

◦ 기본계획상 사업(지하보도 벽면정비, 부조벽화, 춘향‧몽룡마당 조성 등) 도로점용 및 익산지방국토관리청 남원국토관리사무소 협의 필요

※ 운전자 시야방해, 결빙현상에 따른 교통사고 우려 등 기본계획상 사업 추진에 어려움이 있을 것으로 예상

※ 춘향‧몽룡마당 조성 사업대상 부지인 구)국도17호선 유휴부지 일부 남원국토관리사무소에서 토사 야적장으로 사용하고 있어 개발 불가

□ 관련기관 미협의 시 사업비 조정으로 동부권 발전사업 신규사업 발굴 검토

□ 금후계획

◦ 버선밭 정비사업 공사 완료                         : `22. 12.

◦ 오리정 정비공사 공사 완료                         : `22. 12.

◦ 동부권 관광클러스터 기본계획 및 타당성 용역 추진   : `23. 1 ~

이성계장군 전승지 주변 개발사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 ~ 인월면

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2025년

◦ 사업내용 : 서어나무 숲 복원 및 휴게공간 조성, 충절공원 정비 등

◦ 사 업 비 : 7,900백만원(균이 4,000, 도비 1,900, 시비 2,000)

- ‘21년도  : 4억원(균이 2, 도 1, 시 1) / ‘22년도 : 7억원(균이 4, 도 1, 시 2)

□ 추진실적

◦ 이성계장군 전승지 주변 개발 기본계획수립용역	: ‘19. 4. ~ 10.

◦ 사전절차이행(재정투자심사, 중기지방재정계획)	: ‘20. 7. ~ 10.

◦ 실시설계용역 완료	: ‘21. 4. ~ 12.

◦ 황산대첩비지 주차장 화장실 보수공사 완료	: ‘21. 12. ~ ‘22. 5.

◦ 삼산마을 솔밭공원 정비사업 시행	: ‘21. 12.

◦ 서어나무숲 정비사업 시행                       : ‘22. 4. 6.

□ 쟁점 및 대책

◦ 기본계획상 사업(충절공원 내 전시관, 피바위 인도교) 축소 또는 폐지 불가피

- 충절공원 내 전시관

※ 사업 편입부지 내 건축 신축으로 협의 불가

- 피바위 인도교 설치

※ 인도교 접근로인 탐방로(150m)는 통일교 부지로 난항 예상

※ 하천구역 저촉으로 하천점용허가 불가(부산지방국토관리청)

□ 사업비 조정으로 동부권 발전사업 신규사업 발굴 검토

□ 금후계획

◦ 동부권 관광클러스터 기본계획 및 타당성 용역 추진   : `23. 1 ~

교룡산 국민관광지 활성화사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산곡동 교룡산국민관광지 일원

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2025년

◦ 사 업 비 : 8,000백만원(균이 4,000, 도비 2,000, 시비 2,000)

- ‘22년도 예산액 : 1,200백만원(균이 600, 도비 300, 시비 300)

◦ 사업계획 : 메모리얼정원, 감성힐링정원, 소리길 프로젝트(교룡산둘레길), 복합쉼터 신축

□ 추진실적

◦ 남원 관광종합개발계획 사업내용 반영         : ‘19. 12.

◦ 교룡산국민관광지 활성화사업 기본계획 수립   : ‘20. 4. ~ 8.

◦ 지방재정투자심사(전북도) 완료                : ‘20. 7. 8.

◦ 교룡산국민관광지 활성화사업 토지보상 완료   : ‘20. 12. 23.

- 토지 2필지(1,150㎡), 건축물 1식(324㎡) 보상완료

◦ 교룡산국민관광지 활성화사업 실시설계 완료   : ‘20. 11. ~ ‘21. 9.

◦ 교룡산국민관광지 활성화사업 공사 착공	: ‘21. 12. 24.

◦ 교룡산국민관광지 건축기획 용역              : ‘22. 3. ~ 6.

◦ 교룡산국민관광지 활성화사업(경관조명) 전기공사 : ‘22. 5. ~ ‘23. 9.

◦ 메모리얼 정원 관련 유관단체 협의 완료       : ‘22. 6.

□ 쟁점 및 대책

◦ 교룡산국민관광지 활성화사업(토목) 사업부지 내 메모리얼 정원 관련 유관단체(무공수훈자회, 월남참전유공자회, 6‧25참전유공자회, 동학기념사업회) 요구사항 반영에 따른 행정절차 이행 필요로 사업추진 지연

□ 22년 제2회 추경 반영하여 행정절차(공원조성계획(변경), 산지전용, 소규모재해영향평가 등) 이행하여 빠른시일 내 사업 완료(1차분) 추진

◦ 기념물 제9호 교룡산성 국가지정 문화재(사적) 등재 검토 중으로 문화재 외곽경계 범위 확장에 따른 건설공사(둘레길 조성) 추진 어려움 예상

□ 사업비 조정으로 동부권 발전사업 신규사업 발굴 검토

□ 금후계획

◦ 사업(메모리얼정원, 감성힐링정원) 공사 추진     : `21. 12. ~ `23. 5.

◦ 복합쉼터 공공건축 건축기획 심의               : `22. 9.

◦ 복합쉼터 실시설계용역 추진                    : `22. 11. ~ `23. 4.

◦ 동부권 관광클러스터 기본계획 및 타당성 용역 추진 : `23. 1 ~

◦ 복합쉼터 공사발주 및 추진                      : `23. 7.  ~ `24. 7.

옛다솜이야기원 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원관광지 및 함파우유원지 일원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년

◦ 사 업 비 : 17,366백만원(국비 8,058, 시비 9,308)

◦ 사업내용 : 옛다솜 이야기정원 조성(A=80,000㎡), 물놀이시설 1개소(778㎡)

사랑체험관 건립(건축면적 2,203.55㎡, 연면적 2,168.73㎡)

□ 추진실적

◦ 옛다솜 이야기원 기본 및 실시설계 용역 완료	: ‘19. 6. 24.

◦ 옛다솜 이야기원 조성공사 추진	(현공정 90%)	: ‘19. 7. 31. ~

◦ 옛다솜 이야기원 통신・전기공사 완료	: ‘21. 12. 27.

◦ 사랑체험관 건립공사 추진(현공정 50%)	: ‘21. 3. 4. ~

◦ 사랑체험관 통신・전기・소방공사 추진(현공정 30%)  : ‘21. 6. 29. ~

□ 쟁점 및 대책

◦ 서부내륙권 광역관광개발사업의 사업계획변경 없이 사랑체험관을 기존용도인 전시관에서 어드벤처시설로 설계변경하여 시공함.

□ 문화체육관광부에 사업계획변경 신청 예정

◦ 총사업비 부족에 따른 예산 확보 필요

□ 추가경정예산 36억원 의회 제출

◦ 사랑체험관 건축공사는 장기계속공사로 발주했으나(’23년 7월 준공예정), 전기, 통신, 소방공사, 감리용역은 발주당시(2021년) 단년도로 발주하여 금년도에 마무리를 해야 하는 실정임.

□ 건축물과 전기 등 공사는 연내 마무리, 조경 등 외부공사 내년 진행.

□ 금후계획

◦ 옛다솜이야기원 조성사업 완료(정원, 주차장, 도로)   : ‘22. 10.

◦ 사랑체험관 건립공사 완료                         : ‘23.  8.

남원관광지 RE-PLUS 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원관광지 일원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 15,000백만원(기금 6,000, 도비 3,000, 시비 6,000)

- ‘22년도 예산액 : 4,300백만원(기금 1,650, 도비 1,000, 시비 1,650)

◦ 사업내용 : 달빛정원 조성, 달빛정원 미디어아트 프로그램 개발 및 설치, 상설공연프로그램 운영, 연계관광코스 개발, 관광브랜드 개발, 온․오프라인 홍보마케팅 등

□ 추진실적

◦ 기본계획용역추진                        : ‘20. 9. 14. ~ ‘21. 11. 9.

◦ 달빛정원(구.비사벌콘도) 공공 건축기획 승인 절차 이행 : ‘21. 9. 24.

◦ 달빛정원(구.비사벌콘도) 정밀안전점검용역 발주       : ‘21. 11. 23.

◦ 문체부 기본계획 최종 승인                         : ‘21. 12. 3.

◦ 달빛정원 조성 제안 설계 공모                       : ‘22. 4. 26.

◦ 달빛정원 조성사업 건축 설계 용역 수행 중           : ‘22. 7. ~ 12.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 기본계획 수립 당시와 달리 현재 타지역들에 미디어아트 전시관 난립중으로, 콘텐츠 경쟁력 제고를 위해 사업계획 변경 필요.

□ 문화체육관광부에 사업계획변경 신청 예정

◦ 계획공모형 지역관광개발사업 실집행 저조 및 부진으로 인해 2023년 상반기까지 집행하지 못한 예산은 불용 처리 예상(문화체육관광부)

□ 새로운 사업계획(실감 몰입형 메타 그라운드) 변경 추진하고, 달빛정원조성사업 등 관련 예산 불용되지 않도록 신속 집행 추진

□ 금후계획

◦ 달빛정원 미디어아트 콘텐츠 개발 및 설치 용역 추진     : ‘22. 12.

◦ 관광브랜드 개발, 연계관광코스 개발 추진               : ‘22. 12.

◦ 공연프로그램, 요천 푸드스트리트 등 경상보조 사업 추진  : ‘23.  2.

제2차 대표관광지 육성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 광한루원 ~ 남원관광지

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 8,480백만원(국비 200, 도비 5,000, 시비 3,280)

- ‘22년도 사업비 : 1,780백만원(도비 1,000 시비 780)

◦ 사업내용 : 관광기반 7개사업, 관광진흥 8개사업

□ 추진실적

◦ 요천 벛꽃길 야간명소화 사업 설계 용역 추진	: ‘22. 1. 25.

◦ 사랑의 정원(예루원) 경관조명 설치 공사 추진	: ‘22. 4.  4.

◦ 주차장 법면보강 공사 설계용역 및 착공	: ‘22. 4. 25. ~

◦ 주차장 인근 휴게시설 설치공사 완료	: ~ ‘22. 8. 29.

□ 주요쟁점 및 대책

공 사 명	착공일	준공 (예정)일	사업비 (천원)	쟁점 및 대책
요천 벚꽃길 야간명소화 사업	-	-	700,000	· 야간조명 설치를 위한 실시설계 용역 중에 있으나 주변 관광지와 연계성 있는 경관의 필요로 용역 중지 중 ⇒ 야간경관 기본계획 용역과 병행하여 추진하겠음 - 현재 야간경관 기본계획 수립용역 추진 중
사랑의 정원 조성	-	-	400,000
관광편의 개선사업 (주차장, 도로 확장 등)	22.6.8	22.12.9.	400,000	· 조경수 식재의 설계변경으로 공사 중지중 ⇒ 10월 식재시기 공사 재착공 실시

□ 금후계획

◦ 요천 벚꽃길 야간명소화 사업 추진	: ‘22. 10. ~

◦ 사랑의 정원 조성(조명공사) 추진	: ‘22. 10. ~

□ 제2차 대표관광지 육성사업 연도별 세부계획

분야	사업명			구분	예 산						비고
					소계	20년	21년	22년	23년	24년
총사업비				(총)	8,480	2,620	1,220	1,780	1,780	1,080
				(국)	200	200	-	-	-	-
				(도)	5,000	1,300	700	1,000	1,000	1,000
				(시)	3,280	1,120	520	780	780	80
관광기반사업	소계			(합)	5,800	1,700	700	1,400	1,400	600
				(도)	2,900	700	200	700	700	600
				(시)	2,900	1,000	500	700	700
	관광인프라조성	1	덕음산 에코어드벤처 조성	(계)	0	500	0	0	500	-
				(도)	0	300	0	0	300	-
				(시)	0	200	0	0	200	-
		2	심야포차단지 조성	(계)	100	-	-	-	100	-
				(도)	50	-	-	-	50	-
				(시)	50	-	-	-	50	-
		3	AR 실감형 체험관광존 구축	(계)	100	-	-	-	100	-
				(도)	50	-	-	-	50	-
				(시)	50	-	-	-	50	-
		4	관광편의개선 (주차장, 도로확장)	(계)	2,600	1,700	500	400	-	-
				(도)	1,100	700	200	200	-	-
				(시)	1,500	1,000	300	200	-	-
		5	매력더하기 한옥정자 조성	(계)	200	-	-	-	-	200
				(도)	200	-	-	-	-	200
				(시)	-	-	-	-	-	-
		6	사랑의 정원 조성	(계)	1,600	-	200	300	700	400
				(도)	900	-	0	200	300	400
				(시)	700	-	200	100	400	-
		7	요천벚꽃길 야간명소화 사업	(계)	700	-	-	700	-	-
				(도)	300	-	-	300	-	-
				(시)	400	-	-	400	-	-
관 광 진흥사 업	소 계			(합)	2,680	920	520	380	380	480
				(국)	200	200	-	-	-	-
				(도)	2,100	600	500	300	300	400
				(시)	380	120	20	80	80	80
	관광상품및코스	1	신관사또 부임행차 공연	(계)	20	20	-	-	-	-
				(도)	20	20	-	-	-	-
				(시)	-	-	-	-	-	-
		2	관광객환영 취타대 운영	(계)	129	69	60	-	-	-
				(도)	109	49	60	-	-	-
				(시)	20	20	-	-	-	-
		3	마당극 흥부뎐 상설공연	(계)	307.5	60	30	72.5	72.5	72.5
				(도)	247.5	60	30	52.5	52.5	52.5
				(시)	60	-	-	20	20	20
		4	남원 꽃담길 아트장터	(계)	1,015	570	100	115	115	115
				(국)	200	200
				(도)	575	270	80	75	75	75
				(시)	240	100	20	40	40	40
	축제 이벤 트	5	전통문화 체험 프로그램	(계)	421.5	44	70	102.5	102.5	102.5
				(도)	421.5	44	70	102.5	102.5	102.5
				(시)	-	-	-	-	-	-
	홍 보 마 케 팅	6	남원 웰컴투 조선 관광 도우미	(계)	47	17	30	-	-	-
				(도)	47	17	30	-	-	-
				(시)	-	-	-	-	-	-
		7	스마트 관광정보체계 구축/운영	(계)	110	60	-	10	20	20
				(도)	80	60	-	-	10	10
				(시)	30	-	-	10	10	10
		8	대표관광지 홍보 마케팅	(계)	650	80	230	80	80	180
				(도)	650	80	230	80	80	180
				(시)	-	-	-	-	-	-

남원 한옥체험시설 조성사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 쌍교동 191번지 일원(예루원 뒤편)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 4,724백만원(균이 1,750, 시비 2,974)

- ‘22년도 사업비 : 350백만원(균이 100, 시비 250)

◦ 사업내용 : 한옥자원을 활용한 문화관광체험시설 조성

□ 추진실적

◦ 제7차 전북권 관광개발계획 수립 반영           : `21. 8.

◦ 한옥체험시설(종가) 활용방안 상세계획수립 용역 추진 : `21. 9. ~ `22. 3.

◦ 공공건축 사업계획 사전협의(건축공간연구원)     : `21. 10. ~ 11.

◦ 2021년 제2차 지방재정투자심사의뢰	: `21. 11. 9.

◦ 남원시 공공건축 건축심의위원회 심의            : `22. 2.

◦ 사업지 변경에 따른 공공건축 사업계획 재협의     : `22. 8.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 2022년 문체부 지역특화형 친환경 숙박시설 조성사업 선정에 따른 사업지 변경 불가피

□ 제7차 전북권 관광개발계획 수립 변경 협의 진행 중

□ 신규 사업부지 일부 토지매입 완료(쌍교동 185, 191번지) 및 토지 매입 추진 중(쌍교동 186-2, 184번지)

□ 금후계획

◦ 남원 한옥체험시설 조성사업 기본 및 실시설계 용역 추진 : `22. 11.

지역특화형 친환경 숙박시설 조성사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 금동 45번지 일원[옛 명지각(종가집), 민가한옥]

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2023년

◦ 사 업 비 : 7,900백만원(국비 3,900, 시비 4,000)

- ‘22년 사업비 : 1,900백만원(국비 900, 시비 1,000)

◦ 사업내용 : 옛 명지각 및 민가한옥 리모델링(한국전통호텔 조성)

□ 추진실적

◦ 남원 도시관리계획(문화시설) 결정(변경) 추진       : ‘21. 6. ~ 12.

◦ 중기지방재정계획 반영                           : ‘21. 11.

◦ 문화체육관광부 공모사업 최종 선정               : ‘22. 2. 15.

◦ 설계용역 전북도 원가심사                        : `22. 5. 25.

◦ 지역특화형 친환경 숙박시설 조성 제안 설계공모    : `22. 5. 31.

◦ 건축 기본 및 실시설계 용역 수행중               : ‘22. 7. ~ 12.

□ 금후계획

◦ 숙박시설 운영자 모집(제안입찰)  공고             : ‘22. 10.

◦ 숙박시설 조성 리모델링 및 증축 공사              : ‘23. 1. ~ 8.

◦ 숙박시설 개관 및 운영                            : ‘23. 9.

2022 열린관광지 조성사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 광한루원, 남원항공우주천문대

◦ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2022. 12.

◦ 사 업 비 : 1,000백만원(국비 500, 시비 500)

◦ 사업내용 : 체험형 열린관광 콘텐츠 확보, 무장애 동선 및 시설 정비(화장실, 주차장 등), 점자 안내 책자 제작 등

□ 추진실적

◦ 2022년도 열린관광지 조성사업 공모신청 접수	: ‘21. 7. 23.

◦ 2022년도 열린관광지 조성사업 최종 선정	: ‘21. 10. 14.

◦ 권역별 컨설팅 실시	: ‘21. 11. 23.

◦ 실시설계용역 추진                              : ‘22. 3. 29.

◦ BF 컨설팅용역 시행                            : ‘22. 4.

◦ 열린관광지 조성사업 교육용역 시행             : ‘22. 4.

◦ 계약심사 완료	: ‘22. 9.

□ 주요쟁점 및 대책

공 사 명		착공일	준공 (예정)일	사업비 (천원)	쟁점 및 대책
열린 관광지 조성사업	항공 우주 천문대	-	-	450,000	· 표준협회 및 컨설팅의 지연 및 이에 따른 실시설계 완료 지연 ⇒ 9월 중에 공사 실시 하겠음
	광한루원	-	-	450,000	· 표준협회 및 컨설팅 추가요구에 따른 및 문화재 형상변경 절차 필요 - 현재 문화재청 심의 중 ⇒ 형상변경 완료 후, 공사 추진하겠음

□ 금후계획

◦ 현상 변경 후 공사 시행	: ‘22. 9. 중

◦ 현장 검증 및 준공 승인(문체부)	: ‘23. 3.

남원예촌 전통한옥체험시설 관리․운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 광한북로 17 (부지 11,079㎡, 건물 1,679.36㎡)

◦ 시설규모 : 15개동 (숙박 7*24객실, 사랑마루, 도움마루, 부용정, 출입문4, 기타1)

◦ 수 탁 자 : ㈜이랜드파크 (운영인력 : 16명)

◦ 수탁기간 : 2021.07.15.*재계약 ~ 2025.12.31. (*개관일 : 2016.07.15.)

◦ 사업내용 : 남원예촌 전통한옥 체험시설 민간위탁 관리･운영

□ 추진실적(‘22.08.31.기준)

◦ 운영현황 : 평균가동률 86%, 매출 1,056백만원, 이용객 13,036명

(단위 : 백만원, 명)

구 분	운 영 현 황			지역경제 소비효과		비 고
	매출	지출	결산	소비효과	소비효과 포함결산	가동객실	이용객	가동률
‘22. 1. ~ 8.	1,056	1,088	-32	1,538	1,506	4,589	13,036	86%
‘21. 1. ~ 8.	814	929	-115	1,264	1,149	3,751	10,708	70%
전년 대비	242	159	83	274	357	838	2,328	16%
‘21 누적	1,311	1,421	-110	2,023	1,913	6,012	17,148	75%
‘20 누적	1,092	1,374	-282	1,650	1,368	4,846	13,984	60%
‘19 누적	1,128	1,345	-217	1,666	1,449	4,887	14,120	61%
‘18 누적	941	1,276	-335	1,435	1,100	4,184	12,162	52%
‘17 누적	863	1,198	-335	1,269	934	3,843	11,490	48%

※ 매출(2017~2020) : 기타수입(부가가치세환급금+이자수입) 포함 금액

◦ [전통한옥브랜드화사업] 전통문화체험 프로그램 운영(한복․국악․공예 등)

◦ 2021년도 회계감사 완료(□제일세무회계사무소)     : `22. 6. 23. ~ 7. 20.

□ 금후계획

◦ 연평균 가동률 80%이상 달성을 위한 공격적 마케팅(*′22년 목표가동률 : 70%)

- 시즌별 프로모션, 패키지상품 개발, 고객맞춤형 마케팅 홍보 등

◦ 고객 불편해소 및 이미지 제고를 위한 시설보수 : ‘22. 10. ~ 12.

- 객실 황토벽 보수, 부용정 옻칠 보수(상단부), 기타 소수선 등

한복체험관 화인당 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 개관/운영 : 2021. 4. 17. / 직영(유료)

◦ 위    치 : 남원시 월매길 12 (광한루원 동문 옆)

◦ 시설규모 : 지상2층, 연면적 435.6㎡ (건축년도 : 2020. 5.)

구분		주요 콘텐츠
1층	(247.5㎡)	화인당(花人堂□한복대여소), 요요(樂樂□인생샷포토존)
2층	(188.1㎡)	호호(好好□다목적실), 화인풍경(花人風景□전통스튜디오), 화인사진관(花人寫眞館□셀프스튜디오)

◦ 운영시간 : 매주 화 ~ 일요일 10:00~18:00 (*월요일 휴관)

◦ 보유한복 : 한복 124벌(여자 39, 남자 17, 아동 68), 쾌자 136벌(성인 100, 아동 36), 소품

□ 추진실적

◦ 운영현황 (2022.08.31.기준, 팝업스토어 포함)

구 분	누 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
체험인원(명)	9,363	102	103	243	553	6,855	588	444	475
유료	1,461	74	52	81	197	458	263	156	180
무료	7,902	28	51	162	356	6,397	325	288	295
매출액(천원)	26,477	2,038	1,623	2,430	4,497	7,433	3,949	1,937	2,570

◦ 화인당 운영 활성화 위한 다양한 이벤트 추진 : 4회/931명/14,810천원

- 화인당에 오면 복(福) 내려온다 이벤트(1.28.~2.2.)  :  84명/  740천원

- 화인당 #해시태그 이벤트(3.10.~3.23.)            :  40명/  810천원

- 화인당 벚꽃 이벤트(4.1.~4.14.)                  :  97명/ 1,760천원

- 화인당 한복나들이 이벤트(4.26.~8.31.)           : 710명/11,500천원

◦ 한복문화도시 거점화를 위한 행사 및 마케팅 추진

- 춘향제기간(5.4.~5.8./5일간) 자원봉사자 한복체험단 운영 : 863명

- 한복문화 지역거점 연계 프로그램 추진          : 6회(23명)

[꽃을심다]한복리폼 5회(14명), [꽃이되다]한복소품등체험 1회(9명)

- 팝업스토어(5.28.~11.30.), SNS(인스타, 블로그, 유튜브 등) 활용 홍보

□ 금후계획

◦ 2022 한복문화 지역거점 연계 프로그램 추진      : ‘22. 10.

- [꽃을심다]한복리폼 26명(수시), [꽃이되다]한복소품등체험 9회(90명)

◦ 한복문화 활성화를 위한 프로그램 및 이벤트 추진 : ‘22. 10. ~ 12.

- 남원예촌 전통한옥체험시설 숙박객 대상 한복체험 등

복합문화공간 예루원 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 월매길 12 (광한루원 동문 옆)

◦ 시설현황 : 문화시설(전시, 갤러리카페-사용수익허가)

- 전통한옥(지상2층)    : 연면적 362.16㎡

- 행사마당(예루원마당) : 부지면적 1,700㎡

◦ 사 업 비 : 90백만원

◦ 사업내용 : 전시 프로그램 운영 및 문화예술 행사마당 등

□ 추진실적

◦ 남원예촌 동화페스티벌 추진         : ‘21. 12. 24. ~ ‘22. 1. 30.

- 시민 참여 소원 등 달기, 경관조명 / 197명 참여

◦ ‘먼저 만나는 봄소식’ 기획 전시      : ‘22. 3. 28. ~ 4. 30.

- 시민작가 2명 참여 / 한복천 꽃 그림, 토우 인형

◦ 제92회 춘향제 연계 전시            : ‘22. 5.  4. ~ 5. 12.

- 제25회 전국 옻칠 목공예대전 수상작 전시

◦ 예루원마당 공연 추진 : 가인춘향(5~9월, 매주 토요일) 외 다수

◦ 한복문화 지역거점 한복테마 전시    : ‘22. 5. 30. ~

◦ ‘22~‘23 테마가 있는 공공디자인 사업 공모 선정 : ‘22. 7. 20.

- 총사업비 : 500백만원(도비 144, 시비 356) / ‘22년 260백만원

□ 금후계획

◦ 한복문화 주간행사 추진             : ‘22. 10. 17. ~ 10. 23.(7일간)

- 한복문화시청회, 경관 조성 등

◦ [공모]남원예촌 예루원의 밤풍경 조성 : ‘22. 10. ~ ‘23. 6.

◦ 연말연시 겨울경관 조성 및 체험행사 : ‘22. 12.

남원예촌 활성화 프로그램 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원예촌 일원(예촌마당, 조갑녀살풀이명무관, 황희초당, 관서당, 예촌The이음 등)

◦ 기    간 : 2022. 2. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 298백만원 (도비 139, 시비 69)

◦ 사업내용 : 문화공간별 활성화 프로그램 운영

□ 추진실적

◦ 2022 거리극축제 “노상놀이야”운영          : 11회

- 공모선정 : ‘22.02.10. / 53백만원(도24, 시26, 자부담3)

- 5월~10월/총15회/조선에서 돌아온 황희정승(거리극․풍물마당․퍼레이드 등)

◦ 조갑녀류 전통춤 공개전수 등               : 12회

- 4월~9월/총14회/살풀이, 부채흥춤 전수, 조갑녀&명무관 이야기 등

◦ 춘향제 연계 프로그램 운영                 : 3회

- 故조갑녀와 춘향제의 만남(1회), 스피릿춘향&몽룡파이터(2회, 댄스경연)

◦ 대표관광지활성화 연계 프로그램 운영       : 103회

- 덩덕쿵 어깨춤을(22회), 용담검무(22회), 열린서당(59회)

□ 금후계획

◦ ‘22 전라북도 거리극축제 “노상놀이야”      : ‘22. 10.(4회)

◦ 조갑녀류 전통춤 공개전수 및 기획공연      : ‘22. 10. ~ 12.( 3회)

◦ 관서당 ’훈장님과 함께하는 열린서당‘        : ‘22. 10.(15회)

◦ 대표관광지활성화 연계 프로그램 운영       : ‘22. 10.(6회)

- 덩덕쿵 어깨춤을 : 3회 / 조갑녀살풀이명무관 / 매주 토요일

- 용담검무        : 3회 / 조갑녀살풀이명무관 / 매주 일요일

2022 한복문화 지역거점 지원사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 사 업 명 : 2022년 한복문화 지역거점 지원사업

‘한복도시 남원, 꽃을 입다’

◦ 기    간 : 2022. 5. ~ 12. (*한복문화주간 : 10.17.~ 10.23.)

◦ 사 업 비 : 250백만원 (국비 90, 시비 160)

◦ 내    용 : 꽃을 주제로 한복 프로그램 10개 행사

연번	프로그램	내용	연번	프로그램	내용
1	꽃을 심다	한복리폼	6	꽃을 보다	문화공연
2	꽃이 되다	한복장신구 체험	7	꽃잎이 날리다	퍼포먼스극
3	꽃이 피다	한복과 만나는 일상	8	꽃 사이를 걷다	경관 조성
4	꽃을 입다	한복체험	9	꽃을 찍다	사진공모전
5	꽃을 팔다	프리마켓	10	꽃을 담다	기록전시

□ 추진실적

◦ 2022년 한복문화 지역거점 공모 선정              : ‘22. 3. 11.

- 제1차 추가경정예산 반영 및 예산확보(국비 90, 시비 160)

◦ 2022 한복문화 지역거점 지원사업 추진계획 수립   : ‘22. 5.  9.

◦ 보조금 교부결정 및 지급(남원시관광협의회)        : ‘22. 5. 31.

◦ 한복문화 지역거점 지원 사업 추진                : ‘22. 6. ~

◦ 남원시 대표 관광지 종사자 한복 근무복 시범 도입 : ‘22. 8. ~

- 26명(문화관광해설사 14, 관광안내사 6, 광한루원 매표담당자 6)

◦ ’한복 입기 좋은 날‘ 캠페인 추진                  : ‘22. 8. 31.

□ 금후계획

◦ 한복문화 지역거점 지원 사업 추진 : ‘22. 10. ~ 11.

◦ 남원시 한복문화주간 행사 추진    : ‘22. 10. 15. ~ 10. 23.

◦ 사업평가 및 정산                 : ‘22. 12.

□ 2022년 한복문화 지역거점 지원사업 세부사업

구분	운영기간	프로그램	사업비(천원)			대상	장소
			계	국비	시비
상설 프로 그램	8∼12월	꽃을 심다 - 이야기가 있는 한복 리폼	20,000	-	20,000	전연령	화인당
	8∼10월	마을에 꽃이 피다 - 마을 어르신들의 일상으로 찾아간 한복체험	5,290	-	5,290	전연령	수지면 양촌마을
	9∼10월	학교에 꽃이 피다 - 한복입고 졸업사진 찍기	15,000		15,000	청소년	신청학교 및 단체
	9∼11월	꽃 사이를 걷다 - 한복소재 경관조성	30,000	20,000	10,000	전연령	남원예촌
	7∼11월	꽃을 담다 - 한복이카이브 기획전시	20,000	-	20,000	전연령	남원다움관
	7∼9월	꽃을 찍다 - 이야기가 있는 한복사진 공모전	10,000	-	10,000	전연령	남원예촌
한복 문화 주간 프로 그램	10월	꽃이 되다 - 한복에 어울리는 소품 및 헤어스타일 체험	9,000	-	9,000	전연령	화인당
	10∼11월	남원에 꽃이 피다 - 한복과 젊은 예술가의 만남	30,000	30,000	-	전연령	예루원, 남원시립 김병종미술관
	10월	꽃을 팔다 - 한복 소품 프리마켓	6,000	4,000	2,000	전연령	예루원마당
	10월	꽃을 보다 - 남원의 스토리 자원을 활용한 문화공연	35,000	12,000	23,000	전연령	예루원마당
	10월	꽃잎이 날리다 - 남원의 스토리자원을 활용한 퍼포먼스	36,000	-	36,000	전연령	광한루원 남원예촌
기타	홍보·행사장 안전보험		32,816	24,000	8,816
	회계검사 수수료		894	-	894
합 계			250,000	90,000	160,000

지리산 친환경 전기열차 도입

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주천면·산내면 일원(육모정 ~ 고기삼거리(시범노선) ~ 정령치)

◦ 사 업 량 : 총 13km(①시범노선 1km  ②실용화노선 12km)

◦ 총사업비 : 1,102억원(시범노선 : 278억원)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2029년(시범노선 : 2020 ~ 2026년)

□ 추진실적

◦ (철도연)｢산악용 친환경 운송시스템 시범사업｣ 지자체 공모 공고  : ‘22. 2. 24.

◦ (남원시)｢산악용 친환경 운송시스템 시범사업｣ 제안서 접수 : ‘22. 4. 25.

□ (접수결과) 3개 지자체 신청 ⇒ 남원시(전북), 태백시(강원), 울릉군(경북)

◦ (철도연) 1차 사전적격성검토 평가(남원시 단수 통과)    : ‘22. 5. 27.

◦ (철도연) 2차 서면·발표 평가                          : ‘22. 6. 23.

□ (최종결과) 우선협상대상기관 남원시 선정

□ 쟁점 및 대책

◦ 시범사업 시 궤도 전용선로 확보과정에서 발생하는 환경훼손

□ 시민소통회, 공론화위원회를 통한 시민사회 의견 수렴 및 갈등 해소 노력

◦ 기반 시설 조성공사를 위한 시비 부담

□ 정교하고 다각적인 구축 방안 검토를 통해 시비 부담분 최소화 방안 모색

◦ 시범사업 협약내용 우리 시 측 의무부담 과다

□ 고문변호사 자문을 바탕으로 철도연과의 협의를 통해 절충안 모색

□ 금후계획

◦ 상호업무협약 체결 (철도연↔남원시)                  : ‘22. 하반기.

◦ 시범노선 설계 및 시스템 인프라 구축                : ‘23. ~ ’24.

◦ 시범노선 시범운행 및 시스템 성능 검증              : ‘25. ~ ’26.

다양한 숙박․음식 특화거리 조성

(공약사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 광한루원·요천 주변

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년

◦ 총사업비 : 11,563백만원(국비4,565, 도비1,000 시비5,998)

◦ 사업내용 : 광한루원·요천 주변 특색 있는 먹거리와 다양한 숙박시설 확보

◦ 위 치 도

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자 (~‘22)	재원투자기간					비고
			소계	‘23	‘24	‘25	‘26
합계	11,563	5,463	6,100	6,030	35	35	0
국비	4,565	1,565	3,000	3,000
도비	1,000	1,000
시비	5,998	2,898	3,100	3,030	35	35
기타

※ 스마트 ‘LUNA’ 사업 3,563백만원 (국비665, 도비1,000, 시비1,898)

※ 친환경 숙박시설 조성사업 7,900백만원 (국비3,900, 시비4,000)

※ 구도심권 한옥체험업 활성화 사업 100백만원 (시비100)

□ 추진실적

◦ 지역 특색에 맞는 음식 특화거리 조성

- 스마트관광도시 조성사업(스마트 LUNA) 공모 선정        : `22. 3.

- 전북콘텐츠융합진흥원, 컨소시엄 업체와 업무 협약체결    : `22. 9.

◦ 다양한 숙박거리 조성

- 친환경 숙박시설 조성사업 공모 선정                    : `22. 2.

- 친환경 숙박시설 조성 제안 설계공모                    : `22. 5.

- 친환경 숙박시설 건축 기본 및 실시설계 용역            : `22. 7.

□ 금후계획

◦ 지역 특색에 맞는 음식 특화거리 조성

- 스마트주막(스마트 LUNA) 운영                          : `23. 4.

- 스마트 주막 참여 청년, 단체 등 포차거리 창업유도 지원  : `23. 5.

◦ 다양한 숙박거리 조성

- 친환경 숙박시설 운영자 모집(제안입찰)  공고             : `22. 10.

- 친환경 숙박시설 개관 및 운영                           : `23. 9.

- 구도심권 한옥체험업 활성화 지원사업 추진               : `23. 2.

□ 기대효과

◦ 스마트주막 및 포차거리 등 지역 일자리 확보를 통한 지역경제 활성화

◦ 광한루원 주변 특성화 숙박단지 조성을 통한 체류형 관광지로의 도약

【참고자료】스마트(주막)「LUNA」 컨셉(안)

축제와 빛의 향연을 활용한 문화축제 테마 조성

(공약사업)

□ 공약개요

◦ 위    치 : 요천변 제방길(동림교~수창해뜨래@) 및 요천 시민공원

◦ 사업기간 : 22년 ~ 32년(10년)

◦ 총사업비 : 513,725백만원(국비245,104 도비1,300 시비267,321)

◦ 사업내용

- 요천권역 빛을 테마로 한 야간 볼거리 제공으로 체류형 관광지 조성

- 요천 시민공원 조성

- 차없는 거리 조성(지하차도 개설 L=650m (암거 350, 경사로 150×2구간)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

구분		합계	기투자 (~‘22)	재원투자기간					‘27 이후	비고
				소계	‘23	‘24	‘25	‘26
합계		513,725	1,425	35,700	700	8,400	13,800	12,800	476,700
국비	관광과	604	4	600	-	600	-	-	-
	도시과	-	-	-	-	-	-	-	-
	건설과	244,500	-	8,300	-	500	3,900	3,900	236,200
도비	관광과	1,300	300	1,000	-	500	500	-	-
	도시과	-	-	-	-	-	-	-	-
	건설과	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	관광과	2,621	821	1,800	-	1,300	500	-	-
	도시과	20,000	200	15,600	600	5,000	5,000	5,000	4,200
	건설과	244,700	100	8,400	100	500	3,900	3,900	236,300

※ 전라북도 대표관광지 육성사업 700백만원(도비300 시비400)

※ 시내권 관광시설 연계 야간경관 기본계획 수립 용역 200백만원(시비200)

※ 스마트관광도시(요천수상공연장) 225백만원(국비4 시비221)

※ 제7차 전북권 관광개발사업 2,000백만원(도비1,000 시비1,000)

※ k-pop 콘서트 지원사업 800백만원(국비300 시비500)

※ 야간관광 특화도시 사업 600백만원(국비300 시비300)

※ 지역맞춤형 통합하천사업 489,000백만원(국비244,500 시비244,500)

※ 통합하천사업 기본구상 및 타당성 조사용역 200백만원(시비200)

※ 광한루원 정문 앞 지하차도 개설 타당성 조사용역 200백만원(시비200)

※ 광한루원 정문 앞 지하차도 개설 19,800백만원(시비19,800)

□ 추진실적

【관광과】

◦ 시내권 관광시설 연계 야간경관 기본계획 수립 용역 추진  : `22. 8.~

□ 야간경관 기본계획에 맞춰 요천 벚꽃길 디자인(안) 결정

◦ 스마트 관광도시 분석 및 설계 등 본사업 착수         : `22. 8.~

【도시과】

◦ 지하차도 개설을 위한 사례조사	: `22. 8.

【건설과】

◦ 하천관리청(영산강유역환경청/광주) 출장 및 면담	: `22. 6. 21.

※ 하천 유수소통에 지장이 없고, 유로를 변경하지 않는 범위에서 해당구간 친수공원 조성사업 가능하다는 관리청 의견

◦ 현장조사(건설과장 외 2명, 민간전문가 1명)	: `22. 6. 22.

◦ 요천 하천기본계획(변경) 수립 용역사 수리검토 요청    : `22. 6. 30.

◦ 지역맞춤형 통합하천사업 수요조사(환경부→지자체)	: `22. 8.  2.

◦ 지역맞춤형 통합하천사업 제안서 작성용역 시행        : `22. 8. 11.

◦ 지역맞춤형 통합하천사업 신청계획 최종(안) 보고(시장)  : `22. 9. 13.

◦ 사업신청계획서 제출 (남원시→전북도)	: `22. 9. 16.

	< 사 업 개 요 >
◦ 사 업 명 : 지역맞춤형 통합하천사업 ◦ 사업규모 : 300 ~ 4,000억원 규모 ◦ 사업기간 : 2023 ~ 2032년(10년) ※ 22.12월 대상하천 선정 ◦ 대상하천 : 17개 광역지자체 20개 하천 ◦ 사업형태 : 국고보조(국비잠정 50% 보조)를 통한 지자체 사업 추진 ◦ 사업범위 : 하천구역 내 치수, 환경, 친수 등 통합하천사업

□ 쟁점 및 대책

◦ 광한루원 정문 앞 지하차도 개설 추진에 따른 인근 상가 교통불편 예상

□ 타당성조사 용역 추진시 충실한 주민의견 수렴 및 반영 제고

□ 금후계획

【관광과】

◦ 요천 문보트 시범운영(2대) 추진(야간관광 활성화사업/도 소멸기금)  : `22. 10. ~

◦ 전라북도 대표관광지 육성사업「요천벚꽃길 야간명소화 사업」재개  : `22. 11. ~

◦ 요천수상공연장 설치 및 상설공연(야간경관과 어울리는 프로그램) : `22. 12. ~

◦ 함파우 디지털 테마파크 조성사업 실시설계 용역 추진      : `23. 01. ~

【도시과】

◦ 광한루원 정문 앞 지하차도 개설 타당성 조사용역 : `22.  9. ~ `23. 2.

□ 교통영향평가를 포함 타당성 조사 추진

□ 지질조사, 승사교 통행량 우회개설 도로 조사

□ 지하차로 개설에 따른 배수펌프장 검토 등 재해위험성 평가

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: `23.  4. ~ `24. 3.

◦ 기본계획 수립 후 문화재청 형상 변경 협의 추진  : `23.  8.

◦ 지하차도 개설공사 시행	: `24.  6. ~ `27. 12.

【건설과】

◦ 사업 대상지 자체선정 및 제출(전북도→환경부)    : `22. 10월 중

◦ 지역맞춤형 통합하천사업 대상지 선정(환경부)     : `22. 12월 중

□ 기대효과

◦ 야간 요천 일대에서 달의 도시 남원의 감성을 체험할 수 있는 야간조명 설치 및 프로그램 운영으로 볼거리 제공

◦ 연중 상시 관광이 가능한 기반 구축(차없는 거리, 요천 시민공원)으로 휴식공간 제공

◦ 연중 상시 문화예술 축제(특화공연, 버스킹 등) 운영하여 지역경제 활성화