2022. 10.

2022년 주요업무 추진실적

건  설  과

목        차

□ 일  반   현   황

□ 2022년 주요업무  결산

□ 2022년 주요업무 추진실적

◦ 안전한 도로망 확충 정비사업 현황(총괄)

□ 읍면지역시도 정비사업

□ 농어촌도로 정비사업

□ 통행불편 마을진입로 정비사업

□ 위험도로 선형개선사업

◦ 도로 유지관리사업

◦ 겨울철 도로 제설대책 추진

◦ 국도․국지도 건설 5개년 계획(`21~`25)사업 추진

◦ 지방도 730호선 대강~금지간 확포장공사

◦ 2022년도 유관기관 투자사업 계획(도로)

◦ 지방하천 정비사업 현황(총괄)

□ 풍천 지방하천 정비사업

□ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

□ 람천 지방하천 정비사업

◦ 소하천 정비사업

◦ 하천 재해복구사업

◦ 하천 유지관리사업

◦ 육상골재채취 허가 및 관리

◦ 2022년도 유관기관 투자사업 계획(하천)

일  반  현  황

□ 기    구

															건설과장
															박준기
건설행정담당													도로담당																		하천담당
박 광 선													정 병 욱																		최 재 영
도로 유지 관리․보수 설해대책추진 도로 점‧사용 허가 국‧공유 재산관리 노점상‧과적 단속													읍면시도 확․포장사업 농어촌도로 확․포장사업 통행불편 도로사업 위험도로개선사업 도로 유지관리사업																		치 수 사 업 하천유지관리 육상골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	37	1	3	7	4	4	□청원경찰 : - □공 무 직 : 18명
현 원	36	1	5	3	2	8	□청원경찰 : - □공 무 직 : 17명
증 감	△ 1	-	2	△ 4	△ 2	4	△ 1

□ 도로관리사무소 운영 현황

◦ 위    치 : 남원시 주생면 상동리 99-1번지

◦ 면    적 : 대지면적 11,814㎡(3,574평) / 건축면적 1,809㎡(548평)

◦ 장비 및 인력 현황

구 분	장 비 현 황						인 력 현 황
	소 계	굴삭기 (0.6㎥)	15톤 D.T	8톤 D.T	5톤 D.T	1톤 트럭	소 계	도 로 관리원	운전원
보유수량	7	1	2	1	1	2	13	10	3

□ 도로현황                               (2021.12.31 기준)

도 로 별		노선수	총연장 (km)	포 장 (km)	포장율 (%)	비 고 (관리기관)
합 계		841	1,387.7	773.5	55.7
고 속 국 도		2	69.0	69.0	100.0	한국도로공사
국 도		5	123.8	123.8	100.0	국토교통부 (익산지방국토관리청)
국가지원지방도		2	47.7	47.7	100.0 (전북 98.2%)	전라북도
지 방 도		7	120.2	112.5	93.6 (전북 81.2%)	전라북도
시도	동 지 역	472	174.4	102.1	58.5 (전북 79.8%)	남원시
	읍면지역	22	215.1	132.9	61.8 (전북 62.6%)	남원시
농 어 촌 도		331	637.5	185.5	29.1 (전북 38.6%)	남원시

□ 하천현황                               (2021.12.31 기준)

구 분	개소수	연장 (㎞)	개수연장 (㎞)	미개수연장 (㎞)	개수율 (%)	비고 (관리주체)
총 계	352개소	670.482	434.839	235.644	64.9
국가하천	2개소	39.105	39.105	-	100	환경부 (영산강유역환경청)
지방하천	40개소	246.670	198.816	47.854	80.6	전라북도
소 하 천	310개소	384.707	196.918	187.790	51.2	남원시

2022년 주요업무 결산

	상반기 주요성과
◦ 낙후지역 정주여건 개선 및 지역주민 숙원 해결을 위한 연계 도로망 구축 ◦ 지방재정 확충을 위한 국가예산 확보 노력으로 지역 균형 발전 효과 ◦ 노후 파손 도로·교량 정비로 교통장애 없는 안전한 도로 관리 추진 ◦ 예측할 수 없는 국지성 호우 등 자연재해 예방을 위한 하천 정비사업 추진 ◦ 시민의 여가 활동공간인 하천 주변 관리로 치수 및 친수환경 조성

□ 지역 균형발전을 위한 도로망 구축 – 18개 지구/ 7,150백만 원

◦ 공사 완공 5개, 설계완료 3개, 설계중 2개, 공사중 5개, 보상중 3개 지구

- 읍면지역시도 확포장  3개 지구 (L= 7.1㎞,    2,450백만원)

- 농어촌도로 확포장    6개 지구 (L= 11.34㎞,  3,550백만원)

- 통행불편 마을진입로  5개 지구 (L= 2.51㎞,   1,050백만원)

- 위험도로 선형개량    4개 지구 (L= 1.41㎞,      100백만원)

□ 지방재정 확충을 위한 국가예산 확보

◦ 국토부 국도‧국지도 건설 5개년 계획(`21 ~ `25) 4개사업  2,320억원 반영

구 분	노선번호	사 업 명	연 장 (㎞)	총사업비 (억원)	예산요구현황(억원)			비고
					기투자	‵22	이후
합 계	3개 노선	4개 사업	21.8	2,320	2.58	20.43	2,296.99
국 도	24호	이백 ~ 운봉(여원재) 시설개량	4.9	480	-	4	476	설계중
	24호	대강 ~ 대산(비홍재) 시설개량	4.0	446	-	-	446	-
국지도	37호	인월 ~ 아영 2차로 확장 및 개량	7.0	453	-	-	453	-
	60호	주천 ~ 고기 시설개량	5.9	941	2.58	16.43	921.99	설계중

◦ 춘향휴게소(순천~완주간 고속도로) 유치 및 개관 (2022. 9. 16.) / 300억원

◦ 국․도비 확보 : 384.3백만원(특교세 100, 도 284.3)

- 특교세 : 100백만원(주천면 호경리 도로열선)

- 전북도 : 284.3백만원(월락삼거리 회전교차로 140, 통계청~남원대교

교통사고 잦은곳 52.5, 아영 매산마을 도로열선 60, 시특법 시설물

안전점검용역 31.8)

□ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 추진 – 25개분야 104개소  / 6,703백만원

◦ 읍면지역시도 유지관리 : 31개소 / 1,194백만원

- 아영초등학교 앞 인도 정비사업, 남원중학교 앞 자전거도로 보완공사,

보절 진목마을 진입로 포장공사, 노암 쑥고개로 인도정비 공사 등

◦ 농어촌도로 유지관리   : 17개소 / 1,202백만원

- 이백초등학교 앞 인도 개성공사, 군도 10호선(이백면 이백로) 도로정비공사,

장용선 진입로 정비공사, 군도 6호선(송동 안계길) 배수시설 정비공사 등

◦ 법정도로 유지관리       : 56개소 / 4,307백만원

- 사매~덕과 도로구조개선, 요천마을 배수로, 과속방지턱

- 아영면 아영북길, 보절 사계로 아스콘 재포장공사 등

- 황용교․해탈교․주송교 등 보수공사, 승사교 교면 재포장공사 등

□ 재해예방을 위한 하천정비 추진 – 148개 지구 / 67,058백만원

◦ 하천 정비(지방하천, 소하천)	: 6개소 / 17,152백만원

- 지방하천 : 3개소 /  10,000백만원 (풍천, 원천천, 람천)

- 소 하 천 : 3개소 /  7,152백만원 (당동천, 과립천, 산곡천)

◦ 하천 재해복구사업	: 142개소 / 49,906백만원

- 국가하천 9개소, 지방하천 23개소, 소하천 35개소, 개선복구 4개소, 누락지구 71개소

- 재해복구사업 142개소 중 138개소 공사 완료, 4개소 공사 추진 중 (복구율 95%)

□ 시민 만족 중심의 하천 유지관리 추진 – 107개 지구 / 5,749백만원

◦ 하천 유지관리(지방하천, 소하천)	: 89개소 / 4,812백만원

- 유지관리 58개소, 하도준설 19개소, 수목제거 및 제초작업 12개소

◦ 하천 유지관리[국가하천(섬진강, 요천)]	: 18개소 /  937백만원

- 유지관리 9개소, 시특법 정밀안전점검 및 보수 4개소, 제초작업 5개소

2022년 주요업무 추진실적

안전한 도로망 확충 정비사업 현황(총괄)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도로 정비사업 18개 지구, L = 22.36㎞

◦ 총사업비 : 68,750백만원 (`22 : 7,150백만원/ 시비)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2028년(12개년)

구 분	사 업 량(㎞)		사업기간	사업비(백만원)				추진상황
				계	기투자	2022	2023이후
계	18개지구	L=22.36	`17~ `28	68,750	18,863	7,150	42,737
□읍면지역 시도	3개지구	L=7.10	`17~ `26	25,800	9,913	2,450	13,437
	부석~오촌	2.60	`17 ~ `23	5,900	3,100	1,200	1,600	공사중(66%)
	평촌~강기	2.50	`17 ~ `25	13,900	6,813	1,000	6,087	공사중(5%)
	덕촌~황벌	2.00	`22 ~ `26	6,000	-	250	5,750	설계중(22.12까지)
□농어촌 도로	6개지구	L=11.34	`17~ `28	34,350	3,900	3,550	26,900
	도 용 선	0.67	`17 ~ `22	1,650	1,650	-	-	공사중(90%)
	견 두 선	4.00	`18 ~ `28	18,000	750	800	16,450	공사중(5%)
	배 촌 선	3.77	`19 ~ `25	9,600	1,400	1,200	7,000	보상중(40%)
	호 은 선	0.90	`21 ~ `22	1,500	100	1,400	-	공사완료(22.9.)
	덕 인 선	0.90	`22 ~ `24	1,400	-	100	1,300	설계중(22.12.까지)
	일 대 선	1.10	`22 ~ `25	2,200	-	50	2,150	설계완료(22.8.)
□통행불편	5개지구	L=2.51	`17~ `24	4,800	1,950	1,050	1,800
	인월 중군	0.78	`17 ~ `22	1,950	1,950	-	-	공사중(50%)
	송동 척동	0.60	`21 ~ `23	1,000	-	100	900	행정절차추진
	덕과 추산	0.08	`22	150	-	150	-	공사완료(22.10)
	인월 황이	0.50	`22	700	-	700	-	공사완료(22.10)
	아영 이동	0.55	`22 ~ `24	1,000	-	100	900	행정절차추진
□위험도로 선형개선	4개지구	L=1.41	`19~ `23	3,800	3,100	100	600
	수지 호곡	0.40	`19 ~ `22	2,200	2,200	-	-	공사완료(22.4.)
	이백 초촌	0.60	`20 ~ `22	900	900	-	-	공사완료(22.8)
	주생 도산	0.23	`22 ~ `23	400	-	50	350	설계완료(22.5.)
	송동 문치	0.18	`22 ~ `23	300	-	50	250	보상중(10%)

□ 읍면지역시도 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 20개 지구 / 38.46㎞ / 78,130백만원 (시비)

◦ 기 투 자 : 17개 지구 / 31.36㎞ / 52,330백만원

◦ 시 행 중 :  3개 지구 /  7.10㎞ / 25,800백만원 (`22년 : 2,450백만원)

- `23 완공 : 1개 지구 / `25 완공 : 1개 지구 / `26 완공 : 1개 지구

사 업 명		읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
				계	기투자	2022	2023이후
합 계		3개지구	7.10	25,800	9,913	2,450	13,437	48
부석~오촌		송동면	2.60	5,900	3,100	1,200	1,600	73	`17 ~ `23
평촌 ~ 강기	소 계		2.50	13,900	6,813	1,000	6,087	56	`17 ~ `25
	평촌 ~목가	이백면	0.70	6,413	6,413	-	-	100	`17 ~ `21
	목가 ~강기		1.80	7,487	400	1,000	6,087	19	`21 ~ `25
덕촌~황벌		보절면, 덕과면	2.00	6,000	-	250	5,750	4	`22 ~ `26

□ 추진실적

◦ 부석~오촌    : 4차분 착공(`22. 3. 23.) / 공정률 66%

◦ 평촌~강기

- 평촌~목가   : 공사 완료(`21. 4. 13.)

- 목가~강기   : 용지보상 추진(보상률 80%), 공사 착공(`22. 9.) / 공정률 5%

◦ 덕촌~황벌    : 실시설계용역 착공(`22. 2. 16.) / 완료예정일(`22. 12. 15.)

□ 금후계획

◦ 2023년 완료  : 1개 지구(부석~오촌)

◦ 2025년 완료  : 1개 지구(목가~강기)

◦ 2026년 완료  : 1개 지구(덕촌~황벌)

□ 농어촌도로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 26개 지구 / 30.45㎞ / 69,524백만원 (시비)

◦ 기 투 자 : 20개 지구 / 19.11㎞ / 35,174백만원

◦ 시 행 중 :  6개 지구 / 11.34㎞ / 34,350백만원 (`22년 : 3,550백만원)

- `22 완공예정 : 2개 지구 / `23 이후 완공 : 4개 지구

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2022	2023이후
합 계	6개지구	11.34	34,350	3,900	3,550	26,900	21
도 용 선	주생면	0.67	1,650	1,650	-	-	100	`17 ~ `22
견 두 선	수지면	4.00	18,000	750	800	16,450	9	`18 ~ `28
배 촌 선	주천면	3.77	9,600	1,400	1,200	7,000	23	`19 ~ `25
호 은 선	주천면	0.90	1,500	100	1,400	-	100	`21 ~ `22
덕 인 선	사매면	0.90	1,400	-	100	1,300	7	`22 ~ `24
일 대 선	아영면	1.10	2,200	-	50	2,150	2	`22 ~ `25

□ 추진실적

◦ 도 용 선   : 3차분 추진(배수공) / 공정률 90%(1필지 토지수용 절차 중)

◦ 견 두 선   : 공사 착공(`22. 8. 3.) / 공정률 5%

◦ 배 촌 선   : 용지보상 협의 추진(보상률 40%)

◦ 호 은 선   : 공사 완료(`22. 9. 5.)

◦ 덕 인 선   : 실시설계용역 추진(`22. 1. ~ 12.)

◦ 일 대 선   : 실시설계용역 완료(`22. 8.), 관련법 협의(농지) 추진

□ 금후계획

◦ 2022년 완료 : 1개 지구(도용선)

◦ 2024년 이후 : 4개 지구(`24 덕인선·일대선, `25 배촌선, `28 견두선)

□ 통행불편 마을진입로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 62개 지구 / 34.13㎞ / 34,836백만원 (시비)

◦ 기 투 자 : 50개 지구 / 29.33㎞ / 25,536백만원

◦ 시 행 중 :  5개 지구 /  2.51㎞ /  4,800백만원 (`22 : 1,050백만원)

- `22 완공 : 3개 지구 / `23 완공 : 1개 지구 / `24 완공 : 1개지구

◦ 이후계획 :  7개 지구 /  2.29㎞ /  4,500백만원

사 업 명	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
		계	기투자	2022	2023이후
5개 지구	2.51	4,800	1,950	1,050	1,800	63
인월 중군마을	0.78	1,950	1,950	-	-	100	`17 ~ `22
송동 척동마을	0.60	1,000	-	100	900	10	`21 ~ `23
덕과 추산마을	0.08	150	-	150	-	100	`22
인월 황이마을	0.50	700	-	700	-	100	`22
아영 이동마을	0.55	1,000	-	100	900	10	`22 ~ `24

□ 추진실적

◦ 인월 중군 : 공사 추진(토공, 구조물공) / 공정률 50%

◦ 송동 척동 : 산지전용, 분할측량 의뢰

※ 편입용지 과다와 교통량 증가에 따른 사고위험 우려로 주민 사업반대 중

◦ 덕과 추산 : 공사 완료(`22. 10.)

◦ 인월 황이 : 공사 완료(`22. 10.)

◦ 아영 이동 : 실시설계용역 완료, 관련법(산지, 농지, 문화재 등) 협의 추진

□ 금후계획

◦ 2022년 완료 : 1개 지구(인월 중군)

◦ 2023년 완료 : 1개 지구(송동 척동)

◦ 2024년 완료 : 1개 지구(아영 이동)

※ 아영 이동 : 하반기 분할측량 및 용지보상 추진

□ 위험도로 선형개선사업

(계속사업)

□ 개    요

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계 (국비)	기투자 (국비)	2022	2023이후
합 계	4개지구	1.41	3,800 (1,400)	3,100 (1,400)	100	600	84
수지 호곡	수지면	0.40	2,200 (950)	2,200 (950)	-	-	100	`19 ~ `22
이백 초촌	이백면	0.60	900 (450)	900 (450)	-	-	100	`20 ~ `22
주생 도산	주생면	0.23	400	-	50	350	13	`22 ~ `23
송동 문치	송동면	0.18	300	-	50	250	17	`22 ~ `23

□ 추진실적

◦ 수지 호곡  : 공사 준공 (`22. 4. 22.)

◦ 이백 초촌  : 공사 준공 (`22. 8. 11.)

◦ 주생 도산 : 실시설계용역 완료 (`22. 1. ~ 5.)

◦ 송동 문치 : 용지보상 추진 (10%)

□ 금후계획

◦ 2023년 완료 : 2개 지구 (주생 도산, 송동 문치)

※ 주생 도산 : 하반기 분할측량 및 용지보상 추진

도로 유지관리사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 총사업비 : 10,278백만원(도 332, 시 9,846 특 100)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비(백만원)	비 고
합 계		25개 지구	10,278
읍면지역시도	관 내	5개 지구	1,468
농어촌도로	관 내	4개 지구	1,490
법정도로 유지관리	관 내	16개 지구	7,320

□ 추진실적 - 25개 지구 / 104개소 / 6,703백만원

◦ 읍면지역시도 유지관리

- 아영초등학교 앞 인도 정비사업 외 30개소 1,194백만원 추진

◦ 농어촌도로 유지관리

- 이백초등학교 앞 인도 개설공사 외 16개소 1,202백만원 추진

◦ 법정도로 유지관리(도로 유지관리, 재포장, 교량 유지관리 및 내진보강 등)

- 군도 29호선(아영면 아영북길) 아스콘재포장공사 외 55개소 4,307백만원 추진

□ 금후계획

◦ 읍면지역시도·농어촌도로·동지역 도로(최종) 유지관리 추진 : `22. 6. ~ 12.

- 배수개선, 재포장, 교량(터널) 유지관리, 시설물 정비 등

◦ 공사 완료 : 이백초등학교 앞 인도 개설, 군도 11호선(사매면 덕평길), 황죽로 고죽천변, 노암 쑥고개로 인도정비 등

◦ 공사 추진 : 아영초등학교 앞 인도 정비, 식정 요천마을 배수로 정비, 주천 용궁(3지구) 스노우멜팅 설치공사 등

□ 도로 유지관리사업 추진내역(2022년)

사 업 명		사업 위치	사 업 량 / 집 행 량	사업비 (백만원)	추 진 상 황
합 계			25개 지구	10,278
읍면지역시도 유지관리			5개 지구	1,468
	시도유지관리	관 내	유지관리사업 1식	500	완 료:20개소
	주민참여예산	관 내	유지관리 사업 5개소 / 3.19㎞	360	공사완료(`22.6.)
	소규모 민원 해결사업	관 내	민원 해결 사업 5개소 / 0.76㎞	170	공사완료(`22.6.)
	재해복구사업	주천면	도로 재해복구 3개소 / 0.15㎞	38	공사완료(`22.6.)
	아영초 인도 정비	아영면	인도 정비 L=0.37㎞	400	지장물 이설 협의
농어촌도로 유지관리			4개 지구	1,490
	농어촌도로 유지관리	관 내	유지관리사업 1식	500	완 료:13개소 공사중: 2개소
	이백초 인도 개설	이백면	인도 개설 L=0.22㎞, B=2m	350	완료예정(`22.10.)
	대산 심곡 교량 재가설	대산면	교량 재가설 1개소	500	공정률:30%
	장용선 진입로 정비	주천면	도로 확포장 L=0.12㎞, B=4m	140	노선변경 협의중
법정도로 유지관리			16개 지구	7,320
	읍면지역 표지판 정비	관 내	표지판 정비 1식	100	완료예정(`22.12.)
	시특법교량 보수보강	주송교	차량용 안전난간설치 L=400m	150	공사완료(`22.6.)
	사매~덕과 도로구조개선	사매면	도로 시설개선 L=1.0㎞	700	공사완료(`22.8.)
	법정시설물 안전점검	관 내	정밀안전점검 용역 1식	150	용역완료(`22.5.)
	아영 매산 스노우멜팅	아영면	도로 열선설치 L=0.24㎞	240	완료예정(`22.10.)
	회전교차로 설치사업	월락동	월락삼거리 회전로 설치 1식	600	공정률:5%
	시특법 교량 보수보강	승사교	교면 재포장 A=4,560㎡	1,480	공사완료(`22.6.)
	교량(터널) 유지관리	관 내	교량 유지보수 / 시특법 8개소	300	공사완료(`22.6.)
	교량 내진보강	요천2교	교량받침교체 100개	950	공사완료(`22.9.)
	걷고 싶은 거리 조성	관 내	인도 유지관리사업 1식	200	공정률:30%
	도통아파트 앞 인도정비	도통동	인도 재포장 L=0.58㎞, B=3m	350	공사완료(`22.8.)
	도로 유지관리보수	관 내	유지관리사업 1식	500	완 료:22개소 공사중: 2개소
	법정도로 재포장	관 내	유지관리사업 1식	500	완 료: 8개소
	요천마을 배수로 정비	식정동	배수로 정비 L=0.11㎞	200	공정률:30%
	밤티재길(뒷밤재) 정비	광치동	도로 정비 L=3.3km	700	원가심사(`22.10.)
	주천용궁(3) 스노우멜팅	주천면	도로 열선설치 L=0.15㎞ -추경예산 편성으로 추가-	200	실시설계 추진

겨울철 도로 제설대책 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 운영 기간 : 2022. 11. 15. ~ 2023. 3. 15. (4개월간)

◦ 제설 대상

계		시 관리국도		지 방 도		시 도		읍면시도(군도)
노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량
57	431.5㎞	3	25.1㎞	8	154.9㎞	24	38.5㎞	22	213㎞

◦ 제설 인력 : 24명 (도로관리원 9, 운전원 9(자체 3, 용역 6), 기타 6(용역 6))

◦ 제설 차량 : 13대 (15톤 5(임차3), 8톤 1, 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기1)

◦ 제설 장비 : 302대

- 자체 보유 : 27대 (제설기 12, 살포기 12, 교반기 1, 저장탱크 1, 호이스트 1)

- 읍 면 동 : 275대 (트랙터용제설기 271, 1톤용 제설기 4)

◦ 제설자재

(단위 : 톤)

확 보 량				사 용 량				잔 량
계	염화 칼슘	제설용 소금	친환경 제설제	계	염화 칼슘	제설용 소금	친환경 제설제	계	염화 칼슘	제설용 소금	친환경 제설제
2,092	177	1,791	124	1,134	74	1,041	19	958	103	750	105

□ 추진실적

◦ 제설자재 구입(1,509톤, 232.5백만원)            : `21. 9. 30. ~ `22. 2. 16.

- 제설용 소금 1385톤(182백만원), 친환경 제설제 124톤(50.5백만원)

◦ 읍면동 제설기 22대 구입 배치(57백만원)       : `22. 1. 24

◦ 도로 제설작업 추진 (11회)                    : `21. 12. ~ `22. 3.

※ 강설일수 12일, 적설일수 11일(대설주의보 1회)

□ 금후계획

◦ `22년 예비 제설자재 구입                      : `22. 10.  ~ 11.

- 염화칼슘150톤, 소금 600톤, 친환경제설제 100톤

◦ 제설장비 점검 및 상습결빙지역 사전준비       : `22. 10.~ 11.

- 미끄럼주의표지판 28개소 및 모래주머니 20,000매 설치

◦ 제설차량 임차 (6대 / 15톤 3대, 5톤 1대, 1톤 2대)     : `22. 12. 01. ~ `23. 2. 28.

◦ 정령치 도로 통제(고기삼거리 ~ 정령치 ~ 달궁삼거리)   : `22. 12. 01. ~ `23. 3. 31.

◦ 설해대책 상황실 운영 및 도로 제설작업 추진 : `22. 11. 15. ~ `23. 3. 15국도․국지도 건설 5개년 계획(ˋ21~ˋ25)사업 추진

(계속사업)

□ 개    요

구 분	노선번호	사 업 명	연 장 (㎞)	총사업비 (억원)	예산요구현황(억원)			비고
					기투자	‵22	이후
합 계	3개 노선	4개 사업	21.8	2,320	2.58	20.43	2,296.99
국 도	24호	이백 ~ 운봉(여원재) 시설개량	4.9	480	-	4	476	설계중 (순위 24/37)
	24호	대강 ~ 대산(비홍재) 시설개량	4.0	446	-	-	446	(순위 29/37)
국지도	37호	인월 ~ 아영 2차로 확장 및 개량	7.0	453	-	-	453	(순위 21/23)
	60호	주천 ~ 고기 시설개량	5.9	941	2.58	16.43	921.99	설계중 (순위 2/23)

□ 추진실적

◦ 제5차 국도․국지도 건설 5개년 계획 사업 반영 건의    : `17. 12. ~

◦ 제5차 국도․국지도 건설 5개년 계획(`21~ `25) 용역 추진  : `18.  6. ~

- 발주 : 국토부 도로건설과, 용역사 : 국토연구원, 기간 : `18.6.~`20.6.(2개년)

◦ 제1차 대상지 사업 선정(국토부) - 4개사업             : `20.  1.

◦ 일괄 예비 타당성 조사 추진(기재부 / KDI)                : `20. 2. ~ ‵21. 9.

◦ 제5차 국도․국지도 건설 5개년 계획 확정 고시(국토부)  : `21. 10. 01.

◦ 국지도 60호선(주천~고기) 설계용역 발주                 : `21. 11. ~

- 용역비 3,338백만원(‵21년 258백만원, ‵22년 1,643백만원/익산청 시행)

◦ 국지도 37호선 설계용역비 조기 반영 방문 건의(시→기재부) : `22. 1. 25.

◦ 국도 24호선(이백~운봉) 설계용역 발주                   : `22. 7. ~

- 용역비 1,250백만원(‵22년 400백만원/익산청 시행)

◦ 국지도 60호선(주천~고기) 남원시 관계부서 협의(2회)      : `22. 7. / 9.

◦ 국지도 60호선(주천~고기) 주민설명회                    : `22. 9. 23.

□ 금후계획

◦ 국지도 37호선(인월 ~ 아영) : `23년 설계용역 반영 적극 건의 및 대응 추진

지방도 730호선 대강~금지간 확포장공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 대강면 방동리 ~ 금지면 상귀리 일원 / 지방도 730호선

- 노 선 : 방동교차로 ~ 섬진강 자전거 쉼터 ~ 청계동교 ~ 상귀교차로

◦ 사업내용 : 도로 확포장 L=7.78㎞, B=9.5m(2차로) / 교량 6개소

◦ 사 업 비 : 476억원(도비)
◦ 사업기간 : 2021 ~ 2025(5개년)

◦ 시행기관 : 전라북도 도로교통과

□ 추진실적

◦ 제3차(‘21 ~ ‘25) 전북도 도로건설․관리계획 반영(1순위)   : `20. 12.

◦ 타당성 평가 용역 추진(전북도)                        : `21.  2. ~  7.

┌ 타당성 평가 : 300억원 이상(국가통합교통체계효율화법)

└ 타당성 조사 : 500억원 이상(건설기술진흥법)

◦ 주민설명회 개최(주민 40명 참석)	: `21.  5. 11.

◦ 대강면 주민 의견 수렴 결과 회신(대강면 → 건설과)    : `21.  5. 17.

◦ 도로 노선(안) 우리시 협의 의견 회신(시 → 전북도)     : `21.  5. 18.

- 도로 노선 안에 대한 대강면 주민설명회 결과 사석마을(면소재지)을

경유하지 않는 우회 노선 건의

◦ 타당성평가 검증 통과 (전북도 → 국토부 / 교통투자평가협의회) : `21.  7.

◦ 실시설계용역 착수(도급액 : 1,212백만원)              : `21. 12. 24.

◦ 주민설명회(대강, 금지)                               : `22.  3. 23.

◦ 남원시 관계부서 협의(2회)                            : `22. 1. / 10.

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진(15개월)                     : `21. 12. ~ `23.  2.

◦ 용지보상 및 사업추진(36개월)                  : `23.  1. ~ `25. 12.

2022년도 유관기관 투자사업 계획(도로)

기관명	사업명	사업량 (km)	사업비(백만원)					비고 (기간)
			총사업비	기투자	‘21투자	‘22예산	이후
합계	17개 사업	15.30	157,903	720	5,625	7,554	144,004
남 원 국 토 관 리 사무소	소계(5개 사업)	1.51	7,119	20	1,464	3,130	2,505
	국도24호 풍촌2지구 위험도로	0.4	900	10	78	100	712	`21~`23
	국도24호 풍촌3지구 위험도로	0.6	2,483	10	180	500	1,793	`21~`23
	국도24호 화정교 재가설	0.02	1,780	-	500	1,280	-	`21~`22
	국도 19호(산동 월석) 위험도로	0.23	500	-	-	500	-	`21~`22
	국도 19호 산동 태평교차로	0.26	1,456	-	706	750	-	`21~`22
전 라 북 도 도 로 관 리 사업소	소계(10개 사업)	2.99	8,684	700	3,903	2,381	1,700
	`21년 지방도 수해 복구(주천호경)	0.4	958	-	958	-	-	`21~`22
	`21년 지방도 수해 복구(주천 고기 외 2)	0.6	926	-	926	-		`21~`22
	국지도 60호(산내 대정) 지방도 구조개선	0.18	1,500	100	800	600	-	`20~`22
	국지도 60호(산내 대정) 회전교차로	0.46	250	-	-	250	-	`20~`22
	지방도 861호(산내 장항) 위험도로 구조개선	0.1	600	100	500	-	-	`20~`22
	지방도 745호(대강 월탄) 위험도로 구조개선	0.4	700	-	100	600	-	`21~`22
	지방도 721호(보절 신파) 위험도로 구조개선	0.2	500	500	-	-	-	`20~`22
	국지도 60호(산내 백장) 소규모 구조개선	0.17	400	-	400	-	-	`21~`22
	지방도 730호(송동 장국) 소규모 구조개선	0.12	250	-	19	231	-	`21~`22
	위임국도 13호 대강 수홍 오르막차로	0.36	2,600	-	200	700	1,700	`21~`23
익산청	소계(2개 사업)	10.8	142,100	-	258	2,043	139,799	-
	국 지 도 60호 (주천 ~ 고기) 시설개량	5.9	94,100	-	258	1,643	92,199	`21~`25
	국 도 24호 (이백~운봉) 시설개량	4.9	48,000	-	-	400	47,600	`21~`25

지방하천 정비사업 현황(총괄)

□ 개    요

◦ 계    획 : 21개 지구 / 98.43㎞ / 190,771백만원

◦ 기 투 자 : 15개 지구 / 48.79㎞ / 123,612백만원

◦ 시 행 중 :  3개 하천 / 21.36㎞ / 66,351백만원(`22년 : 10,000백만원)

- `23 완공 : 2개 지구,  `25 완공 : 1개 지구

하천별	지구별	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2022	2023이후
합 계	3개소	21.36	66,351	39,508	10,000	16,843	58
□풍 천	소 계	5.50	37,351	28,308	5,000	4,043	89	`14 ~ `23
	청계지구	0.88	6,961	6,961	0	0	100	`17년준공
	풍천지구	4.62	30,390	21,347	5,000	4,043	86	`18 ~ `23
□원천천	신촌~주천	13.70	23,583	11,200	4,000	8,383	69	`17 ~ `23
□람 천	인월지구	2.16	5,417	-	1,000	4,417	15	`22 ~ `25

□ 추진실적

◦ 풍   천 (인월·두락·의지) : 4차분 추진 중 (의지지구)	/ 공정률 81%

◦ 원천천 : 3차분 추진 중(종단교, 행정교 등)	/ 공정률 67%

◦ 람  천 (인월지구) : 실시설계 완료 – 전라북도(공항하천과)

□ 금후계획

◦ 2023년 완료 : 2개 지구(풍  천, 원천천)

- 2022년 10월 람천(인월지구) 신규사업 발주 예정

◦ 2025년 완료 : 1개 지구(람  천)

□ 풍천 지방하천 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면 일대리 ~ 남원시 인월면 취암리 지내

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=5.50km

◦ 사업기간 : 2014 ∼ 2023년(10개년)

◦ 총사업비 : 37,351백만원(국비 8,028, 도비18,118, 시비 11,205)

◦ 재원투자계획

(단위:백만원)

구 분	하천명	사업량 (km)	사 업 비					비 고
			재원	계	기투자	2022	2023
합 계				37,351	28,308	5,000	4,043
지방 하천	풍 천	하천정비 L=5.5km	국비	8,028	8,028	-	-	공정률 81%
			도비	18,118	11,812	3,500	2,806
			시비	11,205	8,468	1,500	1,237

□ 추진 실적

◦ 청계지구 준공	: ‘14.  5. 26 ~ ‘17.  7.  9

◦ 총사업비 변경 승인(부산청 : 낙찰차액 반납)	: ‘17. 11. 28

- M.P : 38,193백만원 (국비 19,096, 도비 7,639, 시비 11,458)

⇒ 변경 : 37,351백만원 (국비 18,676, 도비 7,470, 시비 11,205) / 842백만원 감

◦ 풍천 지방하천 정비공사(총괄분) 시행      : ‘18. 10. 4

- 시공사 : (주)장안종합건설 대표 소재철(전주 소재) / 건설사업관리 : (주)건화

◦ 풍천지구(1차분,2차분) 공사 준공	: ‘19. 12. 23 ~ ‘21. 9. 7.

◦ 풍천지구(3차분) 공사 추진	: ‘21.  5. 26. ~

◦ 풍천지구(4차분) 공사 추진	: ‘22.  4. 19. ~

- 하천정비(인월지구, 의지지구) 교량3개소(일대2, 의지2, 의지3교) 등

□ 금후 계획

◦ 전체분 공사 준공	:‘23. 6.

□ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 신촌동 요천 합류부 ~ 주천면 고기리 일원

◦ 사 업 량 : 관광자원화 친수공간 조성 L=13.7㎞

- 축제 2.78km, 호안 5.16km, 자전거길 6.6㎞, 보․낙차공 12개소, 교량 9개소 등

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2023년 (7개년)

◦ 총사업비 : 23,583백만원(국비 1,600, 도비 14,908, 시비 7,075)

◦ 재원투자계획

(단위:백만원)

구 분	하천명	사업량 (km)	사 업 비					비 고
			재원	계	기투자	2022	2023
합 계				23,583	11,200	4,000	8,383
지방 하천	원천천	하천정비 L=13.7km	국비	1,600	1,600	-	-	공정률 67%
			도비	14,908	6,240	2,800	5,868
			시비	7,075	3,360	1,200	2,515

◦ 시 공 사 : 영록건설(주) 대표 서오성(전주 소재) / 건설사업관리 : ㈜건화

□ 추진실적

◦ 국토교통부 하천사업 제안공모 선정	: ‘15. 10. 5. ~ 12. 31.

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진                : ‘16.  9. 28.

◦ 지방건설기술심의(전라북도)	: ‘19.  9. 23.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의 승인	: ‘19. 11.  4.

- 당초 MP상 18,821백만원 → 23,583백만원 (증 4,762 / 증 25.3%)

◦ 시설공사 준공(1차분·2차분)	: ‘19. 12. 23 ~ 22. 01.

◦ 시설공사 착공(3차분)	: ‘22. 1. 18. ~

□ 금후계획

◦ 전체분 공사	준공	: ‘23. 6.

□ 람천 지방하천 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 인월면 인월리 일원

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=2.16㎞

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2025년(4개년)

◦ 총사업비 : 5,417백만원(도비 3,792, 시비 1,625)

◦ 재원투자계획

(단위:백만원)

구 분	하천명	사업량 (km)	사 업 비					비 고
			재원	계	기투자	2022	2023
합 계				5,417	270	1,000	4,147
지방 하천	람 천	하천정비 L=2.16km	국비	-	-	-	-	설계완료 행정절차 이행중 (농지전용)
			도비	3,792	270	700	2,822
			시비	1,625	-	300	1,325

□ 추진실적

◦ 지방하천정비사업 종합정비계획 반영	: `16. 11.

◦ 실시설계용역착수 (전라북도)	: `20.  5. 11.

◦ 주민설명회(1차, 인월면사무소)	: `21.  3. 24.

◦ 주민설명회(2차, 인월면사무소)	: `21.  9. 15.

◦ 관련계획 추가검토 요청(전북도⇒용역사)           : `21. 12.

◦ 실시설계 완료                                   : `22.  8.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 낙동강유역환경청에서 수립중인「남강상류권역 하천기본계획(변경)」계획홍수위 변경으로 권역 내 지방하천 람천 계획홍수위 재검토로 실시설계 지연(※ 당초 : `17년 내 → 변경 : `20년 내 강우자료 추가분석)

□  `22년 하반기 공사 발주를 위해 용지보상 우선 추진 및 우리시 협의   각종 행정절차(농지·산지·취수시설 등) 적극 지원

□ 금후계획

◦ 실시설계도서 성과품 납품(전북도→남원시)         : ‘22. 10. ~

◦ 사업 발주(전체분 및 1차분)	: ‘22. 11. ~

소하천 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 30개 지구 / 61.24㎞ / 110,775백만원

◦ 기 투 자 :  8개 지구 / 13.75㎞ /  23,512백만원

◦ 시 행 중 :  3개 지구 /  5.85㎞ /  22,965백만원 (`22년 : 7,152백만원)

- `23 완공 :  3개 지구

◦ 재원투자계획

지구별	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2022	2023이후
합 계	3개 하천	5.85	22,965	12,264	7,152	3,549	85
당동천	아영 봉대	2.69	11,511	8,559	2,952	-	100	`18~ `23
과립천	이백 과립	1.88	4,348	1,660	1,600	1,088	75	`20~ `23
산곡천	향 교 동	1.28	7,106	2,045	2,600	2,461	65	`20~ `23

□ 추진실적

◦ 당  동  천 : 3차분 추진 (호안정비 L=0.6km) 및 교량 2개소 등	/ 공정률 75%

◦ 과  립  천 : 1차분 추진(과립 2교) 및 토지보상 병행 추진	/ 공정률 45%

◦ 산  곡  천 : 1차분 추진(호안 L=0.35km) 및 토지보상 병행 추진	/ 공정률 40%

□ 금후계획

◦ 2023년 완료 : 3개 사업[당동천, 과립천, 산곡천]

하천 재해복구사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 142개 지구 / 49,906백만원

◦ 위    치 : 국가하천 조산지구 외 141개소

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2022년 (3개년)

(단위 : 백만원)

구 분	개소수	계	국 비	도 비	시 비	비 고
합 계	142	49,906	46,837	268	2,801
국가하천	9	2,765	2,765	-	-	대행사업
지방하천	23	8,294	7,832	231	231	-
소 하 천	35	5,313	5,239	37	37	-
지방하천 개선복구	2	19,848	19,848	-	-	주촌천(86%) 효촌천(70%)
소하천 개선복구	2	11,153	11,153	-	-	감동천(78%) 서당천(67%)
‘21수해조사 누락지구	61	2,173	-	-	2,173
‘22수해조사 누락지구	10	360	-	-	360

□ 추진실적

◦ 하천 응급복구공사 추진(시비)	: ‘20.  8. ~ 10.

◦ 재해복구사업 실시설계 용역 추진	: ‘20.  9. 11. ~

◦ 예산 성립전 사용승인(13,045백만원)	: ‘20. 11. 17.

◦ 개선복구사업 실시설계 용역 추진	: ‘20. 11. 25. ~

◦ 재해복구사업 공사 추진	: ‘20. 12.  7. ~

- 재해복구사업 142개소 중 138개소 공사완료, 4개소 공사 추진 중(복구율 95%)

◦ `21년 수해조사 누락지구 공사 완료(61개소)	: ‘21.  6. ~ 12.

◦ `22년 수해조사 누락지구 공사 완료(10개소)	: ‘22.  1. ~ 4.

◦ 옥택천 지방하천 재해복구사업 공사완료	: ‘21. 5. ~ `22. 5.

□ 금후계획

◦ 하천 개선복구사업(4개소) 공사완료	: ‘22. 12.

- 주촌천, 효촌천, 감동천, 서당천

하천 유지관리사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천‧지방하천‧국가하천 일원

◦ 총 계 획 : 관내 352개 하천 (소하천 310, 지방하천 40, 국가하천 2) 유지관리

◦ 재원투자계획

(단위:백만원)

사 업 명	대상하천	사 업 량	사업비(백만원)	비 고
합 계		107개 개소	5,749
국가하천 유지보수	국가하천	18개 개소	937	국 937
기성제 유지관리	지방하천	35개 개소	2,000	시 1,000 도 1,000
하천 유지관리	소 하 천	54개 개소	2,812	시 2,760 도 52

□ 추진 실적

◦ 국가하천유지보수사업 추진 (18개소)	: ‘22. 1. ~

- 유지관리(9개소) / 섬진강 자전거도로 유지보수사업 등 7개소 완료 및 2개소 추진 중

- 시특법시설물(4개소) / 하천 시특법시설물(제방 등) 정밀안전점검 및 보수공사 완료

- 제초작업(5개소) / 섬진강‧요천 자전거도로 제초작업 5개소 완료

◦ 기성제유지관리사업 추진 (35개소)	: ‘22. 1. ~

- 유지관리(14) / 대산면 옥율천 등 14개소 중 6개소 완료 및 8개소 추진 중

- 하도준설(9) / 운봉읍 람천 등 9개소 공사 완료

- 수목제거 및 제초작업(12) / 송치천 등 12개소 하천 수목제거 및 제초작업 완료

◦ 하천유지관리사업 추진 (54개소)	: ‘22. 1. ~

- 유지관리(44) / 금지면 도하천 등 44개소 중 33개소 완료 및 11개소 추진 중

- 하도준설(10) / 송동면 장포천 등 10개소 중 7개소 완료 및 3개소 추진 중

□ 금후계획

◦ 2022년 하반기 하천 및 기성제 유지관리사업 공사완료	: ‘22.  11.

◦ 2022년 하반기 국가하천(섬진강‧요천) 유지관리 공사완료	: ‘22.  11.

◦ 2023년 상반기 유지관리사업 실시설계 추진	: ‘22.  11. ~

□ 하천 유지관리사업 추진내역(2022년)

사 업 명		사업 대상	사 업 량 / 집 행 량	사업비 (백만원)	추 진 상 황
합 계			13개 분야 / 107개소	5,749	완 료 81개소 공사중 26개소
하천 유지관리		소 하 천	6개 분야 / 54개소	2,812	완 료 40개소 공사중 14개소
	소하천 유지관리		상동천 등 20개소 / 1.29㎞	600	완 료 15개소 공사중 5개소
	소하천 하도준설		장포천 등 10개소 / 0.72㎞	500	완 료 10개소
	소규모시설 숙원사업		도하천 등 3개소 / 0.81㎞	305	완 료 3개소
	주민참여예산		취암천 등 14개소 / 3.76㎞	952	완 료 7개소 공사중 7개소
	소규모 민원해결사업		용동천 등 7개소 / 0.63㎞	280	완 료 5개소 공사중 2개소
	재해위험시설 정비사업		소하천 정비 / L=0.065km	175	공정률 15% (함 파 우)
기성제 유지관리		지방 하천	3개 분야 / 35개소	2,000	완 료 29개소 공사중 6개소
	지방하천 유지관리		옥율천 등 15개소 / 1.52㎞	950	완 료 9개소 공사중 6개소
	지방하천 하도준설		람천 등 9개소 / 5.29㎞	950	완 료 9개소
	지방하천 수목제거		수목 및 잡목제거 11개소 (요천 외 8개 지방하천)	100	완 료 11개소
국가하천 유지보수		국가 하천	4개 분야 / 18개소	937	완 료 12개소 공사중 6개소
	하천시설물 유지보수		제방 및 자전거도로 유지보수 8개소	613	완 료 2개소 공사중 6개소
	시특법 하천시설물 정밀안전점검		정밀안전점검 용역 4건	132	완 료 4개소
	자전거도로제초		자전거도로 제초작업 5건	160	완 료 5개소
	국가하천 자전거도로 쉼터 유지관리		화장실 및 쉼터 유지관리 1식	32	완 료

육상골재채취 허가 및 관리

(계속사업)

□ 현    황

◦ 육상골재 채취허가 – 11개 지구(복구중 : 7, 채취중 3, 착수전 1)

연번	위 치	허 가 내 용 (면적㎡/채취량㎥)		허가 기간	신 청 자	복구예치금 (천원)	비 고
	합 계 (11개 지구)	147,380.2
		267,141
1	보절면 진기리 1506-1번지 외 9필지	면 적:	17,517.5	2018.01.24. ~ 2019.11.30.	(유)모아산업 조정숙	461,284 증권	복구준공검사중
		채취량:	56,159
2	운봉읍 준향리 826-9번지 외 1필지	면 적:	4,022	2018.04.19. ~ 2022.12.30.	(유)금성산업개발 황필승	153,197 증권	복구중
		채취량:	3,620
3	사매면 인화리 679-2번지 외 9필지	면 적:	22,404	2019.04.19.~ 2021.12.31.	(유)삼창산업 윤영탁	473,490 증권	복구중
		채취량:	47,640
4	광치동 525-3번지 외 5필지	면 적:	8,080	2020.03.24.~ 2022.12.31.	(유)신광개발 이종신	139,515 증권	복구중
		채취량:	18,276
5	사매면 인화리 676-1번지 외 8필지	면 적:	16,927	2020.07.28.~ 2022.06.30.	(유)경희산업 채경숙	214,279 중권	복구중
		채취량:	20,130
6	사매면 오신리 872번지 외 11필지	면 적:	30,304	2021.02.04.~ 2022.12.30.	(유)선진산업개발 송한주	302,117 중권	복구중
		채취량:	21,850
7	주천면 주천리 1197번지 외 3필지	면 적:	7,730	2021.07.07.~ 2022.12.31.	㈜황금개발 김정수	459,668 중권	채취중
		채취량:	19,629
8	주천면 주천리 1128번지 외 4필지	면 적:	4,950	2021.10.05.~ 2022.09.30.	(유)선진산업개발 송한주	98,834 중권	채취중
		채취량:	5,906
9	덕과면 덕촌리 878번지 외 3필지	면 적:	7,555	2021.12.16.~ 2022.12.31.	(유)미영진개발 김승희	2,578,565 증권	착공전
		채취량:	20,668
10	광치동 230번지 외 15필지	면 적:	21,171	2021.12.17.~ 2023.04.30.	금강건재산업(유) 김창환	205,000 증권	복구중
		채취량:	37,369
11	보절면 진기리 1505-8번지 외 3필지	면 적:	6,719.7	2022.02.04.~ 2022.12.31.	(유)모아산업 조정숙	148,104 증권	채취중
		채취량:	15,894

2022년도 유관기관 투자사업 계획(하천)

기관명	사업명	사업내용	사업비(백만원)					비고 (기간)
			총사업비	기투자	‘21투자	‘22예산	이후
합계	3개 사업		85,092	60	1,443	5,327	78,262
영산강유 역 환경청	섬진강 남원지구 하천환경정비사업 실시설계용역	‧ 섬진제 보축 L=2,728m ‧ 대강제 보축 L=1,751m ‧ 사석제 보축 L= 433m ‧ 송대천 정비 L=2,397m	32,000 (추정)	30	850	591	30,529	`22 ~ `26
	섬진강 대강지구 하천환경정비사업 실시설계용역	‧ 대강제 보축 L=1,187m ‧ 도통제 보축 L= 650m ‧ 세전제 보축 L= 700m ‧ 수지천 보축 L=2,233m ‧ 장포소하천 교량신설 1개소	30,000 (추정)	30	583	736	28,651	`22 ~ `26
	섬진강 곡성지구 하천환경정비사업	‧ 요천대교 자전거도로 신설 L=264m ‧ 요천대교 좌안 부체도로 신설 L=156m ‧ 세전낙차공 신설 L=430m	23,092	-	10	4,000	19,082	`22 ~ `26

※ `22년 이후 신규사업 지속 발굴을 위해 환경청, 익산청, 전북도 등 관련계획 사업반영 적극 대응 및 유관기관과 협조체계 유지로 사업추진 원활 도모(주민 건의사항 신속 해결 등)