2022. 10.

2022년 주요업무 추진실적

상 수 도 사 업 소

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2022년 주 요 업 무  결산

□ 2022년 주요업무 추진실적

◦ 월락정수장 현대화 전면 개량사업

◦ 농어촌생활용수 개발사업

◦ 광역상수도 마을권 사업

◦ 노후 상수관 교체공사

◦ 누수다발지역 상수관 개선공사

◦ 타 부서 병행 사업

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축 사업

◦ 노후 옥내급수관 개선 지원 사업

◦ 소규모수도시설 정비사업

◦ 소규모수도시설 지하수 영향조사

◦ 상수도공기업의 안정적 재정 확충

일  반  현  황

□ 기    구

									상수도사업소장
									박 영 재
수도경영담당					급 수 담 당							수도시설담당									누수방지담당
박 영 주					홍 성 봉							문 인 구									김 상 규
∘상수도 공기업 경영 ∘특별회계 재정운영 ∘상수도 사용료 검침 및 요금부과 징수					∘광역상수도 마을권 급수 공사 ∘마을상수도 시설 관리 ∘개인 급수공사							∘월락정수장 개량사업 ∘광역상수도 수수사업 ∘정수장 및 배수지운영관리 ∘상수원 보호구역 관리									∘상수도 관망 유지 관리 ∘노후 급·배수관 교체 ∘노후 계량기 시설 개량 ∘누수관로 복구

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	5	6	4	7
현 원	22	1	9	6	5	1	12 (청경3,공무9)
증 감	△1	-	4	-	1	△6

□ 2022년 예산규모  : 31,275백만원

				＜2022 예산 >			(단위 : 백만원)
	구 분		2022년		2021년			증 감(%)
	합 계		31,275		29,066			2,209(7.5%)
	일반회계		1,037		901			136(15.0%)
	특별회계		30,238		28,165			2,073(7.3%)

※ 일반회계 자본전출금(12,000백만원) 미포함

▷ 2022년 특별회계 : 30,238백만원

					＜세 입＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2022년		2021년			증 감(%)
	합 계			30,238		28,165			2,073(7.3%)
	자체수입			8,052		8,264			△212(2.5%)
	의존수입		국 비	10,186		11,201			△1,015(9.0%)
			지원금 (자본전출금)	12,000		8,700			3,300(37.9%)

					＜ 세 출 ＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2022년		2021년			증 감(%)
	합 계			30,238		28,165			2,073(7.3%)
	사업비		소계	25,584		23,459			2,125(9.0%)
			투자사업	23,456		22,029			1,427(6.4%)
			경상사업	2,128		1,430			698(48.8%)
	비사업		소계	4,654		4,706			△52(1.1%)
			행정운영	4,364		4,584			△220(4.7%)
			예 비 비	290		122			168(137.7%)

※ 행정운영 : 인건비 + 기본경비 + 광역정수비

□ 급수현황

(’21. 12. 31. 기준)

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	1인1일 급수량(ℓ)	평균생산량 (㎥/일)	유수율 (%)
80,324	76,106	94.7	347	26,220	73.2

□ 수도시설 현황

◦ 생 산 시 설 : 39,800㎥/일(월락정수장 15,000/광역상수도 24,800)

◦ 상수도 관로 : 1,086㎞(도수․송수․배수관 586, 급수관 500)

◦ 배  수  지 : 10개소(29,250㎥)

◦ 가  압  장 : 50개소

◦ 감  압  변 : 38개소

◦ 검침급수전 : 29,721전

□ 상수원 보호구역 현황

◦ 위    치 : 월락․도통․신촌․고죽동, 이백면

◦ 지정면적 : 414,525㎡

◦ 지 정 일 : 1985. 12. 24.(0.418㎢) → 2008. 12. 12.(0.415㎢)

□ 소규모 수도시설 현황

시설수 (개소)	규 모 별		급수인구	비 고
	마을상수도	소규모급수시설
54	31	23	4,050명 (2,137세대)	□마을상수도 - 20㎥/일 이상 500㎥/일 미만 □소규모급수시설: 20㎥/일 미만

□ 상수도 관로                                 (단위:km)

구분	총연장	재 질 별				매설연한별			비고
		금속	PE.PVC	내충격수도관	기타	20년미만	20~29년	30년이상
계	1,085	230	191	654	10	948	53	84
도수관	0.1	-	-	-	0.1	0.1	-	-
송수관	15	10	2	3	-	12	2	1
배수관	570	214	2	346	8	524	39	7
급수관	500	6	187	305	2	412	12	76

2022년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축 ◦ 상수도체납요금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확충 ◦ 월락정수장 현대화 전면 개량사업 추진 ◦ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축 ◦ 안정적 물 공급을 위한 광역 및 마을상수도 사업 추진 ◦ 맑은 물 공급을 위한 노후 및 누수다발지역 상수관 개선 사업 추진

□ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축

◦ 상반기 체납금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확충 : 392백만원

◦ 급수지역 확대로 세입확충 도모 : 362백만원(395전)

◦ 상수도 경영효율화 사업 공모 선정 : 3억원

- 보절면 안평‧용평 광역상수도 공급 사업 추진

□ 월락정수장 현대화 전면 개량사업 추진(공정률 57%)

◦ 월락정수장 개량사업 착공                        : `19. 12. 16.

◦ 월락정수장 개량사업(3차분) 착공                  : `21. 4. ~

- 정수지 및 여과지 건축동 신설 등

- 여과지·정수지 시운전 완료 및 정수생산         : `22. 7. ~

- 착수정 신설 및 응집침전지 추진                 : `22. 7. ~ `22. 12.

□ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축

◦ 완료(4) : 주천 배촌·덕촌지구, 수지 고평지구, 구인월지구, 아영 오산지구

◦ 추진 : 아영 오산지구(2지구) 추가세대 / 실시설계용역 추진 중

◦ 지리산권역(인월·아영·산내) 상수도공사 ⇒  실시설계용역 시행 중(’21. 11 ~ ‘22. 11)

□ 안정적 물 공급을 위한 광역 및 마을상수도 사업 추진

◦ 광역상수도 마을권 급수사업 (3개지구)

- 완료(2) : 산동 부절마을, 운봉 덕산마을

- 추진(1) : 이백 효촌마을

◦ 광역상수도 마을권 계량기 설치공사 (3개마을, 171가구)

- 완료(1) : 인월 구인월마을(55가구)

- 추진(2) : 주천 덕촌(59가구)·배촌(57가구) 마을

◦ 소규모 수도시설 정비사업 (7개소)

- 완료(4) : 인월 성산, 산내 원천·원백일, 왕정 상정

- 추진(3) : 산내 와운·부운·삼화

□ 맑은 물 공급을 위한 노후 및 누수다발 상수관 개선사업 추진

◦ 노후 수도미터 1,688전 교체 완료(당해년도 계획 교체율 100%)

◦ 노후 상수관 교체공사 추진 중 (4개소 / L=6.3㎞)

- 완료(2) : 도통지구, 오거리 주변(사고)

- 추진(2) : 금동지구, 운봉 삼산 (공정율 40%)

◦ 누수다발지역 상수관 개선공사 완료 (1개소 / L=1.5㎞)

- 송동 안계

◦ 타 부서 병행 상수관 정비 사업 추진 중(2개소 / L=2.8㎞)  ⇒ 공정율 90%

- 송동 동서내, 어현동 함파우

◦ 긴급 누수복구공사 319개소 완료

2022년 주요업무 추진실적

월락정수장 현대화 전면개량 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 555번지 지내

◦ 사업내용 : 정수장 시설 전면개량 Q=15,000톤/일

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5개년)

◦ 총사업비 : 34,116백만원 (국비 17,058, 도비 3,411, 시비 13,647)

(단위 : 백만원)

구분	합계	재원투자내역					‘23이후	비고
		소계	‘19	‘20	‘21	‘22
합계	34,116	34,116	2,434	9,738	10,554	11,390	-
국비	17,058	17,058	1,217	4,869	5,277	5,695	-
도비	3,411	3,411	243	974	1,055	1,139	-
시비	13,647	13,647	974	3,895	4,222	4,556	-

※ 환경부 국비 교부(`19~`22년)완료에 따른 `23년 예산 미편성.(`22년도에 `23년 사업비 선교부)

`23년 예산은 `22년 잔여예산을 명시이월하여 사용.

□ 추진실적

◦ 월락정수장 개량사업 착공                            : `19. 12. 16.

◦ 월락정수장 개량사업(1차분) 준공                      : `19. 12. ~ 20. 5.

- 기존자재창고 및 완속여과지 철거

◦ 월락정수장 개량사업(2차분) 준공                      : `20. 4. ~ 21. 5.

- 급속여과지 및 관리동 신설, 정수지 가시설 등

- 관리동 신설 및 입주

◦ 월락정수장 개량사업(3차분) 착공                      : `21. 4. ~

- 정수지 및 여과지 건축동 신설 등

- 여과지·정수지 시운전 완료 및 정수생산             : `22. 7. ~

- 착수정 신설 및 응집침전지 추진                     : `22. 7. ~ 22. 12.

※ 전체 추진 공정률 : 57%

□ 금후계획

◦ 착수정 및 응집침전지 추진                           : `22. 12.

◦ 취수펌프장 추진                                     : `22. 11. ~ 23. 6.

◦ 주차장, 관리도로, 조경, 부대공 등 전체공사 완료       : `23. 5. ~ 11.

농어촌생활용수 개발사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 운봉읍, 주천면, 수지면, 덕과면, 산동면, 인월면, 아영면, 산내면 일원

◦ 사업지구 : 8개 지구, 43마을

- 농어촌생활용수 개발사업 35마을, 자연방사성물질 검출지구 8마을

◦ 사업내용 : 배수관로 L=56.36km, 마을 지선관 L=17.96km,      송수관로 L=12.1km, 배수지 1개소

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2025년 (8개년)

◦ 총사업비 : 26,385백만원 (국비 2,844, 도비 15,626, 시비 7,915)

- 기투자액 : 10,048백만원 (국비 2,844, 도비 4,190, 시비 3,014)

- 2022년 사업비 : 2,137백만원 (도비 1,496, 시비 641)

- 이후 사업비 : 14,200백만원 (도비 9,940, 시비 4,260)

□ 추진실적

◦ 공사완료(24마을)

- 자연방사성물질 검출지구(8마을) : 회덕, 노치, 주촌, 고촌, 내기, 안곡, 덕촌, 배촌

- 덕과지구(3마을) : 호복동, 다산, 금계

- 산동 대상지구(3마을) : 대상, 요동, 상신

- 구인월 지구(2마을) : 구인월, 달오름

- 수지 고평지구(4마을) : 고정, 진곡, 양촌, 마륜

- 아영 오산지구(4마을) : 오산, 하성, 상성, 구상

◦ 실시설계용역 추진 중

- 아영 오산지구(2지구) (구상마을 추가세대)

◦ 지리산권역(인월·아영·산내) 실시설계용역 시행 중(19마을)    : `21. 11. ~ `22. 11.

- 인월(2마을) : 덕실, 도장

- 아영(2마을) : 부동, 송리

- 산내(15마을) : 하황, 백일, 중기, 대정, 매동, 장항, 원천, 입석, 삼화, 중황, 상황, 내령, 외령, 백장, 원백일

□ 금후계획

◦ 아영 오산지구(2지구) 농어촌생활용수 개발사업 시행     : `22. 10. ~

◦ 지리산권역 농어촌생활용수 개발사업 추진             : `23. ~ `25.

광역상수도 마을권 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내 운봉읍 외 4개 면(주천, 산동, 이백, 인월)

◦ 사 업 량

- 급·배수관 3지구 L=2.6㎞ (운봉, 덕산, 산동 부절, 이백 효촌)

- 3개소 계량기설치 (171가구 / 인월 구인월, 주천 덕촌·배촌)

◦ 사 업 비 : 700백만원(관로공사 300, 계량기 설치 400 / 시비100%)

◦ 사업기간 : `22. 1. ~ 12.

□ 추진실적

◦ 2022년 사업 계획 수립 및 실시설계용역 완료	: `21. 11. ~ `22. 3.

◦ 산동 부절 광역상수도 배수관 매설공사완료	: `22.  3. ~ 6.

◦ 운봉 덕산마을 광역상수도 급수공사 완료	: `22.  3. ~ 8.

◦ 이백 효촌(용재골) 광역상수도 배수관 매설공사	: `22.  5. ~

- 환경사업소와 협의 및 사유지 점용허가 완료

◦ 마을권 계량기 설치공사 시행

- 주민설명회 개최(구인월, 덕촌, 배촌)	: `22.  3. ~ 4.

- 계량기 설치공사 완료(구인월)	: `22.  5. ~ 7.

□ 금후계획

◦ 이백 효촌 광역상수도 급수공사 완료	: `22. 11.

◦ 마을권 계량기 설치 공사 완료 (주천면 배촌,덕촌) : `22. 12.

노후 상수관 교체 공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수구역

◦ 사업기간 : 2013년 ∼ 2022년(10년)

◦ 사업규모 : 노후 상수관 교체 135㎞

◦ 총사업비 : 22,000백만원(시비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2022년	2023년 이후	비 고
22,000	20,386	1,614	-

□ 추진실적

◦ `21년까지 관로 교체 L=130.5㎞(96.7%)

- 동지역 89.1㎞, 타공사 병행 28.4㎞, 타부서 13.0㎞, 재해복구 3.0㎞

◦ `22년 노후 상수관 교체 공사 추진 4개소(L=6.3㎞)

- 도통지구(2.1㎞), 금동지구(2.1㎞), 오거리 주변(0.8㎞), 운봉 삼산(1.3㎞)

· 도통지구 공사 완료	: `22. 2. 18. ~ 6. 27.

· 오거리 주변 공사 완료	: `21. 5. 11. ~ `22. 8. 26.

· 금동지구 공사 착공(공정률 : 40%)	: `22. 6. 28.

· 운봉 삼산 공사 착공(공정률 : 30%)	: `22. 8. 10.

□ 금후계획

◦ 운봉 삼산 공사 완료	: `22. 11.

◦ 금동지구 공사 완료	: `22. 12.

누수다발지역 상수관 개선 공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수구역

◦ 사업기간 : 2014년 ∼ 2022년(9년)

◦ 사업규모 : 누수 발생 노후관(PVC, PE관 등) 교체 / L=56.0㎞

◦ 총사업비 : 8,230백만원(시비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2022년	2023년 이후	비 고
8,230	7,860	370	-

□ 추진실적

◦ `21년까지 관로 교체 L=54.7㎞(97.6%)

- 읍·면지역 38.2㎞(이백면 외 7개소)

- 동지역 16.5㎞(왕정동 외 5개소)

◦ `22년 누수다발지역 상수관 개선 공사 시행 1개소

- 송동 안계(1.5㎞)

· 공사 착공	: `22. 3. 23.

· 공사 완료	: `22. 6. 20.

타 부서 병행 사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 어현동 함파우 마을, 송동면 동서내 마을

◦ 사업기간 : 2022년

◦ 사업규모 : 노후 상수관 교체 L=2.8㎞

◦ 총사업비 : 600백만원(시비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2022년	2023년	비 고
600	-	600	-

□ 추진실적

◦ 함파우마을(L=0.8㎞) : 하수관로 정비사업 병행 / 공정률 90%

- 공사 착공 및 관로매설 완료	: `22. 3. 2. ~

◦ 송동 동서내(L=2.0㎞) / 공정률 95%

- 공사 착공 및 관로 매설 재포장 완료	: `22. 4. 12. ~

□ 금후계획

◦ 함파우마을 공사 완료 (물탱크 설치)	: `22. 10.

◦ 송동 동서내 마을 공사 준공	: `22. 10.

스마트 관망관리 인프라 구축사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수구역

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년(2개년)

◦ 사업내용 : 재염소 투입 설비, 정밀여과장치, 스마트 미터링, 소규모 유량·수압감시 시스템, 다항목 수질 측정 장치 등

◦ 총사업비 : 5,159백만원(국비 70%, 시비 30%)

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자 (~‘18)	재원투자내역					‘23이후	비고
			소계	‘19	‘20	‘21	‘22
합계	5,159	-	5,159	-	-	2,930	2,229	-
국비	3,611	-	3,611	-	-	2,180	1,431	-
시비	1,548	-	1,548	-	-	750	798	-

□ 추진실적

◦ 스마트 관망관리 기본계획 수립 용역 추진(환경부)	: `20. 1. ~ `21. 2.

◦ 실시설계용역 착수	: `21. 3. 22.

◦ 선진지 벤치마킹

- 전주, 정읍(수자원공사 금강유역본부·정읍권지사	: `21. 5. 12.

- 세종(스마트 워터 시티 사업)	: `21. 8. 18.

- 광주(스마트 미터링 관련)	: `21. 9. 16.

- 대구(달성군 스마트 관망관리사업, 국가 물산업 클러스터)	: `21. 10. 7.

◦ 배수지별 관말부 잔류염소 측정·분석	: `21. 8. ~ 10.

◦ 환경부 기본계획 변경 협의 추진	: `22. 1. ~ 6.

► 우리 시에 적합한 기술별 설치대상, 규모, 수량 조정에 따른 환경부 협의

◦ 기술별 자재 선정 및 실시설계 반영	: `22. 7. ~ 9.

□ 금후계획

◦ 원가심사 완료	: `22. 9.

◦ 공사 발주 및 추진	: `22. 10. ~

노후 옥내급수관 개선 지원사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 추진목적 : 노후된 주택을 대상으로 오래된 옥내급수관의 교체를 통해 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하고자 함

◦ 사업기간 : `22. 3. ~ 12.

◦ 사 업 량 : 노후화 건축물 대상 약 40세대

◦ 사 업 비 : 90백만원(국비 54백만원, 시비 31.5백만원, 자부담 5%)

◦ 사업절차 : 신청자 접수 ⇀ 공사비 적정성 검토(대행:한국상하수도협회)

⇀ 지원대상자 및 지원액 통보 ⇀ 공사시행 및 지원금 지급

□ 추진실적

◦ 국가보조금 교부 결정 및 통지	: `22. 5.

◦ 업무대행 선정(한국상하수도 협회)	: `22. 5.

◦ 현장홍보(춘향골시장 및 도통,월락동 일대)        : `22. 8.

□ 쟁점 및 대책

◦ 지속적인 홍보에도 불구하고 단독주택의 경우 사업신청자가 적고,  중위소득(45~100%) 기준에 적합한 사업 대상자를 선정하기 어려움.

□ 단독주택의 사업대상자가 드물 경우, 공용배관 개선사업으로 사업범위를 확대하여 추진

□ 금후계획

◦ 옥내급수관 개선지원 사업 신청자 접수	: `22. 5. ~ `22. 10.

◦ 사업확대 추진(공사 시행, 준공 및 공사비지원)   : `22. 11. ~ `22. 12.

소규모 수도시설 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 대    상 : 남원시 관내 54개소(마을상수도 31, 소규모급수시설 23)

◦ 사업내용

- 신설(2개소) : 산내 와운(관정개발 및 이용시설공사), 인월 성산(이용시설공사)

- 정비(5개소) : 산내 원천(두수공), 원백일·부운·삼화(물탱크), 왕정 상정(관로개량)

◦ 사 업 비: 770백만원 [정비사업 570(도비400,시비170), 긴급복구 시비200)]

◦ 사업기간 : `22. 1. ~ 12월(연중)

□ 추진실적

◦ 2022년 사업 계획 수립 및 실시설계용역 완료	: `21. 11. ~ `22. 3.

◦ 산내 와운 관정개발 및 이용시설 공사 설계 완료 : `22. 1. ~ 5.

◦ 마을상수도 긴급복구 완료(5개소)	: `22. 2. ~ 6.

► 주생 상도·광촌, 아영 상성, 산내 달궁·반선

◦ 산내 원천(두수공)·원백일(물탱크) 정비공사 완료	: `22. 3. ~ 5.

◦ 인월 성산마을 이용시설공사 완료	: `22. 5. ~ 6.

◦ 왕정(상정) 정비공사 완료	: `22. 5. ~ 8.

□ 금후계획

◦ 소규모수도시설 정비공사 추진 및 완료	: `22. 11.

- 신설(1개소) : 산내면 와운(관정개발 및 이용시설공사)

- 정비(2개소) : 산내면 부운(물탱크)·삼화(물탱크)

◦ 누수 긴급복구 및 유지보수공사 추진(수시)       : `22. 1. ~ (연중)

소규모수도시설 지하수 영향조사

(신규사업)

□ 개    요

◦ 추진근거 : 지하수법 제7조에 의거 소규모수도시설의 지하수를 지속적으로                   사용하고자 할 경우 5년마다 지하수 영향조사를 법적(의무사항)                  으로 실시하여 연장 허가를 해야 함.

◦ 사업기간 : `22. 2. ~ 6.

◦ 사 업 량 : 지하수를 수원으로 사용하는 소규모수도시설 13개소

◦ 사 업 비 : 56백만원(시비)

□ 추진실적

◦ 지하수영향조사 용역설계 완료	: `21. 12.

◦ 지하수영향조사 용역 시행	: `22.  4. 15. ~ 6. 13.

◦ 용역 결과보고 및 연장허가 신청 완료(환경과)	: `22. 6. 20.

□ 금후계획

◦ 2023년 대상지 사전 조사	: `22. 10. ~ 12.

상수도공기업의 안정적 재정 확충

(계속사업)

□ 개    요

◦ (추진목표)  상수도 급수구역 확대와 요금 체납자에 대한 징수로 세입       목표 달성하여 건전 재정 운영 도모

◦ 연도별 세입 증감 내역

(단위 : 백만원)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	전년대비
세 입	15,142	18,596	26,285	28,165	30,238	7.3% 증

□ 전년도 대비 주요증감 요인(5.5억원 증)

- 월락정수장 현대화 전면 개량사업                   : 24억원 감

- 월락정수장 태양광 설치사업                       : 3.5억원 증

- 스마트 관망관리 인프라 구축 사업                 : 4.7억원 감

- 공기업특별회계 자본전출 및 순세계잉여금 등         : 30.7억원 증

□ 추진실적

◦ 과년도 사용료 체납금 징수활동 강화로 자주재원 확보 : 168백만원

◦ 현년도 체납특별징수 기간 운영(3회) : 단수 및 압류 예고 153건 / 224백만원

◦ 수도요금 징수내역(8.31.기준)

(단위 : 천원)

구 분	부 과 액	징 수 액	체 납 액	징 수 율
합 계	4,611,431	3,967,405	644,025	86.03%
현년도	4,288,960	3,798,979	489,980	88.58%
과년도	322,471	168,426	154,045	52.23%

※ 과년도 부과액 (322,471천원)은 2021. 12. 31. 이전 체납분

◦ 상수도 급수구역 확대로 인한 수입 확충(395전)         : 362백만원

◦  이자수입 및 영업외수입(불용품 매각수입 등)            :  96백만원

□ 금후계획

◦ 체납요금 특별 징수기간 지속 운영(매분기별)

- 고질 고액체납자 분류 관리, 담당구역별 책임 관리⇒행정처분(단수,재산압류 등)

◦ 예산 절감 시책발굴을 통한 경영 효율화 노력