2023. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

시정질문·5분발언 추진상황

기업지원과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2023년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 천연물 화장품 시험검사임상센터 건립

◦ 천연물 화이트바이오소재 생태환경 기반조성

◦ 화장품기업 브랜드마케팅 혁신지원

◦ 화장품 지식산업센터 운영

◦ (재)남원시화장품산업지원센터 운영

◦ 남원 옻칠 목공예 전시관 건립

◦ 제26회 남원시 전국 옻칠 목공예대전

◦ 옻칠 목공예산업 활성화

◦ 전통산업 홍보마케팅 사업

◦ LX드론활용센터 구축사업

◦ 항공산업(드론‧UAM) 클러스터 조성

◦ 새로운 관광 수요를 확충할 항공레저사업

◦ 남원 드론 문화체험관 건립

◦ 매출 증대 및 경영 활성화 지원

◦ 기업별 경쟁력 강화 지원

◦ 활기차고 쾌적한 근로환경 조성

◦ 기업 인력난 해소를 위한 노동자 복지 지원

◦ 광치농공단지 복합문화센터 건립

◦ 산업단지 기반시설 정비

◦ 일반산업단지 하‧폐수처리수 재이용시설 설치

◦ 남원일반산업단지 산업용지 분양 추진

◦ 재정지원으로 투자유치기업 경쟁력 강화

◦ 2023년 남원 FAI 월드 드론레이싱 챔피업십 대회 및

미래항공모빌리티·드론 레저스포츠 엑스포

□ 시정질문·5분발언 추진상황

일  반  현  황

□ 기    구

										기업지원과장
										이 주 영
전략산업담당					항공산업담당						기업지원담당								투자유치담당						국제드론엑스포TF
진 경 재					최 선 영						김 태 훈								강 탁 원						유 현 정
바이오산업육성 바이오소재공급기반조성공동연구개발촉진 바이오관련기업유치바이오산업연구원지원 전통산업추진					항공산업육성 항공산업클러스터조성 항공레저산업활성화 드론산업활성화 도심항공교통(UAM) 추진						중소기업육성 공장설립·등록관리 산업(농공)단지입주 일반산업단지조성 산업용지보상및수용 산업(농공)단지관리								투자유치종합계획 기업유치 민간투자유치 투자기업지원 투자유치홍보 투자유치보조금지원						FAI월드 드론 레이싱 챔피언십 대회 총괄 기획 남원UAM 드론 국제 엑스포 업무 추진

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	15	1	4	4	4	2
현 원	21	1	8	3	6	3	1
증 감	6	-	4	△1	2	1

※ 비    고 : 1명(공무직)

※ 현    원 : 국제드론엑스포 TF팀 배치 5명 (22.11.22.일자), 육아휴직 2명 (6급)

2023년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 천연물 화장품시험검사임상센터 건립 추진(보건복지부) : 190억원 ◦ `23년 시군구연고산업 육성사업 선정(중기부) : 12.15억원 ◦ 남원 옻칠 목공예 전시관 건립 추진 : 150억원 ◦ 제26회 남원시 전국 옻칠 목공예대전 개최 : 접수 97, 시상 37 ◦ `23년 드론 실증도시 구축사업 선정(국토부) : 국비 13억원 ◦ `22년 기업하기 좋은 전북 만들기’우수시 선정 ◦ 법무부 시범사업‘전라북도 지역특화형 비자 시범사업’운영 ◦ 강소기업 투자유치 : 투자협약 및 분양계약 체결(2건, 264억원) ◦ `23 남원 FAI 월드 드론 레이싱 챔피언십 및 미래항공모빌리티· 드론 레저스포츠 엑스포 시민설명회 개최 : 시민 600여명 참석 ◦ `23 남원 FAI 월드 드론 레이싱 챔피언십 추진을 위한 업무협약 체결 – 남원시 ~ 대한민국항공회 ◦ 드론레이싱 대회 및 엑스포 상징물 제작 : 마스코트, 엠블럼, 포스터 등

□ 화장품산업 기업성장 플랫폼 구축

◦ 2023년 시군구연고산업 육성사업 선정(남원시화장품산업지원센터)

- 브랜드구축, 처방설계 및 제형개발교육, 소재원료 기술조사교육,              화장품용기활용 및 제조생산교육, 해외시장개척 등 총 14개 지원사업

◦ 바이오 소재개발을 위한 천연물 984종 라이브러리 구축

◦ 천연물 화장품 시험검사 임상센터 건립 설계 공모 : ′23. 4

◦ 화장품 지식산업센터 입주기업 계약

- 36개중 27개사 (공장형 9, 사무실형 18 / 계약율 75%)

◦ 국가지원 연구과제 수행으로 기업지원 강화

- 화장품기업 기술혁신 지원사업(′21~′25년) : 2,500백만원(도비 1,250 시비 1,250)

- 화장품기업 브랜드마케팅 혁신지원사업(′23~′24년) : 400백만원(도비 200, 시비 200)

□ 옻칠 목공예산업 활성화

◦ 남원 옻칠 목공예 전시관 건립 추진

- ′23년도 기본계획 및 타당성 검토 조사 용역 국비 100백만원 확보

◦ 제26회 남원시 전국 옻칠 목공예대전 개최

- 접수 97점(옻칠목공예 71, 갈이 26) / 시상 37점(옻칠목공예 27, 갈이 10)

※ 순회전시 : 3회(안숙선 명창의 여정, 전라북도청, 서울 인사동)

◦ 옻칠 목공예 전문인력 양성 교육(옻칠·갈이교육) 추진

- 옻칠 3개 과정(초·중·고급반), 갈이 3개 과정(초A, 초B, 중급반) 운영

◦ 전통산업 활성화를 위한 온라인 홍보마케팅 추진

- 전통산업 소개 콘텐츠 제작, SNS 활용 홍보

□ 신성장동력 항공산업 활성화를 위한 기반 구축

◦ 항공산업(드론·UAM) 클러스터 조성 연구용역 완료 : 2023. 1. 25

- 항공산업 발전계획 시민설명회 개최                2023. 2. 07.

◦ 국토교통부 2023년 드론 실증도시 구축사업 선정

- 컨소시엄 구성 및 드론 실증도시 구축사업 공모 신청

- 공모 평가 대응 및 최종 선정 : 국비 1,300백만원(국가직접사업)

- 2023년 대한민국 드론·UAM 박람회 남원시관 운영

◦ 국토교통부 드론 특별자유화구역 공모사업 추진

- 남원시 드론 특별자유화구역 조성 공역 협의 추진(국토부, 군 등)

- 드론 특별자유화구역 평가위원회 발표평가 대응     : 2023. 4. 27.

◦ 국토교통부 드론 상용화 지원사업 추진

- 주관업체(서우, 인지과학협회) 공모 선정(국비 200백만원), 남원시 수요처 참여

◦ 경항공기 비행장 기반 조성사업 추진

- 경관개선사업(둑방 잡목제거 및 화단조성사업) 설계 시행

- 편의시설(화장실) 조성 설계 시행

◦ LX드론활용센터 농업진흥지역 대체 농지 조성 추진

- LX드론활용센터 대체 농지 조성사업 설계 시행

◦ 항공산업 발전을 위한 관계자 자문 및 면담 실시(10회)

- 국토교통부, 전라북도, 한화시스템, 전북대 등

◦ 국토교통부 UAM 지역 시범사업 연구용역 청주대 컨소시엄 참여

◦ 드론 문화체험관 건립사업 추진

- 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 시행

- 드론 문화체험관 건립사업 국비 확보를 위한 출장(국회, 국토부, 기업 등 10회)

◦ 항공안전기술원 유치 추진

- 2차 공공기관 지방이전 대응 기획실 기관유치담당 협력 체계 구축

□ 기업 경쟁력 강화 지원사업을 통한 강소기업 육성

◦ 중소기업육성기금 지원

- 대출금액(운전 3억, 시설 5억)에 대한 이차보전금(3~4%) 지원

- 중소기업육성기금 융자지원 : 9개사 21.8백만원

◦ 중소기업환경개선사업 추진 : 5개사 160백만원

- 열악한 근로환경의 중소기업에 노동자 복지‧편의시설, 근로환경 제공

◦ 뿌리기업 그린환경시스템 구축사업 지원 : 1개사 37.5백만원

- 14대 /뿌리기술 업종의 관내 중소기업의 근로환경 개선

◦ 산업단지 통근버스 임차 지원 : 45인승 2대, 25인승 1대/ 74백만원

◦ 지역특화형 비자 시범사업 추진 : (배정) 35명, (선정) 23명, (추가접수) 10명

- 일정요건을 충족한 외국인 등에게 지역특화형 비자를 통한 거주(F-2) 체류자격 변경 허용 및 정착프로그램 지원

◦ 노동자 기숙사 임차비 지원 : 13개사 / 42실 / 22.4백만원

- ‘지역특화형 비자 시범사업’에 따른 지원대상 확대(외국인 35명)

- 노동자 기숙사 임차에 소요되는 월세의 80% 지원(월 최대 30만원 한도)

- 기숙사 거주 노동자 주소 전입(관외→관내) 필수

◦ 마케팅 및 해외시장 판로 개척

- 중소기업 글로벌시장 마케팅 지원 : 8개사 50백만원

- 중소기업 온라인 플랫폼 판매지원 : 3월 프로모션 진행(36개사)

- 국내외 개별 박람회 참가 지원 : 10개사 20백만원

◦ 산업재산권 출원등록 지원 : 2개사 2백만원

- 산업재산권(특허, 실용신안, 디자인, 상표) 출원등록비 일부 지원

◦ 인구유입을 위한 노동자 자금 지원

- 애향장려금 지급 : 25명 25백만원

- 전입정착금 지급 : 100명(29개사) 22.4백만원

□ 산업단지 기반시설 정비로 원활한 기업활동 지원

◦ 노암산업단지(1, 2지구) 저류지 준설	: 2023.01.04.

◦ 산업단지 인도 및 도로 환경정비공사 실시	: 2023.01.17.

◦ 산업단지 근로자 행복주택 인근 주차장 조성(착공)	: 2023.05.04.

□ 강소기업 투자유치 및 육성으로 지역경제 활성화

◦ 투자협약 및 산업단지 분양계약 체결

- 투자협약 체결(1개 기업/ 노암산단 / 214억원)

- 분양계약 체결(1개 기업/ 노암산단 /  50억원)

- 투자유치 협의 중 : 4개 기업(일반산단3 및 개별입지1 / 476억원)

◦ 남원시 투자기업 직접지원 재정 인센티브(투자촉진보조금) 강화

- 투자완료 1개 기업 :  5억원 지급(지투보조금 2차분)

□ 2023 남원 FAI 월드 드론 레이싱 챔피언십 및

미래항공모빌리티·드론 레저스포츠 엑스포

◦ 드론레이싱 대회 및 국제드론엑스포 국도비 확보 추진

- 국비 3억원(국토부 별도집행), 도비 5억원 확보 추진(도 1차 추경 2023. 5 26.한)

◦ 대회 및 엑스포 시민설명회	: 2023. 2. 7.

- 시민, 사회단체, 공무원 등 600여명 참석

◦ 보조사업자 지정(대한민국 항공회)	: 2023. 2. 9.

◦ 드론레이싱 대회 및 엑스포 운영 대행 용역 실시	: 2023. 5. ~ 11.

- 대행용역사 : 아이캔컴퍼니 / 주관방송사 : KBS N

- 운영계획 보고회 개최(2023. 5. 12.)

◦ 드론레이싱 대회 및 국제드론엑스포 자문위원회 구성	: 2023. 5. 12.

- 기업, 단체, 대학 등 드론 및 UAM 관련 주요인사 9명 위촉

◦ K-AAM 기술경연대회 유치

- 드론레이싱 대회 및 국제드론엑스포와 병행하여 개최

- 대회예산 도비 100백만원(도 1차 추경 2023. 5 26. 한), 전북대․캠틱 80백만원 확보 추진

◦ 미니드론레이싱 및 코딩 교육 실시	: 2023. 5.~9.

- 교육신청 인원 : 84명(2023. 5. 11.) 기준

◦ 드론레이싱 대회 및 국제드론엑스포 홍보추진

- 공공기관, 금융기관, 학교, 군부대, 기업 등 방문 홍보 : 상시

- 상징물개발, 홍보영상 송출, 대중교통 랩핑, 검색창 광고 등 온오프라인 홍보

- 홍보부스 운영

․ 아․태 대회: 2023.5.13./대한민국 드론·UAM 박람회: 2023. 5. 17.~20./춘향제: 5. 25.~29.

◦ 남원 국제 드론엑스포 전시회 기업유치 추진

- 제1회 미래 항공전략 포럼 참석	: 2023. 3. 22.

․ 내    용 : 남원 드론레이싱 대회 및 엑스포 홍보, 참여기업 및 기관 유치

- 전북대 방문 협의	: 2023. 3. 28. / 2023. 4. 6.

․ 내    용 : 도-시-전북대 협력 논의, K-AAM 기술개발 경연대회 협의

- 한화시스템 담당부서 간담	: 2023. 3. 17. / 2023. 4. 19.

․ 면 담 자 : UAM 사업전략팀 전정규 팀장, 강동관 차장

․ 내    용 : 국제드론엑스포 전시회 참석 요청 및 UAM사업 협의

- 한국드론기업연합회 면담	: 2023. 5. 4. / 2023. 5. 12.

․ 내    용 : 국제드론엑스포 전시회 기업유치 방안 논의 및 홍보요청

◦ 드론 레저 스포츠 스타디움 건립사업 추진

- 공유재산관리계획 의결(심의 : 2. 21.)	: 2023. 3. 24.

- 건축기획 용역 완료	: 2023. 5. 7.

	하반기 추진방향
◦ 다각적인 접근을 통한 특화된 전략산업 육성 - 화장품산업 기반을 활용한 바이오산업 혁신 구조 마련 및 생태계 조성 - 옻칠 목공예 전시관 건립사업 및 전시회 추진을 통한 옻칠 목공예산업 활성화 - 전통산업 홍보마케팅 사업을 통한 남원 전통산업 기반 확장 ◦ 미래 신성장산업 항공산업(드론‧UAM) 세부 실행과제 단계별 추진 - 드론 실증도시, 드론 특별자유화구역 운영 등 드론산업 기반 구축 - 항공산업 세부 실행계획 수립 - 드론 문화체험관 건립 추진을 통한 차별화된 관광콘텐츠 마련 - 새로운 관광 수요를 확충할 항공레저 인프라 조성사업 추진 - 도심항공교통(UAM) 지역 시범사업 모델 발굴 ◦ 기업 경쟁력 강화 및 근로복지 지원 사업으로 강소기업 육성 - 중소기업육성기금 지원으로 기업의 자금난 해소 - 온라인 플랫폼 판매지원, 물류비 지원 등으로 해외시장 판로 개척 지원 - 통근버스 및 기숙사 임차비 지원으로 기업체 근로자 복지 적극 지원 - 전입정착금, 애향장려금 지급으로 인구유입 및 청년근로자 유출 방지 ◦ 산업단지 기반시설 정비로 기업하기 좋은 도시 조성 - 기업 애로사항을 반영하여 쾌적한 근로 환경 조성 - 노후산업단지 기반시설 정비로 근로여건 개선 ◦ 신성장 산업 기반 강소기업 투자유치 및 지역경제 활성화 추진 - 신성장 산업 유치를 위한 조례개정 및 투자환경 조성으로 투자유치 활성화 유도 - 강소기업 투자유치를 위한 산업단지 관리계획 변경 등 규제 완화 ◦ 2023 남원 FAI 월드 드론 레이싱 챔피언십 및 미래항공모빌리티· 드론 레저스포츠 엑스포 성공적 개최를 위한 준비 철저 - 성공적인 엑스포 개최를 위한 기업, 기관, 단체 유치 추진 - 드론 레이싱 대회 및 국제 드론엑스포 홍보 철저

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

천연물 화장품 시험검사임상센터 건립

(신규사업)

□ 개    요

◦ 추진목적 : 남부권 화장품 기업성장 플랫폼 거점도시 조성

◦ 위    치 : 남원시 노암동 866-1(노암산업단지)

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2025(3년)

◦ 총사업비 : 19,000백만원(국비 9,500, 지방비 9,500)

◦ 사업규모 : 지상 4층, 건축면적 782㎡, 연면적3,174㎡

◦ 사업내용 : 전용공간 및 시험·검사·인증 장비구축, 공동연구장비  이용지원 등

◦ 시행기관 : 전라북도, 남원시, (재)남원시화장품산업지원센터

구분	총사업비	기투자	2023	2024	2025
계	19,000	-	1,108	8,000	9,892
국비	9,500	-	508	4,000	4,992
도비	2,900	-	200	1,200	1,500
시비	6,600	-	400	2,800	3,400

◦ 재원투자 계획                                      (단위 :백만원)

□ 추진실적

◦ 시험검사·피부임상 운영기관 현장조사          : 2023. 1. ~ 2.

◦ 사전규격공개(3.31~4.5)·조달공고(4.7~4.17)       : 2023. 3. ~ 4.

◦ 시험검사임상센터 대행사업 협약 체결           : 2023. 4.

- 협약서 체결기관 : (재)남원시화장품산업지원센터

◦ 시험검사임상센터 건립 설계 공모 및 공모안 제출 : 2023. 4 ~ 5

□ 금후계획

◦ 천연물 화장품 시험검사 임상센터 설계용역 착수 : 2023. 6.

◦ 시험검사 임상센터 공사 착공 및 준공           : 2024. 5. / 2025. 6.

천연물 화이트바이오소재 생태환경 기반조성

(신규사업)

□ 개    요

◦ 추진목적

- 천연 식물이 풍부한 지리산 권역인 지역적 강점을 활용, 지방인구소멸 대응을       위한 신산업으로 천연물 기반 첨단소재 발굴·소재개발 ․ 실증을 통한       체계적이고 안정적인 바이오소재 혁신 공급기반 조성

- 지역 맞춤형 인력 양성 및 고급일자리 창출, 기술이전을 통한 농가소득 증대

◦ 위    치 : 남원시 사매면 산업단지

◦ 사업기간 : 2024 ~ 2027년(4년)

◦ 총사업비 : 19,000백만원(기금 도 11,400, 시 7,600)

◦ 사업내용

- 바이오 소재 융합센터 구축, 천연물 바이오융합 소재 분야 미래경영인 양성,       사업화 모델 개발, 소재융합 연구개발(R&D)·실증 및 데이터 수집 등

◦시행기관 : 전라북도, 남원시

□ 추진실적

◦ 기획회의 및 협업 컨소시엄 구성                      : 2022. 5

- 참여기관 : 전라북도, 남원시, 한국전자기술연구원, 한국식품연구원,

캠틱종합기술원, (재)남원시화장품산업지원센터 등

◦ 천연물 화이트 바이오소재 생태환경기반조성 추진 용역 실시  : 2022. 12. ~

◦ 전북도(탄소바이오산업과)‘24년도 지방소멸대응기금 신청   : 2023. 3.

◦ 한국과학기술연구원 강릉분원 천연물 연구소 방문           : 2023. 4.17.

□ 금후계획

◦ 천연물 화이트 바이오소재 생태환경 기반조성 기본계획 수립  : 2023. 하반기

화장품기업 브랜드마케팅 혁신지원

(신규사업)

□ 개    요

◦ 추진목적 : 화장품 상시 마케팅 체계 구축을 통한 온라인시장 활성화

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 200백만원(도비 100, 시비 100)

◦ 사업주관 : (재)남원시화장품산업지원센터

◦ 지원대상 : 전북도 소재 화장품기업 (책임판매업)

※ 전북도 화장품 기업 현황 : 398개사(전주 161, 익산 51, 군산 49, 남원 29 기타 108)

◦ 사업내용 : 3개 세부사업

(단위 : 천원)

사 업 명	개소	사 업 비	비 고
계	17	200,000
과제인건비 및 제경비	-	62,000
나노브랜드 SNS채널 홍보마케팅	7	70,000
크라우드펀딩 기획마케팅	4	38,000
온라인광고 프로모션마케팅	6	30,000

□ 추진실적 및 계획

◦ 화장품기업 사업화지원 수요조사 실시	: 2022.07. ~ 08.

- 조사기관 : 자체(화장품지원센터), 조사대상 및 결과 : 전북도 화장품기업 샘플수요조사        응답기업 28개사 사업지원분야(홍보마케팅, 제품사업화, 브랜드 육성) 중 홍보마케팅 선호

◦ 브랜드마케팅 혁신지원사업 사업계획 수립	: 2022.10. ~ 2023.01.

◦ 대상기업 사업신청 공고 및 사업선정	: 2023.03. ~ 05.

◦ 브랜드마케팅 혁신지원사업 사업 추진	: 2023.03. ~ 12.

◦ 성과평가 보고 및 2024년 계획 수립             : 2023.12.

□ 기대효과

◦ 화장품기업 브랜드마케팅 상시체계 구축, 온라인시장 진출 확대 지원,

마케팅 전략 기반 브랜드 및 제품 사업화 촉진

◦ 화장품기업 성장유도 및 온라인 ․콘텐츠 마케팅 경쟁력 강화

화장품 지식산업센터 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업목적 : 창업․영세중소기업의 입지애로를 해소하고 화장품 관련 업종 (제조, 연구개발, 원료, 책임판매, 용기제작 등) 기업의 집적화

◦ 사업위치 : 노암동 867-2(노암산업단지 3지구 내)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 총사업비 : 669백만원[시비 230, 기타(임대료) 439]

◦ 사업내용 : 지식산업센터 시설관리 및 공동질서 유지와 입주기업 관리 지원

	화장품 지식산업센터 조성
□ 사업기간 : 2019∼2022년(4개년) □ 규 모 : 지상3층 건축면적 4,561㎡ 연면적 10,564.42㎡ □ 사 업 비 : 25,712백만원(국 14,900 도 800, 시비 10,012) □ 사업내용 : 화장품기업 임대형 지식산업센터 신축 □ 입주규모 : 36개사(화장품 제조공장 14, 사무실 12, 창업실10)

□ 추진실적

◦ 화장품 지식산업센터 사용승인	: 2022.07.08.

◦ 화장품전문저널 전면광고, 배너 광고, (우편)전단지 홍보 : 2022.09. ~ 12.

◦ 입주기업 혁신 네트워크 지원 사업 실시(5회)    : 2022.10. ~ 2023.04.

- 입주기업 간 네트워크 구축 및 지원사업 설명회, 재직자 역량강화 교육

◦ 화장품 지식산업센터 입주계약 체결 현황(27개 기업)       : 2022.05.

※ 27개사 : 공장형 9개사, 사무실형 18개사 / 임대료 : 5,440원/㎡(임대주기 3년)

□ 금후계획

◦ 화장품 지식산업센터 기업입주 홍보(화장품전문지, 홍보물)	: 2023.05. ~

◦ 비즈센터 시설관리 운영 및 입주자 추가 확보	: 2023.05. ~

- 시설관리·인력 운영 및 입주기업 기술·제품·마케팅 경쟁력 지원

(재)남원시화장품산업지원센터 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업위치 : 시묘길 43(노암동 867-1)

◦ 사업기간 : 2023. 1 ~ 12

◦ 총사업비 : 1,149백만원

◦ 사업내용 : 화장품 산업인프라 조성, 사업발굴, 연구개발, 기업지원, 사업화지원

□ 추진실적

◦ 화장품 기업 기업지원	: 2023.01. ~

- 시제품 개발지원, 시설개선지원, 물류지원, 소재원료, 시험분석, 피부임상평가 등

◦ 남원 지리산권 자원식물 소재개발

- 소재라이브러리 DB구축 : 984건(복사나무꽃, 연꽃, 산구절초꽃, 캐모마일꽃 등)

- 실험을 통해 유효물질 데이터 확보 : 61종

◦ 남원 화장품 지식재산 창출 진행(특허, 등록, 학술발표 등)

◦ 화장품 집적화 단지 임대시설 관리(연간 위탁료 : 총 4억)

◦ 지역주도형 청년일자리 사업추진                       : 2023.02. ~

◦ 2023년 시군구연고산업 육성사업* 선정(중기부/2023.03.28.) : 12.15억원

- 남원화장품산업 기술사업화 혁신성장지원사업(브랜드구축, 교육, 해외시장         개척 등 14개 지원사업)

* 인구감소지역 내 지역연고 분야 사업모델을 발굴하고, 사업화 지원을 통해 지역소멸에 대응하는 사업

◦ 법인명 변경 : (재)남원시바이오산업연구원(등기 변경 2023.04.28.)

□ 금후계획

◦ 2023년도 남원시 출연기관 (2022년)경영 실적 평가      : 2023.05. ~

◦‘남원시바이오산업연구원’신규 법인명 CI 개발        : 2023.06. ~

◦ 법무부‘의사록 인증제외 대상 법인’심사 요청        : 2023.07. ~

◦ 비영리법인의‘공익법인 지정추천’신청(국세청)        : 2023.08. ~

◦ 바이오산업 방향정립을 위한 마스터 플랜 수립        : 2023.08. ~

남원 옻칠 목공예 전시관 건립

(신규사업)

□ 개    요

◦ 추진목적

- 옻칠 목공예산업의 전통문화 보존‧전승과 가치를 공유하고 새로운 관광        콘텐츠로 자원화하여 문화관광산업 활성화에 기여

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2026년(4년)

◦ 총사업비 : 15,000백만원(국비 7,500, 지방비 7,500)

◦ 사업위치 : 함파우 유원지 일원

◦ 사업내용 : 옻칠 목공예 전시관 건립

- 전시실/미디어실, 수장고, 학예실(사무실), 교육실(문화강좌), 편의시설 등

◦ 수행기관 : 문화체육관광부, 전라북도, 남원시

□ 추진실적

◦ 국회 문화체육관광위원회 현장시찰 방문(옻칠공예관)    : 2022. 10. 21.

◦ 옻칠 목공예 전시관 건립 국가예산 확보            : 2022. 12.

- 23년 기본계획 및 타당성 검토 조사 국비 100백만원 확보

◦ 전북도 지방재정 투자심사                         : 2023. 2.

◦ 문체부, 전북도 출장 및 관계자 자문               : 2023. 2. ~ 4.

□ 금후계획

◦ 기본계획 및 타당성 검토 조사 용역 시행            : 2023. 5. ~ 12.

◦ 실시설계 용역 시행                              : 2024. 1. ~ 10.

◦ 전시관 건립 공사 시행                           : 2025. 2. ~ 2026. 5.

◦ 전시관 개관                                     : 2026. 하반기

제26회 남원시 전국 옻칠 목공예대전

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2023. 8.

◦ 총사업비 : 285백만원(도비 40, 시비 245)

◦ 공모분야 : 2개 부문(옻칠 목공예부문, 갈이부문)

◦ 사업내용 : 우수 옻칠 목공예품과 작가를 발굴하여 시상 및 후속지원 등을 통해 전통 옻칠 목공예 문화 보급 및 발전 도모

□ 추진실적

◦ 1차 운영위원회 개최                       : 2022. 10. 13.

- 대전 개최요강 및 심사규정안 심의·의결

◦ 개최 공고 및 홍보                         : 2022. 12. ~ 2023. 4.

- 신문 보도 및 SNS 홍보, 갈이공예가 워크숍 등

◦ 작품 접수(97점)                            : 2023. 4. 7. ~ 4. 9.

◦ 작품 심사(입상작 선정)                     : 2023. 4. 12. ~ 4. 19.

- 총37점(국무총리상 포함) 선정, 대상~동상(10점) 남원시 귀속

□ 금후계획

◦ 시상식 개최(안숙선 명창의 여정)            : 2023. 5. 26.

◦ 수상작 전시회 개최(3회)                    : 2023. 5. 26. ~ 7. 7.

- 남원(안숙선 명창의 여정), 서울(KCDF 갤러리), 전주(전북도청 기획전시실)

◦ 2차 운영위원회 개최                       : 2023. 8월 중

- 대전 결과 보고, 개선사항 수렴 등

옻칠 목공예산업 활성화

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

◦ 총사업비 : 79.5백만원(시비 100%)

◦ 사업내용

연번	사 업 명	사업비 (백만원)	사업 내용	비고
계	3개 사업	79.5
1	옻칠 목공예 시설 운영	35	남원시 옻칠공예관□가방뜰 옻칠공예 교육센터 운영
2	옻칠·갈이 교육	29.5	옻칠 및 갈이 전문가 양성 교육 6개반 운영, 강사료 및 재료비 지원
3	공예트렌드페어 참가	15	국내최대 공예박람회인 공예트렌드페어(서울 코엑스) 남원시관 운영 제품 판매 및 홍보 진행

□ 추진실적

◦ 옻칠공예관 민간위탁자 선정 및 계약 체결             : 2023. 1.

- 위탁기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12. / 위탁자 : 박강용(도 무형문화재)

◦ 2023 남원시 옻칠□갈이 교육 강사 및 수강생 모집      : 2023. 5.

- 옻칠 3개(초□중□고급반), 갈이 3개(초A□초B□중급반) 과정

□ 금후계획

◦ 옻칠공예관 및 가방뜰 옻칠공예교육센터 운영	: 상시

◦ 2023 남원시 옻칠□갈이 교육 운영	: 2023. 6. ~ 12.

- 수료식 및 전시회 개최                              : 2023. 12월 중

◦ 2023 공예트렌드페어 남원시관 운영	: 2023. 12월 중

전통산업 홍보마케팅 사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 추진목적

- 남원 전통산업(옻칠목공예, 식도, 부채 등) 활성화 및 경쟁력 강화를 위해         온라인 활용 홍보 마케팅과 관계자간 네트워크 확장 기회 필요

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

◦ 총사업비 : 35백만원(시비 100%)

◦ 사업내용

연번	사 업 명	사업비 (백만원)	사업내용	비고
계	2개 사업	35
1	온라인 홍보 마케팅	25	SNS 활용 전통산업 홍보 -유튜브,인스타그램 등을 활용 전통산업 제품 및 제작 현장 체험□소개
2	전통산업 관계자 워크숍	10	전통산업 관계자 워크숍을 통한 홍보 및 산업화 방안 모색

□ 추진실적

◦ 전통산업 홍보마케팅 사업 전문가‧관내업체 등 사전 회의 개최   : 2023.2.

◦ 전통산업 홍보마케팅 사전조사 및 정보수집           : 2023.3~

- LG헬로비전 방송사, 유튜버, 관내 전통산업 관계자 방문 등

◦ 전통산업 홍보마케팅 사업 추진계획 수립             : 2023. 5.

□ 금후계획

◦ 전통산업 홍보마케팅 홍보영상 등 제작 및 홍보  : 2023. 5. ~ 2024. 5.

◦ 전통산업 관계자 워크숍 계획 수립              : 2023. 7.

◦ 전통산업 관계자 워크숍 실시                   : 2023. 8.

LX드론활용센터 구축사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : (구축) 2022년 ~ 2025년, (운영) 2026년

◦ 사업위치 : 주생면 중동리 449번지 일원

◦ 총사업비 : 21,400백만원(LX 19,400, 시비 2,000)

◦ 규    모 : 59,790㎡ / 총 30필지(국·공유지 14, 사유지 16)

◦ 주요내용 : 드론 테스트베드(활주로, 이착륙장 등) 및 활용지원 시설 건립

□ 추진실적

◦ 도시계획결정 고시(남원시)                     : 2022. 8. 26.

◦ LX드론활용센터 구축 기획 연구용역 시행(시행 : LX) : 2022. 11. 24. ~

◦ 주생 중동마을 주민간담회 실시(2회)             : 2023. 2. 15. / 3. 15.

◦ LX드론활용센터 구축 관련 LX(실무진‧사장) 협의(2회)   : 2023. 3. 24. / 4. 25.

□ 금후계획

◦ LX드론활용센터 구축 기획연구용역 완료(LX)     : 2023. 8.(예정)

◦ LX드론활용센터 구축 설계용역 시행(LX)              : 2023. 9. ~ 12.(예산 확보시)

◦ 남원시 지원사업 협의 추진(대체구거, 지중화사업 등)

◦ 실시계획인가 신청(LX→남원시)                 : 2024. 1.

◦ 토지감정평가 및 부지 확보                     : 2024. 1. ~

◦ 사업 공정별 시행                              : 2024. 3. ~

항공산업(드론‧UAM) 클러스터 조성

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 지속 추진

◦ 총사업비 : 151,700백만원(국비 85,500, 도비 6,350, 시비 39,850, 기타 20,000)

연번	단위 사업명	사업비 (백만원)	사업기간	비 고
계	8개 사업	151,700
1	LX드론활용센터 구축	21,400	`22~`26	테스트 베드, 국토조사 교육 훈련장 조성
2	항공안전기술원 유치	25,000	`22~`26	기체 안전검사소 구축 등
3	드론 특별자유화구역 지정	1,000	`23~`24	실용화, 상용화를 위한 비행 사전 규제 면제
4	드론 실증도시 구축	1,300	`23~`24	드론 활용 모델 및 서비스 실증 (레저스포츠, 통합관제, 소방대형드론)
5	드론통합관제센터 구축	1,000	`24~`25	스마트 도시 관제시스템 구축
6	남원 UAM·드론 국제 엑스포 추진	8,000	`23~`27	「UAM·드론 육성 사업」을 위한 국내 유일 차별화된 대표 박람회
7	UAM 실증단지 조성 등	69,000	`22~`27	- UAM(도심항공교통) 구축 시범단지 조성 등
8	드론 문화체험관 건립	25,000	`23~`25	드론산업 관광콘텐츠 확대

□ 추진실적

◦ 항공산업(드론‧UAM) 클러스터 조성 연구용역 완료    : 2023. 1. 25.

◦ `23년 드론 실증도시 구축사업 최종 선정(국토부)     : 2023. 3. 28.

- 국가직접사업(국비 13억원, 레저스포츠, 통합관제, 소방대형드론)

◦ `23년 드론 상용화 지원사업 최종 선정(국토부)       : 2023. 3. 28.

- 주관업체(서우, 인지과학협회) 공모 선정(국비 2억원), 남원시 수요처 참여

◦ 국토부 UAM 지역 시범사업 연구용역 추진에 따른 대응 : 2023. 4. 20.

- 청주대 컨소시엄 참여

◦ 드론 특별자유화구역 발표평가 실시                 : 2023. 4. 27.

◦ UAM 지역 시범사업 대응을 위한 담당자 자문 및 협의(4회).

- 한화시스템(주), 전북대, 전북도 등

◦ 드론산업 육성을 위한 한국드론기업연합회(사무국장 정진욱) 업무협의

- 스타트업 창업 등 드론기업을 남원에서 육성하고자 하는 방안 모색

- 수요가능한 드론 기업 육성 지원 정책 수립 방안 모색

- 농업용 드론, 감시정찰, 농업용 드론부품 기업 기업유치 필요

□ 금후계획

◦ 항공산업(드론‧UAM‧엑스포 등) 세부사업별 국도비 확보 추진 : 상시

◦ `23년 드론 실증도시 구축사업 추진                 : 2023. 3. ~ 11.

- 사업 안전관리, 행정지원, 중간‧최종보고 및 박람회 지원 등

◦ 드론 특별자유화구역 최종 발표                    : 2023. 6. ~

◦ 항공산업 세부 실행계획 수립 용역 시행             : 2023. 6. ~ 12.

◦ 지역에서 필요한 드론산업 위주로 단계별 단위사업 추진

새로운 관광 수요를 확충할 항공레저산업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2023년

◦ 사업위치 : 식정동 521-1번지 일원

◦ 총사업비 : 400백만원(시비 400)

◦ 주요내용 : 화장실 정비, 요천100리숲길 잡목제거 및 꽃단지 조성사업 등

□ 추진실적

◦ 홈페이지 비행 체험 홍보 추진                         : 2022. 11. ~

◦ 경항공기 시설 구축사업 공유재산 관리계획 심의 의결   : 2023. 2. 20.

◦ 경관개선사업(잡목제거 및 꽃단지 조성사업) 설계용역 시행 : 2023. 4. 25.

□ 금후계획

◦ 편의시설(화장실) 정비 사업 추진                     : 2023. 5. ~

◦ 경관개선사업 공사 시행                             : 2023. 6. ~

◦ 경항공기 관광 타지자체 벤치마킹                    : 2023. 6. ~ 7.

- 함안 비행장(악양둑방), 합천 비행장 등

◦ 경항공기 시설 구축사업 공유재산 관리계획 의회 심의 : 2023. 6.

남원 드론 문화체험관 건립

(신규사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년

◦ 사업위치 : 남원시 일원

◦ 총사업비 : 25,000백만원(국비 12,500, 도비 3,800, 시비 8,700)

◦ 규    모 : 7,100㎡(지상 3층, 1개동) / 부지 13,238㎡

◦ 주요내용 : 남원 드론 문화체험관 건립

- 드론전시체험관, 드론정책홍보관, 교육장 등

□ 추진실적

◦ 국도비 확보를 위한 출장(국회, 국토부, 전라북도 등) : 10회

- 국토부(첨단항공과, 도심항공과), 전라북도(주력산업과) 출장

- KTX 접근성 용이, 영호남 최적의 교통요충지이자 드론레이싱 국제대회 최초 개최지로 차별화된 드론 레제스포츠·문화·관광을 아우르는 새로운 드론 문화 체험공간 필요성 설명

◦ 국토부 및 드론산업전문가(청주대, 전북대 교수, 한국모형항공협회 등) K-드론문화 육성 자문

◦ 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립         : 2023. 5. 12.

- 여건분석을 통한 기본방향 설정 및 운영방향 제시

□ 금후계획

◦ 사전 행정 절차 이행 추진(지방재정투자심사, 공유재산 의회 승인 등)

◦ 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료        : 2023. 11.

◦ 국가예산 확보 대응                                 : 상시

매출 증대 및 경영 활성화 지원

(신규사업)

□ 개    요

◦ 중소기업 온라인 플랫폼 판매지원

- 대    상 : 관내 제조업체(온라인판매 가능 기업)

- 사업기간 : 2023년

- 사 업 비 : 50백만원

- 지원내용 : 남원시 기획전 제작 및 운영, 홍보 지원/ 기획전 상품 할인지원 및 우수상품 특가 프로모션

◦ 산업재산권 출원·등록 지원

- 대    상 : 남원시 소재 중소기업 중 전년도부터 신청시까지 산업재산권 출원·등록을 완료한 기업

- 사업기간 : 2023년

- 사 업 비 : 10백만원

- 지원내용 : 산업재산권(특허, 실용신안, 디자인, 상표) 출원등록비 일부 지원 (기업당 연간 200만원 이내 지원)

지원분야	지원금액	지원내용	지원한도
특 허	최대 100만원/건	관납료, 대행기관 수수료, 선행기술조사비용(특허·실용신안) 등 ※ 지원제외: 부가가치세, 산업재산권 유지비, 변리사 성공부담금 등	기업당 연간 200만원 이내
실용신안	최대 50만원/건
디 자 인	최대 40만원/건
상 표	최대 30만원/건

□ 추진실적

◦ 중소기업 온라인 플랫폼 판매지원

[2023.04말 기준]

플랫폼	진행시기	프로모션 주제	참여업체	매출액
쿠팡	3월	새출발 프로모션	25개사	225백만원
위메프	3월	봄맞이 프로모션	17개사	43백만원

◦ 산업재산권 출원·등록 지원	: 2개사/ 2백만원

□ 금후계획

◦ 중소기업 온라인 플랫폼 판매지원(쿠팡 플랫폼)	: 2023년 9월중

기업별 경쟁력 강화 지원

(계속사업)

□ 개    요

◦ 경영난 해소를 위한 중소기업육성기금 융자지원

◦ 물류부담 해소로 기업경쟁력 강화를 위한 물류비 지원

◦ 기업별 수출여건과 단계를 고려한 맞춤형 글로벌시장 마케팅 지원

◦ 판로 확대 및 수출 증대를 위한 박람회 참가 지원 및 공공구매 확대

□ 추진실적

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 명	지원규모	지원금액	비고
계	4개 사업		67,599.8
경영자금 지원	중소기업 육성기금	9개사	21.8
판로 확대 및 마케팅 지원	글로벌시장 마케팅 지원	8개사	50
	국내외 개별 박람회 참가 지원	10개사	20
	중소기업 공공구매 확대	-	67,508	물품 27,568 공사 29,534 용역 10,406

□ 금후계획

◦ 중소기업 육성기금 지원

- 2023년 중소기업육성기금 접수	: 홀수달

- 2023년 중소기업육성기금 심의 및 선정	: 짝수달

◦ 농공단지 활성화(물류비·폐수배출위탁처리비) 지원

- 농공단지 활성화 지원사업 참여기업 모집 공고	: 2023.07.

- 농공단지 활성화 지원사업 참여기업 선정 및 지급	: 2023.08.

- 농공단지 활성화 지원사업 정산	: 2024.02.

◦ 중소기업 물류비 지원사업

- 중소기업 물류비 지원사업 모집공고	: 2023.07.

- 중소기업 물류비 지원금 선정 및 지급	: 2023.08.

활기차고 쾌적한 근로환경 조성

(계속사업)

□ 개    요

◦ 쾌적한 근로환경 조성을 위한 중소기업 환경개선사업

◦ 기업하기 좋은 환경 조성을 위한 기업애로해소 현장지원반

- 접수된 애로사항 처리(유형분류-실무검토-결과안내)

→ 사후관리(관리카드 작성 및 사전예방 방안 마련 등)

◦ 직장내 인격 함양과 소통을 위한 근로자 역량강화교육

◦ 기업 애로 해소를 위한 현장 방문 소통 간담회 운영

◦ 산업(농공)단지 내 노동자 편의 증진을 위한 관리사무소(구내식당) 리모델링

□ 추진실적

(단위 : 백만원)

사업명	지원규모	지원금액	비고
4개 사업		197.5
중소기업환경 개선사업	5개사	160
뿌리기업 그린환경 시스템	1개사	37.5
기업애로해소 현장지원반	116개사	-
	* 건의 및 애로사항 : 17건 (완료 8, 추진중 2, 유관기관 협의 7)
유관기관 합동 시책설명회	중소벤처기업부, 중소벤처기업진흥공단, 전라북도, 조달청, 도교육청 합동 설명회 추진(2023.02.)
산업(농공)단지 관리사무소(구내식당)리모델링	설계용역 착수

□ 금후계획

◦ 2024년 중소기업 환경개선사업 수요조사	: 2023.06.

◦ 기업애로해소 현장지원반 운영 및 소통간담	: 수시

- 노암농공단지 입주기업 현장방문	: 2023.07.

◦ 근로자 역량강화교육(2회/ 200여명)	: 2023.10.

◦ 관리사무소(구내식당) 리모델링 공사 착공/ 준공	: 2023.06.~

기업 인력난 해소를 위한 노동자 복지 지원

(계속사업)

□ 개    요

◦ 노동자들의 원활한 출퇴근을 위한 산업단지 통근버스 임차 지원

- 대    상 : 광치 1·2단지 / 노암 1·2·3단지

- 사 업 비 : 159백만원 (도비 48, 시비 111)

- 사 업 량 : 45인승 2대, 25인승 1대

◦ 고용유지율 및 복지수준 향상 위한 노동자 기숙사 임차비 지원

- 대    상 : 남원시 관내 기업(제조업체) 및 노동자

[내국인, 외국인(지역특화형 비자 시범사업 대상자)]

- 사 업 비 : 3억원(시비)

- 지원내용 : 기숙사 임차비(월세)의 80%

(월 30만원 한도, 기업당 최대 10개실) 지원

◦ 관내 기업 청·장년층 근로자 사기 진작을 위한 애향장려금 지급

- 대    상 :  취업일 기준 만15세 이상 34세 이하 관내 기업에 취업하여 6개월 이상 종사자 중 어느 하나에 해당하는 근로자

1) 본인 또는 부모의 등록기준지가 남원인 근로자

2) 남원시 소재 중·고등학교를 졸업한 근로자

3) 취업일 이전 10년 이상 남원시에 주소를 둔 근로자

- 사 업 비 : 50백만원

- 지원내용 : 1인당 1백만원

◦ 노동자의 안정적인 가족 정착을 위한 전입정착금 지급

- 대    상 : 관외에서 관내로 전입한 노동자로서 거주기간 및 관내 제조업체 근무기간이 3개월 이상인 자

- 사 업 비 : 108백만원

- 지원내용 : 노동자 1명 전입 시 월 5만원, 동반거주자 포함 2명 이상 전입 시 월 10만원씩 2년간 지급

□ 추진실적

사 업 명	지원규모	지원금액	비고
산업단지 통근버스 임차 지원	45인승 2대, 25인승 1대	74백만원
노동자 기숙사 임차비 지원	13개사/ 42실	44.8백만원
애향장려금	25명	25백만원
전입정착금	29개사/ 100명	22.4백만원

□ 금후계획

◦ 산업단지 통근버스 임차 지원

- 산업단지 통근버스 상반기 만족도 조사 실시	: 2023년 7월초

- 2024년 산업단지 통근버스 수요조사 실시	: 2023년 12월초

- 2024년 산업단지 통근버스 입찰공고	: 2023년 12월중

- 2024년 산업단지 통근버스 계약체결	: 2023년 12월중

- 산업단지 통근버스 하반기 만족도 조사 실시	: 2023년 12월중

◦ 노동자 기숙사 임차비(2분기) 지원	: 2023년 7월중

◦ 남원시 애향장려금 추가 공고	: 2023년 8월중

◦ 노동자 전입정착금 신청 접수 및 지급	: 수시/ 매월

광치농공단지 복합문화센터 건립

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 광치동 195-15(광치 제1․2농공단지)

◦ 사업기간 : 2021년 11월 ~ 2025년 6월

◦ 사 업 비 : 7,500백만원(국비 3,175, 도비 408, 시비 3,917)

◦ 사 업 량 : 복합문화센터 1식 [부지면적 3,556㎡, 연면적 1,865.9㎡(2동 2,3층)]

구분	연면적(㎡)		공간 배치
계	1865.94
1동	지하	67.44	기계실
	1층	144.65	북카페, 코인세탁실, 복합문화공간(평생학습실), 협의회사무실(근로자상담실), 센터사무실(정보검색실)
	2층	225.66	다목적홀, 체력단련실
2동	지하	76.30	기계실
	1층	189.83	구내식당, 편의점
	2층	158.92	원룸형 기숙사(6실)
	3층	158.92	원룸형 기숙사(6실)
공용공간		844.22

□ 추진실적

◦ 공모신청서 제출/ 현장실사/ 발표평가	: 2021.07.29. / 09.01. / 09.15.

◦ 최종선정 / 협약체결(시-도-산단공)	: 2021.09.29. / 2021.10.29.

◦ 복합문화센터 건립사업 건축기획 용역	: 2022.01.20. ~ 2022.03.20.

◦ 전라북도 지방재정 투자융자 심사	: 2022.03.11.

◦ 복합문화센터 건립사업 설계공모	: 2022.08.10. ~ 2022.10.14.

◦ 기본 및 실시설계 용역 착수 / (완료)	: 2022.11.11. / (2023./07.)

◦ 사업계획 변경 요청 → 한국산업단지공단	: 2023.05.

- 물가 상승으로 사업예산 규모에 맞춰 면적 축소 조정(10%이내)

□ 쟁점 및 대책

◦ 물가 상승에 따른 사업규모 축소 승인 요청

- 현재 한국산업단지공단에서 긍정적으로 검토하고 있음

□ 금후계획

◦ 전라북도 계약심사(기본 및 실시설계 용역)	: 2023.08.

◦ 공사 착공/ 준공	: 2023.10. / 2025.06.

산업단지 기반시설 정비

(계속사업)

□ 개    요

◦  사 업 명 : 노후 산업(농공)단지 기반시설 확충 및 시설 개선사업

◦  사업기간 : 2023년 1월 ~ 2023년 12월

◦  총사업비 : 1,767백만원 (도비 285, 시비 1,482)

◦  사업내용 : 단지 내 도로, 상․하수도정비 및 가로등 정비, 기반시설 보강 등

□ 추진실적

단지명	사 업 명	사 업 내 용	사 업 비 (백만원)	추진상황 및 계획
계	9개		1,112 (시)827 (도)285
공통	산업단지 인도 및 도로 환경정비공사	가로수 강전정 123주, 약전정 871주 관목전정 3,165㎡	(시)118	- 설계완료 (22.12.02) - 공사착공 (22.12.12.) - 공사준공 (23.01.17.)
노암	노암 산업단지 저류지 준설공사	- 저류지 준설 2개소 (1지구 2,603㎡, 2지구 1,364㎡)	(시)32	- 설계완료 (22.12.02.) - 공사착공 (22.12.12.) - 공사준공 (23.01.04.)
공통	남원 관내 농공단지 노후가로등 교체사업	- 농공단지 노후가로등 교체 1식 (광치, 노암산업단지)	570 (도) 285 (시) 285	- 설계완료 (23.03.14.) - 공사착공 (23.04.04.) - 착공예정 (23.06.) - 준공예정 (23.09.)
노암	노암산업단지(3지구) 안전시설물 설치공사	고원식 횡단보도 2개소 가상 과속방지턱 2개소	(시)17	- 설계완료 (23.04.07) - 공사착공 (23.04.19.) - 준공예정 (23.05.)
광치	광치농공단지 진입로 재포장공사	아스콘절삭 후 덧씌우기 595㎡ 아스콘 덧씌우기 927㎡ 등	(시)58	- 설계완료 (23.04.11) - 공사착공 (23.04.26.) - 준공예정 (23.05.)
노암	노암산업단지(3지구) 배수로 정비공사	옹벽(H=1.3~2.0m) 70m 라이닝(B=0.6m, T=0.1m) 70m	(시)52	- 설계완료 (23.04.20) - 공사착공 (23.04.26.) - 준공예정 (23.06.)
노암	산업단지 근로자 행복주택 인근 주차장 조성공사	콘크리트포장(T=0.2m) 325㎡ 아스콘포장(T=0.15m) 1,880㎡	(시)197	- 설계완료 (23.03.23) - 공사착공 (23.05.04.) - 준공예정 (23.08.)
사매	남원 일반산업단지 법면 및 배수로 정비공사	코어네트 1,890㎡ 준설 52㎥	(시)38	- 설계완료 (23.04.20) - 착공예정 (23.05.) - 준공예정 (23.07.)
광치	광치농공단지 하수관로 정비공사	PE다중벽관(D400) 65m 원형맨홀 3개소 등	(시)30	- 설계완료 (23.04.18) - 착공예정 (23.05.) - 준공예정 (23.07.)

□ 쟁점 및 대책

◦ 농공단지의 노후화가 진행되면서 입주 기업체의 단지 내 기반시설 보수 요구 증가

- 노후 농공단지 지원 관련 공모사업 등 적극 신청

□ 금후계획

단지명	사 업 명	사 업 내 용	사 업 비 (백만원)	비고
계	7개 사업		(시)655
공통	산업단지 녹지지역 수목정비공사	수목 정비 등 환경정비	(시)140
	산업단지 소규모 수선 등 관리	산업단지 유지관리	(시)120
노암	노암산업단지 SM식생용벽 정기안전점검	식생용벽 정밀 안전점검용역	(시)12
	산업단지 비점오염 시설관리	노암 2,3지구 비점오염시설 유지관리	(시)21
	노암산업단지 내 우수관로 준설공사	비점오염 시설 및 우수관로 준설	(시)100
인월	인월 농공단지 인도 및 도로 정비공사	인도 및 도로 정비	(시)250
사매	남원 일반산업단지 환경정비	인도 및 배수지 잡초 제거, 고사목 제거 등	(시)12

◦ 실시설계 용역 발주	: 2023.06.~07.

◦ 공사 시행	: 2023.07.~12.

일반산업단지 하·폐수처리수 재이용시설 설치

(계속사업)

□ 개    요

◦  위    치 : 사매면 월평리 1109

◦  사업기간 : 2021 ~ 2027

◦  총사업비 : 3,118백만원(국비 2,183, 시비 935) ※ 국비보조율 70%

◦  사업내용 : 하·폐수처리수 재이용시설 325㎥/일

┍1단계(Q=65㎥) - 2021 ~ 2023년(3년)

┕2~4단계(Q=260㎥) - 2024 ~ 2027년(4년)

구 분	총 계	2021	2022	2023	2024 이후	비 고
총 계	3,118	429	252	-	2,437
국 비	2,183	300	176	-	1,707
시 비	935	129	76	-	730

□ 추진실적

◦ 2021년 하수도분야 국고보조사업 예산신청	: 2020.03.04.

◦ 2021년 환경부 소관 상수도 국고보조사업 예산 확정내시	: 2020.12.21.

◦ 하·폐수처리수 재이용시설 기본 및 실시설계 용역	: 2021.05.~10.

◦ 하·폐수처리수 재이용시설 재원협의 완료(전북지방 환경청)	: 2022.09.08.

◦ 하·폐수처리수 재이용시설 설치 착공	: 2022.10.27.

◦ 하·폐수처리수 재이용시설 설치사업(1단계) 공사중지	: 2022.11.08.

◦ 하·폐수처리수 재이용시설 설치사업(1단계) 재착공	: 2023.03.16.

□ 금후계획

◦ 하·폐수처리수 재이용시설(1단계) 준공	: 2023.06.

◦ 하·폐수처리수 재이용시설(2~4단계) 착공	: 2024년 ~

(※ 하·폐수 유입량 증가에 따라 2~4단계 시행)

남원일반산업단지 산업용지 분양 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 사매면 월평리 1138번지 일원

◦ 면    적 : 47블럭 585,569㎡(분양-42블럭, 495,589㎡ / 임대-5블럭, 89,980㎡)

◦ 분양가격 : 98,530원/㎡(325,000원/3.3㎡)

- 임  대 : 보증금(분양가의 10%), 임대료(연간/분양가의 1.5%), 5년간

◦ 업    종 : 음·식료품, 금속·전자·전기, 자동차부품 등 제조업, 물류시설

□ 분양현황

구 분	대상부지	분양완료	투자협약	미분양
블 럭 수	47블록	10블럭(5개 기업)	10블럭(2개 기업)	27블럭
면 적(㎡)	585,569	106,524(18.2%)	115,699(19.8%)	281,160.3(62%)

□ 추진실적

◦ 투자희망 기업에 대한 투자상담(18개 기업)

- 상담업종 : 식료품(3개), 금속 및 비금속 제조(4개), 물류센터(2개),

자원 및 원료 재생업(4개), 기타(5개 기업-특장차, 의료장비 등)

- 협의진행 : 3개 기업(금속 및 비금속2, 자원재활용1)

◦ 일반산단 분양을 위한 강소기업 투자유치 제안 추진(4개 기업)

- 투자제안 : 식료품(1개), 2차전지(1개), 물류센터(2개)

- 협의진행 : 1개 기업(식료품)

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 경기 둔화와 수출 부진 등 대내외 악재로 국내기업의 투자 여건의 어려움이 지속될 것으로 사료됨.

□ 산업단지 분양대행사 및 투자컨설팅 기업의 전국 네트워크를 활용하여 일반산업단지 분양 활성화 도모

□ 금후계획

◦ 협상 진행 중인 기업 투자협약 체결 추진            : 2023. 하반기

◦ 산단 분양대행사 및 투자컨설팅 기업 간 업무협약 등 검토 : 2023. 하반기

재정지원으로 투자유치기업 경쟁력 강화

(계속사업)

□ 개    요

◦ 국가지원(국비) : 지방자치단체의 지방투자기업 유치에 대한 국가의 재정자금 지원기준

- 대     상 : 수도권이전, 신·증설기업(업력 1년, 고용 10인 이상)

- 지원 규모 : 설비투자금액의 14% 이내(지역특성화 업종 : 10% 가산)

- 매칭 비율 : 국비 75%, 지방비 25%(도비 70%, 시비 30%)

- 지급시기 : 1차(공장 착공 후 지급), 2차(투자완료 후)

◦ 시 지원(시비) : 남원시 기업 및 투자유치 촉진 조례 및 시행규칙

- 대     상 : 국가지원 외 기업(고용 10인 이상)

- 투자보조금 : 투자금액 10억원 초과 금액의 10% 범위 내

※ 지급시기(투자 완료 후 지급)

- 물 류 비 : 사업개시일부터 3년간 매년 물류비의 50%이내(최고 3억원)

- 고용보조금 : 관내 거주자 10명이상 신규채용, 초과 1인당 월 100만원,

6개월 범위 내 지급(최고 10억원)

□ 추진실적

◦투자유치기업 보조금 지급

기 업 명	위 치	투자금액	총지급액	1차분 ('19.8월)	2차분(억원)				비고
					총액	국비	도비	시비
㈜대명창호	노암3지구	65억원	18억원	13억원	5	4	0.7	0.3

□ 금후계획

◦ 물류 및 고용 보조금 지급(3개 기업, 4억원)           : 2023. 8월

◦ 투자완료 기업에 대한 투자촉진보조금 심의 및 지급 : 2023. 하반기

- 투자완료(예정) 기업 : 4개 기업(9억원)

2023 남원 FAI 월드 드론 레이싱 챔피언십 및

미래항공모빌리티·드론 레저스포츠 엑스포

(신규사업)

□ 개    요

◦ 기간/장소 : 2023. 10. 6.(금) ~ 10. 9.(월) / 남원종합스포츠타운

◦ 주    최 : FAI(국제항공연맹), 국토교통부, 전라북도, 남원시

◦ 주    관 : 대한민국항공회, 항공안전기술원, 한국교통안전공단, 대한드론축구협회

◦ 총사업비 : 3,990백만원(국비 300, 시비 3,690) ※ 도비 5억원 도의회 심의예정(5. 26.한)

◦ 주요내용

- 개폐회식 : K-POP콘서트, 환영․송만찬, 선수입장식, 드론쇼

- 드론대회 : 월드드론레이싱챔피언십, 온라인 드론레이싱, 드론축구

- 드론엑스포 : 전시회, 컨퍼런스

- 부대행사 : K-AAM 기술경연대회, 드론교육, 체험행사, 드론클래쉬, 전국드론경진대회

□ 추진실적

◦『2023 FAI 월드 드론 레이싱 챔피언십 대회』 유치 확정 : 2022. 11. 2.

◦ 대회 및 엑스포 시민설명회	: 2023. 2. 7.

◦ 보조사업자 지정(대한민국 항공회)	: 2023. 2. 9.

◦ 기본계획수립	: 2023. 2. 9.

◦ 지방재정투자심사 완료	: 2023. 3. 6.

◦ 드론교육 추진	: 2023. 5월 ~ 9월

◦ 드론레이싱 대회 및 엑스포 운영 대행 용역(아이캔컴퍼니)	: 2023. 5. ~ 11.

◦ 운영계획보고회 및 자문위원회 구성	: 2023. 5. 12.

◦ K-AAM 기술경연대회 유치 추진

- 대회예산 도비 100백만원(도 1차 추경 2023. 5 26. 한), 전북대․캠틱 80백만원 확보 추진

◦ 남원 국제 드론엑스포 전시회 기업유치 추진

- 제1회 미래 항공전략 포럼 참석	: 2023. 3. 22.

- 전북대 방문 협의	: 2023. 3. 28. / 2023. 4. 6.

- 한화시스템 담당부서 간담	: 2023. 3. 17. / 2023. 4. 19.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 국방부(블랙이글쇼 등) 유치 및 군부대 유치 추진

□ 블랙이글쇼 유치를 위한 국방부와 협의 및 방문 추진

□ 도내 군부대 유치를 위한 군부대 방문 홍보 및 35사단 사단장과 면담 추진

◦ 드론 레이싱 대회 및 국제 드론엑스포 홍보 철저

□ 홍보전산과와 협의하여 단계별 홍보계획을 수립해 추진

□ 시민, 시의회, 관련 기관 및 단체 등 홍보 철저

□ 드론레이싱 및 코딩교육을 통한 대회 분위기 조성

□ 타행사 방문 홍보 및 부스운영, 주관방송사(KBS N)를 통한 방송홍보, 대행사를 통한 온․오프라인 홍보(SNS, 홈페이지, 트렉조성) 등 빈틈없는 홍보 추진

◦ 성공적인 엑스포 개최를 위한 대기업, 기관, 단체 유치 필요

□ 드론기업연합회, 자문위원회, 대한민국항공회, 대행업체를 적극 활용

□ 타 박람회 및 기업․기관․대학․ 관련단체에 수시로 방문하여 유치 추진(대기업 및 중견기업, 주요기관 중점 유치)

◦ 드론 레이싱 대회 및 국제 드론엑스포 도비 예산확보 추진

□ 도의회에서 예산안(5억원) 심의예정(2023. 5. 26.한)으로 소관 부서인 도 토지정보과와 협의하여 도비 예산확보 총력

◦ 안전 및 방역관리 준비 철저

□ 안전재난과와 협의하여 안전 기본방침, 근무수칙, 대응요령 등 안전종합대책을 수립

□ 보건소, 유관기관(경찰서, 소방서, 남원의료원 등) 등과 협조하여 안전 및 방역 준비 철저

⟹ 대회 및 엑스포를 통해 남원시의 항공산업 추진의지를 부각시키고, 기업유치를 위한 기반마련 및 신성장미래산업 육성의 장이 될 수 있도록 추진

□ 금후계획

◦ 드론레이싱 대회 및 국제 드론엑스포 홍보 추진	: 상시

◦ 미래항공모빌리티․드론레저스포츠 엑스포 기업․기관 모집 : 2023. 5. ~ 9.

◦ 대회 및 엑스포 개최 관련 도비확보 추진	: 2023. 5 26. 한

◦ 홍보부스 운영(대한민국 드론·UAM 박람회, 춘향제)

- 대한민국 드론·UAM 박람회 : 2023. 5. 17. ~ 20. / 춘향제 :  5. 25. ~ 29.

◦ 진행사항 보고(수시, 중간, 최종) 및 문제점 보완	: 2023. 5. ~ 9.

◦ FAI 코리아 드론 레이스 월드컵(사전대회)	: 2023. 8. 12. ~ 8. 13.

◦ 일정별 추진사항 점검 및 대회전 최종점검	: 2023. 5. ~ 9.

◦ 드론레이싱 대회 및 국제 드론엑스포 개최	: 2023. 10. 6. ~ 9.

□ 5분발언 추진상황

발언일자 : 2022. 12. 16. (제255회)		발언의원 : 김영태 의원
발언내용	옻칠 목공예 산업 활성화
◦ 옻칠목공예 전통산업에 대한 과감한 인식 전환 ◦ 옻칠문화산업에 대한 기반 확대 ◦ 옻칠목공예 전시관의 랜드마크화
추진상황
◦ 2023년 전통산업 홍보마케팅 사업 추진(신규) - 온라인채널을 통한 남원 전통산업 홍보로 전통산업 브랜드화 및 소비자층 확대 ◦ 남원전통산업 육성 및 연구용역 시행 - 산업화 및 가격경쟁력 강화 방안 모색 ◦ 남원목기산업 특화림 조성 계획(산림녹지과) - 옻칠산업의 원료 수급을 통한 생산기반 구축을 위해 시유림에 옻나무 식재 사업 시행 추진 ‣ 2022년 운봉읍 화수리 산 19-2번지 외 5필지(사유지 포함) 옻나무 30,000본(10ha) 식재하였으며, 2023년에는 옻나무 식재에 대한 산주들의 낮은 선호도로 시유림인 주생면 내동리 산58번지(10ha)에 식재 예정임 ※ 옻나무 재배환경 및 옻의 특성(알레르기)을 고려하여 사업대상지 선정함 ◦ 옻칠 목공예 전시관 건립 사업 추진 -‘23년 기본계획 및 타당성 검토 국비 100백만원 확보