2023. 9.

2023년 주요업무 추진실적

안 전 재 난 과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2023년 주 요 업 무  결산

□ 2023년 주요업무 추진실적

◦ 시민 안전문화 정착

◦ 남원시 시민안전보험 운영

◦ 여름철 물놀이 안전관리

◦ 민방위 교육 및 시설 운영 관리

◦ 민·관·군·경·소방 통합방위태세 확립

◦ 재난종합상황(재난안전대책본부) 관리

◦ 재난대응 안전한국훈련 실시

◦ 대한민국 안전대전환 집중안전점검 실시

◦ 자연재해 사전대비 추진

◦ 재해위험 방재시설 정비사업

◦ 남원시 우수유출저감대책 수립 용역

◦ 2020년 남원시 호우피해 재해복구사업 분석·평가 용역

◦ 재난관리기금 운용 관리

◦ 지방하천 정비사업(총괄)

□ 풍천 지방하천 정비사업

□ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

□ 람천 지방하천 정비사업

◦ 소하천 정비사업

◦ 하천 유지관리사업

◦ 재해위험지역 정비사업

□ 대곡지구 풍수해생활권 종합 정비사업

□ 사석지구 풍수해생활권 종합 정비사업

□ 주촌 재해위험개선지구 정비사업

□ 풍촌 재해위험개선지구 정비사업

□ 유암 재해위험개선지구 정비사업

◦ 남원시 중대재해 예방 업무추진

◦ CCTV 통합관제센터 운영

◦ 마을방범 CCTV 설치

일  반  현  황

□ 기    구

										안전재난과장
										백 강 규
안전정책팀					재난관리팀						하천관리팀								중대재해팀						통합관제팀
김 차 남					하 형 호						유 종 상								최 은 주						문 은 희
∘안전관리계획수립·추진 ∘재난관리평가 대응 ∘국민안전교육·안전신고 ∘물놀이 안전 관리 ∘비상대비·통합방위업무 ∘민방위교육훈련·시설관리					∘사회·자연재난 사전대비 ∘재난대응 훈련 ∘재난관리자원 관리 ∘재난취약시설 안전점검 ∘재난예·경보시스템 ∘재난관리기금 운용관리						∘하천정비사업 추진 ∘하천 유지관리 ∘하천점 사용허가 ∘재해위험지구 정비 ∘자연재해종합계획 수립								∘중대산업재해 대응 ∘중대시민재해 대응 ∘현업업무종사자 관리 ∘산업안전보건위원회 ∘산업안전보건교육						∘통합관제센터 운영 ∘통합관제 및 요원관리 ∘방범 CCTV 설치 운영 ∘마을방범 CCTV 설치 ∘영상정보 운영 관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	27	1	5	7	9	5
현 원	27	1	8	6	4	5	공무직 3
증 감	-	-	3	△1	△5	-	3

2023년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 2023년 재난관리평가 우수기관 선정 ◦ 호우 등 자연재난 관련 재난안전대책본부 구성·운영 - 컨트롤타워 역할 수행 및 상황 유지 ◦ 시민안전보험 확대 가입 및 보험금 지급 - 도내 최초 영문영업배상책임보험 가입 (1인 1백만원 한도 상해 의료비 보장) - 86건, 76백만원 보장 ※ 최근 3년 평균 : 16건, 89백만원 보장 ◦ 남원시 전직원 심폐소생술 교육 실시 - 공무원, 공무직 1,446명 중 1,313명 교육 실시 (91%) ◦ 스마트시티 솔루션 확산사업 공모 선정 - 총사업비 4,000백만원(국 50%, 시 50%) - 스마트시티 통합플랫폼 구축 및 IoT 서비스 제공 ◦ 마을방범 CCTV 신규 및 고장·노후 교체 설치 : 3종 320대

□ 선제적 대응을 위한 재난·재해예방 기반 구축

◦ 자연재난 종합대책 수립·추진(대설, 한파, 지진, 폭염, 태풍 기상특보)

◦ 자연재해취약지 점검·정비 : 95개소

- 인명피해우려 23, 급경사지 70, 배수펌프장 2

◦ 기상관측시설(AWS) 추가 구축 및 지진가속 계측기 서버 정비

◦ 재난대응 매뉴얼 재정비(유관기관 및 13개 협업부서 등)

◦ 홍수재해 모니터링 시스템 유지⋅보수, 재난안전통신망 단말기 추가 구입

□ 빈틈없는 24시간 재난종합상황 관리

◦ 재난종합상황 유지·관리 : 연중 무휴 운영

◦ 재난안전대책본부 운영

- 코로나19 대응 재난안전대책본부 운영    : 2020. 01. 31. ~ (5개반 7명)

- AI대응 재난안전대책본부 운영(운영종료) : 2022. 11. 04. ~ 2023. 04. 01.

◦ 2023. 01. 01. ~ 2023. 08. 11. 기상특보 발효 건수 : 25회

◦ 기상특보 발령에 따른 재대본 운영 및 비상근무 실시 : 18회

□ 재해예방을 위한 하천정비 추진 : 69개소 23,614백만원

◦ 하천 정비(지방하천, 소하천)	: 6개소 / 15,175백만원

- 지방하천 : 3개소 /  11,626백만원 (풍천, 원천천, 람천)

- 소 하 천 : 3개소 /   3,549백만원 (당동천, 과립천, 산곡천)

◦ 하천 유지관리(지방하천, 소하천)	: 58개소 / 7,734백만원

◦ 하천 유지관리[국가하천(섬진강, 요천)]	: 9개소 /  742백만원

□ 국도비 확보를 통한 재해예방사업 추진 : 5개소 139,802백만원

◦ 풍수해생활권 종합 정비사업(대곡, 사석)	: 2개소 86,200백만원

◦ 재해위험개선지구 정비(유암, 풍촌, 주촌)	: 3개소 54,027백만원
※ 2023년 총 사업비 : 5개 사업, 16,539백만원

□ 안전관리 체계 강화로 시민 안전환경 조성

◦ 남원시 안전관리계획 수립 : 안전관리위원회 의결·확정(2023. 03.)

◦ 남원시 시민안전보험 가입·시행 : 145백만원(단체상해, 영문영업배상책임)

◦ 축제장 안전점검 및 관리 : 제93회 춘향제 등 6회

◦ 시민실종사고 지원 : 3건, 5백만원 (2023. 8월 기준)

◦ 화재피해 주민지원 : 7건, 22백만원 (2023. 8월 기준)

◦ 현업업무 사업장 순회 지도·점검 및 사업장 위험성평가 실시 : 44개소

◦ 산업안전보건위원회 운영 및 개최(2회)

□ 생활 속 안전문화 정착

◦ 안전신문고 앱 활용 위해요소 신고 : 4,721건 / 안전점검의 날 행사 : 8회

◦ 남원시 전직원 심폐소생술 교육 실시 : 1,313명(91%)

◦ CCTV 통합관제센터 구축을 통한 시민 생활안전 제고

- 관제현황 : 1,074대(방범용, 재해예방, 주정차, 문화재, 쓰레기 등)

- 운영실적 : 영상정보 열람 및 제공 311건, 관제요원 관제 149건

◦ CCTV 설치 및 안내판 교체 : 11대(신규 7, 교체 4) / 70개

◦ 마을방범 CCTV 신규 및 고장·노후 교체 설치 : 75개소, 3종 320대

□ 비상 대비업무 추진을 통한 지역 안보태세 확립

◦ 민방위 교육 실시

- 집 합 교 육 :   920명 중   631명 이수(68.5%)

- 사이버교육 : 2,146명 중 1,933명 이수(90.07%)

◦ 민방공 대피훈련 실시(2회)

◦ 정기점검(1회), 비상급수시설 수질검사(2회) 등 민방위 시설·장비 점검 실시

◦ 통합방위협의회(3회), 동원자원조사(1회)

◦ 예비군 육성지원을 위한 보조금 지급 : 194백만원

◦ 드론 예비군부대 창설 및 드론 통합운용 업무 협약(2023. 03.)

◦ 2023년 을지연습 실시(8. 21. ~ 8.24.)

2023년 주요업무 추진실적

시민 안전문화 정착

(계속사업)

□ 개    요

구 분	추진사항	시 기	내 용
교 육 홍 보	안전문화미디어교실	연중	어린이집□유치원 순회 방문교육
	찾아가는 생활안전 교육	연중	안전취약계층 순회 방문교육
	어린이 홍보물품 제작	5월	어린이를 대상으로 안전홍보물품 제작
	남원시 전직원 심폐소생술 교육	5월	남원시청 전 직원 대상 심폐소생술 실습 교육
	찾아가는 안전체험교실	9월	안전체험교육 사각지대 해소를 위한 찾아가는 안전교육
안전의식 제 고	안전마을 만들기	연중	안전위해요소 경감사업 추진으로 지역안전수준 향상
	안전점검의 날 운영	연중	매월 1회 이상 안전점검 및 홍보캠페인 실시
	승강기 안전관리	연중	안전점검 실시 및 안전사고예방 홍보물 제작‧배부
	어린이 놀이시설 지도‧점검	연중	의무이행사항 매월 및 수시 지도‧점검
훈 련	승강기 사고대응 합동훈련	9월	신고에서 구조까지 연계한 유관기관 합동훈련

□ 추진실적

◦ 안전점검의 날 운영(월 1회)                        : 8회

◦ 승강기사업자 실태점검 및 다중이용시설 승강기 안전점검 : 1회

◦ 어린이 안전문화 미디어교실 운영                  : 25개소 1,172명

◦ 어린이 놀이시설 자체 전수점검 실시(98개소)        : 2023. 03.

◦ 남원시 전직원 심폐소생술 교육 실시(1,313명, 91%)  : 2023. 05.

◦ 춘향제 심폐소생술 실습 행정부스 운영(412명 체험)	: 2023. 5월
- 심폐소생술 및 소화기 체험 312명 / 하임리히법, 블록만들기 등 100명

◦ 지역안전지수 연계 안전마을 만들기 사업 추진      : 2023. 06.

□ 쟁점 및 대책

ㅇ 찾아가는 어린이 안전체험 교실 선정되어 10월 행사 예정으로 미취학 아동, 초등학생 등 어린이들 많이 참여할 수 있도록 홍보 필요

□ 교육청 및 여성가족과와 협의하여 교육프로그램 안내문 관련 기관(초등학교, 유치원 등) 발송 및 홈페이지, 언론매체등 온·오프라인으로 홍보

□ 금후계획

◦ 찾아가는 안전취약계층 생활안전교육 운영           : 2023. 09. ~ 12.

◦ 찾아가는 안전체험교실 운영                        : 2023. 10.

◦ 안전점검의 날 운영(월 1회)                        : 2023. 10. ~ 12.

남원시 시민안전보험 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2023. 1. 8. ~ 2024. 1. 7. (1년)   ※ 청구기한 : 3년

◦ 예 산 액 : 145백만원 (도 7, 시 138)

◦ 가입대상 : 남원시에 주민등록이 되어있는 모든 시민(등록외국인 포함)

◦ 가입항목 : 단체상해보험* + 영문영업배상책임보험(의료비 담보 특약)**
*  단체상해보험 : 상해사망(교통상해 제외), 상해후유장해(교통상해 제외), 대중교통
이용중 상해사망·상해후유장해, 스쿨존 교통사고 부상치료비 (1천만원 한도)
** 피해자의 과실 유무에 관계없이 상해의 직접 결과로 발생한 응급비용, 치료, 수술,
X선 검사, 치과치료, 입원 등의 의료비용을 보장(교통상해 제외 / 개인형 및
공유형 PM사고 보장 / 1인 1백만원 한도 / 남원시 총한도 2.1억원)

□ 추진실적

◦ 2023년 남원시 시민안전보험 보장 개시       : 2023. 1. 8. ~ 2024. 1. 7.

◦ 2023년 남원시 시민안전보험 보장 홍보       : 상시
* 전광판, 홈페이지, 승강기 모니터, 보도자료 배포, 이통장 회의자료 송부 등

◦ 보상내역 : 86건, 76백만원 (2023. 7월 기준)          (단위 : 건, 백만원)

보장항목	보장금액	주요사고내용	건수	지급액
합 계			86	76
단체상해보험	10백만원 한도	상해사망	2	20
		상해후유장해	1	6
영문영업배상책임 (의료비 담보 특약)	1백만원 한도	넘어짐	48	29
		운동중 상해	13	8
		기타	22	13

□ 쟁점 및 대책

◦ 의료 상해비 총한도가 보험료 결정에 큰 영향을 미치고 있어 차년도 의료 상해비 총한도 적정액에 대한 면밀한 검토 필요

- 의료 상해비 운영 중인 타 시군구 협조를 통해 청구기한 내 연차별 지급률 검토 후 차년도 의료상해비 총한도 결정

□ 금후계획

◦ 2024년 시민안전보험 가입 ․ 등록                      : 2023. 12.

◦ 2024년 시민안전보험 시행                          : 2024. 01.

여름철 물놀이 안전관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 목    표 : 물놀이 안전사고 및 인명피해 예방

◦ 추진기간 : 사전대비(4. 15. ~ 5. 31.) 중점관리(6. 1. ~ 8. 31.)

◦ 대    상 : 계곡·하천 물놀이 관리지역 (9개 지역)
* 고소암, 석동교, 북치골 계곡, 천왕봉식당, 소윤정 펜션, 토비스 야영장,
산내들 펜션, 털보가든, 빗기재 폭포

◦ 내    용

물놀이 안전환경 조성	- 물놀이 지역과 안전시설에 대한 전수조사(4월) - 구명조끼·로프·이동식 거치대 및 노후 인명구조함 정비 (6월까지)
현장중심 안전관리	- 물놀이 안전요원 선발·교육(5~6월) 및 현장배치(7~8월) · 장소 : 물놀이 9개소(산내6, 산동3), 기타 안전관리(요천2) · 인원 : 36명 (산내 4인 1개조, 기타 2인 1개조) · 근무 : 위험구역 접근통제, 물놀이지역 순찰, 방역관리
홍보 및 교육 강화	- 여름방학 전 어린이 안전교실, 구명조끼 착용법 등 교육 - 물놀이 안전 홍보물 배부, 현장 안전수칙 캠페인 실시

□ 추진실적

◦ 물놀이 관리지역 ‧ 위험구역 전수조사               : 2023. 03.

◦ 여름철 수상안전 기본계획 수립                   : 2023. 04.

◦ 물놀이 위험구역 고시                             : 2023. 05.

◦ 안전관리요원 모집 ‧ 교육                          : 2023. 05. ~ 06.

◦ 물놀이 안전관리요원 배치 및 근무 점검           : 2023. 07. ~ 08.

□ 금후계획

◦ 2024년도 여름철 물놀이 국고보조금 교부신청      : 2023. 12.

민방위 교육 및 시설 운영 관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 민방위대 편성 기준일 : 매년 1월 10일

◦ 편성대상 : 만20세 ~ 만40세(1983.1.1. ~ 2003.12.31.)   ※ 2023년 3,117명

◦ 추진방법

1 ~ 2년차  : 집합교육(4시간)

3 ~ 4년차  : 사이버교육(2시간)

- 5년차 이상 : 사이버교육(1시간)

◦ 교육내용 : 임무와 역할, 화재, 교통, 가스, 지진 해일 등 행동요령

◦ 장비현황 : 주민대피(36개소), 비상급수(12개소), 민방위 경보시설(9개소)

□ 추진실적

◦ 2023년 민방위 편성 및 기본교육 지침시달	: 2023. 01. ~ 03.

◦ 2023년 민방위 교육 훈련 계획 수립	: 2023. 02. ~ 03.

- 민방위교육 홍보 및 전자고지 통지서 배부

◦ 상반기 민방위 비상급수시설 (음용수) 수질검사 실시 : 2023. 03.

◦ 남원시 민방위대 점검 실시(20개소*)	: 2023. 04. ~ 05.
* 민방위대 편성, 민방위 교육, 시설 ‧ 장비 일체

◦ 민방위 집합교육 실시	: 2023. 04.

교육대상 : 920명 / 이 수 자 : 631명(68.5%)

◦ 민방위 사이버교육 실시	: 2023. 04. ~ 06.

교육대상 : 2,146명 / 이 수 자 : 1,933명(90.07%)

◦ 민방위 재난안전 경보시설 설치(5식)                : 2023. 06. ~ 08.

- 사 업 비 : 290백만원(도 24, 시 266)

- 설치장소 : 남원시청, 운봉읍 ‧ 금동 행정복지센터(노후장비교체),
주천면‧수지면행정복지센터(신규설치)

◦ 민방위 보충1차교육 실시	: 2023. 08.

□ 쟁점 및 대책

◦ 우리 시 민방위 경보시설 가청률(68%)은 전국 평균(84.2%)보다 낮은 상황
으로, 각종 긴급사태시 재난방송 발령·전파를 위한 경보시설 확충 필요

- 행정안전부 출장 및 건의를 통한 예산 확보 후 신규 설치 추진

□ 금후계획

◦ 민방위 보충2차 교육 실시                          : 2023. 11.

◦ 민방위 사이버 교육 훈련 결과 보고                : 2023. 12.

민·관·군·경·소방 통합방위태세 확립

(계속사업)

□ 개    요

구 분	추진사항	시 기	내 용
예비군 육성지원	경상보조	연초	- 지역방위 작전 물자 유지 보수 - 지역예비군 부대운영 여건보장 - 예비군 교육훈련 시설유지
	자본보조	연초	- 지역방위 작전 능력 구비 - 예비군 교육훈련 물자구매 - 예비군 교육훈련 시설개선
	예비군 훈련대 진입도로 정비	2023	통합(6개 시·군) 과학화 예비군 훈련대 창설에 따른 예비군 훈련대 진입도로 정비
협력체계	통합방위협의회	매분기	민·관·군·경 통합방위태세 확립을 위한 위원회 운영
자원관리	동원자원조사	연초	중점관리대상자원 지정 · 관리를 위한 자원조사
	중점관리대상자원 확인의 날	매분기	비상대비 인력·물자 등 자원 관리
훈 련	민방공 대피훈련	5월	미사일 공격, 공습 위험에 대비한 민방공 대피훈련
	을지연습	8월	전시대비 공무원의 전시 임무수행역량 강화

□ 추진실적

◦ 2023년도 예비금 육성지원 보조금 교부(194백만원)	: 2023. 03.

◦ 2023년도 동원자원조사	: 2023. 03.

◦ 드론 예비군부대 창설 및 드론 통합운용 업무협약	: 2023. 03.

◦ 통합방위협의회 구성 및 운영(분기별1회)                : 3회

◦ 예비군 훈련대 진입도로 정비 사업 착공	: 2023. 04.

◦ 공습대비 민방공 대피훈련 실시	: 2023. 05.

◦ 국가용 암호장비(usb) 신규 구매(5대)	: 2023. 06.

◦ 을지연습 실시(2023. 08. 21. ~ 08. 24.)                    : 2022. 08.

□ 쟁점 및 대책

◦ 을지연습 진행 시 상황 유지관리를 위한 관련부서 및 유관기관의 지속적인 협조 필요

- 관련부서의 협조를 위한 심도깊은 준비상황 보고회 운영과 통합 방위협의회 개최시 유관기관의 역할 재차 강조

□ 금후계획

◦ 전시병무담당 및 주민신고망 일제정비	: 2023. 12.

◦ 중점관리대상자원 확인의 날	: 2023. 12.

재난종합상황(재난안전대책본부) 관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 관리대상 : 자연재난, 사회재난(인적재난, 국가기반체계 마비, 전염병 등)

◦ 운용장소 : 재난안전상황실 (시 의회 4층)

◦ 상황유지 : 지속적인 상황관리 유지(24시간)

◦ 내    용 : 신속한 정보수집 및 상황전파 등 대응태세 확립

□ 추진실적

◦ 재난 종합상황 관리를 위해 연중 근무 : 일 4명(주간 2, 야간 2)

- 상황전파 : 사건접수, 보고·전파, 상황 조치 등

- 비상근무 : 명절 연휴(설, 추석) 기상특보 발령 시

◦ 재난대응 매뉴얼 제작 ‧ 배부(유관기관 및 13개 협업부서 등) : 200부

◦ 코로나19 발생에 따른 재난안전대책본부 운영

- 운영기간 : 2020. 1. 31. ~ 상황 종료 시까지

- 실 무 반 : 5개반 7명(안전재난과2, 보건소2, 환경과1, 주민복지과1, 홍보전산과1)

◦ 2023. 01. 01. ~ 2023. 08. 11. 기상특보 발효 건수 : 1회

◦ 기상특보 발령에 따른 재대본 운영 및 비상근무 실시 : 1회

구분	대설·한파		호 우		태 풍		폭 염
	횟수	인원	횟수	인원	횟수	인원	횟수	인원
합 계	4	46	16	736	0	0	5	46
주의보	3	-	14	644	-	-	4	-
경 보	1	46	2	92	-	-	1	46

□ 쟁점 및 대책

◦ 기후변화에 따른 기상특보 발령 가능성 증가

- 예찰, 사전 점검, 홍보 활동 등을 강화하여 안전사고 예방

- 한파, 대설 등 여름철 자연재해 대비 비상근무 실시

□ 금후계획

◦ 상시 재난대비(예방, 대비, 대응, 복구) 체계 유지

◦ 한파, 대설 등 겨울철 자연재해 대비 비상근무 실시

◦ 사건·사고 발생 시 신속한 상황전파, 보고 등 상황유지 관리

□ 재난관리 단계

◦ 자연재난 : 태풍, 호우, 홍수, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 낙뢰, 가뭄, 지진, 황사, 폭염, 한파, 조류대발생, 조수, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해

◦ 사회재난 : 화재, 붕괴, 폭발, 교통사고, 화생방사고, 환경오염사고, 감염병, 가축전염병, 미세먼지, 그 밖에 이와 유사한 사고로 발행하는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 피해

재난관리	자연재난		사회재난
예방	비구조적 대책	구조적 대책	∙국가안전대진단 및 지적사항 정비 ∙재난관리자원 운용 ∙공공 발주공사 안전점검 ∙시설물 안전점검 ∙재난취약시설 재난배상책임보험 가입 ∙재난취약계층 소방시설 지원
	∙ 자연재해저감 종합계획 수립 ∙ 재해영향평가 제도 운영 ∙ 방재성능목표설정 ∙ 피해우려지역 상시점검	∙ 자연재해위험지구 개선사업 추진 ∙ 재해위험저수지 정비사업 추진 ∙ 급경사지 붕괴 위험지역 정비 ∙ 소하천 정비 ∙ 우수저류시설 설치
대비	∙ 재난관리자원의 비축 및 관리 ∙ 재난대비 전문교육 ∙ 안전한국훈련 ∙ 재난대비 수시훈련 ∙ 위기관리 매뉴얼 작성․운용
대응	∙ 재난안전대책본부 운영 ∙ 재난현장관리 ∙ 재난 예․경보 체계구축․운영
복구	∙ 피해조사 및 복구계획 수립 ∙ 특별재난지역 선포(남원시 : 피해액 60억원 이상) ∙ 재난복구사업 추진 및 복구사업의 분석․평가

※ 재난관리 : 재난의 예방, 대비, 대응, 복구를 위하는 하는 모든 활동

◦ 예방 : 평상시 재난발생 위험감소 및 예방을 위해 수행하는 일련의 활동

◦ 대비 : 재난발생시를 가정, 재난상황에서 수행해야 할 제반 사항을 미리 준비하기 위한 활동

◦ 대응 : 재난이 발생했을 때 대처하는 일련의 활동, 응급대책 및 구조, 구급활동을 포괄하는 활동

◦ 복구 : 재난이 발생하기 이전 상태로 되돌리기 위한 일련의 활동

재난대응 안전한국훈련 실시

(계속사업)

□ 개    요

◦ 훈련시기 : 2023. 10. 23. ~ 11. 03

◦ 근    거 :「재난 및 안전관리기본법」제35조 재난대비훈련 실시 (연 1회 이상)

❖ 안전한국훈련 (매년 정기* / 모든 재난관리책임기관 및 일반국민 참여)

* 대규모 재난대비 범국가적 재난대응체계 종합점검

❖ 상시훈련 (연중 수시*, 재난관리책임기관 및 필수 협업기관 참여)

* 위기관리 매뉴얼 숙달을 위해 연 1회 이상 각 기관의 임무･역할 및 협업체계 점검

◦ 참    여 : 남원시, 유관기관․단체 및 일반국민 등

◦ 내    용 : 다중밀집시설 대형화재 재난 대응 토론․현장훈련

비상소집, 불시대피 훈련, 다중이용시설 복합사고 수습·복구 및 행동 매뉴얼 숙지 종합훈련 실시

□ 추진실적

◦ 2022 안전한국훈련 평가결과 우수기관 선정	: 2023. 02.

◦ 2023 안전한국훈련 추진 계획 수립 중	: 2023. 05.

□ 연도별 훈련실시 현황

구 분	2021	2022	2023(예정)
훈련일시	2021. 11. 30.	2022. 11. 23. ∼ 11. 24.	2023. 10. 23. ∼ 11. 03.
참여인원	남원시 13개 협업부서 및 유관기관 · 단체 일반국민 등	남원시 13개 협업부서 및 유관기관 · 단체 일반국민 등	남원시 13개 협업부서 및 유관기관 · 단체 일반국민 등
훈련내용	- 도로 터널 내 사고로 인한 대형화재 재난 대응 토론 훈련	- 풍수해 재난대응 현장 및 토론 훈련	- 지진 대피훈련 - 다중밀집시설 대형화재 재난 대응 현장 및 토론 훈련

□ 쟁점 및 대책

◦ 유관기관과 연계하여 지역특성에 맞는 실질적인 훈련 실시

- 형식적인 훈련이 되지 않도록 불시 훈련 보완 필요

□ 금후계획

◦ 2023 안전한국훈련 실시                   : 2023. 10. 23. ~ 11. 03

대한민국 안전대전환 집중안전점검 실시

(계속사업)

□ 개    요

◦ 진단기간 : 2023. 4. 17.(월) ~ 6. 16.(금) (61일간)

◦ 진단대상 : 7개 분야 총 120개소

※ 건축시설(13), 생활·여가(17), 환경·에너지(23), 교통시설(9), 산업·공사장(1), 보건복지·식품(5), 기타(52)

◦ 점검방법 : 민·관 합동점검

◦ 참여인원 : 650여명(민간전문가 150여명, 기타 공사·공단 직원 등 200여명, 공무원 300여명)

◦ 점검내용 : 담당 부서별 시설물 안전점검(건축·토목·전기·가스·소방 등)

◦‘23년도 집중안전점검 추진결과

점검대상 (개소)	점검실적 (개소)	점검률 (%)	점 검 결 과
			이상없음	보수ㆍ보강	현지시정	정밀안전진단
120	120	100%	98	18	4	-

□ 추진실적

◦ 집중안전점검 주민신청제 신청·접수(2건)	: 2023. 02.

◦ 집중안전점검 대상시설 선정 및 시스템 입력(120개소)   : 2023. 02. ~ 03.

◦ 집중안전점검 기본계획 수립 및 민관합동점검반 구성(18명)  : 2023. 03.

◦ 플래카드, 대형전광판 등 집중안전점검 홍보        : 2023. 04. ~ 06.

◦ 집중안전점검 홍보 및 민·관 합동 집중안전점검 실시  : 2023. 04. ~ 06.

◦ 집중안전점검 시군 평가	: 2023.  07.

□ 쟁점 및 대책

◦ 집중안전점검 시 지적된 사항에 대한 시설관리 부서의 신속한 후속조치 필요

- 보수 보강 사업 추진을 위한 예산확보 철저

- 후속조치 사항 시스템 등록 및 분기별 조치현황 파악을 통한 이력관리

□ 금후계획

◦ 점검 결과 후속 조치 추진상황 지속 관리	: 매 분기

자연재해 사전대비 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 자연재해 기상특보 기준

종류	주 의 보	경 보
폭염	일 최고체감온도가 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때	일 최고체감온도가 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
호우	3시간 강우량이 60mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm이상 예상될 때	3시간 강우량이 90mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm이상 예상될 때
태풍	① 호우 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 ② 육상에서 풍속 14m/s이상 또는 순간풍속 20m/s 이상이 예상될때	①풍속 21m/s 이상 또는 순간풍속 26m/s이상 예상될 때 ② 총 강우량이 200mm이상 예상될 때
대설	24시간 신적설이 5cm이상 예상될 때	24시간 신적설이 20cm이상 예상될 때

□ 추진실적

◦ 겨울철 사전대비 및 대책 추진

- 소형제설기(블로워) 배부 및 점검(24대)	: 2023. 03.

- 읍면동 트랙터 부착용 제설기 구입·보급(	31대)	: 2023. 03.

◦ 여름철 사전대비 및 대책 추진

- 인명피해우려지역 점검 추진(급경사지, 세월교, 저수지 등)	: 2023. 03.

·총 131개소(기존 26, 침수 주거 2, 태양광 103) 점검

- 무더위쉼터(538개소) 냉방기 관리점검                    : 2023. 05.

- 그늘막 53개소 운영                                     : 2023. 05.

- 읍면동 수방자재 구입 배부(14종 4,845점)                 : 2023. 05.

- 향교우수저류시설 우기 대비 점검                              : 2023. 05.

- 폭염피해 예방 살수차 임차 운영(4대 4개구간 18km)       : 2023.06.

- 폭염 취약계층 아이스링 구입·보급(1,000개)               : 2023.06.

- 자율방재단 폭염대비 생수 나눔 캠페인(공설시장 4회)         : 2023.07      - 그늘막 6개소 신규설치 및 스마트그늘막 1개소 교체          : 2023. 08.

□ 금후계획

◦ 2023년 겨울철 사전대비 및 대책기간 추진  : 2023. 10. 15. ~ 2024. 03. 15.

◦ 한파, 대설 등 겨울철 자연재해 대비 비상근무 실시

◦ 사건·사고 발생 시 신속한 상황전파, 보고 등 상황유지 관리

재해위험 방재시설 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비				사업기간	비 고
		계	국비	도비	시비
계		417	-	166.8	250.2
아영 일대 배수로 재해위험 방재시설 정비사업	개거설치 (L=300m)	357.4	-	144 (40%)	213.4 (60%)	‘23. 05. ~ ‘23. 10.
이백 내동 소하천 재해위험 방재시설 정비사업	석축쌓기 (A=30㎡)	15	-	6 (40%)	9 (60%)	‘23. 03. ~ ‘23. 04.	완료
대강 신덕 세천 재해위험 방재시설 정비사업	세천보강 (L=150m)	41.5	-	16.8 (40%)	24.7 (60%)	‘23. 03. ~ ‘23. 6.	완료

※ 추진근거 : 자연재해대책법 시행령 제55조

□ 추진실적

◦ 재해위험 방재시설 정비를 위한 도비 확보	: 3개소 / 166.8백만원

◦ 실시설계용역 추진	: 2022. 12. ~ 2023. 02.

◦ 이백 내동 재해위험 방재시설 정비사업 완료      : 2023. 04.

◦ 아영 일대 배수로 재해위험 방재시설 정비사업 착공  : 2023. 05.

◦ 대강 신덕 세천 재해위험 방재시설 정비사업 완료   : 2023. 06 .

□ 쟁점 및 대책

◦ 우기 전 사업 완료를 목표로 진행하되, 불가할 경우 안전사고가 발생하지
않도록 대비책 마련

- 우기 시 발생할 재난에 대한 안전 가이드라인 마련

□ 금후계획

◦ 아영 일대 배수로 재해위험 방재시설 정비사업 준공  : 2023. 10.

안전한 도시환경 구축

(계속사업)

□ 개    요

(단위 : 백만원)

연번	구 분	사업기간	사업비	사 업 량	사업위치
	합 계		75
1	재난취약계층 화재감지기 등 보급	2023. 3. ~ 11.	5	화재감지기 : 145대 소화기 : 145대	남원시 관내 (취약계층가구)
3	화재피해 주민지원	연중	30	2건(전소) : 5백만원 4건(반소) : 3백만원 4건(부분소) : 2백만원	남원시 관내 화재취약지역
4	시민실종사고 대응	연중	10	1건당 250만원	남원시 관내 시민실종 지역

□ 추진실적

◦ 시민실종사고 지원(인력 지원, 예산 재배정 등)	: 2023. 01. ~

- 2023년 지원건수 및 지원액 : 3건, 5백만원 (2023. 8월 기준)

◦ 화재피해 주민지원 사업 시행	: 2023. 01. ~
- 2023년 지원건수 및 지원액 : 7건, 22백만원 (2023. 8월 기준)

◦ 범죄예방 시설물 설치사업 추진	: 2023. 04. ~

- 광치천 생태공원 산책로 구간 중 가로등 미설치 구간 LED 조명 41개 설치
※ 향교동 건의, 남원경찰서 생활안전과 제언 등 의견 수렴

◦ 재난취약계층 화재감지기, 소화기 설치(145세대)	: 2023. 05월

□ 쟁점 및 대책

◦ 남원시 관내 화재가 증가하는 만큼 화재피해 추가적인 지원 필요
- 화재피해 주민지원 사업과 관련해 추가 예산 확보 추진

□ 금후계획

◦ 시민실종사고 지원 및 화재피해주민 지원	: 발생 시

남원시 우수유출저감대책 수립 용역

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 전지역

◦ 사업기간 : 2023. 08. ~ 2025. 2.

◦ 총사업비 : 600백만원 (시비 100%)

◦ 사업내용 : 남원시 전역(752.1㎢)을 대상으로 우수유출저감대책을 수립하여 우수저류 및 침투시설을 활용한 분산형 우수관리체계 구축

◦ 추진근거 : 자연재해대책법 제19조 및 동법 시행령 제16조

- 우수 침투, 저류 또는 배수를 통한 재해예방을 위해 5년마다 수립

◦ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
합 계	600	-	300	300
국 비	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	600	-	300	300

□ 추진실적

◦ 원가 심사                                            : 2023. 01.

◦ 사업수행능력평가서 제출 안내 공고 및 접수            : 2023. 01.

◦ 사업수행능력평가 결과 보고 및 선정 업체 통보         : 2023. 07.

◦ 수립용역 1차분 시행                                  : 2023. 08.

□ 금후계획

◦ 수립용역 2차분 시행                                  : 2024. 08.

◦ 수립용역완료                                         : 2025. 02.

□ 기대효과

◦ 우수유출저감대책 수립용역을 통하여 기후변화에 따른 자연재난(침수)방지를 위해 우수저류 및 침투시설을 활용한 분산형 우수관리체계를 구축하고 내수침수 위험을 저감 또는 분담함으로써 안전한 남원을 만들기 위함

2020년 남원시 호우피해 재해복구사업

분석·평가 용역

(신규사업)

□ 개    요

◦ 사업대상 : 2020년 수해복구사업

◦ 사업기간 : 2023. 01. ~ 12.

◦ 총사업비 : 588백만원 (시비 100%)

◦ 사업내용 :「2020년 남원시 호우피해 재산복구사업」 분석평가 용역 추진

- 재해복구사업의 해당 시설별 피해원인 분석, 적절성, 타당성 등

◦ 추진근거 : 자연재해대책법 제57조

- 공공시설의 복구비가 300억원 이상인 사업에 대해 분석·평가 실시
※ 2020년 복구액 : 1,600억

◦ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
합 계	588	-	588	-
국 비	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-
시 비	588	-	588	-

.

□ 추진실적

◦ 원가 심사                                            : 2023. 01.

◦ 사업수행능력평가신청서 제출 안내 공고 및 접수        : 2023. 04.

◦ 사업수행능력평가 결과 보고 및 선정 업체 통보         : 2023. 05.

◦ 수립용역 착수                                        : 2023. 06.

□ 금후계획

◦ 수립용역 완료                                        : 2024. 04.

□ 기대효과

◦ 재해복구공사를 분석·평가하여 재해발생의 원인파악과 시설물의 재해재발 방지 여부 및 재해복구 사업이 지역주민의 생활환경에 미치는 효과, 지역개발의 발전성에 미치는 영향 등을 파악하여 재해복구 체제에 역기능은 완화하고 순기능을 향상시키기 위함

재난관리기금 운용 관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 2023년 조성액

(단위 : 백만원)

총 액	2022년 이월액	수 입 내 역
		일반회계 전입금	도 보조금	이 자
2,168	1,046	634	470	18

◦ 2023년 기금사용 계획

(단위 : 백만원)

예산과목	사 업 명	예산액	재원별
			도	시
합 계	13건	1,095	470	625
사무관리비 (7)	소 계 (7건)	165	5	160
	재난 예방 홍보 (풍수해, 폭염, 한파, 대설 등)	15	-	15
	수방자재 구입	5	-	5
	제설자재 구입	15	-	15
	물놀이 위험구역 부표 설치	10	5	5
	재난 피해예방 긴급대응 (풍수해, 폭염, 한파, 대설 등)	50	-	50
	감염병 피해예방 긴급대응	20	-	20
	공공시설 응급복구 장비 지원	50	-	50
재료비(1)	겨울철 설해대비 제설용 소금구입	180	90	90
시 설 비 (5)	소 계 (5건)	750	375	375
	자동기상관측시설(AWS) 설치	200	100	100
	덕과 용산소하천 재해위험 방재시설정비사업	100	50	50
	덕과 고정소하천 재해위험 방재시설정비사업	250	125	125
	사매 오현소하천 재해위험 방재시설정비사업	100	50	50
	사매 오신 소교량 정비사업	100	50	50

□ 추진실적

◦ 물놀이 안전사고 예방 부표 구입	: 2023. 07.

◦ 호우대비 긴급대응 톤마대 및 수방자재 구입	: 2023. 08.

□ 금후계획

◦ 하반기 실시예정사업 연내 준공 철저

- 사고이월되는 사업이 없도록 독려 및 관리

◦ 여름철·겨울철 자연재난 발생 시 긴급대응비 및 응급복구비 즉시
사용할 수 있도록 관리 철저

지방하천 정비사업(총괄)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 아영면 풍천 외 2개소

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2025년 (14개년)

◦ 총 계 획 : 21개 지구 / 98.43㎞ / 190,771백만원

- 완료지구 : 15개 지구 / 48.79㎞ / 123,612백만원

(송내천, 내척천, 괴양천, 진기천, 백암천, 운교천, 풍천, 요천, 수외천, 수지천, 주촌천, 갈치천, 람천, 송치천, 다산천)

-`23년사업 : 3개 하천 / 11,626백만원(도비 8,115, 시비 3,511)

하천별	지구별	사업량 (km)	사 업 비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2023	2024이후
합 계	3개소	21.36	66,351	51,578	11,626	3,147	81
□풍 천	소 계	5.50	37,351	36,108	1,243	-	100	`14 ~ `23
	청계지구	0.88	6,961	6,961	-	-	100	`17년준공
	풍천지구	4.62	30,390	29,147	1,243	-	100	`18 ~ `23
□원천천	신촌~주천	13.70	23,583	15,200	8,383	-	100	`17 ~ `23
□람 천	인월지구	2.16	5,417	270	2,000	3,147	42	`22 ~ `25

□ 추진실적

◦ 풍  천(인월·두락·의지) : 4차분 추진 중 (의지지구)	/ 공정률 99%

◦ 원천천 : 4차분 추진 중(호곡교, 자전거도로 등)	/ 공정률 86%

◦ 람  천(인월지구) : 실시설계 중 – 전북도(물통합관리과)

□ 금후계획

◦ 2023년 완료 : 2개 지구(풍  천, 원천천)

- 2023년 람천(인월지구) 신규사업 발주 예정

◦ 2025년 완료 : 1개 지구(람  천)

□ 풍천 지방하천 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면 일대리 ~ 남원시 인월면 취암리 지내

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=5.50km

◦ 사업기간 : 2014 ∼ 2023년(10개년)

◦ 총사업비 : 37,351백만원(국비 8,028, 도비18,118, 시비 11,205)

◦ 재원투자계획

구 분	하천명	사업량 (km)	사 업 비(백만원)					비 고
			재원	계	기투자	2023	2024
합 계				37,351	36,108	1,243	-
지방 하천	풍 천	하천정비 L=5.5km	국비	8,028	8,028	-	-	공정률 94%
			도비	18,118	17,271	847	-
			시비	11,205	10,809	396	-

□ 추진 실적

◦ 총사업비 변경 승인(부산청 : 낙찰차액 반납)	: 2017. 11.

- M.P : 38,193백만원 (국비 19,096, 도비 7,639, 시비 11,458)

⇒ 변경 : 37,351백만원 (국비 18,676, 도비 7,470, 시비 11,205) / 842백만원 감

◦ 풍천 지방하천 정비공사(총괄분) 시행           : 2018. 10.

- 시공사 : (주)장한종합건설 대표 소재철(전주 소재) / 건설사업관리 : (주)건화

◦ 풍천지구(1, 2, 3차분) 공사 준공	: 2019. 12. ~ 2022. 09.

◦ 풍천지구(4차분) 공사 추진	: 2022. 04. ~

- 하천정비(의지지구) 교량3개소(일대2, 의지2, 의지3교) 등

□ 쟁점 및 대책

◦ 현재 공정률이 99%의 상황으로 특이사항 없이 공사완료 예정임.

□ 금후 계획

◦ 전체분 공사 준공	: 2023. 08.

□ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 신촌동 요천 합류부 ~ 주천면 고기리 일원

◦ 사 업 량 : 관광자원화 친수공간 조성 L=13.7㎞

- 축제 2.78km, 호안 5.16km, 자전거길 6.6㎞, 보․낙차공 12개소, 교량 9개소 등

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2023년 (7개년)

◦ 총사업비 : 23,583백만원(국비 1,600, 도비 14,908, 시비 7,075)

◦ 재원투자계획

구 분	하천명	사업량 (km)	사 업 비(백만원)					비 고
			재원	계	기투자	2023	2024
합 계				23,583	15,200	8,383	-
지방 하천	원천천	하천정비 L=13.7km	국비	1,600	1,600	-	-	공정률 86%
			도비	14,908	9,040	5,868	-
			시비	7,075	4,560	2,515	-

□ 추진실적

◦ 국토교통부 하천사업 제안공모 선정	: 2015. 10. ~ 12.

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진	: 2016. 09.

◦ 지방건설기술심의(전라북도)	: 2019. 09.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의 승인	: 2019. 11.

- 당초 MP상 18,821백만원 → 23,583백만원 (증 4,762 / 증 25.3%)

◦ 시설공사 준공(1차분·2차분·3차분)	: 2019. 12. ~ 2023. 04.

- 주천면 고기리, 덕치리 구간 호안 정비, 종단교 신설, 호경좌1지구, 원천우1지구 호안공 등

◦ 시설공사 착공(4차분)	: 2023. 05. ~

- 호곡교 재가설, 용담좌1지구, 호기우1지구 호안공, 자전거도로공 등

□ 쟁점 및 대책

◦ 본 사업 내에 호곡교와 접속도로(지방도 730호선) 연결 시 급경사에 따른 문제점 발생으로 전라북도와 협의 중

- 도로설계 기준에 맞게 재설계(안) 검토 중이며, 이에 따른 계획 및 공기연장 등 협의 필요.

□ 금후계획

◦ 전체분 공사	준공	: 2023. 12.

□ 람천 지방하천 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 인월면 인월리 일원

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=2.16㎞

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2025년(4개년)

◦ 총사업비 : 5,417백만원(도비 3,792, 시비 1,625)

◦ 재원투자계획

구 분	하천명	사업량 (km)	사 업 비(백만원)					비 고
			재원	계	기투자	2023	2024
합 계				5,417	270	2,000	3,147
지방 하천	람 천	하천정비 L=2.16km	국비	-	-	-	-
			도비	3,792	270	1,400	2,122
			시비	1,625	-	600	1,025

□ 추진실적

◦ 지방하천정비사업 종합정비계획 반영	: 2016. 11.

◦ 실시설계용역착수 (전라북도)	: 2020. 05.

◦ 주민설명회(1차, 인월면사무소)	: 2021. 03.

◦ 주민설명회(2차, 인월면사무소)	: 2021. 09.

◦ 기본계획에 대한 지역수자원 관리위원회 개최	: 2023. 04.

□ 쟁점 및 대책

◦ 사업부지 내 홍수조절지 설치에 대한 적정 여부

- 람천 지방하천 기본계획에 홍수조절지 설치 예정 부지가 하천구역에서 제외되지 않도록 지속 협의.

□ 금후계획

◦ 실시설계도서 성과품 납품(전북도→남원시) 예정	: 2023. 09. ~

◦ 사업 발주(전체분 및 1차분)	: 2023. 10. ~

- 편입용지 토지 협의 매수 병행 추진

소하천 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 30개 지구 / 61.24㎞ / 110,775백만원

◦ 기 투 자 :  8개 지구 / 13.75㎞ /  23,512백만원

◦ 시 행 중 :  3개 지구 /  5.85㎞ /  22,965백만원 (`23년 : 3,549백만원)

- `23 완공 :  3개 지구

◦ 재원투자계획

지구별	위 치	사업량 (km)	사 업 비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2023	2024이후
합 계	3개 하천	5.85	22,965	19,416	3,549	-	100
당동천	아영 봉대	2.69	11,511	11,511	-	-	100	`18~ `23
과립천	이백 과립	1.88	4,348	3,260	1,088	-	100	`20~ `23
산곡천	향교동	1.28	7,106	4,645	2,461	-	100	`20~ `23

□ 추진실적

◦ 당  동  천 : 4차분 추진 (배수암거 및 교량 2개소 등)	/ 공정률 90%

◦ 과  립  천 : 3차분 추진(호안정비 및 지수벽6개소 등)	/ 공정률 100%

◦ 산  곡  천 : 3차분 추진(호안정비 L=0.53km 및 교량2개소)	/ 공정률 90%

□ 금후계획

◦ 2023년 완료 : 3개 사업[당동천, 과립천, 산곡천]

참고		소하천 정비사업 중기계획

◦ 소하천정비 중기계획 수립 (2019 ~ 2023) : 행정안전부 / 2017. 7.

◦ 총 계 획 : 310개소 중 상위 30개소 우선 추진 61.24km / 110,775백만원

․ 완    료 지구 :  8개지구 13.75km,  23,512백만원

․ 계속사업 지구 :  3개지구  5.85km,  22,165백만원

․ 중기계획 지구 : 19개지구 41.64km,  65,098백만원

행정구역			대상하천		사업개요		비고
순위	시	읍면동	하천명	수계명	사업량(㎞)	사업비(백만원)
합 계			30개소		61.24	110,775
준 공			8개소		13.75	23,512
84	남원	보절	뒤하천	섬진강	1.95	1,797	`10~`11
175	남원	주천	율치천	섬진강	1.00	2,098	`11~`12
214	남원	대산	율정천	섬진강	0.89	875	`10~`11
271	남원	아영	아곡천	낙동강	1.15	1,596	`11~`12
121	남원	보절	신동천	섬진강	3.11	3,051	`14~`15
47	남원	운봉	장교천	낙동강	2.55	4,000	`14~`17
91	남원	수지	고평천	섬진강	2.28	7,745	`16~`21
201	남원	운봉	오롱골천	낙동강	0.82	2,350	`19~`21
공사 중			3개소		5.85	22,165
172	남원	아영	당동천	낙동강	2.69	10,711	`18~`22
2	남원	이백	과립천	섬진강	1.80	4,348	`20~`23
1	남원	향교	산곡천	섬진강	1.28	7,106	`20~`23
중기 계획			19개소		41.64	65,098
3	남원	수지	유암천	섬진강	5.39	4,940	중기
4	남원	어현동	함파천	섬진강	1.22	2,067	〃
5	남원	아영	이동천	낙동강	2.76	2,595	〃
6	남원	운봉	탑동천	낙동강	2.91	3,697	〃
7	남원	대산	감성천	섬진강	1.64	1,503	〃
8	남원	덕과	용산천	섬진강	4.16	3,536	〃
9	남원	운봉	준행천	낙동강	3.30	4,715	〃
10	남원	송동	영촌천	섬진강	1.15	1,086	〃
11	남원	송동	양아천	섬진강	0.36	342	〃
12	남원	인월	덕실천	낙동강	1.35	2,027	〃
13	남원	인월	지산천	낙동강	0.47	10,28	〃
14	남원	송동	백평천	섬진강	2.58	2,424	〃
15	남원	대산	심곡천	섬진강	2.55	5,890	〃
16	남원	이백	외동천	섬진강	1.07	3,509	〃
18	남원	사매	수동천	섬진강	0.81	1,850	〃
19	남원	이백	입촌천	섬진강	1.14	1,540	〃
20	남원	신정	신정천	섬진강	3.09	5,388	〃
21	남원	금지	방촌천	섬진강	5.69	17,989	〃

하천 유지관리사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천‧지방하천‧국가하천 일원

◦ 대상하천 : 관내 352개 하천 (국가하천 2, 지방하천 40, 소하천 310)

◦ 총사업비 : 8,476백만원 (국비:742, 도비:1,450, 시비:6,284)

사 업 명	대상하천	사 업 량	사업비(백만원)	비 고
합 계		67개 개소	8,476
국가하천 유지보수	국가하천	9개 개소	742	국 742
기성제 유지관리	지방하천	12개 개소	1,900	도 950 시 950
하천 유지관리	소 하 천	46개 개소	5,834	도 500 시 5,334

□ 추진 실적

◦ 국가하천유지보수사업 추진(국가하천 9개소 정비)	: 2023. 01. ~

- 유지관리(5)  : 요천 친수공간 유지보수 등 5개소 중 3개소 완료, 2개소 추진 중

- 시특법시설물(3) : 하천 시특법시설물 정밀안전점검 및 보수공사 완료

- 잡목제거(1) : 요천(주촌천 합류부) 수목제거 사업 추진 중

◦ 기성제 유지관리사업 추진(지방하천 12개소 정비)	: 2023. 01. ~

- 유지관리(6) : 광치천 유지관리사업 등 6개소 중 3개소 완료, 3개소 추진 중

- 하도준설(6) : 풍촌천 하도준설사업 등 5개소 추진 중

◦ 하천 유지관리사업 추진(소하천 76개소 정비)	: 2023. 01. ~

- 유지관리(38) : 수지면 생촌소하천 등 37개소 중 23개소 완료, 14개소 추진 중

- 하도준설(7) : 용산천 하도준설사업 등 6개소 중 4개소 완료, 3개소 추진 중

- 효촌천 개선복구사업 잔여분 공사 완료

- 집중호우 피해하천 복구사업(광락천 외 29개소) 추진

□ 금후계획

◦ 2023년 하반기 국가하천(섬진강‧요천) 유지관리 공사완료  : 2023. 12.

◦ 2023년 하반기 유지관리사업 실시설계 및 공사발주   : 2023. 08. ~ 12.

참고		하천 유지관리 대상사업 목록

사 업 명		사업 대상	사 업 량 / 집 행 량	사업비 (백만원)	비 고 (사업기간)
국가하천 유지보수			4개 분야 / 9개소	742
1	요천 친수공간 유지보수사업		데크재설치 A=599㎡, 아연도각관설치 L=864m	211	준공
2	요천 조산1제 유지보수사업		사석쌓기 H=2.4m~3.7m 흙콘크리트포장 L=45m	49	준공
3	요천 시설물 유지보수사업		옹벽블럭계단 설치 2개소, 미끄럼방지지설설치 L=120m	21	준공
4	국가하천 배수문 수위제어 케이블 지중포설 전기공사 실시설계용역		노출제어 케이블 처거 후 지중포설 1식	3	준공
5	죽항제4배수문 외 1개소 정밀안전점검 기술용역		정밀안전점검 기술용역 1식	7	준공
6	노암제 외 3개소 정밀안전점검 기술용역		정밀안전점검 기술용역 1식	30	준공
7	신양제10지구1배수통문 외 2개소 정밀안전점검 기술용역		정밀안전점검 기술용역 1식	20	준공
8	국가하천 하천 제방 및 도로 잡목제거		제방 및 제방도로 잡목제거 1식	160	~‘23.11.
9	국가하천 자전거도로 쉼터 유지관리		화장실 및 쉼터 유지관리 1식	32	~‘23.11.
-	국가하천 유지 보수 공사 추진 예정			241
기성제 유지관리			2개 분야 / 12개소	1,900
1	광치천 유지관리	유지관리	인도교 데크 설치 L=20m	25	준공
2	월평천(중류) 하도정비		준설 V=13,275㎥	58	준공
3	남창마을 자동문비 설치		스탠자동문비 2500*1500	20	준공
4	람천 유지보수사업		사석 쌓기 L=103m	48	중지
5	수지면 남창천 유지보수		옹벽블럭 L=53m	39	준공
6	운봉천 유지관리사업		옹벽블럭 L=53m	100	~‘23.11.
7	율천 지방하천 하도준설	준설	준설 V=11,435㎥	174	중지
8	덕과 율천 하도준설		준설 V=12,440㎥	165	준공
9	풍촌 지방하천 하도준설		준설 V=25,849㎥	218	~‘23.11.
10	요천(산동 대기) 하도준설		준설 V=26,560㎥	217	~‘23.11.
11	요천(이백 남계) 하도준설		준설 V=28,560㎥	215	~‘23.11.
12	옥율 지방하천 하도준설		준설 V=14,195㎥	189	~‘23.11.
-	하반기 추진 예정			432
하천 유지관리		소하천	2개 분야 / 46개소	5,834
1	이백면 서곡리 하천 보수		전석 쌓기 L=10m	6.8	준공
2	주촌천 인도교 보수		장애인슬로프설치L=7m	13	준공
3	산동면 가장골천 유지관리		발파석쌓기L=26m	25	준공
4	사매면 계동소하천 유지관리		발파석쌓기L=53m	43	준공
5	덕과면 양선소하천 유지관리		옹벽블럭설치L=87m	91	준공
6	사매면 두루메소하천 유지관리		석축쌓기L=80m	60	준공
7	수지면 생촌소하천 유지관리		옹벽블럭설치L=225m	109	준공
8	송동면 양아소하천 유지관리		옹벽블럭설치L=184m	87	영농기 중지
9	사매면 오리정소하천 유지관리		발파석쌓기L=34m	33	준공
10	주천 장안 제방 포장공사		L형옹벽L=25m	26	영농기 중지
11	덕과 사곡천 유지관리		콘크리트포장L=178m	73	영농기 중지
12	용정 박달천 유지관리		석축쌓기L=78m	80	준공
13	이백 채곡천 유지관리		석축쌓기L=110m	66	준공
14	월탄 소하천 유지관리		옹벽블럭L=51m	55	준공
15	대강 월탄천 유지관리		게비온옹벽설치L=45m	75	준공
16	주생면 광락소하천 유지관리		호안블럭쌓기L=258m	85	영농기 중지
17	노암동 데크의자 설치		데크의자설치	5	준공
18	주생면 새터소하천 유지관리		석축쌓기L=180m	188	영농기 중지
19	주생면 신정소하천 유지관리		풀베기A=8,978㎡, 준설V=4,501㎥	54	준공
20	향교동 내동소하천 유지관리		석축쌓기L=59m	46	준공
21	노암동 데크 설치		데크 설치 1개소	5	준공
22	닭진천 유지관리		석축쌓기 L=81m	68	준공
23	외야골천 유지관리		석축쌓기 L=81m	35	영농기 중지
24	은어천 유지관리		석축쌓기 L=90m	70	지장 이설 중지
25	수지면 양촌천(주민참여예산)		옹벽블럭 설치 L=48m	41	준공
26	주천면 무수신기천(주민참여예산)		석축쌓기 L=258m	85	영농기 중지
27	수지면 외호곡천(주민참여예산)		석축쌓기 L=65.4m	58	~‘23.8
28	주생면 영천천 유지관리		옹벽블럭 설치 L=70m	46	준공
29	이백면 서곡천 유지관리		옹벽블럭 설치 L=63m	29	준공
30	송동면 송내천 유지관리		석축쌓기 L=13m	8	영농기 중지
31	아영면 청계천 유지관리		석축쌓기 L=55m	112	~‘23.11
32	아영면 성리천 유지관리(1공구)		옹벽블럭 설치 L=91m	90	~‘23.11
33	아영면 성리천 유지관리(2공구)		석축쌓기 L=110m	106	~‘23.11
34	인월면 도장천 유지관리		암거 설치 L=10m	95	~‘23.11
35	주천면 율치소하천(주민참여예산)		석축 쌓기 L=100m	70	준공
36	이백면 서곡천 유지관리		옹벽블럭 L=63m	70	준공
37	주생면 신정소하천 유지관리		풀베기A=8,978㎡, 준설V=4,501㎥	54	준공
38	만수천 제방 정비사업		사석 쌓기 L=70m	88	~‘23.11.
39	운봉읍 용산천 하도준설(상)		하도준설 V=5,376㎥	31	준공
40	운봉읍 용산천 하도준설(하)		하도준설 V=4,161㎥	22	준공
41	양선소하천 하도준설		하도준설 A=3,990㎡	21	준공
42	구렁천 하도준설		하도준설 A=1,618㎡	13	우기 중지
43	뒤하천 하도준설		하도준설 V=4,650㎥	4	준공
44	양선천 하도준설		하도준설 V=1,972㎥	20	우기 중지
45	왕정동 광치천 하도준설		하도준설 V=3,383㎥	23	우기 중지
46	효촌천 개선복구사업 잔여분		하천정비 L=2.64km	1,143	준공
	읍면동 재배정 및 영농보상금 지급			1,506
-	하반기 추진 예정			700

재해위험지역 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 2023년 재해위험지역 정비사업 현황: 총 5개소 / 140,227백만원

구 분	합 계	풍수해 생활권	재해위험 개선지구	급경사지 붕괴위험	재해위험 저수지	조기경보 시스템
사업 지구수	5	2	3	-	-	-
사업비 (백만원)	140,227	86,200	54,027	-	-	-

□ 지구별 사업선정 조건

◦ 신    규

- 자연재해저감종합계획에 반영되고, 각 개별법에 따라 위험지구로 지정‧고시된 지구 중 5개년 정비(중기)계획을 수립한 지구

◦ 계    속

- 전년도까지 실시설계 등 행정절차가 완료되어 편입토지 보상 및 공사 착공이 가능한 지구

- 공사가 착공된 지구로서 정비계획에 따라 예산을 투입하여 정상적인 사업추진이 가능한 지구

□ 선정 대상 및 절차(참고)

구 분	선정 대상･절-차	비고
풍수해 생활권	(대상) 자연재해저감종합계획 및 재해위험개선지구 5개년 정비계획에 반영된 지구 (절차) 신규 신청(시･군･구) → 우선순위 선정(행안부) → 확정	풍수해 생활권 종합정비사업 신규지구 우선순위 선정계획
재해위험 개선지구	(대상) 5개년 정비계획에 반영된 지구 중 위험도에 따른 우선순위가 높은 지구 (절차) 신규 신청(시･군･구) → 우선순위 평가(시･도) → 확정	자연재해위험개선지구 관리지침
급경사지 붕괴위험	(대상) 5개년 정비계획에 반영된 지구 중 인명피해 위험도가 높은 지구 ※ 당해연도 해빙기 기간 중 피해 발생 사실이 있거나, 안전점검 결과 붕괴위험이 심각히 우려되는 지역에 한하여 신규 신청 가능 (절차) 신규 신청(시･군･구) → 우선순위 평가(시･도) → 확정	재해위험지역정비사업계획 수립 지침
재해위험 저수지 (농정과)	(대상) 재해위험저수지로 지정･고시된 5개년 정비계획에 반영된 지구 중 인명피해 위험도가 높은 지구 ※ 전년도 합동안전점검 결과 누수, 시설물 파손 등이 발견되어 정비가 시급한 저수지는 신규 신청 가능 (절차) 신규 신청(시･군･구) → 우선순위 평가(시･도) → 확정

□ 대곡지구 풍수해생활권 종합 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 전라북도 남원시 주생면 제천리 1133-166번지 일원

◦ 위험유형 : 침수위험지구 "나"등급 / 95,430㎡

◦ 사업기간 : 2023. 1 ~ 2026. 12.

◦ 사 업 량 : 배수펌프장 2개소, 배수로 및 우수관거정비(4.54km), 지방
하천정비(1.2km), 소규모 공공시설 정비 등

◦ 총사업비 : 40,600백만원(국 20,300 도 8,120 시 12,180)

◦ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
합 계	40,600	-	2,200	38,400
국 비	20,300	-	1,100	19,200
도 비	8,120	-	440	7,680
시 비	12,180	-	660	11,520

□ 추진실적

◦ 재해위험개선지구 지정·고시	: 2022. 02. 25.

◦ 공모사업 확정 및 ‘23년 예산 가내시	: 2022. 09. 15.

◦ 기본 및 실시설계용역 원가심사 완료(전라북도)	: 2022. 12. 09.

◦ 기본 및 실시설계용역 일상감사 완료(남원시)	: 2023. 01. 26.

◦ 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가 완료	: 2023. 04. ~ 05.

◦ 기본 및 실시설계용역 낙찰자 선정 및 착수	: 2023. 06.

□ 쟁점 및 대책

◦ 현재 기본 및 실시설계용역 업체 선정 완료하여 착수 완료

- 설계 용역 과업 기간이 18개월로 신속집행을 위해 최대한 단축하여 용역 완료 예정

□ 금후계획

◦ 기본설계에 대한 사전설계 검토(행안부)	: 2023. 12.

◦ 기본 및 실시설계용역 1차분 완료	: 2024. 06.

□ 사석지구 풍수해생활권 종합 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 대강면 사석리 2112번지 일원

◦ 위험유형 : 침수위험지구 “나”등급 / 163,280㎡

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2025년 (4년)

◦ 사 업 량 : 배수펌프장 2개소, 지방하천 정비(L=2.4km), 소하천 정비
(L=1.1km), 우수관로(L=1.1km), 소규모 공공시설 정비 등

◦ 총사업비 : 45,600백만원(국 22,800, 도 9,120, 시 13,680)

◦ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
합 계	45,600	1,930	3,440	40,230
국 비	22,800	965	1,720	20,115
도 비	9,120	386	688	8,046
시 비	13,680	579	1,032	12,069

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2022. 04. 25. ~

◦ 전략 및 소규모 환경영향평가 착수	: 2022. 11. 09.

◦ 기본설계에 대한 사전설계검토(행안부)	: 2023. 01. 24.

◦ 사전설계검토 조치계획서 협의	: 2023. 05. 11.

□ 쟁점 및 대책

◦ 공사발주 시기가 23.12월경으로 예산집행 지연우려

□ 용역기간을 최대한 단축(행정절차 조기이행 등)하여 상반기 설계 완료하고, 연내 공사발주 되도록 노력.

□ 금후계획

◦ 사전설계검토(행안부) 완료	: 2023. 08.

◦ 지방 건설기술심의 추진	: 2023. 09.

◦ 기본 및 실시설계 완료	: 2023. 09.

◦ 공사 발주	: 2023. 11.

□ 주촌 재해위험개선지구 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 전라북도 남원시 노암동 일원

◦ 위험유형 : 침수위험지구 "나"등급 / 99,100㎡

◦ 사업기간 : 2023. 1 ~ 2026. 12.

◦ 사 업 량 : 배수펌프장 2개소, 우수관거정비(1.03km), 고지배수로(723m),
지방하천정비 교량재가설 1개소 등

◦ 총사업비 : 39,600백만원(국 19,800 도 7,920 시 11,880)

◦ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
합 계	39,600	-	1,462	38,138
국 비	19,800	-	731	19,069
도 비	7,920	-	292.4	7,627.6
시 비	11,880	-	438.6	11,441.4

□ 추진실적

◦ 공모사업 확정 및 ‘23년 예산 가내시	: 2022. 09. 15.

◦ 재해위험개선지구 지정·고시	: 2022. 09. 23.

◦ 기본 및 실시설계용역 원가심사 완료(전라북도)	: 2023. 01. 13.

◦ 기본 및 실시설계용역 일상감사 완료(남원시)	: 2023. 01. 26.

◦ 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가 추진	: 2023. 04. ~ 05.

◦ 기본 및 실시설계용역 낙찰자 선정 및 착수	: 2023. 07.

□ 쟁점 및 대책

◦ 현재 기본 및 실시설계용역 업체 선정 완료하여 착수 완료

- 설계 용역 과업 기간이 18개월로 신속집행을 위해 최대한 단축하여 용역 완료 예정

□ 추진계획

◦ 기본설계에 대한 사전설계 검토(행안부)	: 2023. 12.

◦ 기본 및 실시설계용역 1차분 완료	: 2024. 06.

□ 풍촌 재해위험개선지구 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 전라북도 남원시 대산면 풍촌리 837번지 일원

◦ 위험유형 : 침수위험지구 "나"등급 / 202,905㎡

◦ 사업기간 : 2021. 01. ~ 2024. 06.

◦ 사 업 량 : 확폭 및 축제(L=2,640m), 교량 재가설 11개소, 배수통관
증설 1개소, 배수로 정비(L=1,500m) 등

◦ 총사업비 : 11,402백만원(국 5,701 도 2,280 시 3,421)

◦ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
합 계	11,402	4,590	6,812	-
국 비	5,701	2,295	3,406	-
도 비	2,280	918	1,362	-
시 비	3,421	1,377	2,044	-

□ 추진실적

◦ 공사 착공	: 2022. 11. 14.

◦ 실시계획 수립 및 공고	: 2022. 11. 30.

◦ 토지 감정평가	: 2022. 12. 08.

◦ 풍촌지구 공사추진(1차분)	: 2022. 11. ~ 2023. 11.

□ 쟁점 및 대책

◦ 재해예방사업 마무리 지구로 토지보상 및 공사추진 동시에 진행 중

- 신속집행을 위하여 토지보상 완료 구역 우선으로 공사 추진 중

□ 금후계획

◦ 편입토지 보상 추진중(70% 완료)                : 2024. 06.

◦ 공사 준공                                     : 2024. 06.

□ 유암 재해위험개선지구 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 전라북도 남원시 수지면 산정리 388-1번지 일원

◦ 위험유형 : 침수위험지구 "나"등급 / 65,011㎡

◦ 사업기간 : 2022. 12 ~ 2024. 05.

◦ 사 업 량 : 소하천 정비(L=1,173m), 구조물 계획(교량 3개소, 보 및 낙차공 8개소), 용지보상(26,300㎡)

◦ 총사업비 : 3,025백만원(국 1,512.5 도 605 시 907.5)

◦ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
합 계	3,025	400	2,625	-
국 비	1,512.5	200	1,312.5	-
도 비	605	80	525	-
시 비	907.5	120	787.5	-

□ 추진실적

◦ 문화재 지표조사 용역 추진	: 2021. 08. 10.

◦ 자연재해위험 개선지구 지정 고시	: 2021. 09. 07.

◦ 실시설계용역 추진(1차분)	: 2022. 04. 25.

◦ 유암지구 사전설계 심사 검토	: 2022. 12.

◦ 실시설계용역 완료	: 2022. 12.

◦ 일상감사 및 원가심사 완료	: 2023. 01.

◦ 공사시행 및 토지보상 추진	: 2023. 04. ~ 2024. 05.

□ 쟁점 및 대책

◦ 재해예방사업 마무리 지구로 토지보상 및 공사추진 동시에 진행 중

- 신속집행을 위하여 소유자 불명 토지에 대한 토지수용 절차 진행 예정

□ 금후계획

◦ 공사 준공	: 2024. 04.

남원시 중대재해 예방 업무추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 남원시 관할 사업장 종사자 및 공중이용시설을 이용하는 시민의 중대       재해 예방을 위한 종합적이고 체계적인 안전보건 관리체계 구축

□ 추진실적

◦ 남원시 안전보건관리 체계 구축을 위한 컨설팅 실시  : 2023. 02. ~ 05.

◦ 남원시 안전보건경영시스템 규정집(매뉴얼/절차서/지침서) 보급  : 2023. 06.

◦ 남원시 소속 상반기 사업장 위험성평가 실시	: 2023. 03. ~ 06.

◦ 남원시 소속 사업장 위험성평가 매뉴얼 보급              : 2023. 07.

◦ 산업안전보건위원회 분기별 개최	: 2회(3월, 6월)

◦ 사업장 안전 및 보건관리 순회점검 실시(21개소)	: 수시

□ 쟁점 및 대책

◦ 현업부서 근로자의 근무장소가 산재되어 있고 근로자와 담당자가 수

시변동되어 안전보건 교육관리의 어려움이 있어 교육 이수율 미흡

□ 온라인 교육 홈페이지 개설하여 이수관리 및 기존 교육방식 병행실시

□ 금후계획

◦ 남원시 소속 사업장 하반기 위험성평가 실시       : 2023. 07. ~09.

◦ 관리감독자(부서장) 산업안전보건 정기교육 실시    : 2023. 08. ~09.

◦ 현업근로자 온라인 안전보건교육 수요조사 및 개설 : 2023. 08. ~09.

◦ 남원시 산업안전보건위원회 개최                  : 분기별(9월, 12월)

◦ 남원시 소속 사업장 안전·보건 순회점검          : 수시

CCTV 통합관제센터 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2023. 01. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,373백만원(센터 유지관리 및 민간위탁비, 방범용 CCTV)

◦ 관제인원 : 14명(경찰 2, 관제요원 12)

◦ 목    적 : 사건 사고 발생시 신속대응 체계 구축

◦ 관제현황

(단위 : 대)

합계	방범용				재해예방			주정차	문화재	쓰레기	비고
	소계	차 량 방 범	생 활 방 범	어린이 보 호	소계	하 천 재 해	산 불 감 시
1,074	873	90	510	273	72	65	7	71	54	4

□ 추진실적

◦ 관제요원 및 유지관리 용역업체 보안 교육(2회)     : 2022. 12 / 2023. 02.

◦ 통합관제센터 운영 실적                        : 2023. 01. ~ 07.

- 영상정보 열람 및 제공 311건, 관제요원 관제 149건

◦ CCTV 설치 등 통합관제센터 환경 개선          : 2023. 02. ~ 04.

- CCTV 설치 11대(신규 7, 교체 4), 안내판 교체 70개

- 시스템 보강(저장장치 증설(100TB), CCTV 라이센스 추가(50채널), PC 교체(5대))

◦ 빅데이터 활용·분석을 위한 CCTV 위치도 구축을 위한 현장조사 : 2023. 06. ~

- 현장조사 612대 완료(총 1,074대)

□ 금후계획

◦ 빅데이터 활용·분석을 위한 CCTV 위치도 구축(공간정보 정확도 개선) : 2023. 06. ~ 09.

◦ 스마트시티 통합 플랫폼 구축․운영(공모사업 관련)     : ~ 2024. 12.

◦ CCTV 및 통합관제시스템 유지 운영 관리            : 연중

◦ 긴급상황 신속대응 및 범죄예방을 위한 24시간 관제     : 연중

마을방범 CCTV 설치

(계속사업)

□ 개    요

◦ 기    간 : 2023. 01. ~ 11.

◦ 사 업 비 : 696백만원

◦ 사업내용 : 마을방범 CCTV 신규 및 고장장비(녹화기 등) 교체 설치

◦ 총사업량 : 118개소, 3종 434대(녹화기 60, 모니터 64, 카메라 310)

구분		소요예산 (백만원)	마을수	장비계	녹화기	모니터	카메라	비 고
총계		696	118	434	60	64	310
교체	소계	569	104	399	57	60	282
	1차	140	22	110	19	21	70	완료
	2차	266	39	175	27	27	121	완료
	3차	218	43	114	11	12	91	10월중
추가·노후		72	14	35	3	4	28	완료

□ 추진실적

◦ 마을방범 CCTV 설치(교체) 계획 수립                : 2023. 01.

◦ 마을방범 CCTV 1차 교체 설치 추진(22개소, 3종 110대)    : 2023. 03. ~ 05.

◦ 1회 추경 확보(150백만원)                           : 2023. 03.

◦ 마을방범 CCTV 추가·노후 설치 추진(14개소, 3종 35대)  : 2023. 04. ~ 06.

※도비 보조 및 주민참여예산 대상지(이백2개소, 동충2개소) 포함

◦ 마을방범 CCTV 설치 물품 구매 입찰(5종, 175백만원)   : 2023. 06. ~ 08.

◦ 마을방범 CCTV 2차 교체 설치 추진                  : 2023. 07. ~ 08.

- 39개소, 3종 175대(녹화기 27, 모니터 27, 카메라 121)

□ 금후계획

◦ 마을방범 CCTV 3차 설치 추진                      : 2023. 09. ~ 10.

◦ 24년 마을방범 CCTV 설치(교체 및 추가) 수요조사      : 2023. 10.

◦ 마을방범 CCTV 유지 운영                          : 연중

◦ 마을방범 CCTV 상태 모니터링 서비스 구축 추진       : ~ 2024. 12.

참고		스마트시티 솔루션 확산사업

□ 개    요

◦ 사 업 명 : 더 안전하고 편리한 스마트도시 구축

◦ 사업목적 : 스마트시티 솔루션 구축을 통해 도시문제 해결 및 실질적인
서비스 여건을 개선

◦ 주관부처 : 국토교통부 / 스마트도시협회(위탁기관)

◦ 총사업비 : 40억원(국비 20, 시비 20)

◦ 사업내용 : 스마트시티 통합플랫폼 구축 및 IoT 인프라 구축 등

□ 세부내용

◦ 스마트시티 통합플랫폼 및 스마트 횡단보도 구축(보급솔루션)

- 다양한 도시상황을 통합․연계․제어 할 수 있는 지능형 스마트 도시환경 조성

- 스마트 안전망 서비스(112, 119 출동 현장 영상 지원)

- 횡단보도 이용자 안전보장을 위한 스마트 횡단보도 구축

◦ IoT(사물인터넷) 인프라 구축 및 응용서비스(특화솔루션)

- 마을방범 CCTV 상태 모니터링 구축 및 화재안전관리 서비스 등

□ 추진상황

◦ 공모사업 신청서 제출 및 1·2차 평가	: 2023. 03. ~ 04.

◦ 최종 선정 (8개 시군)	: 2023. 04.
※ 경기(의왕, 양주), 충남(보령), 강원(속초), 전북(남원), 충북(옥천), 경북(고령, 예천)

◦ 사업계획서 검토(1·2차 컨설팅)	: 2023. 05. ~ 06.

◦ 국토교통부 협약 및 세부 추진계획 수립	: 2023. 07. ~ 08.

□ 금후계획

◦ 사전절차 이행(일상감사, 원가심사 등)	: 2023. 09. ~ 10.

◦ 협상에 의한 계약 체결	: 2023. 10.

◦ 착수 및 사업추진 등	: 2023. 10. ~ 2024. 09.