2023. 9.

2023년 주요업무 추진실적

관   광   과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2023년 주 요 업 무  결산

□ 2023년 주요업무 추진실적

◦ 스마트관광도시 조성사업

◦ 남원 요천 봄꽃 축제

◦ 제93회 춘향제

◦ 남원 요천 물놀이 축제(요천비치 페스티벌)

◦ 제31회 흥부제

◦ 요천 미디어아트 빛 축제

◦ 동□동□동화 축제

◦ 2023 소규모축제 지원

◦ 남원관광지 민간개발사업

◦ 남원드래곤관광단지 조성사업

◦ 남원드래곤관광단지 진입도로 조성사업

◦ 오리정□버선밭 연계 관광지화사업

◦ 이성계장군 전승지 주변 개발사업

◦ 교룡산 국민관광지 활성화사업

◦ 함파우 아트밸리 조성사업(키즈랜드, 아카이브관)

◦ 옛다솜이야기원 조성사업

◦ 남원 관광지 RE-PLUS 사업

◦ 제2차 대표관광지 육성사업

◦ 남원 한옥체험시설 조성사업

◦ 지역특화형 친환경 숙박시설 조성사업

◦ 고소바위공원 국민여가캠핑장 조성사업

◦ 남원 시내권 관광시설 연계 야간경관 기본계획 수립용역

◦ 천문대 진입도로 선형개량공사

◦ 산악용 친환경 운송시스템 시범사업

일  반  현  황

□ 기    구

				관 광 과 장
				노 경 록
테마관광조성팀장			축제기획팀장					관광개발팀장				생태자원개발팀장
홍 동 원			이 영 규					박 봉 용				황 이 연
스마트관광도시조성			춘향제추진					관광(단)지조성				지리산친환경 전기열차추진
리플러스프로그램운영			흥부제추진					대표관광지육성				산악용친환경운송 시스템시범사업추진
대표관광지육성사업 상설공연이벤트			소규모축제지원					관광종합개발계획
관광상품개발및홍보			지역축제육성위원회지원					함파우유원지조성

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	17	1	4	3	4	5
현 원	17	-	6	5	4	2	임기제 1 공무직 1
증 감	-	△1	2	2	-	△3

2023년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 시민과 관광객에게 희망을 주는 제1회 요천 봄꽃 축제 개최 - 남원 전통막걸리 행사장 마련으로 막걸리 한잔과 함께 신나는 공연 제공 ◦ 춘향과 빛이 만나는 제93회 춘향제 전면 확대 개최 - 요천 권역을 빛을 테마로 한 야간콘텐츠 확보로 축제 기간 체류형 관광객 유치 ◦ 남원관광지 RE-PLUS사업-춘향제 연계 요천 푸드스트리트 운영 및 요천 비치 페스티벌 연계 공연프로그램 운영 ◦ 대표관광지(광한루원) 연계 상설공연 및 전통문화체험 프로그램 추진 ◦ 남원관광지 RE-PLUS 사업(실감미디어아트 전시 등), 슈퍼트리 조명 등 광한루원과 남원관광지를 연계하는 체류형 관광 인프라 구축 ◦ 신성장 동력을 위한 산악용 친환경 운송시스템 시범사업 추진

□ 관광산업의 디지털 전환 스마트관광도시 출범

◦ 민관협력을 통한 정보통신기술 기반의 디지털 관광콘텐츠 및 인프라 육성

◦ 광한루원~요천~승월교~달빛정원~함파우 동선을 유도하는 디지털 콘텐츠 구축으로 체류시간 및 도심관광 범위 확장

◦ 현대퓨처넷 지원(15.6억원 상당) 서울 도심 9개소 옥외광고 등 적극 홍보

◦ 스마트관광도시-춘향제 기간 사업홍보부스 운영 및 서비스 시범운영

□ 경쟁력 있는 콘텐츠 발굴로 축제 브랜드 강화

◦ 제1회 요천 봄꽃 축제

- 새봄을 맞아 시민과 관광객에게 희망을 주는 음악회 개최

- KBS 방송 송출을 통한 남원 관광 및 춘향제 사전홍보

◦ 춘향과 빛의 만남으로 남원의 아름다운 밤을 알린 제93회 춘향제 개최

- 4개 분야, 45개의 다양한 행사구성 및 MZ세대를 겨냥한 대학생 서포터즈인‘춘몽단’모집으로 전국 대학생 유치, 외국대사 부부 초청으로 대학생과 외국인 모두 참여하는 다양한 연령과 계층이 즐길 수 있는 축제

◦ 시원한 물놀이와 즐거운 공연, 맛있는 음식을 한자리에서 모두 즐길 수 있는 요천 비치 페스티벌 개최

- 물총전쟁, 음악과 함께하는 쉼크닉, EDM파티, 수상체험프로그램 및 부대행사 추진 (페이스페인팅, 네일아트 등)

□ 체류형 관광 인프라 조성 사업 추진

◦ 광한루원과 남원관광지 및 함파우유원지를 연계하여 경유형 관광지에서 체류형 관광지로 환류하는 인프라 구축과 신규 관광개발사업 추진

- 달빛정원 조성, 남원 한옥체험시설 조성, 친환경 숙박시설 조성, 옛다솜이야기원 조성, 함파우 아트밸리 조성사업(키즈랜드, 아카이브관) 등

◦ 남원 시내권 관광시설 연계 야간경관 조성 용역으로 기존 관광지와 신설 관광지 및 주변지역 방문을 연계·유도하는 디자인 지정 및 테마 조성

□ 지리산 친환경 전기열차 도입

◦ (산악용 친환경 운송시스템 시범사업) 남원시·철도연 업무협약 체결 및 시범사업 기반 조성공사 기본 및 실시설계 발주로 시범사업 본격 착수

- 위    치 : 주천면 고기삼거리 ~ 고기댐 일원(L=1km)

- 사 업 비 : 31,080백만원 (국비 27,850, 시비 3,230)

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.

- 시행기관 : 한국철도기술연구원(주관연구기관)·남원시(유치기관)

- 사업내용 : 시범노선 건설, 차량 제작(3량 1편성), 시스템 검증 및 시범운영

2023년 주요업무 추진실적

스마트관광도시 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 광한루원 일원 ~ 요천 ~ (구)비사벌콘도

◦ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2026. 10.(구축 1년/80억원, 운영 3년/25억원)

◦ 총사업비 : 105억원(기 45, 도 10, 시 50) / 23년도 10억원(기5, 시5)

◦ 사업내용 : 민관협력을 통한 정보통신기술 기반의 관광콘텐츠 및 인프라 육성

- 스마트 경험(스마트 LUNA, 3D디스플레이, 미디어아트, 메타버스, 키오스크 등)

- 스마트 플랫폼 (관광웹, on□offline 통합관제, 빅데이터, 클라우드 등)

- 사업관리 및 홍보(출범식, 마케팅, 현장사무실 운영, 사업관련 의무용역 등)

□ 추진실적

◦ 문체부/한국관광공사 스마트관광도시 공모사업 최종선정    :‘22. 3. 8.

◦ 남원시-한국관광공사-전라북도 3자 업무 협약체결        :‘22. 6.

◦ `스마트 LUNA' 건축 실시설계용역 착수                 :‘23. 3.

◦ 현대퓨처넷 지원(15.6억원 상당) 서울 도심 9개소 옥외광고 송출   :‘23. 4. ~

◦ 춘향제 기간 사업홍보부스 운영 및 서비스 시범운영      :‘23. 5.

◦ `스마트 LUNA' 설계 중간 보고                          :‘23. 7.

□ 쟁점 및 대책

◦ `스마트 `LUNA' 운영사업자 선정관련 모집(지역)범위 설정 및 평가

□ 1안) 전국단위로 모집하되 지역연계 방안에 중점을 두어 수준 높은

서비스 및 편의제공

2안) 운영사 모집범위를 지역(남원)으로 한정하여 지역업체 육성

※ 전국단위 모집 시 미디어시설 활용방안, 지역청년 채용방안, 지역특화 메뉴, 마케팅 방안, 실내 인테리어 및 포토존 구성계획 등 종합적 능력 평가 필요

□ 금후계획

◦ `스마트 LUNA' 설계용역 완료 및 시설공사 착공         :‘23. 9.

◦ `스마트 LUNA' 제외 스마트관광도시 서비스 정식 오픈 및 운영  :‘23. 10.

◦ 복합문화공간 `스마트 LUNA' 오픈                       :‘23. 12.

남원 요천 봄꽃 축제

(신규사업)

□ 개    요

◦ 기    간 : 2023. 3. 30.(금) ~ 3. 31.(토) / 2일간

◦ 장    소 : 요천둔치 (승월교 아래)

◦ 사 업 비 : 80,000천원 (시 80,000)

◦ 내    용 : 축하공연, 봄꽃 음악회, 먹거리 장터 운영, 쉼터 제공 등

□ 추진실적

◦ KBS 봄꽃 음악회 방송프로 섭외 및 편성 확정           : ‘23. 3. 2.

◦ KBS 봄꽃 음악회 방송 송출

- 방영채널 : KBS 1TV

- 방영일자 : ‘23. 4. 10.(월) 15:00 ~ 15:50

- 기대효과 : 5.25.부터 개최하는 춘향제 사전 홍보로 남원 관광객 유치

◦ 지역가수 10팀 정도를 섭외하여 지역 문화예술인의 참여를 통한 지역 문화예술 발전을 도모

□ 쟁점 및 대책

◦ 벚꽃 개화시기가 유동적이며, 일반적으로 개화기간 동안 1~2일 정도 비가 내릴 것으로 예상

☞ 기상청 중장기예보로 개화시기를 최대한 정확하게 예측하여  축제를 추진하고 우천대책을 면밀히 수립하여 진행

□ 금후계획

◦ 2024년 벚꽃 축제 기본계획 수립                      : ‘24. 1.

◦ 2024년 벚꽃 축제 개최 및 결과 보고                  : ‘24. 3. ~ 4.

제93회 춘향제

(계속사업)

□ 개    요

◦ 기    간 : 2023. 5. 25.(목) ~ 5. 29.(월) / 5일간

◦ 장    소 : 광한루원, 요천둔치, 사랑의광장 일원

◦ 사 업 비 : 2,741,220천원 (도 500,000 시 2,241,220)

※ 민간행사사업보조 1,900,000천원 (도 500,000 시 1,400,000)

◦ 종    목 : 4개분야 47개 종목

□ 추진실적

◦ 전문가에 의한 외부평가를 통한 춘향제 성과 분석

- 추정 방문객 : 40만명 정도

- 추정 경제효과 : 217억 정도

- 주요 성과 요약

연 도	2018년	2019년	2023년
관광객 수	19만명	20만명	40만명
외지인 비율	45%	45%	68%
MZ세대 비율	26.5%	28%	38%
소비액	42억	36억	217억

◦ 관광객 만족도

평가항목	전체만족도	프로그램	재방문 및 추천
대한민국 10大 축제	5.33	5.40	5.60
제93회 춘향제	5.52	5.18	5.75

※ 평가 수행기관 : 경기대학교 산학협력단

□ 쟁점 및 대책

◦ 춘향제 100주년을 바라보면서 전국 3대 축제 명성을 회복하고,

세계적인 축제로 나아가기 위한 준비작업 필요

☞ 94회 춘향제부터는 행사 전년도에 미리 준비예산을 편성하여 충분한 사전 준비를 거쳐 추진할 필요가 있어 예산 및 전담 조직 필요

☞ 100주년 대비 춘향제 사료 아카이빙 및 장기계획 수립 필요

□ 금후계획

◦ 제94회 춘향제 준비예산 편성                    : ‘23.  9월중

◦ 제94회 춘향제 기본계획 수립                    : ‘23. 11월중

남원 요천 물놀이 축제

(요천비치 페스티벌)

(신규사업)

□ 개    요

◦ 기    간 : 2023. 8. 12.(토) ~ 8. 15.(화)

◦ 장    소 : 요천 수경공원 일원

◦ 사 업 비 : 90,000천원 (시 90,000)

※ 계획공모형 지역관광개발 (Re-plus사업) 130,000천원 연계추진

◦ 내    용 : 요천 수경공원 및 수변 공간을 활용한 물축제 개최

□ 추진실적

◦ 요천 물놀이 축제 기본계획 수립              : ‘23. 8. 1.

◦ 행사 안전점검                               : ‘23. 8. 11.

◦ 행사 추진                                   : ‘23. 8. 12. ~ 8. 15.
- 물총전쟁, 음악과 함께하는 쉼크닉, EDM 파티, 수상체험프로그램

및 부대행사 추진 (페이스페인팅, 네일아트 등)

□ 쟁점 및 대책

◦ 태풍‘카눈’북상에 따른 행사 진행 차질 및 안전사고 발생 우려

☞ 기상 상황 주시 및 행사장 변경 추진 (요천수경공원 → 사랑의광장)

☞ 비상상황 발생 대비 물놀이 안전요원, 응급의료인력 배치

□ 금후계획

◦ 요천 물놀이 축제 결과 보고                  : ‘23. 9.

제31회 흥부제

(계속사업)

□ 개    요

◦ 기    간 : 2023. 10. 7.(토) ~ 10. 9.(월) / 3일간

※ 고유제 : 10. 23. (음 9.9)

◦ 장    소 : 양림관광단지(사랑의광장) 및 요천둔치일원

◦ 사 업 비 : 473,550천원 (도 40,000 시 433,550)

◦ 슬 로 건 : 흥부(興富)가 예술(藝術)이야!

□ 추진방향

◦ 남원시 대표 문화관광축제 콘텐츠 육성

- 나눔과 흥(興)을 테마로 타 축제와 차별화된 콘텐츠 발굴

- 재미(흥)와 의미(나눔)를 함께 추구하는 색다른 축제

◦ 흥부정신을 계승한『나눔』축제

- 시민, 학생, 관광객, 기부단체의 나눔 참여마당인 나눔장터 추진

◦ 지역대표 축제 컨설팅을 통한 정체성 강화

- 흥부전의 문학적 요소를 방영한 프로그램 육성

- 춘향전과 더불어 남원 대표 캐릭터로 육성

□ 쟁점 및 대책

◦ 정책적으로 추진 중인 대표축제 육성에 걸맞는 예산편성 필요

☞ 올해 흥부제의 성공적 추진으로 최우수축제 평가 달성으로 도비 보조금 확보 노력 (현재 40백만원 확보, 최고 100백만원까지 확보 추진)

□ 금후계획

◦ 제31회 흥부제 기본계획 수립	: ‘23. 8.

◦ 제31회 흥부제 기본계획 설명회	: ‘23. 8.

◦ 제31회 흥부제 추진 및 결과 보고                 : ‘23. 10. ~ 12.

요천 미디어아트 빛 축제

(계속사업)

□ 개    요

◦ 기    간 : 2023. 11월 중

◦ 장    소 : 남원예촌 일원

◦ 내    용 : 미디어파사드, 레이저, 무빙라이트, 프로젝션 매핑, LED

조형물 설치 및 문화공연, 체험공간 조성

◦ 사 업 비 : 290,000천원 (시 290,000)

□ 추진방향

◦ 천혜의 자원인 요천의 야간경관 활성화 축제

- 시민과 관광객에게 새로운 볼거리 제공

◦ 미디어아트와 빛이 결합한 야간 축제

- 시민과 관광객에게 다양한 문화예술 체험 기회 확대

- 체류형 관광객 증가에 기여하여 지역경제 활성화 제고

◦ 친구, 연인, 가족 등 다양한 사람들이 추억을 남기는 축제

- 아름다운 경관으로 행복한 추억을 담는 공간 제공

□ 쟁점 및 대책

◦ 남원만의 문화정체성을 상징할 빛 조형물 설치 필요

☞ 남원의 대표 문화자원을 빛과 미디어아트를 통해 형상화

◦ 빛 축제의 경우 먹거리, 공연, 체험프로그램의 부족으로 관광객 즐길거리 부족

☞ 흥부제와 연계하여 다양한 공연 및 체험행사 병행

□ 금후계획

◦ 요천 미디어아트 빛 축제 기본계획 수립             : ‘23. 8.

◦ 요천 미디어아트 빛 축제 개최 및 결과 보고         : ‘23. 10. ~ 11.

동․동․동화(冬童童話) 축제

(계속사업)

□ 개    요

◦ 기    간 : 2023. 12월중 / 3일간

◦ 장    소 : 남원예촌 일원

◦ 내    용 : 도란도란 화톳불 체험, 크리스마스 스페셜 버스킹, 크리스마스

동화 OST 길거리 공연, 아랫목 할머니 옛날이야기 듣기 등

◦ 사 업 비 : 95,000천원 (시 95,000)

□ 추진방향

◦ 온 가족이 함께 즐거운 가족 단위 겨울 축제

- 성탄절을 전후하여 어린이들과 부모가 함께 즐길 수 있는 축제 추진

◦ 지역경제 활성화에 기여하는 축제

- 비수기 관광객 유치로 구도심권 활력 제고

◦ 광한루원 주변 관광자원을 활용한 축제

- 광한루원 주변 예촌, 예촌 광장, 예루원 광장 등 주변 관광자원을 활용        하여 다양한 행사 추진

□ 주요쟁점 및 대책

◦저녁 야외 공연 시 추위에 따른 공연자 및 관람객 대책 필요

☞ 야외 행사용 난로 설치, 핫팩 무료 제공 등 추위 대책 마련

□ 금후계획

◦ 동동동화 축제 기본계획 수립                   : ‘23. 11.

◦ 동동동화 축제 개최 및 결과 보고               : ‘23. 12. ~ ‘24. 1.

2023 소규모축제 지원

(계속사업)

□ 개    요

◦ 2023년 소규모축제 추진

- 스스로 발전하는 소규모 축제 : 간담회, 용역자료 제공 등 행정지원

- 안전하고 질서 있는 축제 : 사전 안전점검

◦ 바래봉 눈꽃축제(1~2월)         : 20백만원 / 운봉읍애향회

◦ 고로쇠 약수제(2월)             : 15백만원 / 산내면발전협의회

◦ 람천 벚꽃 축제(4월)            :  5백만원 / 운봉읍발전협의회

◦ 바래봉 철쭉제(4~5월)           : 15백만원 / 운봉읍애향회

◦ 지리산 단풍제(10월)            : 10백만원 / 산내면발전협의회

◦ 도비 보조금 축제

- 혼불문학 신행길 축제(10월) : 50백만원(도 20, 시30)  / 노봉혼불문학마을회

□ 추진실적

◦ 바래봉 눈꽃축제           : `22. 12. 25. ~ ‘23. 2. 12. (기념식 1. 7.)

- 볼거리와 체험행사 등 관광명소 인프라 구축

◦ 고로쇠 약수제             : `23. 3. ~ 4. (기념식 3. 4.)

◦ 람천 벚꽃 축제            : `23. 4. 8. ~ ‘23. 4. 15.

- 지리산 둘레길 2코스 홍보 및 관광 자원화

◦ 지리산 운봉 바래봉 철쭉제 : `23. 4. 22. ~ 5. 21. (기념식 4. 29.)

- 바래봉 철쭉의 우수성 홍보, 농·특산물 홍보 및 판매

□ 쟁점 및 대책

◦ 주민 주도의 축제 운영 효율화 방안 필요

- 마을 자원을 충분하게 활용한 주민 주도 마을 축제로 육성

- 컨설팅을 통한 축제기획, 홍보마케팅 지원

□ 금후계획

◦ 제44회 지리산 뱀사골 단풍제                      : ‘23. 10.

남원관광지 민간개발사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원관광지 및 함파우유원지 일원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2023년

◦ 사 업 비 : 383,000백만원 (민간자본)

◦ 사업내용

- 모노레일(8인승 20대, 총연장 2.44㎞), 짚와이어(총연장 1.26㎞)

- 어드벤처 : 짚타워(H=78m), 스카이워크

□ 추진실적

◦ 남원관광지 민간개발사업 투자협약 체결	: ‘19. 6. 5.

◦ 남원관광지 민간개발사업 실시협약(안) 의회 동의	: ‘20. 5. 8.

◦ 남원관광지 민간개발사업 실시협약 체결	: ‘20. 6. 4.

◦ 모노레일 및 짚와이어 공사 추진	: ‘20. 8 ~

◦ 남원관광지 민간개발사업 완료	: ‘22. 6. 27.

◦ 기부채납 및 사용수익허가 신청	: ‘22. 6. 28.

◦ 남원관광지 민간개발사업 특정감사 실시 안내	: ‘22. 7. 7.

◦ 남원관광지 민간개발사업 소송 제기	: ‘22. 7. 25.

- 손실·손해배상(금574,280천원) 지급 소송

◦ 특정감사 결과 및 영업 안내에 따른 유의사항 알림	: ‘22. 8. 29.

◦ 영업안내에 따른 운영개시 알림(남원테마파크)	: ‘22. 8. 31.

◦ 손해배상 소송 1차 변론준비기일	: ‘22. 10. 17.

◦ 전라북도행정심판위원회 심판청구 기각	: ‘22. 12. 28.

- 사건명 : 사용수익허가 의무이행 청구 [청구인 남원테마파크 주식회사]

◦ 손해배상 소송 변론준비기일(2차~5차)	: ‘23. 1. 16 ~ 7. 10.

□ 금후계획

◦ 손해배상 소송 변론기일	: ‘23. 9. 7.

남원드래곤관광단지 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 대산면 옥율리 산131번지 일원

◦ 총사업비 : 190,272백만원 (민자100%)

◦ 사업내용 : 드래곤 관광단지 조성 (A=798,250㎡)

- 가족･한옥호텔, 골프장(9홀), 실내·외 수영장, 아트뮤지엄 등

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2025

◦ 사업시행자 : 신한레저㈜

□ 추진실적

◦ 관광단지 지정 및 조성계획 승인(전라북도) 통보        : ‘18. 9. 3.

◦ 관광단지 지정 및 조성계획 고시(남원시)                : ‘18. 9. 7.

◦ 관광단지 조성사업 착공	: ‘19. 1. 2.

◦ 드래곤관광단지 조성계획(변경) 고시(1차)	: ‘20. 6. 12.

◦ 드래곤관광단지 지정 및 조성계획(변경) 고시(2차)	: ‘21. 3. 12.

◦ 드래곤 관광단지 조성계획(변경) 고시(3차)	: ‘22. 6. 27.

◦ 체육시설업 조건부 등록 변경(공동명의 등록 ㈜골프존카운티)	: ‘22. 7.

◦ 드래곤 관광단지 조성계획(변경) 고시(4차)	: ‘22. 12. 30.

◦ 드래곤 관광단지 건축 계획설계(안) 설명회 개최	: ‘23. 5. 4.

◦ 드래곤 관광단지 지정(변경) 및 조성계획(변경) 신청	: ‘23. 7. 5.

- 구역변경없이 지적측량(지구계 분할 등)에 따른 면적 변경

□ 금후계획

◦ 관광단지 조성계획(변경)접수 및 건축 기본설계 완료	: ‘23. 12.

- 건축 기본설계 반영 된  관광단지 조성계획(변경) 절차 진행 및 건축 인허가 절차 진행

남원드래곤관광단지 진입도로 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 대산면 금성리 28번지 일원

◦ 총사업비 : 6,200백만원 (도비1,250, 시비4,950)

◦ 사업내용 : 진입도로[L=590m, B=11m], 상·하수도 및 우수관 매설 등

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2025

□ 추진실적

◦ 실시설계 용역 및 도시계획시설(도로) 결정 용역 시행   : ‘21. 2. ~ 12.

◦ 주민설명회 개최(3회)	: ‘21. 4. ~ 8.

◦ 도시계획시설(도로) 결정 고시	: ‘21. 12. 10.

◦ 공사 착공	: ‘21. 12. 28.

◦ 동절기 공사 중지	: ‘21. 12. 31.

◦ 토지매입 감정평가 1차 추진	: ‘22. 1. 27.

◦ 간담회 개최(1회~4회)	: ‘22. 3. ~ 11.

◦ 토지매입 감정평가 2차 추진(6필지)	: ‘22. 5. 27.

◦ 토지매입 감정평가 2차 보상액 산정 및 결정보고	: ‘22. 7. 4.

◦ 주민설명회 개최(드래곤관광단지 관계자, 시 관계자, 금강마을 주민) :  ‘22. 12. 9.

◦ 드래곤관광단지 진입도로 조성공사 계약해지 및 정산완료 : ‘23. 1. ~ 3.

□ 금후계획

◦ 진입도로 조성공사 토지매입 재협의 추진중	:  ‘23. 1. ~

오리정·버선밭 연계 관광지화사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 사매면 오리정, 버선밭 주변

◦ 사업기간 : (당초) 2021 ~ 2025년 (변경) 2021 ~ 2022년

◦ 사업내용 : 오리정 테마공원(오리정 주변정비, 눈물정원, 주차장) 조성, 버선밭 및 유휴공간 조성 등

◦ 사 업 비

┌당 초 : 6,800백만원(균이 3500, 도비 1550, 시비 1750)

└변 경 : 2,000백만원(균이 1100, 도비 350, 시비 550)

□ 추진실적

◦ 기본계획수립 완료	: ‘20. 05.

◦ 사전절차이행(재정투자심사, 중기지방재정계획)	: ‘20. 07. ~ 10.

◦ 오리정 정비사업 시행	: ‘22. 04. 21.

◦ 오리정 테마공원 조성사업 시행	: ‘22. 05. 16.

◦ 오리정·버선밭 연계 관광지화사업 사전협의(익산국토관리청 남원국토관리사무소) : ‘22. 09. 27.

◦ 전라북도 지정(등록)문화재 허가사항에 대한 변경허가 완료   : ‘22. 12. 14.

◦ 오리정 테마공원 주차장 예정부지 보상 협의 요청 : ‘23. 02. 08.

◦ 동부권 발전사업 사업변경 원안가결	: ‘23. 05. 25.

◦ 오리정 테마공원 야간경관 조성사업 시행	: ‘23. 06. 23.

□ 금후계획

◦ 동부권 발전사업 정산 검사 보고	: ‘23. 12.

- 오리정 정비공사, 오리정 테마공원 조성사업, 버선밭 정비공사, 오리정 테마공원 야간경관 조성사업

이성계장군 전승지 주변 개발사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 ~ 인월면

◦ 사업기간 : (당초) 2021 ~ 2025년 (변경) 2021 ~ 2022년

◦ 사업내용 : 서어나무 숲 복원 및 휴게공간 조성 등

◦ 사 업 비

┌당 초 : 7,900백만원(균이 4000, 도비 1900, 시비 2000)

└변 경 : 1,100백만원(균이 600, 도비 200, 시비 300)

□ 추진실적

◦ 기본계획수립 완료	: ‘19. 10.

◦ 사전절차이행(재정투자심사, 중기지방재정계획)	: ‘20. 07. ~ 10.

◦ 황산대첩비지 주차장 화장실 보수공사 완료	: ‘22. 05. 02.

◦ 황산대첩비지 주차장 화장실 보수공사(전기) 완료	: ‘22. 05. 19.

◦ 삼산마을 솔밭공원 정비사업(2차분) 완료	: ‘22. 12. 01.

◦ 동부권 발전사업 사업변경 원안가결	: ‘23. 05. 25.

◦ 서어나무 숲 정비사업 완료	: ‘23. 06. 26.

□ 금후계획

◦ 동부권 발전사업 정산 검사 보고	: ‘23. 12.

- 주차장 화장실 보수공사, 삼산마을 솔밭공원, 서어나무 숲 정비사업

교룡산 국민관광지 활성화사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 산곡동 교룡산국민관광지 일원

◦ 사업기간 : (당초) 2021 ~ 2025년 (변경) 2021 ~ 2023년

◦ 사업내용 : 메모리얼 정원, 감성힐링 정원, 복합쉼터 조성 등

◦ 사 업 비

┌당 초 : 8,000백만원(균이 4000, 도비 2000, 시비 2000)

└변 경 : 4,400백만원(균이 2200, 도비 1100, 시비 1100)

- `23년도 사업비 : 1,600백만원(균이 800, 도비 400, 시비 400)

□ 추진실적

◦ 기본계획수립 완료	: ‘20. 08.

◦ 교룡산국민관광지 활성화사업(1차분)	완료	: ‘21. 12. ~ ‘22. 12.

◦ 교룡산국민관광지 건축기획 용역 완료	: ‘22. 03. ~ 12.

◦ 교룡산국민관광지 활성화사업(경관조명) 전기공사	: ‘22. 05. ~ ‘23. 09.

◦ 도시계획시설(왕정공원) 공원조성계획(변경) 및 실시계획인가(변경) 용역	: ‘22. 10. ~ ‘23. 02.

◦ 교룡산국민관광지 활성화사업(2차분)	추진	: ‘23. 02. ~ ‘23. 12.

- 메모리얼 조성(6·25참전 유공자기념비(23기)이설, 무공수훈자비 이설 등)

◦ 동부권 발전사업 사업변경 원안가결	: ‘23. 05. 25.

◦ 교룡산 복합쉼터 기본 및 실시설계 용역 착수	: ‘23. 08. 02.

□ 금후계획

◦ 교룡산 복합쉼터 기본 및 실시설계 용역 완료	: ‘23. 12.

◦ 교룡산 복합쉼터 건립공사 발주 및 시행	: ‘23. 12. ~

함파우 아트밸리 조성사업(키즈랜드, 아카이브관)

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 함파우 유원지(소리체험관 인근) 일원

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2025년

◦ 사업내용 : 키즈 아트랜드, 아트 아카이브 전시

◦ 사 업 비 : 17,900백만원(균이 9,050 도비 4,325 시비 4,525)

- `23년도 사업비 : 3,100백만원(균이 1,650, 도비 625, 시비 825)

□ 추진실적

◦ 동부권 발전사업 기본계획사업 변경	: ‘23. 05. 25.

◦ 지방재정투자 심의 의뢰	: ‘23. 05. 31.

◦ 소관부서 협의(전라북도 관광산업과) 등	: ‘23. 06.

□ 금후계획

◦ 계약심의(아트 아카이브 전시) 등 행정절차 이행	: ‘23. 08.

◦ 사랑체험관 전시물 설치용역 제안공모 추진	: ‘23. 09.

◦ 사랑체험관 전시물 설치용역 공사 시행	: ‘23. 11. ~

옛다솜이야기원 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원관광지 및 함파우유원지 일원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년

◦ 사 업 비 : 22,506백만원(국비 8,558, 시비 13,948)

◦ 사업내용

- 기반 : 정원 조성(A=34,112㎡) / 기반시설(도로, 주차장) 조성(A=24,368㎡)

- 건축 : 사랑체험관 건립(면적, 대지- : 12,123㎡, 건축- 2,203.55㎡, 연- 2,168.73㎡)

□ 추진실적

◦ 옛다솜이야기원 기본 및 실시설계 용역 완료	: ‘19. 6. 24.

◦ 옛다솜이야기원 기반시설 조성공사 착공(현공정 95%)	: ‘19. 7. 31.

◦ 옛다솜이야기원 조성공사 착공	: ‘19. 11. 19.

◦ 옛다솜이야기원 사랑체험관 건립공사 착공(현공정 60%)	: ‘21. 3. 4.

◦ 옛다솜이야기원 사랑체험관 건립공사 1차분 준공	: ‘22. 8. 25.

◦ 옛다솜이야기원 사랑체험관 건립공사 2차분 착공	: ‘22. 9. 5.

◦ 전시시설 설계등을 위한 제1차 추가경정예산 편성 (10억원)       : ‘23. 3. 27.

◦ 옛다솜이야기원 사랑체험관 건립공사 3차분 착공	: ‘23. 5. 3.

◦ 옛다솜이야기원 조성공사 준공	: ‘23. 6. 14.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 사랑체험관 내부 전시계획

- 당초 기본계획 수립(2015~2016년) 이후 트렌드 변화 등을 반영하기 위해 문체부 관광개발과와 사랑체험관 전시계획 조정 협의

□ 당초 기본계획(사랑을 체험하는 전시) 의 큰 방향성 유지, 사랑의 범위 확대(이성→이성,가족,친구,취미,문화 등), 문화예술 요소 도입

□ 금후계획

◦ 전시계획 및 실시설계 용역 추진	: `23. 8.

◦ 옛다솜이야기원 기반시설 조성사업  완료	: `23. 9.

◦ 사랑체험관 건립공사 완료	: `23. 11.

◦ 내부 전시시설 설치 추진	: `23. 11.

◦ 사랑체험관 개관	: `24년중

남원 관광지 RE-PLUS 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원 관광지, 광한루원 일원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 15,000백만원(기금 6,000, 도비 3,000, 시비 6,000)

- 2023년도 사업비 : 5,035백만원(국비 2,018, 도비 1,000 시비 2,018)

◦ 사업내용 : 달빛정원 조성, 달빛정원 미디어아트 전시 및 운영, 달빛정원 추진조직 운영, 공연프로그램, 연계관광코스, 관광브랜드 개발, 온․오프라인 홍보마케팅 등

□ 추진실적

◦ 계획공모형 지역관광개발사업 공모 최종 선정	: ‘20.  3. 20.

◦ 남원관광지 RE-PLUS사업 기본계획 수립 완료	: ‘21. 11. 9.

◦ 문체부 기본계획 최종 승인	: ‘21. 12. 3.

◦ 달빛정원 건축 설계 제안공모 안 선정	: ‘22.  6. 7.

◦ ’22년도 경상사업 보조금 지급	: ‘22. 12.

◦ 미디어아트 콘텐츠 제작·설치 용역(1차) 시행	: ‘23.  1.

◦ 춘향제 연계 요천 푸드스트리트 등 핵심사업 운영	: ‘23.  5.

◦ 미디어아트 콘텐츠 제작·설치 용역(2차) 시행	: ‘23.  6.

◦ 계획공모형 지역관광 개발사업 기본계획 변경	: ‘23.  7.

◦ 요천 비치 페스티벌 연계 공연프로그램 운영      : ‘23.  8.

□ 금후계획

◦ ’23년도 경상사업 보조금 지급(남원 관광발전협의회)    : ‘23.  8.

◦ 미디어아트 콘텐츠 제작·설치용역(1차) 완료	: ‘23.  9.

◦ 달빛정원 조성 및 방문자센터 실시설계 완료	: ‘23.  9.

◦ 달빛정원 조성 및 방문자센터 조성공사 발주 및 시행	: ‘23. 10.

제2차 대표관광지 육성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 광한루원 ~ 남원관광지

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 8,480백만원(국비 200, 도비 5,000, 시비 3,280)

- 2023년도 사업비 : 1,780백만원(도비 1,000 시비780)

◦ 사업내용 : 관광기반 7개사업, 관광진흥 9개사업

□ 추진실적

◦ 관광편의개선(주차장, 도로확장) 사업 추진	: ‘23. 1. ~

- 관광지 주차장 재포장공사 1식

◦ 요천벚꽃길 야간명소화 사업 추진	: ‘22.  7. ~ ‘23. 10.

- 요천벚꽃길(승사교~남원대교) 경관조명 1식

◦ 사랑의 정원 조성 사업 추진	: ‘22. 12. ~ ‘23. 6.

- 광한루원 담장 경관조명 1식 (L=203m)

◦ 심야포차단지 조성 사업 추진	: ‘23.  5. ~ ‘23. 9.

- 초가부스 및 차양시설 설치

◦ 2023년 중복사업 내용 변경 협의[전북도 관광총괄과]	: ‘23. 6.

◦ 관광진흥 사업 추진	: ‘22. 5. ~ 12.

- 마당극 흥부뎐 상설공연(공연 2식, 10/25회 운영)

- 남원 꽃담길 아트장터(프리마켓 5일, 체험프로그램 14/35회 운영)

- 전통문화체험 프로그램(공연·체험프로그램 3식, 10/42회운영)

- 스마트 관광정보체계 구축·운영

- 대표관광지 홍보마케팅

◦ 성과평가 및 후속 사업 발굴 연구용역	: ‘22. 6. ~ 7.

□ 금후계획

◦ 요천 벚꽃길 야간명소화 사업 시행	: ‘23. 9. ~

◦ 시내권 연계 야간경관 기본계획 수립용역 시행   : ‘22. 12. ~ ‘23. 10

◦ 보조금 정산검사 및 보고	: ‘23. 12.

구분	사 업 명	사 업 내 용	사업비	추진계획	비고
	계		8,480
관광 기반 (7)	∘ 요천 벚꽃길 야간명소화사업	수목투사등 1식, 전기배선 1식	700	`23	추진중
	∘ 덕음산 에코 어드벤처 조성	- 네트 어드벤처 및 트리탑 등 설치	500	`23	추진중
	∘ 심야포차단지 조성	- 야간관광활성화를 위한 심야 포장마차거리 조성	100	`23	완료
	∘ AR 실감형 체험관광존 구축	- AR 체험존 구축 등	100	`23	추진중
	∘ 관광편의개선 (주차장, 도로확장)	- 주차장 4곳, 화장실리모델링 데크설치 1식	2,600	`20~`23	추진중
	∘ 사랑의 정원 조성	- 주변정비 및 사랑의 화단 조성	1,600	`21~`24	추진중
	∘ 매력더하기 한옥정자 조성	- 한옥정자 설치 1개소	200	`24
관광 진흥 (9)	∘ 신관사또부임행차 공연	- 신관사또 부임행차 프로그램 개발 및 운영	20	`20	완료
	∘ 관광객 환영 취타대 운영	- 취타대 행사운영 및 의상ㆍ악기 보강	129	`20~`21	완료
	∘ 마당극 흥부뎐 상설공연	- 흥부뎐 상설공연 프로그램 개발 및 운영	307.5	`20~`24	추진중
	∘ 남원 꽃담길 아트장터	- 플리마켓 운영 및 문화예술거리 활성화 사업	995	`20~`24	추진중
	∘ 전통문화 체험프로그램	- 국궁체험, 장구체험, 장원급제 글쓰기 체험 등	421.5	`20~`24	추진중
	∘ 남원 웰컴투 조선 관광도우미	- 광한루원내 조선시대 캐릭터 도우미 운영	47	`20~`21	완료
	∘ 스마트 관광정보체계 구축/운영	- 관광안내소 네트워크 시스템 정비 등	90	`20~`24	추진중
	∘ 대표관광지 홍보 마케팅	- SNS 서포터즈 교육 및 팸투어 운영ㆍ관리	650	`20~`24	추진중
	∘성과평가 학술용역	- 대표관광지 성과평가 및 후속사업 발굴 용역	20	`23	추진중

남원 한옥체험시설 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 쌍교동 191번지 일원(예루원 뒤편)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 3,500백만원(균이 1,750, 시비 1,750)

- 2023년도 사업비 : 1,000백만원(균이 500, 시비 500)

◦ 사업내용 : 한옥자원을 활용한 문화관광체험시설 조성

□ 추진실적

◦ 제7차 전북권 관광개발계획 수립 반영	: `21. 8.

◦ 한옥체험시설(종가) 활용방안 상세계획수립 용역 추진	: `21. 9. ~ `22. 3.

◦ 공공건축 사업계획 사전협의(건축공간연구원)	: `21. 10. ~ 11.

◦ 2021년 제2차 지방재정투자심사의뢰	: `21. 11. 9.

◦ 남원시 공공건축 건축심의위원회 심의	: `22. 2.

◦ 사업부지 매입(쌍교동 185, 191번지)	: `22. 5.

◦ 관광자원개발사업 계획 변경 승인	: ’23. 2.

◦ 한옥체험시설 조성사업 콘텐츠 개발용역	: ‘23. 5.

□ 금후계획

◦ 남원 한옥체험시설 조성사업(건축) 제안설계공모	: `23. 8.

※「건축서비스산업 진흥법」제21조에 따라 설계용역비 1억원 이상 공모 의무

◦ 남원 한옥 체험시설 기본 및 실시설계 용역 시행	: `23. 9. ~ `23. 12.

◦ 남원 한옥 체험시설 공사 발주 및 시행	: `24. 1. ~ `24. 12.

지역특화형 친환경 숙박시설 조성사업

(계속사업)

□ 개   요

◦ 위    치 : 남원시 금동 45번지 일원(종가)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2023년

◦ 사 업 비 : 7,900백만원(국비 3,900, 시비 4,000)

- 2023년도 사업비 : 6,000백만원(국비 3,000, 시비 3,000)

◦ 사업계획 : 한옥 리모델링, 한국전통호텔 조성

□ 추진실적

◦ 남원 도시관리계획(문화시설) 결정(변경) 추진	: ’21. 6. ~ 12.

◦ 중기지방재정계획 반영	: ’21. 11.

◦ 문화체육관광부 공모사업 최종 선정	: ’22. 2. 15.

◦ 도 재정투자심사 승인	: ’22. 6. 7.

◦ 지역특화형 친환경 숙박시설 기본설계 추진	: ’22. 7. ~ ’23. 7.

◦ 명지각·명지호텔 상표출원	: ’23. 2. 8.

◦ 사용수익허가자 선정(스테이폴리오)	: ’23. 3. 15.

□ 금후계획

◦ 원가심사 및 일상감사(설계도서)	: ’23. 8.

◦ 친환경 숙박시설 조성 리모델링 및 증축공사 시행	: ’23. 8. ~ 24. 4.

◦ 숙박시설 개관 및 운영	: ’24. 4. ~

고소바위공원 국민여가캠핑장 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 산동면 고소암공원 (대기리 404-1번지 일원)

◦ 사업기간 : 2022. 01. ~ 2023. 12. (2개년)

◦ 사업내용 :「관광진흥법 시행령」제5조[(야영장)등록 기준] 시설 조성

⇒ △화장실, △샤워장, △관리동, △주차장, △상·하수도 시설

◦ 사 업 비 : 1,100백만원(도비 500 시비 600)

- ‘23년 사업비 : 1,000백만원 (도비 500 시비500)

□ 추진실적

◦ 캠핑장 조성관련 2021년 랜선 시정설명회 건의	: ’21. 3. 25.

◦ 2022년 사업 시행[시비 100백만원 / 토지 매입 및 설계]	: ’22. 1. ~

◦ 관련부서 협의 실시	: ’22. 9.

- 개발행위, 산지전용, 하천, 상·하수도 관련 등

◦ 경계복원 측량 및 감정평가 실시(2필지)	: ’22. 10.

◦ 사업 부지 매입 (2필지)	: ’22. 12.

◦ 상·하수도 매설공사	시행	: `23.  5. ~ 10.

◦ 건축공사 실시설계 용역 시행	: `23.  6. ~  9.

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: `23.  5. ~  9.

□ 금후계획

◦ 기본 및 부대 조성공사 시행	: `23.  9. ~ 11.

◦ 건축공사 시행	: `23.  10. ~ 11.

◦ 야영장(업) 등록	: `23.  12.

남원 시내권 관광시설 연계 야간경관 기본계획 수립용역

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 시내권 – 광한루원 – 남원관광단지 - 함파우유원지

◦ 사업기간 : 2022년 [2023년 사고이월]

◦ 사 업 비 : 183,500천원(시비 100%)

◦ 사업내용

시설명	사업량	사업내용	비고
시내권 관광시설 연계 야간경관 기본계획수립 용역 추진계획	pdf파일 책자 한글파일	- 기존 관광지와 신설된 관광지를 연계하는 디자인 및 테마 지정 - 독창성이 풍부한 디자인 구현 - 구축된 야간경관에 대한 유지보수 및 관리 방안 마련

◦ 도급업체 [공동수급 – 디자인:전기 분야 70:30]

1. ㈜아이라이트 대표 이미애

2. 삼성파워랩 주식회사 대표 권훈남

□ 추진실적

◦ 협상에 의한 계약 제안공고	: ‘22. 8. ~

- 1차 제안 공고의 유찰로 사업 지연

◦ 2차 협상에 의한 계약 제안공고 및 제안서 평가	: ’22. 11. ~ 12.

◦ 계약 및 용역사업 착수	: ‘22. 12. 30.

◦ 착수 보고회	: ’23. 02. 22.

◦ 1차 중간 보고회	: ‘23. 08. 18.

□ 금후계획

◦ 2차 중간보고회	: ’23. 9. 중

◦ 사업준공	: ‘23. 10. 말

천문대 진입도로 선형개량공사

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암동 김병종미술관 및 항공우주천문대 일원

◦ 사업기간 : ’22. 06.  ~ ’23. 05.[함파우지방정원 조성에 따른 중지 (’22.07.08.)]

◦ 사 업 비 : 334,507천원 [도급 238,804 관급 83,213 폐기물 12,490]

⇒ 예산 : 350,000천원 = 관광과(150,000) + 관광시설사업소(200,000)

- 도급자 : 수성건설이앤씨(주)  대표 홍연수 (남원 사매면 소재 업체)

◦ 사업내용 : 도로신설 [흙깍기 A=1,155㎥, 아스콘포장 A=1,584㎡ 등]

⇒ 당초 짚타워 인근 차량통행으로 관광객들의 안전확보를 하고자 시행

□ 추진실적

◦ (관광시설사업소) 사업 시행 재검토	: `22. 2.

- 사업비 부족으로 관광시설사업소에서 사업비 2억 반납요청

◦ 제1회 추경 1.5억 반영 (관광과)	: `22. 5.

◦ 착공 및 (함파우지방정원 조성에 따른) 공사중지       : `22. 6. 22. ~ 7. 8.

◦ 변경 계획 보고 및 설계변경 시행	: `22. 10. 19.

- 기존 천문대 도로 확장 [데크길 신설] 및 도로선형화

※ 대형버스(45인승) 진입 가능

◦ 설계 변경 및 준공	: ‘22. 12.~ ‘23. 5.

◦ 경관조명 공사 실시설계 용역 시행	: ‘23. 8.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 경관조명 및 가로등 설치공사 누락

- 당초 노선을 변경하면서 조명공사 누락

□ 실시설계 후, 조명(안) 협의 및 사업 시행

□ 금후계획

◦ 조명공사 실시설계 완료 후, 조명공사 시행	: ‘23.  9. ~ 10.

산악용 친환경 운송시스템 시범사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 주천면 고기삼거리 ~ 고기댐 일원 (L=1km)

◦ 사 업 비 : 31,080백만원 (국비 27,850, 시비 3,230)

◦ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.

◦ 시행기관 : 국토교통부(소관부처)·한국철도기술연구원(주관연구기관)·남원시(유치기관)

◦ 사업내용 : 시범노선 건설, 차량 제작(3량 1편성), 시스템 검증 및 시범운영

□ 추진실적

◦시범사업 기반 조성공사 기본 및 실시설계 착수	:‘23.  3. 31.

◦시범사업 관련 관련기관(전북도청 도로공항철도과) 협의	:‘23. 4. 20.

◦국토부 시범사업 대상지 제2차 현지답사	:‘23. 5. 17.

◦시범사업 관련 제3차 공정회의	:‘23. 5. 24.

◦시범사업 기반 조성공사 지반조사 용역 착수	:‘23. 6. 12.

◦시범사업 관련 제4차 공정회의	:‘23. 6. 15.

◦시범사업 관련 관련기관(국토교통과학기술진흥원) 협의	:‘23. 6. 21.

◦소규모 재해영향평가 용역	착수	: `23. 7. 7.

◦소규모 환경영향평가 용역	발주	: `23. 7. 31.

□ 쟁점 및 대책

◦ 사업대상지가 지방도(737호선)임에 따라 도로관리청인 전라북도에         비관리청 사업 인허가 필요

□ 기본설계 완료 후 전북도 도로공항철도과 협의 필요

인허가 신청 시점은 소규모 환경·재해영향평가 완료 이후

□ 금후계획

◦ 차량기지 설치 지역 토지 소유주 관련 민원 해결 : `23.  9. ~ 10.

◦ 사업구간 산지전용·일시사용 제한지역 해제     : `23. 10. ~ 12.

◦ 비관리청 사업 인허가 신청(전라북도청 소관)     : `24.  3.

◦ 시스템 인프라 구축 및 차량 제작	:‘24. ~‘25.

◦ 시범노선 시범운행 및 시스템 성능 검증	:‘25. ~‘26.