2023. 9.

2023년 주요업무 추진실적

보 건 지 원 과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2023년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 공공산후조리원 건립

◦ 건강생활지원센터 신축

◦ 공공건축물 그린리모델링 지원

◦ 농어촌 의료서비스 개선

◦ 시민중심의 의‧약업소 안전관리

◦ 남원의료원 시설 현대화사업 추진

◦ 안전한 먹거리, 깨끗한 공중위생 관리

◦ 품격 있는 모범‧친절업소 만들기

일  반  현  황

□ 기    구

				보 건 소 장
				한 용 재
				보건지원과장
				하 진 숙
보건행정팀			의약검진팀			위생안전팀			보건건축TF팀
김 보 상			박 장 희			하 승 인			이 석 선
지역보건의료계획 보건지소 및 진료소 관리 예산・회계 의료지원 민원실 진료실			병의원・약업소관리 응급의료체계구축 암·희귀 의료비 지원 건강검진사업 국가암검진사업			식품위생업소관리 공중위생업소관리 부정불량식품관리 다소비식품 수거・검사 어린이급식관리지원센터 시청민원실			공공산후조리원 건립 건강생활지원센터 신축 농어촌의료서비스개선 공공건축 그린리모델링

□ 인    력(보건지원과)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	82	1	1	6	21	47	6
현 원	71	1	1	36	12	17	4
증 감	△11	0	0	30	△9	△30	△2

※ 현원에서 휴직자 14명 제외

2023년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 2022년 암관리 사업 수행평가 전북 최우수기관 선정 ◦ 보건건축TF팀 신설(2023.8.1.)로 보건 공공기관 건립 추진 전문성 확보

□ 보건환경 개선

◦ 공공보건 의료서비스 인프라 확충

- 공공산후조리원 건립, 건강생활지원센터 신축

◦ 농어촌 의료서비스 개선 및 공공건축물 그린리모델링

- 농어촌 의료서비스 개선 : 개보수 3개소, 장비 3점

- 노후된 보건기관 에너지 성능개선 리모델링 공사 : 2개소

□ 안전한 보건의료서비스 조성 및 건강검진사업 활성화

◦ 의·약업소 지도점검 및 응급의료 자원관리로 안전한 의료환경 조성

- 의료기관 및 의약품 취급업소 등 지도·점검(92개소), 방역수칙 점검

- 심폐소생술 등 응급처치 교육 실시 : 4회/ 177명

◦ 지역주민의 건강검진사업 활성화로 지속적인 건강관리

- 국가 건강검진(일반검진, 암검진, 영유아 검진 등) 안내 : 22,676명

- 암환자 의료비 지원 : 56명 / 76,129천원

- 희귀질환자 의료비 지원 : 44명 / 36,202천원

- 영유아 발달 정밀검사비 지원 : 3명 / 315천원

□ 음식점 시설개선 지원으로 위생수준 향상

◦ 2023년도 음식점 등 시설개선지원사업(입식테이블 설치 등) : 18개소

- 사업비 : 80,000천원(도비 30%, 시비 40%, 자부담 30%)

- 업소별 최대 5,000천원 지원

◦ 연도별 음식점 시설개선 지원 현황

연도	총계	2020년	2021년	2022년	2023년
지원업소 수	150개소	43개소	30개소	47개소	18개소

2023년 주요업무 추진실적

공공산후조리원 건립

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 고죽동 200-4 (1,764㎡)

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년

◦ 사 업 비 : 8,100백만원(국비 3,180, 도비 3,500, 시비 1,420)

◦ 사업내용 : 산모(신생아) 관리 및 프로그램 운영 공간 조성

- 산  모 : 개인 맞춤운동, 체형교정 전신마사지 등 회복 프로그램

- 신생아 : 신생아실 운영, 전용 환기시스템 등 전문적인 관리

◦ 시설규모 : 연면적 1,200㎡정도 (지상 3층)

□ 추진실적

◦ 공공산후조리원 건립계획 수립                : ‘22. 10.

◦ 공유재산 관리계획 심의의결                  : ‘22. 10.  7.

◦ 전라북도 지방재정투자심사                   : ‘23. 03. 06.

◦ 공공건축 건축기획 용역                      : ‘23. 05. ~ 07.

◦ 공공건축 사업계획 사전검토(건축공간연구원)   : ‘23. 06. 28.

◦ 공공건축 건축기획 심의                      : ‘23. 07. 15.

◦ 건축 설계공모 시행(공고)                     : ‘23. 08. 04.

□ 쟁점 및 대책

◦ 공공산후조리원 시설 고급화 및 차별화된 프로그램 도입

□ 민간산후조리원 시설 우수사례 및 특화된 프로그램 설계 반영

□ 금후계획

◦ 설계공모 작품 접수 및 심사(당선작 선정)    : ‘23. 10. 06. ~ 10. 13.

◦ 설계용역 시행                              : ‘23. 11. ~ ‘24. 04.

◦ 공사 시행                                 : ‘24. 05. ~ ‘25. 04.

건강생활지원센터 신축

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충동 28 외 3필지 (1,694㎡)

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년

◦ 사 업 비 : 5,319백만원(국비 1,160, 도비 290, 시비 3,869)

◦ 사업내용 : 주민밀착형 건강관리 보건의료서비스 공간 조성

- 통합관리실, 건강상담실, 주민참여실, 지역사회연계실

◦ 시설규모 : 연면적 825㎡정도 (지상 2층)

□ 추진실적

◦ 시 지방재정투자심사                             : ‘23. 02. 16.

◦ 공유재산 관리계획 심의의결                      : ‘23. 02. 21.

◦ 건강생활지원센터 신축사업 변경 승인 신청(市→道) : ‘23. 03. 28.

◦ 공공건축 건축기획 용역	: ‘23. 04. ~ 07.

◦ 공공건축 사업계획 사전검토(건축공간연구원)       : ‘23. 06. 22.

◦ 시설사업변경 승인 통보(道)                       : ‘23. 06. 27.

◦ 공공건축 건축기획 심의                          : ‘23. 07. 14.

◦ 건축 설계공모 시행(공고)                         : ‘23. 08. 04.

□ 쟁점 및 대책

◦ 사업부지 협소함에 따라 주차공간 부족 예상

□ 주차장 확보를 위한 토지 매입(동충동 28-2 외 1필지) 추진 중

□ 금후계획

◦ 설계공모 작품 접수 및 심사(당선작 선정)    : ‘23. 10. 06. ~ 10. 13.

◦ 설계용역 시행                              : ‘23. 11. ~ ‘24. 04.

◦ 공사 시행                                 : ‘24. 05. ~ ‘25. 02.

공공건축물 그린리모델링 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업대상 : 준공 후 10년 이상 경과된 보건기관 (2개소)

- 인월면 보건지소 / 대상보건진료소

◦ 사업기간 : 2023. 03. ~ 10.

◦ 사업내용 : 노후 공공건축물 에너지 성능향상 및 생활환경개선

- 고성능 창호, 고효율 냉난방치, 내‧외벽 단열재, 방수시공 등

◦ 사 업 비 : 5.3억원(국비 3.72, 도비 0.3, 시비 1.28)

□ 추진실적

◦ 국토부 2023년 공공건축물 그린리모델링 사업 선정 : ‘23. 12. 16.

◦ 제1회 추가경정예산 편성                         : ‘23. 03. 27.

◦ 건축 설계용역 시행                             : ‘23. 04. ~ 07.

□ 금후계획

◦ 2023년 그린리모델링 공사 시행                  : ‘23. 08. ~ 10.

《2024년 사업 계획(안)》

◦ 국토부 2024년 그린리모델링 사업 신청 및 협의   : ‘23. 09. ~ 11.

- (2개소) 사촌, 신월 보건진료소

농어촌 의료서비스 개선

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업대상 : 15년 이상 노후된 보건기관 (3개소)

- 보절면 보건지소 / 이백면 보건지소 / 부절 보건진료소

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 10.

◦ 사업내용 : 개보수 3개소, 장비 3점

- (개 보 수) 실내 리모델링 및 내‧외부 마감재 교체 등 시설 개보수

- (장비구입) 백신보관용 냉장고 등 3점

◦ 사 업 비 : 5억원(국비 2.5, 도비 0.7, 시비 1.8)

□ 추진실적

◦ 장비 구입 완료(백신보관용 냉장고 등 3점)          : ‘23. 03.

◦ 건축 설계용역 시행                                : ‘23. 02. ~ 04.

◦ 보건복지부 시설설계심의                           : ‘23. 05. ~ 06.

◦ 원가심사 및 일상감사                              : ‘23. 07.

□ 금후계획

◦ 보건기관 3개소 개보수 공사 시행                   : ‘23. 09. ~ 11.

《2024년 사업 계획(안)》

◦ 보건복지부 2024년 농어촌 의료서비스 개선사업 협의 : ‘23. 09. ~ 10.

- (4개소) 남원시보건소, 산내면보건지소, 공안‧수홍 보건진료소

시민중심의 의‧약업소 관리

(계속사업)

□ 현    황

구분 합계	의료기관(병·의원)						약업소						의료기기 판매·수리 업소	기타
	종합 병원	일반 병원	요양 병원	의원	치과	한의원	약국	도매 업소	한약방	약방	안전상비의약품 판매업소	특수장소 의약품취급소
325	1	2	4	56	21	18	43	7	13	3	40	1	93	23

※ 기타 : 안경업소 14, 치과기공소 8, 안마원 1

□ 추진실적

◦ 의료기관 및 의약품 취급업소 등 지도·점검	: 92개소

◦ 요양병원 코로나19 감염 대비 집중 지도·점검	: 4개소/ 2회

◦ 의료기관 집중안전점검	: 5개소

◦ 구급차 운용 상황 및 관리실태 점검	: 7개소/ 9대

◦ 양귀비·대마 불법재배 단속	: 8건/ 154주

◦ 심폐소생술 등 응급처치 교육	: 4회/ 177명

◦ 설 명절 연휴 응급의료 진료체계 구축	: 68개소/ 3,163명

□ 금후계획

◦ 의료기관 지도·점검	: 10월, 수시

◦ 의약품 및 한약 취급업소 지도·점검	: 9~10월

◦ 심폐소생술 등 응급처치 교육	: 9월~11월

◦ 추석 명절 연휴 응급의료 진료체계 구축	: 9월

◦ 보건소 신속대응반 재난대응체계 강화 교육	: 10월

◦ 의료기기 판매·수리업소 지도‧점검	: 10~11월

남원의료원 시설 현대화사업 추진

(공약사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원의료원 일원

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2027년

◦ 총사업비 : 81,018백만원(국비 50%, 도비 50%)

◦ 사업내용 : 노후화 된 시설·장비 보강으로 안전한 진료환경 조성

□ 추진실적

◦ 최근 5개년 주요 시설공사	: ´17 ~´21년

- 응급의료센터, 분만·중환자·수술·인공신장투석실, 읍압격리병상, 심뇌혈관센터 등 확충

◦ 편의·안전시설(엘리베이터, 의료장비 등) 보강 완료	: ´23. 2월

◦ 시설·장비 확충 방안을 위한 현장방문 및 면담	: ´23. 1월/ 4회

◦ 2023년 지역거점공공병원 기능보강사업 2차 공모 선정	: ´23. 5월

- 의료진 숙소 리모델링(8,000백만원), 재활치료실 장비보강(612백만원)

◦ 피부절제기 등 총 4종 의료장비 보강	: ´23. 7월

□ 금후계획

◦ 의료인력 숙소 증축 준공 및 사용승인 신청	: ´23. 8월

◦ 양질의 의료서비스가 제공될 수 있도록 지도·점검	: 수시

◦ 연차별 기능보강사업 기본계획 수립 시 협력체계 유지

◦ 연차별 추진계획

세부내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				2027년~
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
편의·안전시설 보강
의료진 숙소 증축
의료진 숙소 리모델링
재활의학과 보강
입원병동 환경개선
행정부서 환경개선
주차 환경개선

안전한 먹거리, 깨끗한 공중위생 관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위생업소 현황

합 계	식품위생업소					공중위생업소
	소계	일반·휴게	유흥·단란	제조(즉석)	판매·소분 등	소계	숙박·목욕	이·미용	기 타
3,194	2,690	1,625	80	440	545	504	126	309	69

(단위 : 개소, 2023. 8. 11. 기준)

□ 추진실적

◦ 식품·공중위생업소 지도·점검                        : 1,324개소

- 위반업소 : 25건(고발 9, 영업정지 2, 품목제조정지 1, 과징금 1, 과태료 6, 시정명령 등 6)

◦ 시민 다소비 식품, 유통식품, 농·수산물 등 수거·검사    : 131건

◦ 음식점 등 시설개선지원사업(입식테이블 설치 등)          : 18개소

◦ 어린이 기호식품 조리·판매업소 지도·점검         : 72개소/ 매월

◦ 어린이 급식시설 위생·영양관리(어린이급식관리지원센터)  : 77개소

◦ 식중독 예측지수 문자 전송                             : 305개소

◦ 집단급식소 및 학교 수련활동 등에 따른 위생업소 점검    : 17개소

◦ 배달음식점(마라탕, 치킨 등) 및 식품판매업소 지도·점검  : 100개소

◦ 아·태 마스터스대회, 춘향제, 잼버리 대비 지도·점검      : 1147개소

□ 쟁점 및 대책

◦ 식중독 발생 사전예방 활동 강화 필요

- (지역행사) 행사장 주변 위생업소 사전 점검 및 식중독 예방 활동

- (수학여행) 관내 음식점에 대한 위생점검 요청 시 적극 협조

□ 금후계획

◦ 2023 남원 세계 드론제전 및 흥부제 대비 지도·점검       : 8~9월

◦ 식중독 예방을 위한 집단급식소 및 다중이용시설 지도·점검 : 8~10월

◦ 배달음식점(김밥, 떡볶이 등) 및 식품판매업소 지도·점검   : 8~12월

◦ 추석, 가을 행락철, 김장철, 성탄절 대비 위생업소 지도·점검  : 9~12월

품격 있는 모범‧친절업소 만들기

(계속사업)

□ 개    요

◦ 모 범 업 소 : 45개소(지정기간 ′22. 10. 1. ~ ′23. 9. 30.)

◦ 위생등급제 지정 업소  : 50개소(′23. 7. 28. 기준)

◦ 친절·청결 우수업소 : 40개소(식품 33, 공중 7)

◦ 공중위생 최우수업소 : 63개소(숙박업 17, 목욕장업 3, 세탁업 2, 이용업 6, 미용업 35)

◦ 사 업 비 : 57,210천원(기금 15,160, 시비 42,050)

□ 추진실적

◦ 신규 위생등급제 지정을 위한 컨설팅 대상업소 모집 및 집체교육 : 10개소

◦ ′23년도 위생등급제 신규 및 재지정 업소                  : 21개소

□ 쟁점 및 대책

◦ 음식점 위생등급제 지정 활성화를 통한 위생수준 향상 도모

- 음식점 위생등급제 인센티브 강화 및 지정신청 편의 제공

□ 금후계획

◦ 2023년 모범업소 재심사 및 위생·친절교육            : 9~10월

◦ 2023년 신규 위생등급제 지정을 위한 컨설팅비 지원    : 10개소

◦ 친절·청결 위생업소 지정 및 관리                      : 8~12월

◦ 위생등급제 지정 업소 사후관리 및 위생물품 등 지원   : 10~12월

◦ 공중위생서비스평가(이·미용업) 실시                  : 10~11월