2023. 9.

2023년 주요업무 추진실적

도   시   과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2023년 주 요 업 무  결산

□ 2023년 주요업무 추진실적

◦ 남원시 미래 도시디자인 마스터플랜 수립 용역

◦ 장기미집행 도시공원 내 사유지 매입

◦ 어린이공원 새단장 조성사업

◦ 금암공원 조성사업

◦ 만인공원 조성사업

◦ 교룡공원 숲속야영장 조성사업

◦ 쾌적한 도시공원 유지관리

◦ 미세먼지 차단숲 조성사업

◦ 생활밀착형 숲 조성사업

◦ 함파우 지방정원 조성사업

◦ 도시숲 및 가로수 조성사업

◦ 2040 도시기본계획 및 관리계획(재정비)

◦ 구암지구 도시개발사업

◦ 도시재생 활성화 계획 수립

◦ 생활밀착형 도시재생 스마트 기술지원사업

◦ 터미널지구 도시재생 뉴딜사업

◦ 도시재생 인정사업(구.미도탕)

◦ 도시재생 지원센터 운영

◦ 도시재생 거점시설 운영

일  반  현  황

□ 기    구

										도 시 과 장
										박 승 용
도시디자인팀											도시관리팀													도시재생팀
강 자 청											정 병 욱													김 상 규
∘ 도시디자인 마스터플랜 수립 ∘ 도시공원 조성 사업추진 ∘함파우지방정원 ∘도시숲·가로수 조성 ∘미세먼지 차단숲· 옥상정원조성 ∘ 장기미집행 사유지 매입 ∘ 경관·공공디자인 관리 ∘도시공원 유지관리											∘도시기본·관리 계획수립 ∘도시계획시설 결정및인가 ∘ 지구단위계획 수립 ∘개발행위허가 ∘전문건설업관리													∘도시재생뉴딜사업 ∘도시재생인정사업 ∘ 도시재생 전략 계획수립 ∘ 도시재생 활성화 계획 수립 ∘도시재생예비사업 ∘ 도시재생지원센터 운영

□ 인    력

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	16	1	1	3	5	4	2
현 원	16	1	1	3	5	2	4	공무직 2 휴직자 1
증 감	-	-	-	-	-	△ 2	2

2023년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 도시디자인의 입체적인 미래상 구현과 실질적인 가이드라인 지침 수립 ◦ 주민 중심의 쾌적하고 안전한 도시공간 조성 및 공공디자인 프로세스 정립 및 추진 ◦ 도시관리계획 변경 및 지속 발전 가능한 도시개발사업 추진 ◦ 지속적인 도시재생사업을 통한 구도심 활성화 및 지역주민 삶의 질 제고

□ 다양한 숲, 정원, 공원과 디자인이 어우러진 녹색도시 구현

◦ 기후대응 광치천 미세먼지 차단숲 조성 (2㏊ / 메타세콰이어 외 33종 50,048주)

◦ 함파우 지방정원(11㏊) 추진으로 관광지 연계 및 정원문화 확산 기여

◦ 역사와 충혼의 만인공원 행정절차 이행, 부지 매입비 등 예산확보(109억)

◦ 미래 도시디자인 가이드라인 수립 추경 확보(9억) 및 제안 공모 추진

◦ 도시공원 활성화 지원 시범사업 공모선정 *전북 3개소(전주,익산,남원)

- 도통근린공원 맨발걷기길 조성 : 도비 60백만원(‘23. 3월)

□ 보존과 개발이 조화를 이루는 도시관리계획 수립 및 정비

◦ 남원 도시기본계획 및 도시관리계획 재정비로 체계적 도시 공간구조 마련

◦ 건전한 도시 성장과 난개발 예방을 위한 도시개발 추진

- 도시관리계획 추진 8건

(도시계획시설(변경) 4, 용도지구(변경) 3, 국립공원구역 해제에 따른 변경 1)

- 남원 구암지구 도시개발사업 추진

- 도시계획 심의(1분과위원회) 추진 : 8회 374건

(태양광 발전시설 347, 동·식물 관련 시설 18, 기타 9)

□구도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진

◦ 도시재생사업 공모대응을 위한 활성화계획 수립(동문밖마을, 금동노후주거지)

- 금동노후주거지 공모신청서 제출(`23.04.25.) 완료

- 동문밖마을 하반기 공모 신청(`23.09. 예정)

◦ 주민들의 역량 강화를 위한 S/W사업 추진

- 터미널지구 4과목, 인정사업 5과목, 동문밖마을 1과목, 금동지구 1과목

◦ 거점공간 조성사업(H/W) 추진

- 공사중 : 남원이음센터, (구)미도탕

- 설계중 : 숲정이마을공유마당, 상생협력상가

◦ 생활밀착형 도시재생 기술지원사업을 통한 구도심 활성화 도모

- 원도심지구 사업 착공(`23.05.02.) 및 터미널지구 설계 착수(`23.04.21.)

2023년 주요업무 추진실적

남원시 미래 도시디자인 마스터플랜 수립 용역

(신규사업)

□ 개    요

◦ 용 역 명 : 남원시 미래 도시디자인 마스터플랜 수립 용역

◦ 위    치 : 남원시 도시지역(30.65㎢)

◦ 과업내용 : 미래 도시디자인 마스터플랜 용역 1식

※ 도시경관, 공공디자인, 녹지, 도시공원 및 도시숲, 가로수 관리계획 등

◦ 용 역 비 : 880백만원(시비)

◦ 용역 기간 : 2023. 6. ~ 2024. 2. (8개월)

□ 추진실적

◦ 남원 미래도시디자인 마스터플랜 수립용역 시행	: ′23. 05. 04.

- 제안 공모 공고 : 23. 5. 04. ~ 5. 24.(20일)

◦ 제안서 평가 및 협상 적격자 통보·협상                 : ′23. 06. 09. ~

◦ 계약체결 및 용역 착수	: ′23. 06. 20. ~

◦ 총괄디자이너 자문회의	: ′23. 07. 12. ~

- 2023 공공디자인 민간전문가 지원제도 (홍익대학교 장영호 교수)

◦ 용역 착수보고회 개최	: ′23. 07. 19. ~

□ 쟁점 및 대책

◦ 전국 최초로 추진하는 사례로 비전과 목표를 충분히 고려하지 못하면       최상의 결정과 종합적인 계획 수립의 어려움이 있을 수 있음.

□ 전체 도시에 대한 실행계획을 한꺼번에 수립하기보다는 초기에는 특정 영역이나 프로젝트에 초점을 맞추고, 과업을 추진하면서 실행계획을 구체화하고 보완

□ 금후계획

◦ 총괄디자이너 수시 자문 및 민간전문가 회의	: ′23. 08. ~

◦ 시민 참여단 구성	: ′23. 08. ~

◦ 중간보고회 개최	: ′23. 10.

장기미집행 도시공원 내 사유지 매입

(계속사업)

□ 개    요

◦ 대    상 : 근린공원 6개소(금암, 월락, 향교, 교룡, 신촌, 노암)

◦ 면    적 : 2,172천㎡ (사유지 1,288천㎡, 국・공유지 884천㎡)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2025년(8년)

◦ 사 업 비 : 26,000백만원(시비)  *23년 예산 : 14,000백만원

□ 추진 실적

(단위: 백만원)

구 분	지정면적(㎡)	소유별(㎡)		매입현황(㎡)			비 고
		국공유지(필지)	사유지(필지)	기매입(필지)	23년(필지)	금액
계	2,172,324	883,610(261)	1,288,714(601)	506,053(138)	101,175(10)	2,116	47.1%
향교공원	486,786	217,932(68)	268,854(134)	87,994(45)	19,934(4)	479	40.1%
교룡공원	1,405,206	576,039(149)	829,167(378)	373,846(64)	6,996(4)	230	45.9%
월락공원	64,054	3,496(17)	60,558(22)	8,098(4)	-	-	13.4%
노암공원	108,114	12,487(14)	95,627(35)	11,987(3)	198(1)	13	12.7%
금암공원	38,257	19,988(7)	18,269(24)	16,734(21)	-	-	91.5%
신촌공원	69,907	53,668(6)	16,239(8)	7,394(1)	74,047(1) 전라북도교육감	1,394	45.5%

□ 금후 계획

◦ 장기미집행 도시공원 사유지 매입 지속 추진         : `23. 09 ~ 12.

어린이공원 새단장 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 어린이공원 12개소

◦ 사업내용 : 새단장(바닥정비, 퍼걸러, 수목정비, 노후시설 교체 등)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 2,000백만원 / `23년 예산 : 200백만원(시비)

□ 추진 실적

◦ ‘18 ~ ‘22년 사업현황

조성 년도	공원명	위치	사업비 (백만원)	사업내용
계			1,600
‘18년	도통3호 어린이공원	용성중 옆	100	탄성포장 400㎡, 수목식재, 블록포장 140㎡ 등
	도통7호 어린이공원	도통동주민센터 옆	100	탄성포장 410㎡, 콩자갈포장 112㎡ 등
	도통6호 어린이공원	물방개 워터파크	700	탄성포장 939㎡, 물놀이시설 (11종)
‘19년	향교4호 어린이공원	중앙초 옆	20	야자매트 61㎡, 수목식재 등
	도통1호 어린이공원	시청북문	90	탄성포장 384㎡, 수목식재 등
	도통2호 어린이공원	녹주맥반석 옆	90	탄성포장 455㎡, 수목식재 등
‘20년	향교1호 어린이공원	덕인회관 옆	60	탄성포장 262㎡, 수목식재 등
	도통5호 어린이공원	예닮교회 앞	140	탄성포장 186㎡, 수목식재, 데크설치 29㎡
‘21년	노암1호 어린이공원	노암5통	60	옥외용벤치 교체, 수목식재 등
	도통4호 어린이공원	도통초 옆	140	탄성포장 331㎡, 수목식재, 화장실신축 등
‘22년	주천 송치, 이백 서곡	문화마을내	100	그네 1대, 철봉 1대, 수목 식재, 비가림시설 등

◦‘23년 실시설계용역(의견수렴, 원가심사 등)          : `23. 03 ~ 07.

- 5개소(도통 1~3호, 향교 1호, 4호) : 조합놀이대 교체, 맨발길 조성, 수목보완 등

□ 금후 계획

◦ 원가심사(감사실) 및 새단장 사업 착공               : `23. 08.

◦ 새단장 사업 준공                                   : `23. 11.

◦ 사후관리                                          : 계속

금암공원 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 노암동 566-1번지 일원

◦ 사업내용 : 야간경관이 특화된 가족생태 근린공원조성

- ［1단계］주민생활과 밀접한 근린생활시설 /‘20~‘22년 (70억)

- ［2단계］공원 이용활성화를 위한 관광객 유인시설 /‘22~‘23년 (32억)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2023년 (6년)

◦ 총사업비 : 115억원(매입비 10, 용역비 3, 공사비 102)

□ 추진 실적

◦ 1단계 사업완료	: `20. 04. ~`22. 06.

·(전기) : 금수정 및 수목 경관조명, 인도교조명, 가로등설치 등

·(조경·토목) : 인도교, 데크산책로, 생태놀이터, 종탑·우물 복원, 쉼터, 화장실 등

◦ 2단계 사업완료	: `22. 06. ~`23. 08.

·(조경·토목) : 놀이터 녹음수 등(느티, 에메랄드 그린 외 1종 56주), 수국 2.1만주 등

무장애 데크로드, 주차장 진입로 포장, 침목계단, 수로관 설치 등

· (건축) : 까페전망대 59.98㎡ 완료, 운영 위탁자 선정 예정

· (전기) : 종탑·중앙계단, 옹벽, 진입 데크로드, 전망대, 인도교 종점부,                 벽천 경관조명 LED 184개

□ 금후 계획

◦ 금암공원 보완사업 실시설계용역                   : `23. 08. ~ 09.

◦ 보안사업 발주 및 까페운영자 위탁자 선정           : `23. 10. ~ 12.

만인공원 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충동 197-1번지 일원

◦ 사업내용 : 만인공원 조성

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2027년

◦ 총사업비 : 30,441백만원(국비 3,887 시비 26,554)

□ 추진 실적

◦ 코레일 소유 토지매입(1필지, 19,011㎡) 협의, 면담   : `22. 08 ~ `23. 07.

◦ 공원 구역조정(51,300㎡⇒약90,246㎡) 행정절차 이행  : `22. 12 ~ 현재

- 도시관리계획 결정(변경), 공원조성계획(변경), 환경성·교통성·경관성 검토, 재해영향성검토    ◦ 만인공원 조성 관련 1회 추경예산 확보(109억)        : `23. 03.

- 마스터플랜(문화예술과), 문화재조사, 철거공사, 기본계획 및 실시설계용역

◦ 만인공원 문화재 지표조사 시행(문화재청 승인, 착수) : `23. 07. ~

□ 금후 계획

◦ 기본계획 및 실시설계용역 추진                 : `23. 10. ~ `24. 05.

◦ 만인공원 철거공사 설계용역 발주                 :  `23. 09월한

- 공원 내 기존 시설물(구 남원역, 테니스코트 등) 철거

◦ 철도공사 부지매입 지속협의                   : 계속

교룡공원 숲속야영장 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산곡동 산13번지 일원

◦ 면    적 : 28,069㎡

◦ 사업내용 : 일반야영장 29면, 글램핑돔 3동, 산책데크, 부대시설, CCTV 등

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2023년 (3년)

◦ 총사업비 : 2,400백만원(국비 1,200, 시비 1,200)

□ 추진 실적

◦ 숲속야영장 기본계획 및 실시설계용역                   : `21. 01. ~ `21. 09.

◦ 캠핑동호회 의견수렴(한국캠핑협회 외 2개 동호회)        : `21. 05.

◦ 숲속야영장 제반용역 및 관련부서 협의                  : `21. 05. ~ `22. 03.

◦ 숲속야영장 조성계획 승인, 고시(전라북도)                : `22. 05.

◦ 숲속야영장 조성사업 조성사업(조경‧토목) 착공            : `22. 05.

◦ 숲속야영장 조성사업 조성사업(전기‧통신) 착공            : `22. 11.

□ 금후 계획

◦ 숲속야영장 조성사업 공사 시행(공정율 70%)            : `23. 09. ~ 12.

◦ 운영관리 조례 제정, 운영방식(직영, 위탁) 검토    : `23. 12월한

쾌적한 도시공원 유지관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 대상공원 : 교룡공원 외 22개소

◦ 사업내용

- 등산로변 예초(교룡, 신촌, 향교공원 / 13㎞)      :  30백만원

- 등산로 정비(신촌공원 외 3지구)                 :  50백만원

- 시설물 및 수목유지관리(근린·어린이공원 / 23개소)  : 180백만원

- 도통14통 근린공원 내 탄성포장                  :  30백만원

- 맨발 황토길 조성(도통근린공원)                  : 150백만원

◦ 사업기간 : 2023. 1 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 440백만원

□ 추진 실적

◦ 맨발길 조성, 탄성포장 등 실시설계 용역           : `23. 04. ~ 05.

◦ 공원 시설물도색·교체, 수목해충방제              : `23. 04. ~ 06.

◦ 근린공원, 어린이공원 수목관리(제초, 풀베기, 수목전정)  : `23. 05. ~ 08.

◦ 등산로 예초작업(교룡, 향교공원, 신촌공원)         : `23. 05. ~ 08.

◦ 등산로(향교공원 외2개소) 정비사업 추진           : `23. 07 ~ 08.

□ 금후 계획

◦ 공원 내 수목, 녹지대, 시설물 유지관리            : 계속

미세먼지 차단숲 조성사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 광치천변(용정동 산101-4번지 일원)

◦ 사 업 량 : 2.0ha

◦ 사 업 비 : 2,000백만원(국비 1,000 시비 1,000)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업내용 : 메타세콰이어 외 23종 51,223주 식재, 퍼걸러 2개소 등

※ 산림청 권장 미세먼지 저감 조림수종 (76종), 조달청 고시 조경수목(246종), 지표면 피복수종(70종) 중 선정

□ 추진 실적

◦ 사업계획 수립                              : ′22. 01. 26.

◦ 지방재정 투자심사 승인                     : ′22. 03. 08.

◦ 실시설계 용역 시행                        : ′22.  05.  02. ~ 10. 28.

◦ 원가심사 및 일상감사 완료                 : ′22. 10. 20.

◦ 사업시행 및 준공                          : ′22. 11. 10.~ 23. 06. 02.

□ 금후 계획

◦ 미세먼지 차단숲(광치생태공원) 보완사업 시행	:′23. 8. ~ 12월 한

- 장마철 집중호우로 인한 수목 도복 및 유실 등 복구

※ 도시숲 조성사업 예산 잔액 활용

◦ 급수, 시비, 제초 등 사후관리 철저	: 계속

생활밀착형 숲 조성사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 만인로 3(만인의총 기념관 및 관리동)

◦ 사업규모 : 850㎡

◦ 사 업 비 : 500백만원(국250 시250)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 사업내용 : 옥상정원 및 실내정원조성

□ 추진 실적

◦ 생활밀착형 숲 조성사업 신청서 제출	: ′22. 05. 30.

◦ 사업대상지 선정	: ′22. 08. 30.

◦ 대상지 변경 승인신청(전라북도)	: ′23. 05. 17.

- 변경사유 : 기존 구조체 구조검토결과 구조 안정성 미확보

◦ 대상지 변경 승인(전라북도)	: ′23. 06. 20.

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: ′23. 7. 25. ~ 9. 22.

- 구조안전성 검토 및 생활밀착형 숲 조성 지침 반영

□ 금후 계획

◦ 감리용역 시행	: ′23. 8. ~ 12.

◦ 사업 시행	: ′23. 9. ~ 12.

◦ 사후관리	:  계속

함파우 지방정원 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암동 산13번지 일원

◦ 조성면적 : 40,638㎡(구역 면적 11.3ha)

◦ 사 업 비 : 6,533백만원(도비 3,000 시비 3,533)  ※ 토지매입비 533백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2020. ~ 2023.

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자 (~‘18)	재원투자내역					‘23이후	비고
			소계	‘19	‘20	‘21	‘22
합계	6,533		6,533		500	2,533	600	2,900
국비
도비	3,000		3,000		250	1,000	300	1,450
시비	3,533		3,533		250	1,533	300	1,450

□ 추진 실적

◦ 용역추진상황

용 역 명	사업기간	사업비(백만원)	비 고
계		803
기본 및 실시설계	2020. 9. 3. ~ 2021. 12. 15.	475	완료
문화재 지표조사	2020. 12. 22. ~ 2021. 5. 14.	6	완료
문화재 표본조사	2021. 6. 7. ~ 2021. 11. 5.	17	완료
산림조사	2021. 8. 30. ~ 2021. 9. 16.	6	완료
사전재해영향평가	2021. 3. 23. ~ 2022. 4. 17.	66	완료
소규모환경영향평가	2021. 3. 23. ~ 2022. 6. 21.	38	완료
환경영향평가	2022. 5. 19. ~ 2022. 12. 31.	134	완료
사후 환경영향 조사	2023. 4. 19. ~ 2024. 4. 19.	61	추진중
시공감리용역	2022. 12. 20. ~ 2024. 1. 31.	50	추진중

◦ 함파우지방정원 경관심의                             : ′21. 09. 14.

◦ 유원지 조성계획 변경(남원시 고시 제2021-150호)      : ′21. 10. 01.

◦ 실시계획인가신청 및 관련부서 협의                   : ′21. 12. 20.

- 협의완료 : 문화예술과, 건설과, 안전재난과, 건축과, 상수도사업소, 농정과 등

◦ 환경영향평가 용역 시행                     : ′22. 5. 19. ~ 12. 29.

- 환경영향평가서(초안) 주민설명회 개최               : ′22. 07. 28.

- 환경영향평가 협의 완료                            : ′22. 12. 29.

◦ 원가심사 및 일상감사 완료                          : ′22. 11. 28.

◦ 함파우 지방정원조성사업(토목․조경) 시행   : ′22.12. 27. ~′24. 3. 17.

◦ 사후환경영향조사 용역 시행               : ′23. 4. 19. ~′24. 4. 12.

◦ 함파우 지방정원 조성사업(전기․통신공사) 시행        : ′23. 04. 24.

◦ 무연분묘 개장 및 봉안 용역 시행	: ′23. 7. 21. ~ 8. 19.

□ 금후 계획

◦ 함파우 지방정원 조성사업(토목․조경) (2차분) 시행 : ′23. 12. ~′24. 12.

- 함파우 유원지 마스터플랜(문화예술과) 협의 반영 추진

도시숲 및 가로수 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도시숲 1.0ha, 가로수 조성 10.5㎞

◦ 사 업 비 : 1,600백만원(도비 800, 시비 800)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 사업내용 : 경관개선, 공간활용성을 고려한 도시숲 및 가로수 조성

위 치		사업량	예산액	비고
합 계		1.3ha/10.5㎞	1,600
도시숲	소 계	1.3ha	700
	금지면 옹정리 309-2번지 일원	0.3	200	금지문화누리센터
	금지면 옹정리 301-3번지 일원	0.7	300	김주열열사 기념관
	덕과면 사율리 652-8번지 일원	0.3	200	덕과면 소재지 앞 유휴지
가로수	소 계	10.5㎞	900
	인월면 서무리 95-5 ~ 취암리 65-4	2.5	200	인월면 풍천
	주생면 도산리 5-15 ~ 금지면 입암리 1140-10	3.0	300	주생면 – 금지면 풍촌천
	요천 100리숲길(산동~금지)	5.0	400	기존 수목 보식

□ 추진 실적

◦ 23년 도시숲 조성사업 대상지 선정	: ′22. 11. 22.

◦ 사업계획 수립	: ′23. 01. 03.

◦ 도시숲 및 가로수 실시설계 용역	: ′23. 1. 31.~ 3. 21.

◦ 도시숲 위원회 심의	: ′23. 04. 04.

◦ 가로수 조성사업 일상감사	: ′23. 4. 6.~ 4. 13.

◦ 가로수 조성사업 시행	: ′23. 4. 27.~7. 2.

◦ 가로수 조성사업 공사 중지	: ′23. 05. 12.

◦ 대상지 변경 승인신청(전라북도)	: ′23. 05. 19.

◦ 도시숲 조성사업 일상감사 및 원가심사	: ′23. 05. 19.

◦ 도시숲 조성사업 공사 중지	: ′23. 07. 20.

□ 금후 계획

◦ 사업시행 및 준공                              : ′23. 09. ~ 11.

◦ 사후관리                                      :  계속

2040 도시기본계획 및 관리계획(재정비) 수립

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업 범위 : 남원시 행정구역 전체

◦ 사업 기간 : 2019. ~ 2023.

◦ 사업 내용 : 도시기본계획, 도시관리계획(재정비) 등

◦ 사  업  비 : 총 1,444백만원

□ 추진실적

< 도시기본계획 수립>

◦ 기초조사 및 현황분석 (시민참여단운영 4회)	: ′19. 07. ~ 12.

◦ 도시기본계획 입안보고	: ′20. 08. 20.

◦ 주민의견 수렴(공청회) 개최	: ′21. 03. 18.

◦ 시의회 의견청취	: ′21. 03. ~ 04.

◦ 남원시 도시계획위원회 자문	: ′21. 08. 10.

◦ 국토계획평가(국토부) 협의 추진중	: ′21. 06. ~ 12.

◦ 도시기본계획 승인신청(남원시 → 전라북도)	: ′22. 10. 20.

◦ 국토정책위원회(국토계획평가) 심의완료	: ′23. 03.

◦ 전라북도 재해영향평가 심의완료	: ′23. 04.

◦ 남원 도시기본계획 전라북도 도시계획위원회 심의	: ′23. 06. 29.

< 도시관리계획 수립>

◦ 기초자료 및 관련자료 수급, KLIS 등재사항 검토 및 정비 등

◦ 장기미집행시설 전수 조사 및 관련도서 작성	: ′19. 08. ~ 12.

◦ 일몰제에 따른 장기미집행시설 실효고시(1차/2차)	: ′20. 07. ~ 12.

◦ 일몰제에 따른 장기미집행시설 실효고시(3차)	: ′22. 02.

◦ 도시관리계획(재정비) 입안, 의견청취, 의회의견청취: ′22. 03. ~ 04.

◦ 남원시 도시계획위원회 자문 및 심의	: ′22. 05. 23.

◦ 전라북도 관련부서, 산림청, 환경청 협의	: ′22. 06. ~ 12.

□ 쟁점 및 대책

◦ 2030 남원 도시관리계획은 시의 지속적이고 장기적인 발전과 원활한 사업추진을 위한 지역현안사업, 농업진흥지역·보전산지 해제지역의 관리지역으로의 변경과

◦ 주민재산권 보호, 귀농귀촌 여건마련 등을 위한 자연취락지구 변경 및 신설, 도시계획시설 변경 등 남원시민의 생활과 밀접한 관계가 있는 계획인 만큼 신속한 추진 필요

□ 2023년 9월 중 전라북도 도시계획위원회 상정 예정으로, 신속히 마무리하여, 시민의 삶의 질 향상 및 시 현안사업이 차질없이 추진될 수 있도록 적극 노력하겠음.

□ 금후계획

< 도시기본계획 수립>

◦ 전라북도 도시계획위원회 심의에 대한 조치계획 제출	: ′23. 08.

◦ 2040 남원 도시기본계획 승인 및 공고	: ′23. 09.

< 도시관리계획(재정비)>

◦ 전라북도 승인신청	: ′23. 08.

◦ 전라북도 도시계획위원회 심의	: ′23. 09.

◦ 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면고시	: ′23. 10.

도시기본계획

◇ 미 래 상 : 남원에 머무는 모두가 시민이 되는 오고싶고 살고싶은 “문화관광도시 남원”

◇ 계획인구 지표 설정

구분		2020	2025	2030	2035	2040	비고
			1단계	2단계	3단계	4단계
통계청 인구추계	남원시	77,539	75,871	74,790	74,162	73,924
	105% 적용시	81,416	79,665	78,530	77,870	77,620
상주 인구(계획인구)		82,045	80,404	79,635	79,121	78,410
주간 활동 인구(체류인구)			16,256	17,245	18,192	19,008
인구지표(안) (총괄)	총계	97,280	96,600	97,025	97,223	97,418
	최종적용	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000

※ 인구의 지속적 감소 및 유출에 대응하기 위해 관광체류형 인구 지표 수립 반영

	도시관리계획(재정비)
◇ 시간적 범위(기준년도 / 목표연도) : 2020년 / 2030년 ◇ 공간적 범위 : 남원시 행정구역 일원(752.81㎢) ◇ 내용적 범위 : 용도지역, 용도지구, 지구단위계획, 성장관리계획, 도시계획시설 결정(변경) - 전라북도 결정사항 : 78건 / 용도지역(68지역), 용도지구(10지구) - 남 원 시 결정사항 : 120건 / 용도지구(33지구), 지구단위계획(1지구), 성장관리계획(1지구), 시설(84개소)

구암지구 도시개발사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 전북 남원시 향교동, 도통동 일원

◦ 시 행 자 : 한국토지주택공사

◦ 사업방식 / 사업비 : 환지방식 / 406억원

◦ 토지이용계획(안)

구 분	계	공동주택	단독주택	준주거시설	공공청사	비고
토지이용	171,702.5㎡	67,336㎡	11,111㎡	5,860㎡	19,081㎡	도로,공원, 녹지,저류지 등
수용인구·세대수		2,807인 / 1,080세대

□ 추진실적

◦ 도시개발구역 지정 제안(수용 및 사용방식)	: ′17. 09. 01.

◦ 사업방식 전환에 따른 구역지정 제안(환지방식)	: ′18. 04. 20.

◦ 구역지정 및 개발계획 승인(남원시↔전북도)	: ′18.12.31.~′19.05.30.

◦ 구역지정(변경) 및 개발계획(변경) 고시(남원시↔전북도) : ′20. 08. 14.

◦ 실시계획 인가 고시	: ′20. 08. 21.

◦ 토지이용계획 변경(2차) 추진 및 승인	: ′21. 02. ~ 10.

◦ 문화재 정밀발굴조사 추진(중층발굴, 4구역 추가발굴)	: ′21. 07. ~′23. 09.

◦ 실시계획 변경 인가 고시(1차)	: ′22. 02. 25.

◦ 문화재 보존방안 수립 완료(1·2구역) / 문화재청	: ′22. 09. 21.

◦ 문화재 유적 전문가 검토 조치(3구역) / 문화재청	: ′22. 12. 07.

◦ 공사발주 의뢰(LH)	: ′23. 08.

□ 쟁점 및 대책

◦ 문화재 보존을 위해 역사공원 부지 계획 및 사업성 개선을 위한 공동주택용지 용적률 및 최고층수 완화 검토

□ 토지이용계획 변경 관련 전라북도 관련부서(경관,도시계획) 협의 시 완화될 수 있도록 지원하겠음

□ 금후계획

◦ 공사착공(LH)	: ′23. 9.~′27. 12.

※ 8월 공사발주 의뢰 완료(개발계획, 실시계획인가, 문화재 발굴조사 병행 추진)

◦ 환지계획수립 및 인가 추진	: ′23. 9.~′23. 12.

도시재생 활성화계획 수립

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 동문밖마을, 금동노후주거지

◦ 사업내용 : 활성화계획 수립 2개소 및 공모대응

◦ 사업유형 : 동문밖마을(지역특화재생), 금동노후주거지(우리동네살리기)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2023년 (2년)

◦ 사 업 비 : 250백만원 /  `23년예산 : 100백만원

□ 추진실적

<동문밖마을>

◦ 동문밖마을 활성화계획 수립용역 착수	: ‘22. 04. 19.

- 용역사 : ㈜인우

◦ 전라북도 사전 컨설팅	: ‘23. 01. 19.

◦ 주민의견 수렴	: ‘23. 06.

◦ 전라북도 및 도시재생지원기구(HUG) 컨설팅	: ‘23. 07. ~ 08.

<금동노후주거지>

◦ 금동노후주거지 활성화계획 수립용역 착수	: ‘22. 04. 25.

- 용역사 : 남원새로이마을관리사회적협동조합, ㈜도시공간디자인 에이치트리

◦ 주민의견 수렴 완료	: ‘22. 07. ~ 09.

◦ 전라북도 및 도시재생지원기구(HUG) 컨설팅	: ‘23. 02. ~ 04.

◦ 최종 활성화계획(안) 수립	: ‘23. 05.

◦ 공모신청서 제출	: ‘23. 04. 25.

□ 금후계획

<동문밖마을>

◦ 공모신청서 제출 및 공모대응	: ‘23. 09. ~ 12.

<금동노후주거지>

◦ 공모사업 평가 및 최종 발표	: ‘23. 09.(예정)

생활밀착형 도시재생 스마트기술지원사업

(계속사업)

□ 개    요

<원도심지구>

◦ 위    치 : 남원시 동충동ㆍ죽항동ㆍ금동 일원(원도심 일원)

◦ 총사업비 : 831백만원(국비 498, 도비 83, 시비 250)

◦ 사업기간 : 2022. ~ 2023.

◦ 사업내용 : 스마트가로등, CCTV, 심장제세동기, 공공 Wifi 설치 등

<터미널지구>

◦ 위    치 : 남원시 동충동ㆍ죽항동 일원(공용버스터미널 일원)

◦ 총사업비 : 834백만원(국비 500, 도비 83, 시비 251)

◦ 사업기간 : 2023. 01. ~ 12.

◦ 사업내용 : 공영주차장 빈자리 알림, 버스 진출입 및 차량 우회전 위험 알림 서비스

□ 추진실적

<원도심지구>

◦ 국토교통부 공모사업 선정                       : ‘21. 12. 30.

◦ 실시설계용역 추진                              : ‘22. 04. ~ 12.

◦ 보안성검토 및 S/W사업 과업심의                 : ‘22. 08. ~ 11.

◦ 협상에 의한 계약 절차 이행                     : ‘23. 02. ~ 04.

◦ 사업 착수                                      : ‘23. 05. 02.

<터미널지구>

◦ 국토교통부 공모사업 선정                       : ‘22. 12. 29.

◦ 실시설계용역 착수                              : ‘23. 04. 21.

□ 금후계획

<원도심지구>

◦ 사업완료	: ‘23. 10.

<터미널지구>

◦ 보안성검토 및 S/W과업 심의 등 행정절차 이행	: ‘23. 07. ~ 08.

◦ 사업 추진	: ‘23. 09. ~ 12.

◦ 사업자 선정을 위한 절차 이행	: ‘22. 10. ~ 11.

◦ 사업 착수 및 추진	: ‘23. 12. ~ ‘24. 02.

◦ 시범운영 및 시스템 안정화	: ‘24. 03.

터미널지구 도시재생 뉴딜사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충․죽항동 일원(시외버스터미널주변 A=14만㎡)

◦ 사업내용 : 이음센터․숲정이마을 공유마당․상생협력상가 조성,

골목길개선사업(포켓주차장,마을쉼터 등), 역량강화사업 등

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2023년 (5년)

◦ 사 업 비 : 14,722백만원(균특 8,500, 도비 1,416, 시비 4,806)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2022	2023	2024이후	비 고
계	14,722	11,370	3,352	0	0
균 특	8,500	6,490	2,010	0	0
도 비	1,416	1,081	335	0	0
시 비	4,806	3,799	1,007	0	0

□ 추진실적

◦ 골목길 개선사업 추진(바닥포장, 벽화, CCTV설치 등)	: ‘21. 01. ~ 12.

◦ 숲정이마을 공유마당 실시설계용역 착수	: ‘21. 12. 10.

◦ 상생협력상가 설계용역 착수	: ‘22. 01. 18.

◦ 남원 이음센터 조성사업 착공	: ‘22. 03. 02.

◦ 도시재생 뉴딜아카데미 (13회/31과목/282명 수료)	: ‘19. ~ 현재

◦ 주민공모사업 추진(21팀)	: ‘19. ~ 현재

◦ 도시재생 활성화계획 변경(기간 연장) 추진	: ‘23. 09. ~

□ 금후계획

◦ 활성화계획 변경 승인 및 고시	: ‘23. 08.

◦ 숲정이공유마당 조성사업 공사 추진	: ‘23. 11. ~

◦ 이음센터 준공	: ‘23. 11.

◦ 주민역량강화사업(뉴딜아카데미) 추진	: ~ ‘23. 12.

□ 남원 도시재생 뉴딜사업(터미널지구) 총괄사업계획표

사업명	사업내용	사업비 (백만원)	추진상황	비 고
계	6개 사업	14,722
골목길 경관개선	터미널 주변 골목길 개선 포켓주차장 마을쉼터	1,013	바닥포장 완료 벽화, CCTV·가로등설치 마을쉼터 및 포켓주차장 조성	사업 완료
숲정이마을 공유마당	마을쉼터 주민편의시설 커뮤니티공간 등 (연면적 2,199㎡,5층)	2,899	철거공사 완료 설계공모 완료 실시설계용역 추진	설계중 공정율:80%
남원이음센터	마을카페 교통회관 사회적생산품판매장 공영주차장 등 (연면적 : 1,914㎡,3층)	7,985	설계완료 공사 진행 중	공사추진중 공정율:80%
상생협력 상가	청년 및 소상공인 경제활동공간 조성 (연면적 277㎡, 2층)	1,175	구조안전진단 (E등급, 구조불안정) 건축물 철거 완료 설계추진	설계중 공정율:90%
도시재생 기반구축	마을활동가 육성 주민공모사업 주민역량강화 모니터링	850	도시재생뉴딜아카데미운영 (상반기 4과목 33명수료)	하반기 뉴딜아카데미 운영중
도시재생 지원센터 운영	현장지원센터 운영 (센터장 및 팀원 인건비 등)	800	현장지원센터 운영 (2019. 12. ~ 현재)	인건비 및 센터 운영비

도시재생 인정사업(구.미도탕)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 금동 22-1번지

◦ 사업면적 : 대지면적 886㎡ / 연면적 834㎡(지상4층)

◦ 사업내용 : 주민을 위한 문화·예술·상업·체험 복합 공간 조성

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 (4년)

◦ 사 업 비 : 4,389백만원 (국비 2,633, 도비 439, 시비 1,317)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2022	2023	2024이후	비 고
계	4,389	1,193	867	2,329	0
균 특	2,633	400	520	1,713	-
도 비	439	67	87	285	-
시 비	1,317	726	260	331	-

□ 추진실적

◦ 도시재생 인정사업 공모 선정	: ‘20. 12. 21.

◦ 문화저장 도시재생대학(6회, 31과목, 228명 수료)	: ‘21. ~ 현재

- ‘23년 : 6기(5과목, 42명수료). 7기(3과목 47명 진행중)

◦ 주민공모사업 추진(5팀)	: ‘21. ~ 22.

◦ 구)미도탕 문화저장소 리뉴얼 실시설계용역	: ‘21. 12. ~ ‘22. 12.

◦ 문화저장소 주민한마당 행사	: ‘22. 10. 28. ~ 30.

◦ 구)미도탕 문화저장소 리뉴얼사업(소방, 통신) 발주	: ‘22. 12.

◦ 구)미도탕 문화저장소 리뉴얼사업(건축, 전기) 발주	: ‘23. 01.

□ 금후계획

◦ 문화저장소 리뉴얼 사업(H/W) 추진	: ~ ‘24. 06.

◦ 주민역량강화사업(S/W) 추진	: ~ ‘24. 12.

- 문화저장 도시재생대학, 주민한마당 등

도시재생 지원센터 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 운영기간 : 2016년 ~ 도시재생사업 종료 시

◦ 운영예산 : 360백만원 (인건비, 일반운영비 등)

◦ 직원현황 : 총7명(기초지원센터장 1명, 팀장 2명, 팀원 4)

◦ 담당업무 : 주민역량강화사업, 거버넌스(주민협의체 등) 운영관리, 사업홍보 등

□ 추진실적

◦ 도시재생대학 운영: 10과목 98명 수료

- 인정사업(5과목 42명), 터미널지구(5과목 33명)

◦ 주민공모사업 추진 : 21년/19팀, 22년/10팀

◦ 선진지견학 방문(타 지자체⟹남원시) : 1회(3명)

- 대구 북성로 도시재생현장지원센터 및 주민협의체 등

- 활동가 운영사항 및 개선사항 의견 교류, 숲정이현장센터 답사

◦ 터미널지구 22년 상반기 도시재생뉴딜아카데미 성과공유회 추진

◦ 주민 간담회 : 3개지구 주민협의체, 나우원 입주자 등 (28회, 392명참석)

□ 금후계획

◦ 주민역량강화 사업 추진 : 사회적경제조직육성교육 등(8월~11월)

◦ 도시재생 거버넌스 운영관리(주민간담회), 전담인력워크숍(월 1회) 지속 시행

◦ 도시재생대학 운영(11과목, 수강140)               : ~ `23. 12.

- 인정사업(5과목 70명), 터미널지구(4과목 45명), 금동지구(1과목, 10명), 동문밖지구(1과목 15명)

◦ 도시재생사업 관련 계획 수립 및 변경 지원

◦ 도시재생 거점시설 운영 지원

- 사랑나눔어울림센터, 커먼스페이스, 청년창업공간(나우원)

◦ 도시재생사업 홍보 및 운영

도시재생 거점시설 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 운영기간 : 2022. 01. ~

◦ 사 업 비 : 40백만원(운영 및 유지관리비)

◦ 거점시설

시 설 명	위 치	면적	비고
커먼스페이스	하정동 59-1번지(빨간벽돌)	대지 506㎡ 연면적 197.6㎡	준공(`20)
사랑나눔어울림센터	동충동 208-1번지 일원(구.북부시장)	대지 2,160㎡ 연면적 925㎡	준공(`22)
창업공간	하정동 56-1번지(한옥군)	대지 328㎡ 연면적 94.5㎡	준공(`21)
	하정동 53-1번지(구.부채박물관)	대지 212㎡ 연면적 241.7㎡	준공(`21)

□ 추진실적

◦ 커먼스페이스 및 청년창업공간 입주 및 운영	: ‘22. 01.

입주공간	상호(대표)	사업아이템	비고
창업공간	고샅(오종하)	카페(제철특산물 활용)
	추냔이네(김민화)	남원 굿즈 편집샵
	(주)도킹씨네마떼끄(김형준)	영화 및 문화 체험공간조성
커먼스페이스	Red Bricks Studio(최한범)	음악과 영상기반 콘텐츠 제작 및 교육

◦ 사랑나눔어울림센터 조성사업 준공	: ‘22. 02. 14.

◦ 나우원(NOWWON) 페스티벌 개최(3회)	: ‘22. 04. ~ 10.

※ NOWWON[(주)도킹씨네마떼끄 외 3팀] 자체 행사 추진

◦ 제7회 도시재창조한마당 우수사례 경진대회(우수상)	: ‘22. 09. 02.

◦ 나우원(NOWWON) 협동조합 설립 추진 완료	: ‘23. 01. ~ 08.

◦ 전북형 청년마을만들기 지원사업 선정 및 추진	: ‘23. 05. ~ 12.

□ 금후계획

◦ 나우원(NOWWON) 페스티벌 개최(일자리경제과 협업)	: ‘23. 09. 15. ~ 17.