2023. 9.

2023년 주요업무 추진실적

환경사업소

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2023년 주 요 업 무  결산

□ 2023년 주요업무 추진실적

◦ 운봉지구 하수관로 정비사업

◦ 남원 농어촌마을하수도 정비사업

◦ 사매 대율지구 하수관로 정비사업

◦ 수지 용강지구 하수관로 정비사업

◦ 남원(3단계) 하수관로 정비사업

◦ 남원처리구역 하수관로 정비사업

◦ 아영 인풍지구 하수관로 정비사업

◦ 산내지구 하수관로 정비사업

◦ 남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업

◦ 남원하수처리장 운영 및 시설개선

◦ 스마트 남원하수처리장 사업

◦ 공공하수도시설 관리대행 사업

◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업

◦ 소규모 마을하수도 및 중계펌프시설 보강사업

◦ 요천생태습지공원 운영·관리

일  반  현  황

□ 기    구

			환경사업소장
			황 도 연
하수경영담당			하수시설담당			하수처리담당
유 홍 규			김 덕 곤			노 치 호
∘행정 종합계획 수립 ∘ 공기업특별회계 운영·관리 (임찰, 계약, 지출, 결산, 예산 등) ∘공공시설물 관리 ∘ 하수도요금 부과징수 및 현실화 ∘하수도 경영평가 및 실태점검 ∘요천생태습지공원 관리 ∘물재이용시설 관리			∘하수도정비 기본계획 수립 ∘하수관로 정비사업 추진 (3단계, 남원처리구역외 5곳 등) ∘하수중계펌프장 관리 ∘ 하수도 유지관리 및 긴급보수 ∘ 배수설비 설치 신고 및 관리 ∘ 하수도 원인자부담금 부과·징수 ∘ 하수관로 GIS DB 구축 및 관망도 정비			∘하수처리 종합계획 수립 ∘ 남원하수 ․ 분뇨 ․ 음식물처리시설 운영 ∘ 슬러지처리시설 관리대행 감독 ∘ 운봉 ․ 인월 ․ 소규모하수처리장 관리대행 감독 ∘ 소규모마을하수시설 개량사업 ∘ 하수처리장 기술진단 및 악취기술진단 ∘ 하수처리장 구조물, 전기설비 정밀진단 ∘ 남원 ․ 운봉 ․ 인월하수처리장 수질TMS 관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	21	1	3	6	7	4	청 경 1 환경관리원 3 공 무 직 5
현 원	19	1	7	5	5	1	청 경 1 환경관리원 3 공 무 직 5
증 감	△2	-	4	△1	△2	△3

2023년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 지속적 하수관로 정비사업으로 사회기반 인프라 확충 및 국가예산 확보 ◦ 효율·경제적인 하수처리를 위한 공공하수처리시설 관리대행 추진 ◦ 악취 기술진단을 통한 원인 분석 및 방지시설 설치로 쾌적한 근무환경 조성 ◦ 하수처리 노후시설물 개선을 통한 안정적 방류수질 확보 ◦ 효율적 하수도 특별회계 운영 및 요천생태습지 공원 관리

□ 하수도 인프라 확충 및 국가예산 확보

◦ 지속적인 하수관로 사업 추진으로 하수도 보급률 향상(92.3%)

정비사업 대상	사업량	대상가구	사업비(백만원)	공정률	비고
합 계	121.9km	4,282	121,289
운봉지구 하수관로	9.4km	290	8,700	설계용역	신규
농어촌마을 하수관로	7.1km	-	6,300	설계용역	신규
대율지구 하수관로	2.1km	105	3,000	설계용역	신규
용강지구 하수관로	1.4km	109	2,400	설계용역	신규
남원[3단계] 하수관로	40.4km	2,314	37,818	100%
남원처리구역 하수관로	27.0km	664	27,253	3.7%
아영 인풍지구 하수관로	20.5km	473	19,556	4.3%
산내지구 하수관로	7.3km	228	8,527	83.2%
남원일반산업단지 주변마을	6.7km	99	7,735	66.3%

◦ 체계적인 하수관로 정비를 위한 하수도정비 기본계획 변경 수립용역 착수

◦ 하수관로 정비사업 23년 준공 완료 (3단계)	: 1개소/ 37,818백만원

◦ 하수관로 정비사업 계속 추진	: 4개소/ 63,071백만원

◦ 하수관로 정비사업 국·도비 확보	: 4개소/ 20,400백만원

□ 하수처리 전문성 확보를 위한 공공하수처리 관리대행 추진

◦ 안정적인 방류수질 확보 및 전문성을 갖춘 민간업체 관리대행 추진

- 공공하수·분뇨·음식물처리시설 시설물 관리

◦ 소규모마을하수처리시설, 슬러지처리시설 민간 관리대행을 통한 전문성 확보

- 전문인력 배치 및 시설 운영·관리(하수처리장 64, 중계펌프장 75, 슬러지처리시설 1)

□ 악취 원인 분석 및 근무환경 개선

◦ 음식물류폐기물처리시설 악취저감시설 점검 추진 : 3~4월/ 17백만원

- 악취저감시설 내 필터, 안개분무장치, 약품공급배관 보수

◦ 남원하수처리장 현장근무자 편의시설 공사	: 2~6월/ 110백만원

- 화장실, 샤워실, 찜질방, 휴게실 설치

□ 하수처리 노후시설물 개선을 통한 수질 환경 보전

◦ 하수처리시설 운영 기술진단 : 11개소(남원·소규모하수·분뇨처리장)/ 250백만원

◦ 노후 하수처리 시설물 정비 추진 : 42건/ 110백만원

- 노후 시설물 정비를 통한 시설물 수명 연장 및 관리비용 절감

◦ 하수슬러지 처리시설 공법변경(탄화￫가열)으로 유기성 고형연료 발열량 향상

◦ 실시간 수질원격감시제어 시스템(TMS) 운영 : 3개소(남원, 운봉, 인월)

◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업 추진으로 안정적 수질관리

- 주천면 내기 하수처리장 전면 개량 : 30㎥/일, 600백만원

□ 효율적 하수도 특별회계 운영 및 요천생태습지 공원 관리

◦ 하수도 재원확보를 통한 공기업특별회계 운영	: 31,622백만원

◦ 하수도요금 인상으로 재정 현실화 추진 및 세입 확충	:  4,114백만원

◦‘23 지방공기업 신속집행 목표율 초과달성 : 집행률 66.45%(목표 56.5%)

- 전북 하수도공기업 신속집행 순위 : 남원 > 익산 > 김제 > 군산 > 정읍 > 전주 > 완주

◦ 요천생태습지공원 시설물 보강 및 정비로 시민 휴식 공간 제공

- 방문객 수 : 30,993명(공원 22,367명, 애견놀이터 8,626명) *‘22년 기준

- 애견놀이터 편의시설 및 놀이용품 구입 비치(원반 등 3종)

2023년 주요업무 추진실적

운봉지구 하수관로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 운봉지구 (엄계, 삼산, 행정, 산덕, 유평, 용은, 가장, 덕산, 공안, 수월, 군화, 화신, 학생교육원 등)

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

◦ 총사업비 : 8,700백만원(국비 5,220 / 도비 1,740 / 시비 1,740)

- ‘23년 사업비 : 400백만원(국비 240 / 도비 80 / 시비 80)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=9.4km, 배수설비 290여가구

□ 추진실적

◦ 하수도 정비 기본 계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 비전 하수처리구역 기본계획 부분 변경	: `21. 2.

◦ 신규사업 신청	: ‘22. 3. 11.

◦ 하수관로 정비사업 가내시 통보	: ‘22. 9. 21.

◦ 사업능력평가 시행	: ‘23. 2. ~ 5.

◦ 기본 및 실시설계 착수	: ‘23. 5. 26.

◦ 공공 측량 작업실시	: ‘23. 7. ~ 12.

□ 금후계획

◦ 행정절차 이행	: ‘23. 7. ~ ‘24. 2.      - 설계 경제성 검토(VE), 설계 안정성 검토, 건설기술 심의 등

◦ 기본 및 실시설계 준공	: ‘24. 3

◦ 환경부 재원 협의	: ‘24. 3. ~ 4.

◦ 사전 협의 진행 [각종점용(도로, 하천등) 허가 등]	: ‘24. 4.

◦ 공사 시행	: ‘24. 4.~ ‘26. 12.

남원 농어촌마을하수도 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주천(내기), 보절(진목‧양촌), 산동(부절‧중절), 산내(대정‧백일)

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

◦ 총사업비 : 6,300백만원(국비 3,780 / 도비 1,260 / 시비 1,260)

- ‘23년 사업비 : 250백만원(국비 150 / 도비 50 / 시비 50)

◦ 사업내용 : 하수관로 개량 L=7.1km

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 하수관로 기술진단(주천면 내기외 6개마을)	: ‘21. 9.~ ‘22. 2.

◦ 신규사업 신청	: ‘22. 3. 11.

◦ 하수관로 정비사업 가내시 통보	: ‘22. 9. 21.

◦ 사업능력평가 시행	: ‘23. 2. ~ 5.

◦ 기본 및 실시설계 착수	: ‘23. 5. 26.

◦ 공공 측량 작업실시	: ‘23. 7. ~ 12.

□ 금후계획

◦ 행정절차 이행(설계자문, 설계 안정성 검토 등)	: ‘23. 7. ~ ‘24. 2.

◦ 기본 및 실시설계 준공	: ‘24. 3.

◦ 환경부 재원 협의	: ‘24. 3. ~ 4.

◦ 사전 협의 진행(도로, 하천 점용허가 등)	: ‘24. 4.

◦ 공사 시행	: ‘24. 4. ~ ‘26. 12.

사매 대율지구 마을하수도 설치사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 사매면(대율ㆍ화정) 일원

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

◦ 총사업비 : 3,000백만원(도비 1,800, 시비 1,200)

- ‘23년 사업비 : 1,400백만원(도비 840 / 시비 560)

◦ 사업내용 : 하수처리시설 Q=40㎥/일, 하수관로 L=2.03km, 배수설비 105가구

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 지방소멸대응기금 투자사업 신청	: ‘22. 6. 25.

◦ 지방소멸대응기금 투자사업 선정	: ‘22. 9. 22.

◦ 계약심의 위원회	: ‘22. 11. 2.

◦ 사업능력평가 시행	: ‘23. 2. ~ 5.

◦ 기본 및 실시설계 착수	: ‘23. 5. 26.

◦ 공공 측량 작업실시	: ‘23. 7. ~ 12.

□ 금후계획

◦ 행정절차 이행(토지보상, 용도변경, 설계자문, 안정성 검토 등) : ‘23. 7. ~ ‘24. 2.

◦ 기본 및 실시설계 준공	: ‘24. 3.

◦ 전라북도청 재원 협의	: ‘24. 3. ~ 4.

◦ 사전 협의 진행(도로, 하천 점용허가 등)	: ‘24. 4.

◦ 공사 시행	: ‘24. 4. ~ ‘24. 12.

수지 용강지구 마을하수도 설치사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 수지면(용강ㆍ남창) 일원

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

◦ 총사업비 : 2,400백만원(도비 1,440 / 시비 960)

- ‘23년 사업비 : 1,100백만원(도비 660 / 시비 440)

◦ 사업내용 : 하수처리시설 Q=40㎥/일, 하수관로 L=1.35㎞, 배수설비 109가구

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 지방소멸대응기금 투자사업 신청	: ‘22. 6. 25.

◦ 지방소멸대응기금 투자사업 선정	: ‘22. 9. 22.

◦ 계약심의 위원회	: ‘22. 11. 2.

◦ 사업능력평가 시행	: ‘23. 2. ~ 5.

◦ 기본 및 실시설계 착수	: ‘23. 5. 26.

◦ 공공 측량 작업실시	: ‘23. 7. ~ 12

□ 금후계획

◦ 행정절차 이행(토지보상, 용도변경, 설계자문, 안정성 검토 등) : ‘23. 8. ~ ‘24. 2.

◦ 기본 및 실시설계 준공	: ‘24. 3.

◦ 전라북도청 재원 협의	: ‘24. 3. ~ 4.

◦ 사전 협의 진행(도로, 하천 점용허가 등)	: ‘24. 4.

◦ 공사 시행	: ‘24. 4.~ ‘24. 12.

남원(3단계) 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원처리구역 및 운봉처리구역

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2023년

◦ 총사업비 : 37,818백만원(국비 22,128 / 시비 15,668 / 기금 22)

-  ‘23년 사업비 : 4,949백만원(국비 2,896 / 시비 2,031 / 기금 22)

◦ 사업내용

- 남원처리구역 : 하수관로 L=37.8㎞, 배수설비 1,963가구

- 운봉처리구역 : 하수관로 L=0.9㎞, 비굴착보수(전체:1.7km, 부분:351개소)

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: ‘17. 11.~ ‘19. 3.

◦ 공사 시행(1~3차분)	: ‘20. 2.~ ‘23. 4.

◦ 공사 착공(4차분)	: ‘23. 4.

◦ 설계 변경(4차분)	: ‘23. 4.

- 사업량 : 하수관로 L=38.7km(∆1.2㎞), 배수설비 1,963가구(∆12가구)

◦ 공사 준공(4차분)	: ‘23. 8. 16

□ 금후계획

◦ 사업완료 현장 점검(전라북도)	: ‘23. 10.

남원처리구역 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주천(용담‧안곡), 주생(부동․중동․상동․대지․소지․제천․서만), 송동(태동), 대산(서원초), 산동(목동), 신촌, 왕정(화정․한우물), 광치(광석)

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2025년

◦ 총사업비 : 27,253백만원(국비 19,079 / 시비 8,174)

- ‘23년 사업비 : 2,945백만원(국비 2,062 / 시비 883)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=27.0㎞, 배수설비 664가구

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 착수	: ‘20. 6.

◦ 남원시 배수구역 및 하수처리구역 변경 공고	: ‘22. 1. 25.

◦ 환경부 재원 협의	: ‘22. 3. ~ 4.

◦ 실시설계 경제성 검토(VE) 용역 시행	: ‘22. 5. ~ 6.

◦ 지방건설기술심의(전라북도)	: ‘22. 9. 27.

◦ 공사 시행	: ‘23. 3. 6.

- 공정율(전체공정의 3.7%) : 하수관로 L=1.05km

□ 금후계획

◦ 공사 준공	: ‘25. 8.

- 잔여공정 : 하수관로 L=25.95km, 배수설비 664가구

아영 인풍지구 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면(봉대ㆍ외인ㆍ내인ㆍ매산ㆍ서갈ㆍ동갈), 인월면(덕실ㆍ연실ㆍ자래ㆍ외건ㆍ내건ㆍ지산ㆍ흥부놀부촌ㆍ흥부골)

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2025년

◦ 총사업비 : 19,556백만원(국비 12,585 / 시비 6,914 / 기금 57)

- ‘23년 사업비 : 813백만원(국비 569 / 시비 187 / 기금 57)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=20.5㎞, 배수설비 473가구

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 착수	: ‘20. 6.

◦ 배수구역 및 하수처리구역 변경 공고	: ‘22. 1. 25.

◦ 환경부 재원 협의	: ‘22. 3. ~ 4.

◦ 실시설계 경제성 검토(VE) 용역 시행	: ‘22. 5. ~ 6.

◦ 지방건설기술심의(전라북도)	: ‘22. 9. 27.

◦ 공사 시행	: ‘23. 1. 16.

- 공정율(전체공정의 4.3%) : 하수관로 L=1.17km

□ 금후계획

◦ 공사 준공	: ‘25. 8.

- 잔여공정 : 하수관로 L=19.33km, 배수설비 473가구

산내지구 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산내면 일원(상황 ‧ 중황, 하황, 중기, 삼화)

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2023년

◦ 총사업비 : 8,527백만원(국비 5,506 / 시비 2,359 / 기금 662)

- ‘23년 사업비 : 3,110백만원(국비 1,714 / 시비 1,246 / 기금 150)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=7.3㎞, 배수설비 228가구

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 착수	: ‘20. 6.

◦ 환경부 재원 협의	: ‘22. 3. ~ 4.

◦ 공사 착공	: ‘22. 5. 9.

- 대정처리장 공법변경에 따른 시비 증액(662백만원)

- 잔여 예산 활용에 따른 사업량 증가(L=0.4km)

- 공정율(전체공정의 83.2%) : 하수관로 L=7.3㎞, 배수설비 46가구

□ 금후계획

◦ 공사 준공	: ‘23. 12.

- 잔여공정 : 배수설비 182가구

남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 사매면 일원(손율, 수월, 덕평)

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2024년

◦ 총사업비 : 7,735백만원(국비 3,518 / 시비 4,217)

- ‘23년 사업비 : 868백만원(국비 608 / 시비 260)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=6.7㎞, 배수설비 99가구

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 착수	: ‘20. 6.

◦ 환경부 재원 협의	: ‘22. 3. ~ 4.

◦ 공사 착공	: ‘22. 5. 9.

- 공정율(전체공정의 66.3%) : 하수관로 L=3.6㎞

□ 쟁점 및 대책

◦ 사매 인화마을 주민들의 지속적인 요청에 따라 해당마을을 포함하여 남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업을 추진하고자 함

- 환경청과 협의를 통해 국고보조금 추가 확보 노력

□ 금후계획

◦ 공사 준공	: ‘24. 6.

- 잔여공정 : 하수관로 L=1.9㎞, 배수설비 99가구

남원하수처리장 운영 및 시설개선

(계속사업)

□ 개    요

◦ 시설현황

(단위 : ㎥/일)

구 분	하수	분뇨	음식물	하수슬러지	비 고
설치년도	1995년	1982년	2017년	2011년
처리공법	Symbio	B3	혐기성소화	건조
시설용량	50,000	50	20	30
처 리 량	29,810	17	18	30

※ 처리방식 : 생활하수, 분뇨 및 음식물류폐기물, 매립장 침출수 병합처리

□ 추진실적

◦ 철저한 수질관리로 방류수질기준 준수

(단위 : ㎥/일)

항목 구분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수	비고
유입수	181.8	78.2	134.9	43.270	6.419	241,274
방류수 / 기준	1.9 / 5	8.2 / 15	5.3 / 10	16.645 / 20	0.133 / 0.3	9 / 1,000

◦ 처리시설 점검(매주)‧정비(상시)로 안정적인 처리시설 운영

◦ 공공하수처리시설(남원·운봉·인월) 수질 TMS 관리용역 : ‘23. 2.~ ‘24. 1.

◦ 공공하수 및 분뇨처리시설 기술진단(96백만원)	: ‘23. 1. ~ 4.

◦ 수질관리를 위한 노후 처리시설 보강공사(110백만원)   : ‘23. 1. ~ 5.

◦ 남원하수처리장 정밀안전점검 용역	: ‘23. 2. ~ 4.

◦ 음식물처리시설 내 악취저감시설(안개분무장치) 보수공사    : ‘23. 3. 10.

◦ 분뇨처리시설 협잡물처리기 설치(330백만원)	: ‘23. 4. 17.

◦ 유입동 노후건물 정비사업(450백만원)	: ‘23. 5. 23.

◦ 남원하수처리장 전기설비 정기검사	: ‘23. 6. 24.

□ 금후계획

◦ 연중 24시간 방류수질 실시간 모니터링 시스템 가동(TMS)

◦ 남원하수처리장(시특법 대상시설) 하반기 정기안전점검	: ‘23. 9. ~ 10.

스마트 남원하수처리장 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 요천로 1036-207(남원하수처리장)

◦ 총사업비 : 4,074백만원(국비 2,037 / 도비 1,018 / 시비 1,019)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

◦ 사업내용  스마트시스템 도입으로 운영비 절감 및 안정적 방류수질 확보

- 하수처리공정 지능화 솔루션 구축, 송풍기 에너지 절약을 위한 소프트웨어 적용

- 실시간 계측장비 구축을 통한 신뢰도 높은 데이터 생산

- 지능형 제어를 위한 처리시설 기능보강

□ 추진실적

◦ 실시설계 용역 착수	: ‘21. 12.

◦ 스마트 하수처리장 벤치마킹 2회 실시(김제, 여주)	: ‘22. 2. ~ 3.

◦ 남원하수처리장 공정별 시설보강 항목조사	: ‘22. 4. ~ 7.

◦ 환경부 재원협의 신청 및 보완	: ‘22. 8.~ ‘23. 4.

◦ 사업자 선정방안(협상에 의한 계약) 검토보고	: ‘22. 9. 30.

◦ 계약심의위원회 심의	: ‘22. 11. 2.

◦ 스마트하수처리장사업 추진 관련 출장(정읍시)	: ‘23. 3. 23.

◦ 환경부 스마트하수처리장 협의체 회의	: ‘23. 4. 19.

◦ 원가심사(전라북도)	: ‘23. 5. 2.

□ 금후계획

◦ 공고 및 사업자 선정	: ‘23. 8. ~ 10.

◦ 평가위원 모집 및 구성	: ‘23. 9. ~ 10.

◦ 계약 체결 및 사업 시행	: ‘23. 10.~ ‘24. 12.

공공하수도시설 관리대행 사업

(계속사업)

□ 개    요

구 분	공공하수처리시설	하수슬러지처리시설	비 고
위 탁 비	1,804백만원	2,285백만원
위 탁 기 간	2023년 ~ 2027년(5년)	2020년 ~ 2024년(5년)	5년 이내 갱신가능
위 탁 시 설	마을하수 64개소, 중계펌프장 75개소	1개소
관리대행사	(유)일토씨엔엠(70%), ㈜에코비트워터(30%)	(유)일토씨엔엠(51%), ㈜에코비트워터(49%)
관 리 인 원	16명	10명

□ 추진실적

[공공하수처리시설]

◦ 소규모 마을하수처리시설 점검 및 정비	: ‘23. 1. ~ 5.

- 방류수질 5개항목(TN, TP, SS, TOC, 대장균) 자체점검(매주)

- 전기설비, 기계설비 점검 및 정비(64개소)

◦ 공공하수도시설 관리대행 성과평가 실시	: ‘23. 2. ~ 3.

◦ 운봉·인월 공공하수처리시설 시설물 상반기 안전점검	: ‘23. 3. ~ 4.

◦ 소규모 마을하수처리시설 기술진단(9개소)	: ‘23. 3. ~ 6.

- 반송, 제천, 송내, 태평, 하신, 옹정, 입암, 사석, 평촌

[하수슬러지처리시설]

◦ 남원 하수슬러지 처리시설 시설물 교체 완료	: ‘23. 1. ~ 4.

- R.T.O.로터씰 및 감속기, 열풍건조기 등 교체·정비

◦ 남원 하수슬러지 처리시설 상반기 대보수 완료	: ‘23. 3. 22.

- 기계실, 전기실 시설 개선공사(가열시설 변경 등)

□ 금후계획

[공공하수처리시설]

◦ 운봉·인월 공공하수처리시설 시설물 하반기 안전점검	: ‘23. 9. ~ 10.

◦ 악취 진단 실시(운봉, 인월, 원천, 율천)	: ‘23. 9. ~ 10.

[하수슬러지처리시설]

◦ 시설물 교체·정비 (사업비 : 108백만원)              : ‘23. 9. ~ 12.

- R.T.O.축열제, 백필터 등 교체

◦ 사용시설(가스) 안전검사 실시	: ‘23. 9.

소규모 마을하수처리시설 개량사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 대    상 : 2개소 (보절 양촌, 주천 내기)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2024

◦ 총사업비 : 3,520백만원 (국비 1,054 / 시비 2,466)

※ 2023년 사업비 : 1,470백만원(양촌 870 / 내기 600)

◦ 사업내용

- (양촌) 처리장 통합(진목,양촌) 개량 Q=50㎥/일, 하수관로 신설 L=1.6km

- (내기) 처리장 개량 Q=30㎥/일

□ 추진실적

◦ 하수처리 공법선정 완료(T-SBR)	: ‘22. 5. 12.

◦ 전라북도 설치인가 및 재원협의 완료	: ‘22. 12. 29.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: ‘22. 12. 30.

◦ 도로 굴착심의 완료(양촌)                            : ‘23. 2. 21.

◦ 주천 내기 개량사업 시행 (토목,건축,기계,시운전)        : ‘23. 4. ~

- 임시 오수처리시설 설치 및 운영, 부대설비공사 완료

◦ 양촌 개량사업 관련 마을주민 의견조율 및 환경청 자문     : ‘23. 2. ~ 7.

: (주민) 처리장 위치변경 시 통합처리 찬성 / (환경청) 위치변경 가능

□ 쟁점 및 대책

◦ 양촌 마을하수처리장 위치변경 검토 및 주민재협의 진행

- 주민협의 및 위치확정하고 금년 내 통합 개량사업으로 추진하겠음

□ 금후계획

◦ 양촌 하수처리장 실시설계 진행 및 재원협의           : ‘23. 8. ~ 9.

◦ 주천 내기 개량사업 완료 (토목,건축,기계,시운전)       : ‘24. 4.

- 소규모 공공하수처리시설 및 중계펌프장 -

마을 하수도시설 보강사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 시설현황 : 139개소 (공공하수처리시설 64, 중계펌프장 75)

◦ 사업기간 : 2023년도

◦ 사 업 비 : 980백만원(시비)

◦ 사업내용 : 소규모 공공하수처리시설 및 중계펌프장 등 효율적인 수질관리 및 환경개선을 위해 처리장 보강, 처리시설(스크린 및 여과기, 모터제어반 및 자동제어설비(PLC)교체 등) 유지보강

□ 추진실적

◦ 하수처리장 침수보강공사(하신마을)	: ‘23. 4. 7.

◦ 운봉, 인월하수처리장 상반기 정기 안전점검	: ‘23. 4. 7.

◦ 자동제어설비(PLC) (4개소) 및 모터제어반 실시설계 용역	: ‘23. 5. 12.

◦ 방류수 유량계 교체공사 완료(6개소)	: ‘23. 5. ~ 6.

◦ 소규모 마을하수처리시설 기술진단(9개소)	: ‘23. 6. 20.

- 주생2, 금지2, 대강2, 사매1, 산동1, 송동1 / 95,040천원

◦ 노후 스크린 철거공사(4개소)	: ‘23. 7. 24.

◦ 유량계 및 초음파센서 교체 등(평촌처리장 외 5개소)	: ‘23. 7. 26.

◦ 운봉·인월 하수처리장 방류 여과기 교체	: ‘23. 8. 17.

□ 금후계획

◦ 스크린 설치 및 배관공사(인월,용산,옹정,대정,동천)	: ‘23. 8.

◦ 자동제어설비(PLC) 및 모터제어반 설치공사	: ‘23. 9.

◦ 자외선 소독기(서도 외 5개소) 교체	: ‘23. 10.

◦ 중절 소규모 공공하수처리시설 기술진단(기본계획반영)	: ‘23. 10.

◦ 운봉, 인월하수처리장 하반기 정기 안전점검	: ‘23. 10.

요천생태습지공원 운영관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 중동리 1295번지 일원

◦ 공원규모 : 145,298㎡(공원부 75,562㎡ / 습지부 69,736㎡)

- 주요시설 : 야구장, 생태탐방로, 모정, 애견놀이터, 수생식물 등 관찰데크 등

◦ 관리인력 : 2명(환경관리원 1명, 시설관리원 1명)	*공공근로 (2명)

◦ 방문객 수 : 30,993명(공원 22,367명, 애견놀이터 8,626명)   *‘22년 기준

□ 추진실적

◦ 생태습지 및 애견놀이터 시설물 보수 및 정비

- 시설물 보수(화장실 지붕 ․ 음수대 ․ 제수변, 산책길재포장, 징검다리 등)

- 분수 및 모정, 개수대, 데크보수 및 습지부 수초제거(4,851㎡)

- CCTV녹화기 및 카메라 추가 구입 및 설치(4대)

- 생태습지공원 주차안내 등 알림현수막 보강

- 주변지역(중동마을 8명) 주민과 연계한 잡초제거 시행

◦ 생태습지공원 내 취사구간(3,000㎡) 운영관리

◦ 야구장 동호인 연중 리그전 개최 운영(2~10월)

◦ 지역행사 연계(별별커플달달시네마 (6/10), 남원시관광협의회)

□ 금후계획

◦ 파크골프장(18홀) 공사시행(교육체육과 추진) / 주차장 확장(교통과)

◦ 시설물 보수 및 예초 작업 등 요천생태습지공원 지속 정비

◦ 하수처리장과 연계한 생태환경학습장 운영 홍보 : 유치원, 초·중·고등학교 등