2024. 1.

2024년 주요업무 계획

상수도사업소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2023년 주요업무 결산

□ 2024년 중점 추진방향

□ 2024년 주요업무 계획

◦ 상수도 요금 인상 방안 계획수립용역

◦ 후속 노후 상수도 정비사업

◦ 아영 율동마을 광역상수도 공급사업

◦ 교룡공원, 숲속야영장 광역상수도 공급사업

◦ 농어촌 생활용수 개발사업

◦ 소규모 배수관로 포설사업

◦ 광역상수도 마을권 급수공사

◦ 소규모수도시설 정비사업

◦ 상수도 관망 DB 구축 사업

◦ 노후 상수관로 교체사업

◦ 타부서 병행 상수도 정비사업

◦ 누수다발지역 상수관로 정비사업

◦ 상수도 공기업의 안정적 재정 확충

일  반  현  황

□ 기    구

					상수도사업소장
					박 동 규
수도경영팀장					급수시설팀장						수도시설팀장
박 영 주					이 현 석						김 희 욱
∘상수도 공기업 경영 ∘특별회계 재정운영 ∘상수도 사용료 검침 및 요금부과 징수					∘광역상수도 마을권 급수 공사 ∘소규모수도 시설 관리 ∘개인 급수공사 ∘상수도 관망 유지 관리 ∘노후 급·배수관 교체 ∘노후 계량기 시설 개량 ∘누수관로 복구						∘월락정수장 개량사업 ∘광역상수도 수수사업 ∘정수장 및 배수지운영관리 ∘상수원 보호구역 관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	22	1	4	6	4	7
현 원	21	1	9	5	4	2	11 (청경2,공무9)
증 감	△1	-	5	△1		△5

□ 2024년 예산규모  : 28,345백만원

				＜2024 예산 >			(단위 : 백만원)
	구 분		2024년		2023년			증 감(%)
	합 계		28,345		22,814			5,531(24.24%)
	일반회계		804		1,040			△236(22.6%)
	특별회계		27,541		21,774			5,767(26.48%)

※ 일반회계 자본전출금(11,560백만원) 미포함

▷ 2024년 특별회계 : 27,541백만원

					＜세 입＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2024년		2023년			증 감(%)
	합 계			27,541		21,774			5,767(26.48%)
	자체수입			8,106		8,034			72(0.89%)
	의존수입		국 비	7,875		2,802			5,073(181%)
			지원금 (자본전출금)	11,560		10,938			622(5.68%)

					＜ 세 출 ＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2024년		2023년			증 감(%)
	합 계			27,541		21,774			5,767(26.48%)
	사업비		소계	20,491		15,080			5,411(35.88%)
			투자사업	19,841		14,676			5,165(35.19%)
			경상사업	329		404			△75(18.56%)
	비사업		소계	7,050		6,694			356(5.31%)
			행정운영	6,979		6,493			486(7.48%)
			예 비 비	71		201			△130(64.67%)

※ 행정운영 : 인건비 + 물건비 + 경상이전

□ 급수현황

(’23. 12. 13. 기준)

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	1인1일 급수량(ℓ)	평균생산량 (㎥/일)	유수율 (%)
76,884	73,247	95.3	376.5	27,926	74.7

□ 수도시설 현황

◦ 생 산 시 설 : 39,800㎥/일(월락정수장 15,000/광역상수도 24,800)

◦ 상수도 관로 : 1,142㎞(도수․송수․배수관 625, 급수관 517)

◦ 배  수  지 : 10개소(29,250㎥)

◦ 가  압  장 : 50개소

◦ 감  압  변 : 38개소

◦ 검침급수전 : 30,030전

□ 상수원 보호구역 현황

◦ 위    치 : 월락․도통․신촌․고죽동, 이백면

◦ 지정면적 : 414,525㎡

◦ 지 정 일 : 1985. 12. 24.(0.418㎢) → 2008. 12. 12.(0.415㎢)

□ 소규모 수도시설 현황

시설수 (개소)	규 모 별		급수인구	비 고
	마을상수도	소규모급수시설
52	16	36	3,637명 (1,914세대)	□마을상수도 - 20㎥/일 이상 500㎥/일 미만 - 100명 이상 2,500명 이내 급수인구 □소규모급수시설 - 20㎥/일 미만 - 100명 미만의 급수인구

□ 상수도 관로

(단위:km, ’23. 12. 13. 기준)

구분	총연장	재 질 별				매설연한별			비고
		금속	PE.PVC	내충격 수도관	기타	20년미만	20~29년	30년이상
계	1,142.1	226	186	721	9	939	110	93
도수관	0.1	-	-	-	0.1	0.1	-	-
송수관	15	10	2	3	-	12	2	1
배수관	610	210	-	393	7	507	93	10
급수관	517	6	184	325	2	420	15	82

2023년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축 ◦ 상수도체납요금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확충 ◦ 환경부 국고보조사업 후속 노후 상수도 정비사업(‵24.~ ‵29.) 선정 - 총사업비 : 444억원【국비(50%) 222, 지방비(50%) 222】 ※‘24년 예산 : 66억원【국(50%) 33 / 도(10%) 6 / 시(40%) 27】 ◦ 맑은 물 공급 및 유수율 증대를 위한 노후 상수관로 정비사업 추진 ◦ 농촌지역 광역상수도 공급을 위한 급수공사 추진 ◦ 지리산권 농어촌생활용수 개발사업 총사업비 증액 변경 - 당초 사업비 155억 ⇒ 변경 사업비 268억, 113억 증액

□ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축

◦ 체납금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확충 : 145백만원

◦ 급수지역 확대로 세입확충 도모 : 449백만원(328전)

□ 각종 상수도공사 조기 준공 및 민원 방지 대책 마련

◦ 지리산권역(인월, 아영, 산내) 농어촌생활용수 개발사업 조기 준공

- 체계적인 공정 관리 및 인원 투입으로 공기 단축 추진

- 상수도관 당일 매설 당일 복구로 굴착으로 인한 교통 불편 최소화

- 사전 주민설명회 개최로 공사로 인한 민원 발생 최소화

- 관광지인 산내 지역의 특성을 고려하여 성수기 공사를 지양하고     성수기 기간은 다른 지역(인월,아영) 공사 추진

◦ 배수관 포설 사업

- 주민설명회를 통해 공기 단축을 위한 주민 이해 당부

- 철저한 공정 계획으로 굴착 후 복구 포장 기간 최대 단축

□ 환경부 국고보조사업 후속 노후 상수도 정비사업(‵24.~‵29.) 선정

◦ 필 요 성 : 지방상수도 시설의 선진화를 통한 녹물, 이물질 등

수질개선과 유수율 제고 추진

◦ 총사업비 : 444억원 반영【국비(50%) 222, 지방비(50%) 222】

【‘24년 예산】: 66억원【국비(50%) 33 / 도비(10%) 6 / 시비(40%) 27】

◦ 사업기간 : 2024. ~ 2029년(6개년)

□ 맑은 물 공급 및 유수율 증대를 위한 노후 상수관로 정비사업 추진

◦ 노후 상수관 교체사업 추진(3개소, L=4.7㎞)

- 완료(2) : 금동지구(D200~16㎜, L=2.1㎞), 내척동 내척4교(D75~16㎜, L=14m)

- 추진(1) : 도통우체국~GS편의점 4가(D200~16㎜, L=2.6㎞) / 공정률 50%

◦ 누수다발지역 상수관 개선사업 완료(송동 송내사촌지구, D100~16㎜, L=6.4㎞)

◦ 타 부서 병행 상수도 정비사업 추진(2개소, L=3.7㎞)
- 완료(1) : 송동 태동(D100~16㎜, L=2.1㎞)
- 추진(1) : 노암 3통(D75~16㎜, L=1.6㎞) / 공정율 10%

□ 농촌지역 광역상수도 공급을 위한 급수공사 추진

◦ 2023년 4개 마을 광역상수도 공급 완료 (2023. 7. ~ 11.)

- 보절면 3개 마을 (금계, 섭골, 안평․용평), 주천면 1개 마을(안곡)

※ 마을별 수돗물 보급현황(전체분) : 384개 마을(보급완료 332, 미보급 52)

	아쉬운 점
◦ 광역상수도 배수관 매설로 급수 가능 지역으로 포함되었음에도 불구 하고 주민들의 상수도 낮은 신뢰성 및 요금 부담으로 인해 공급 기피 - 지속적으로 주민설득과 대표자 협의회 회의, 주민홍보를 실시하여 맑고 깨끗한 광역상수도 수돗물 공급에 최선을 다하고자 함

2024년 중점 추진방향

더 나은 상수도, 수돗물 신뢰 회복으로 거듭나겠습니다

	중 점 추 진 과 제
◦ 상수도 경영기반 강화 - 철저한 체납관리를 통한 안정적인 경영실적 개선 - 상수도 요금 인상(현실화)을 통한 재정 기반 확충 ◦ 지방상수도 시설 선진화 - 후속 노후 상수도 정비사업(‵24. ~ ‵29.) ※ 관망정비 L=20.2㎞, 블록시스템 및 유지관리시스템 구축 ◦ 유수율 제고 및 수질사고 예방 - 노후 상수관로 교체 및 누수다발지역 상수관 정비 - 타부서 병행 상수도 정비 ◦ 농촌지역 물복지 향상 - 광역상수도 공급을 위한 관로매설 및 계량기 설치 4개 마을 - 소규모 수도시설 개선 및 유지관리 ◦ 농촌지역 상수도 공급 확대를 위한 급수체계 개선

2024년 주요업무 계획

상수도 요금 인상 방안 계획수립용역

(신규사업)

작성부서 : 상수도사업소   부서장 : 박동규   팀장 : 박영주  담당자 : 양서경   전화 : 6862

□ 추진근거

◦ 지방공기업법 제22조, 같은법 시행령 제18조

◦ 수도법 제38조(공급규정), 제72조(수도요금 등의 납부)

◦ 남원시 상수도 급수조례 제24조(수도사용요금)

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 상수도 요금이 2010년 인상 이후 13년간 지속 동결되어 요금 현실화율 하락 및 재정건전성 악화

◦ 사업기간 : 2024. 1 ~ 3월

◦ 사 업 비 : 10백만원

◦ 사업내용 : 상수도 요금 인상 방안 계획 수립

□ 현    황

◦ 요금 현실화율 37.13% (22년 기준)으로 최저수준 (전북도내 13위)

- 상수도 톤당 요금(871원/㎥) 대비 톤당 원가(2,345원/㎥)의 지속적인 증가(2018년 1,904.07원 ⇨ 2022년 2,344.89원 / 연평균 5.34% 인상)

◦ 상수도 노후 시설 교체와 유수율 제고 등을 위한 지속적인 시설투자로 비용 증가

- 누수율은 17%로 전북 평균 21%보다 낮고, 전국 평균 10.2%보다 높음

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 수도 요금 산정방안을 전문기관에 용역 의뢰하여 정확한 자료 작성으로 시민의 이해 및 신뢰도 제고

◦ 급격한 요금 인상에 따른 주민 부담 완화를 위하여 단계적인 인상 방안 등 검토

□ 기대효과

◦ 급수수익 증대로 상수도 공기업 재정건전성 도모

◦ 시설투자를 위한 재원 확보로 양질의 상수도 서비스 제공

후속 노후 상수도 정비사업

(신규사업)

작성부서 : 상수도사업소   부서장 : 박동규   팀장 : 이현석   담당자 : 하현수   전화 : 6875

□ 추진근거

◦ 수도법 제21조(수도시설의 관리) 및 21조의 2(상수도관망의 관리)

◦ 환경부「지방상수도 현대화사업 업무처리지침」(2023. 11. 개정)

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 노후 배․급수관(주철관 등), 상수도 시설물로 인한 이물질 및 적수 유출 등 상수도 관련 문제 개선(유수율 제고)과 효율적인 지방상수도 공기업 운영 능력 향상

◦ 위    치 : 관내 급수구역(소규모수도시설 제외)

◦ 사업기간 : 2024. ~ 2029년(6개년)

◦ 사업규모 : 노후 관망정비(L=20.2㎞, GIS DB 구축 등), 블록․유지관리시스템 구축 등

◦ 총사업비 : 444억원【국비(50%) 222, 지방비(50%) 222】

- ‵24년 예산 : 66억원【국비(50%) 33 / 도비(10%) 6 / 시비(40%) 27】

□ 추진실적

◦ 국가예산 확보 건의 출장(환경부, 전북도, K-water)	: ‵22. 3. ~ ‵23. 9.

※ 총 17회 방문 (환경부 8회 / 전북도 7회 / K-water 2회)

◦ 총사업비 444억원 배정 통보(유선 / 환경부, 전북도)	: ‵23.  8. 14.

◦ 국가예산 가내시 통보	: ‵23. 10. 12.

➣ ‵24년 가내시 통보 : 66억원 / 국비 50%(33), 도비 10%(6), 시비 40%(27)

◦ 위․수탁 체결을 위한 선진지 벤치마킹(완주군, 순창군, 장수군, 김제시) 추진	: ‵23. 11. 27.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 본 사업은 목표 성과(유수율 85%) 달성 및 유지 등을 위한 복합적 공정의 공사임을 감안, 상수도 전문기술을 갖춘 인력이 필요하나, 우리시 전문기술이 부족하여 성과 미달성과 그에 따른 패널티 발생 우려

□ 상수도 전문기술(인력)을 갖춘 한국수자원공사에 위탁하여 성과 달성 및 패널티 부담감 해소

□ 기대효과

◦ 지방재정의 부족으로 인해 미루었던 지방상수도 시설을 선진화 및 개량 (정비)하여 유수율을 제고하고 그에 따른 국지적 물부족 사태 예방

◦ 복잡한 관망체계를 지역별 블록화를 통해 단순화하여 물공급 체계를 정비하고 효과적인 상수도관망 체계 구축

◦ 수용가가 밀집된 주요 시가지의 노후된 관로를 전면 개량하여 맑은물 공급 추진

아영 율동마을 광역상수도 공급사업

(신규사업)

작성부서 : 상수도사업소   부서장 : 박동규   팀장 : 이현석   담당자 : 은현귀   전화 : 6873

□ 추진근거

◦‘23년 지방 상․하수도 경영 효율화 공모사업 선정 및 수도법 제2조(책무), 39조(급수의무)

□ 개    요

◦ 사업목적 : 수원 고갈 현상과 수질오염 등으로 상수도 공급이 절실한 지역으로,

광역상수도 공급공사를 통해 안정적이고 깨끗한 생활용수 공급

◦ 위    치 : 아영면 율동마을(아영면 의지리 64번지 일원)

◦ 사 업 량 : 관로 매설(D75~16㎜, L=2.5㎞), 계량기 설치(47가구), 가압장 1식

◦ 사 업 비 : 738백만원(특별교부세 400, 시비 338)

◦ 사업기간 : 2023. 12. ~ 2024. 7. (8개월)

□ 추진실적

◦ 2023년 지방 상·하수도 경영효율화 사업 공모 신청  : `23.  8.  7.

◦ 공모 서류 및 발표(사업계획 등) 심사                : `23. 10. 13.

◦ 국비 확보(공모사업 선정)                           : `23. 10. 30.

◦ 사업비 결산추경 반영                              : `23. 11.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 가뭄 시 지하수 고갈 등 급수원의 문제가 되는 아영 율동마을에 대하여 조속한

시일내에 공사추진 필요

□ 조기 설계 및 사업 준공[‘24년 6월]을 통해 안정적인 광역상수도 공급

□ 기대효과

◦ 광역상수도 관로매설을 통해 안정적이고 깨끗한  수돗물 공급 및 농어촌 생활환경 개선

교룡공원, 숲속야영장 광역상수도 공급사업

(신규사업)

작성부서 : 상수도사업소   부서장 : 박동규   팀장 : 이현석   담담당자 : 은현귀   전화 : 6873

□ 추진근거

◦ 수도법 제2조(책무) 및 39조(급수의무)

□ 개    요

◦ 사업목적 : 지하수를 사용하는 교룡산성(숲속야영장 포함) 내 광역상수도

기반시설 지원 및 생활용수 공급으로 시민들의 건강 증진 및 시설물 방문객 유치 도모

◦ 위    치 : 산곡동 교룡공원(산곡동 251-25번지 일원)

◦ 사 업 량 : ┏ 광역상수도(내충격수도관, D100㎜) 매설 L=200m

┗ 가압장 ․ 물탱크 각 1개소 설치

◦ 사 업 비 : 300백만원(시비)

◦ 기    간 : 2023. 12. ~ 2024. 6.(7개월)

□ 추진실적

◦ 관련부서 사전 협의(인허가 등)                        : `23.  9. 1.

◦ 사업계획 검토보고                                   : `23.   9. 15.

◦ 사업비 2024년 예산 반영	: `23.  10.  1.

◦ 실시설계 용역 착수	: `23.  12. 13.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 성수기(여름철) 이전 숲속야영장 및 교룡공원 물놀이장 등 용수 공급 시급

□ 조기 설계 및 사업 준공을 통해 성수기 이전 상수도 공급 추진 및  방문객 편의 도모

□ 기대효과

◦ 광역상수도 공급공사를 통해 안정적이고 깨끗한 용수 공급 및 관광객 유치능력 향상

농어촌 생활용수 개발사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소  부서장 : 박동규  팀장 : 김희욱  담당자 : 김건중  전화 : 6882

□ 추진근거

◦ 추진법령 : 수도법 제5조(수도정비계획의 수립) 7항

- 수도 공급 구역에 관한 사항

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍, 주천면, 수지면, 덕과면, 산동면, 인월면, 아영면, 산내면 일원    ◦ 사업지구 : 8개 지구, 43개 마을 (’22년 : 5개 지구, 31개 마을)

- 농어촌생활용수 개발사업 35개마을, 자연방사성물질 검출지구 8개마을

◦ 사업내용 : 배수관로 L=56.36km, 마을 지선관 L=17.96km,

송수관로 L=12.1km, 배수지 1개소

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2025년 (8개년)

◦ 총사업비 : 36,685백만원 (국비 2,844, 도비 22,835, 시비 11,005)

- 기투자액 : 16,185백만원 (국비 5,644, 도비 5,686, 시비 4,855)

- ‘24년 사업비 : 5,485백만원 (도비 3,839, 시비 1,646)

- 이후 사업비 : 15,015백만원 (도비 10,511, 시비 4,504)

□ 추진실적

◦ `23년 추진 완료(아영 오산지구(성리, 구상리))

◦ 지리산권역(인월·아영·산내) 실시설계용역 완료 (19개마을) : `21. 11. ~ `23. 3.

- 인월(2개마을), 아영(2개마을), 산내(15개마을)

- 총사업비 변경(당초 155억 ⇒ 268억, 113억 증액)   : `23. 6. 28

- 지리산권역 농어촌생활용수 개발사업 착수         : `23. 12.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 지리산권역 지역 중 13개 마을*은 수도정비계획에 미반영 됨

* 인월면 성산, 장평, 아영면 율동, 이동, 산내면 덕동, 달궁, 부운, 와운, 반선, 방목, 백일전원, 장자터, 학천

□ 2023년 수도정비계획(변경) 수립 용역에 반영하여 환경부 승인 후 사업비 확보하여 사업 추진

□ 금후계획

◦ 지리산권역(인월,아영,산내) 배수시설 공사 추진    : `23. 12. ~ `25. 12.

- 지리산권역(인월,아영,산내) 배수시설 (1차분)	: `23. 12. ~ `24. 10.

(배수지 1개소, 배수관로 포설 L= 8.2km, 아영, 인월, 산내 일부)

소규모 배수관로 포설사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소  부서장 : 박동규  팀장 : 김희욱  담당자 : 김용하  전화 : 6885

□ 추진근거

◦ 추진법령 : 수도법 제5조(수도정비계획의 수립) 7항

- 수도 공급 구역에 관한 사항

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내

◦ 사업내용 : 배수관로 포설 L=25km 및 가압장 설치

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 (5개년)

◦ 총사업비 : 9,245백만원 (시비 100%)

- 기투자액 : 3,445백만원    - ‘24년 사업비 : 1,800백만원

- 이후 사업비 : 4,000백만원

(단위:백만원)

구분	합계	재원투자내역					비고
		소계	기투자	‘24	‘25	‘26
합계	9,245	9,245	3,445	1,800	1,800	1,800
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	9,245	9,245	3,445	1,800	1,800	1,800

□ 추진실적

◦ 향교 23통 매설공사 완료(L=0.325km)                      : ‘22.  5.

◦ 이백면 외 2개소 포설사업 사업 완료(L=0.631km)           : ‘22.  9.

◦ 향교 20통 매설공사 완료(L=1.076km)                      : ‘22.  9.

◦ 보절지구 배수관로 포설사업 완료(L=5.84km)                : ‘23. 10.

◦ 흥부골 휴양림 배수관로 포설공사 완료(L=1.0km)            : ‘23. 10

◦ LX드론활용센터 배수관 포설공사 준공(L=1.6km)            : ‘23. 12.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 마을에서 떨어진 독립 가옥이 다수 위치하고 있어 배수관로 포설 사업량 증가

□ 독립 가옥의 위치, 표고 등을 면밀히 검토 후 사업추진

□ 금후계획

◦ 가압장 및 배수관로 포설공사 추진

- 수지남창 비청골, 이백면 초촌마을, 주천면 각골마을 , 아영면 율동마을  : ‵24. 1. ~ 12.

* 남창 비청골 L=1km,  초촌마을 L= 0.7km,  각골마을 L=1km, 율동마을 L=0.7km

광역상수도 마을권 공급사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소   부서장 : 박동규   팀장 : 이현석   담당자 : 은현귀   전화 : 6873

□ 추진근거

◦ 수도법 제2조(책무) 및 39조(급수의무)

□ 개    요

◦ 사업목적 : 소규모수도시설을 이용하는 마을에 안정적이고 깨끗한 광역상수도 공급

◦ 위    치 : 아영면(일대, 부동)

◦ 사 업 량 : 급수관로 매설(D16~75㎜, L=1.7㎞), 마을권 계량기 설치

◦ 사 업 비 : 855백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 10.(10개월)

□ 추진실적

◦ 급수희망 동의서 제출(금계 외 3개 마을)          : 2023. 12.

◦ 주민설명회 실시                                 : 2023. 1. ~ 2.

◦ 실시설계 용역 완료                              : 2023. 2.

◦ 2023년 4개 마을 광역상수도 공급(공사) 완료      : 2023. 11.

- 보절면 3개 마을 (금계, 섭골, 안평․용평), 주천면 1개 마을(안곡)

※ 마을별 수돗물 보급현황(전체분) : 384개 마을(보급완료 332, 미보급 52)

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 소규모 독립 가옥(마을)의 광역상수도 공급 요청(수요) 수요 증가

□ 위치, 가옥의 규모 등을 면밀히 검토 후 단계적 공급추진

※ 시설비 과다 등 예산의 한계 및 독립가옥이 곳곳에 다수 위치하고있어 사업추진 장기화

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진 및 주민설명회 개최(일대, 부동)   : `24. 1. ~ 3.

◦ 광역상수도 매설공사 추진	: `24. 4. ~ 7.

◦ 마을권 계량기 설치공사 추진(2개 마을/116가구)   : ‘24. 8. ~ 10.

소규모수도시설 정비사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소   부서장 : 박동규   팀장 : 이현석   담당자 : 은현귀   전화 : 6873

□ 추진근거

◦ 남원시 마을상수도·소규모급수시설 관리 조례 9조(유지보수) 및 10조(긴급복구)

□ 개    요

◦ 사업목적 : 광역·지방상수도를 공급받지 못하는 소규모수도시설을 이용하는

마을에 노후된 시설을 개량하여 안정적이고 깨끗한 물 공급

◦ 위    치 : 관내 소규모수도시설 52개소(마을 16, 소규모 36)

◦ 사 업 량 : 소규모수도시설 노후화 시설 개량사업(아영 송리), 긴급복구사업

(누수복구 및 시설교체) 및 기능상실 시설물 철거사업

◦ 사 업 비 : 704백만원(도비 394, 시비 310)

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.(연례반복)

□ 추진실적

◦ 산내지구 삼화마을 노후상수관 개선공사 완료	: `23.  8. 25.

◦ 산내지구 하황마을 노후상수관 개선공사 완료	: `23. 10. 10.

◦ 마을상수도 긴급복구 추진	: `23. 7. ~ 12.

- 누수복구(3개소) : 주생 내동, 인월 중군, 산내 원천

- 펌프교체(3개소) : 대산 감동, 인월 도장, 산내 내령

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 노후 상수관 누수, 기기 고장 등 긴급사고 발생 시 신속 대응 필요

□ 상수도 대행업체와 긴밀 협조를 통해 신속복구 및 항시 대기 체계 구축

□ 금후계획

◦ 노후 소규모수도시설(관로교체, 수위조절기, 소독약투입기, 두수공 등) 개량 및 기능상실 시설물(물탱크해체, 관정 폐공) 철거   : `24.  1. ~ 12.

◦ 아영면 송리마을 노후화시설 개량공사 실시설계 용역 추진 : `24.  1. ~  3.

◦ 아영면 송리마을 노후화시설 개량공사 추진	: `24.  4. ~  9.

◦ 소규모수도시설 긴급복구사업(긴급누수복구 등) 추진   : 연중 수시

상수도관망 DB 구축 사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소   부서장 : 박동규   팀장 : 이현석   담당자 : 하현수   전화 : 6875

□ 추진근거

◦「국가공간정보 기본법」제28조 및 「공공측량 작업규정」제182조(시설물 탐사 대상)

◦「남원시 공간정보에 관한 조례」제15조(공간정보 자료 구축)

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 현지와 일치하지 않는 상수관망도를 최신화하여 정확한

단수지역 설정을 통해 피해지역을 최소화하고 신속한

복구공사 추진과 시설물 유지관리의 용이성 확보

◦ 위    치 : 상수관로 DB 미구축(오류) 지역

◦ 사업기간 : 2023. ~ 2027년(5개년)

◦ 사업규모 : 상수도시설물 탐사 및 DB 구축, 기 운영시스템 내 로딩 L=265㎞

- ‵24년 계획 : 덕과, 이백, 산동 배수지권(상수도시설물, 전구경) L=53㎞

※ 상수도시설물 : 상수관로, 밸브류, 가압장, 감압변, 배수지 등

◦ 총사업비 : 5,000백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2024년	2025년 이후	비 고
5,000	1,000	1,000	3,000

□ 추진실적

◦ `23년 상수관망도 GIS DB 구축 및 정확도 개선사업 추진

- 운봉, 대강, 대산 배수지권 L=53㎞ / 3개의 장비*를 통해 3단계 중복 탐사 추진

- 운봉배수지권(운봉읍) 관로 탐사 진행중

➣ 북천·가산리 L=3.0㎞ 및 밸브류(소화전, 지수전 등 포함) 22개 탐사 완료

* AML(핸드형, 금속․비금속), MPL(핸드형, 금속형), GPR(카트형, 금속․비금속)

- GIS DB 미구축 정보 및 현지와 일치하지 않은 정보 우선 탐사 추진

□ 금후계획

◦ 용역 발주를 위한 사전 행정절차 이행(협상에 의한 계약)	: ‵24. 1.

- 발주(추진) 계획, 관련부서 의견 검토 등

◦ 용역 발주 및 협상에 의한 계약 추진	: ‵24. 1. ~ 2.

◦ 과업 수행(덕과, 이백, 산동 배수지권)	: ‵24. 3. ~ ‵25. 3.

노후 상수관로 교체사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소   부서장 : 박동규   팀장 : 이현석   담당자 : 하현수   전화 : 6875

□ 추진근거

◦ 수도법 제21조(수도시설의 관리) 및 21조의 2(상수도관망의 관리)

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 잦은 이물질 및 적수 유출지역의 노후된 상수관로 교체로 유수율과 관로 교체율 제고 및 수질 사고 요인 해소

◦ 위    치 : 관내 급수구역(소규모 수도시설 제외)

◦ 사업기간 : 2013. ~ 2027년(연례반복)

◦ 사업규모 : 노후 상수관(시설물) 교체 L=150㎞

- ‵24년 계획 : 3개소 L=2.0㎞ (주생 효동 L=0.8㎞, 노암초 뒤 L=0.5㎞, 함파우마을 L=0.7㎞)

※ 주생 효동(2004, DCIP, D75~16㎜) 노암초 뒤(2004, DCIP, D75㎜)

함파우마을(2001, DCIP, D75㎜)

◦ 총사업비 : 26,000백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2024년	2025년 이후	비 고
26,000	22,500	500	3,000

□ 추진실적

◦ `23년까지 관로 교체 L=126.9㎞ (~‵22년 : 122.2㎞ / ‵23년 : 4.7㎞)

- 읍 ‧ 면지역 5.0㎞(운봉 삼산 외 6), 동지역 117.1㎞(도통지구 외 85)

- `23년 L=4.7㎞ : 노후 상수도 교체사업 추진(3개소)

‧ 완료(2) : 금동지구(D200~16㎜, L=2.1㎞), 내척동 내척4교(D75~16㎜, L=14m)

‧ 추진(1) : 도통우체국~GS편의점 4가(D200~16㎜, L=2.6㎞) / 공정률 50%

➣ 공사 완료 예정일 : ‵24. 5.(동절기 공사 중지 및 침하기간 소요)

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진(주생 효동 외 2개 지구)	: 2024. 1. ~ 3.

◦ 공사 추진	: 2024. 3. ~ 12.

타부서 병행 상수도 정비사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소   부서장 : 박동규   팀장 : 이현석   담당자 : 하현수   전화 : 6875

□ 추진근거

◦ 수도법 제21조(수도시설의 관리) 및 21조의 2(상수도관망의 관리)

◦「도로법」 시행령 제62조(도로관리심의회의 설치)

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 타 부서와 중복되는 사업 구간에 대해 사전 협의를 통하여 병행 굴착을 추진하고 그에 따른 예산 절감과 차량 통제 등 민원 불편 최소화

◦ 위    치 : 관내 급수구역(소규모 수도시설 제외)

◦ 사업기간 : 2022. ~ 2026년(연례반복)

◦ 사업규모 : 노후 상수관 교체 L=15.0㎞【‵24년 계획 : 3개소 L=4.2㎞ 】

※ (주생 지당~제천) 2004, D100㎜, L=2.6㎞ / (운봉초 지중화) 2005, D200~16㎜, L=0.5㎞

(덕인선 사매 월평~인화) 2005, D100~16㎜, L=1.1㎞

◦ 총사업비 : 5,100백만원(시비)

◦ 재원투자계획                                       (단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2024년	2025년 이후	비 고
5,100	2,100	1,000	2,000

□ 추진실적

◦ `23년까지 관로 교체 L=8.2㎞ (‵22년 : 4.5㎞ / ‵23년 : 3.7㎞)

- 읍·면지역 3.4㎞(송동 동서내 외 2), 동지역 1.1㎞(함파우 마을 내부관)

- `23년 L=3.7㎞ : 타부서 병행 상수도 정비공사 추진(2개소)

‧ 완료(1) : 송동 태동(D100~16㎜, L=2.1㎞)

‧ 추진(1) : 노암 3통(D75~16㎜, L=1.6㎞)【전북도시가스 병행】

※ 관련부서(전북도시가스) 협의 기간 소요로 공사 발주 지연

□ 금후계획

◦ 실시설계 용역 추진(주생지구 외 2개소)	: ‵24. 1. ~ 3.

※ 주생지구【환경사업소 병행】 / 덕인선 및 운봉초 지중화【건설과 병행】

◦ 공사 추진	: ‵24. 3. ~ 12.

누수다발지역 상수관로 정비사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소   부서장 : 박동규   팀장 : 이현석   담당자 : 하현수   전화 : 6875

□ 추진근거

◦ 수도법 제21조(수도시설의 관리) 및 21조의 2(상수도관망의 관리)

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 상수관로(PVC, PE관 등)의 노후화로 누수 등 상수도 사고가 다발적으로 발생하는 지역의 관로를 정비하여 유수율 제고 추진

◦ 위    치 : 관내 급수구역(소규모 수도시설 제외)

◦ 사업기간 : 2014. ~ 2027년(연례반복)

◦ 사업규모 : 누수다발 상수관 교체 L=66㎞

- ‵24년 계획 : 송동 척동·신성·백평마을 L=1.9㎞ (2004, DCIP, D150~16㎜)

◦ 총사업비 : 10,695백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2024년	2025년 이후	비 고
10,695	8,695	465	1,535

□ 추진실적

◦ `23년까지 관로 총 27개 지구 교체 L=58.9㎞ (~‵22년 : 52.5㎞ / ‵23년 : 6.4㎞)

- 읍·면지역 37.5㎞(송동 안계 외 18개소), 동지역 15.0㎞(왕정동 외 6개소)

- `23년 시행분 : 송동 송내사촌지구(내충격수도관 D100~16㎜) L=6.4㎞

□ 금후계획

◦ 실시설계 용역 추진(송동 척동~신성~백평마을)	: ‵24. 1. ~ 3.

◦ 공사 추진	: ‵24. 3. ~ 12.

상수도 공기업의 안정적 재정 확충

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소   부서장 : 박동규   팀장 : 박영주  담당자 : 양서경   전화 : 6862

□ 추진근거

◦ 지방공기업법 제22조, 같은법 시행령 제18조

◦ 남원시 상수도 급수조례 제24조(수도사용요금)

□ 개    요

◦ (추진목표)  상수도 급수구역 확대와 요금 체납자에 대한 징수로 세입       목표 달성하여 건전 재정운영 도모

◦ 연도별 세입 증감 내역

(단위 : 백만원)

구분	2020	2021	2022	2023	2024	전년대비
세 입	26,285	28,165	30,238	21,773	27,541	26.5% 증

☞ 2024년 세입 주요 사업 내역

- 후속 노후상수관 정비사업                              : 39억원

- 소규모 수도 노후화시설 개량사업지원                    :  4억원

- 지리산권역(인월,아영,산내)농어촌 생활용수 개발사업      : 38억원

□ 추진실적

◦ 과년도 사용료 체납금 징수활동 강화로 자주재원 확보 : 145백만원

- 체납특별징수 기간 운영(4회) : 단수 및 압류 예고 7,558건 / 494백만원

◦ 수도요금 징수내역(12.13.기준)

(단위 : 천원)

구 분	부 과 액	징 수 액	체 납 액	징 수 율
계	6,384,801	6,088,038	298,227	95.3%
현년도	6,144,422	5,943,325	202,561	96.7%
과년도	240,379	144,713	95,666	60.2%

◦ 상수도 급수구역 확대로 인한 수입 확충(328전)         : 449백만원

□ 금후계획

◦ 체납요금 특별 징수기간 지속운영(매분기별)

- 고질 고액체납자 분류 관리, 담당구역별 책임 관리⇒행정처분(단수,재산압류 등)