2024. 1.

2024년 주요업무 계획

관   광   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2023년 주요업무 결산

□ 2024년 중점 추진방향

□ 2024년 주요업무 계획

◦ 다양한 숙박□음식 특화거리 조성

◦ 축제와 빛의 향연을 활용한 문화축제 테마조성

◦ 스마트관광도시 조성사업

◦ 남원관광지 RE-PLUS사업(경상)

◦ 남원관광지 RE-PLUS사업(자본)

◦ 제2차 대표관광지 육성사업(경상)

◦ 제2차 대표관광지 육성사업(자본)

◦ 남원 요천 벚꽃축제

◦ 제94회 춘향제

◦ 남원 막걸리축제

◦ 제32회 흥부제

◦ 요천 미디어아트 축제

◦ 동□동 이글루 축제

◦ 남원관광지 민간개발사업 추진현황

◦ 남원 드래곤관광단지 조성사업

◦ 남원 한옥체험시설 조성사업

◦ 지역특화형 친환경 숙박시설 조성사업

◦ 함파우유원지 디지털 테마파크 조성사업

◦ 고소바위공원 국민여가캠핑장 조성사업

◦ 함파우아트밸리 조성사업(키즈랜드, 아카이브관)

◦ 옛다솜이야기원 조성사업

◦ 산악용 친환경 운송시스템 시범사업

일  반  현  황

□ 기    구

				관 광 과 장
				노 경 록
테마관광조성팀장			축제기획팀장					관광개발팀장				생태자원개발팀장
홍 동 원			이 영 규					박 봉 용				황 이 연
스마트관광도시조성			춘향제추진					관광(단)지조성				지리산친환경 전기열차추진
리플러스프로그램운영			흥부제추진					대표관광지육성				산악용친환경운송 시스템시범사업추진
대표관광지육성사업 상설공연이벤트			소규모축제지원					관광종합개발계획
관광상품개발및홍보			신규 축제기획 및 대표 축제 평가관리					함파우유원지조성

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	임기제	공무직
정 원	17	1	4	3	4	5	-	-
현 원	19	1	5	5	4	2	1	1
증 감	-	-	1	2	-	△3	-	-

2023년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ PLAY 남원, 향이몽이 캐릭터 등 상표출원으로 콘텐츠 IP 확보 ◦ 여행채널 및 인플루언서, 현대퓨처넷과 협업을 통한 영상홍보 ◦ 「제93회 춘향제」 관광객 약40만명, 200억 경제효과 달성 ◦ 봄꽃 음악회, 요천비치페스티벌, 동동동화축제 개최로 계절별 축제 개최 ◦ 축제기간 청사초롱 야간경관 조성으로 축제 분위기 상향 ◦ 광한루원과 남원관광지를 연계하는 체류형 관광인프라 구축 ◦ 산악열차 비관리청 사업 인허가 사전협의 완료 실시설계 착수 중

□ 스마트관광과 RE-PLUS사업을 통한 콘텐츠 및 인프라 확보

◦ 메타버스, 관광웹&앱, 3D디스플레이, 남원네컷, 가상피팅, 흥얼 버스킹 등 광한루원 주변 온□오프라인 관광 인프라 조성

◦ PLAY 남원, 향이몽이 캐릭터 등 상표출원으로 콘텐츠 IP 확보

◦ 춘향제, 드론제전 등 각종 행사참여를 통한 축제활성화에 기여

◦ 여행채널 및 인플루언서, 현대퓨처넷과 협업을 통한 영상홍보

* 조회수 : 여행에 미치다(85만), 다정모녀(18만) / 서울 옥외광고(507,000회)

◦ 한국관광공사 지원으로 스마트관광 여행상품 1천여명 모객

□ 남원시 대표축제의 발전적 성장을 위한 분위기 조성

◦제93회 춘향제 전반적 만족도 5.52(7점 만점/문체부 문화관광축제 평가기준)

및 40만 명의 방문객 방문

* 문체부(2021년 기준) 대표축제(3개/5.42), 최우수축제(7개/5.23)와 비교

◦제31회 흥부제: 전라북도 대표 문화관광축제로의 위상을 강화하는

공연예술 분야로의 방향성을 점진적 전환 기반 추진

* 대표 콘텐츠(killer contents)발굴(트롯뮤지컬/남우문장(국가문형문화재 공연))

□ 요천 권역을 빛을 테마로 한 야간관광 강화

◦ 축제기간 청사초롱 야간경관 조성으로 축제 분위기 상향

◦ 광한루원 일원 LED를 활용한 야간관광 상설공연 및 체험프로그램 추진

□ 체류형 관광 인프라 조성

◦ 광한루원과 남원관광지를 연계하는 체류형 관광인프라 구축과

신규 관광개발사업 추진

◦ 리플러스 사업의 달빛정원 사업, 지역특화형 친환경 숙박시설 조성,

한옥체험시설 조성사업, 고소바위공원 국민여가 캠핑장 조성 등

□ 지리산 친환경 전기열차 도입

◦ (산악용 친환경 운송시스템 시범사업) 지방도 비관리청 사업

인허가 사전협의 완료 후 실시설계 착수 중

- 위    치 : 주천면 고기삼거리 ~ 고기댐 일원(L=1km)

- 사 업 비 : 31,706백만원 (국비 27,852, 시비 3,854)

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.

- 시행기관 : 한국철도기술연구원(주관연구기관)·남원시(유치기관)

- 사업내용 : 시범노선 건설, 차량 제작(3량 1편성), 시스템 검증 및 시범운영

	아쉬운 점
◦ 전기열차 비관리청 사업 인허가 사전협의 지연으로 사업 전체 일정 지연 - 공사 착공 시기 단축을 위하여 인허가 절차 차질없이 준비 필요

2024년 중점 추진방향

관광 자원의 창의적 연계□활용으로

글로벌 관광도시로 대전환

	중 점 추 진 과 제
◦ 경쟁력 있는 테마관광도시 조성 - 콘텐츠 특화 관광도시 조성을 위한 테마 브랜딩 전략 추진 - 디지털과 전통이 만나는 복합문화공간 ‘스마트LUNA’ 오픈 - 남원관광지 RE-PLUS사업 ‘로컬리즘’ 활성화 ◦ 세계인이 즐기는 100만인의 축제 - K-축제를 선도하는 대한민국 대표축제 춘향제의 위상 강화 - 춘향제의 K-문화 세계화를 위한 춘향선발대회 국제화 추진 ◦ 대표축제 위상정립 및 신규콘텐츠 개발 - 흥부제 콘텐츠 경쟁력 강화로 대표축제 위상 정립 - 축제 신규 프로그램 개발로 변화하고 진화하는 축제 ◦ 낮과 밤이 아름다운 여행지 조성 - 남원의 지리적 특성을 반영한 특색있는 야간경관 조성 - 야간관광 특화도시 조성사업 공모 적극 대응 ◦ 관광인프라 구축 - 관광자원 체계적 개발 및 체류형 관광 기반 구축 - 신성장 동력을 위한 산악용 친환경 운송시스템 시범사업 추진 - 지리산 케이블카 유치를 위한 체계적인 추진전략 모색

2024년 주요업무 계획

다양한 숙박□음식 특화거리 조성

(공약사업)

작성부서: 관광과  과장: 노경록  팀장: 박봉용  담당자: 송기곤  전화: 6852

□ 추진근거

◦ 민선8기 공약에 따른 사업 추진

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 광한루원 및 요천 주변

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2025년

◦ 총사업비 : 13,683백만원(국비 5,200 도비 1,000 시비 7,483)

◦ 사업내용 : 광한루원·요천 주변 특색있는 먹거리와 다양한 숙박시설 확보

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자 (~‘22)	재원투자내역(임기내)					‘27이후	비고
			소계	‘23	‘24	‘25	‘26
합계	13,683	5,613				0	0	0
국비	5,200	1,730	3,470	3,270	200
도비	1,000	1,000	0
시비	7,483	2,883	4,600	4,600

※ 스마트 ‘LUNA’ 조성 및 운영     : 3,763백만원 (국비 955, 도비 1,000, 시비 1,808)

※ 친환경 숙박시설 조성사업         : 9,400백만원 (국비 3,900, 시비 5,500)

※ 요천 푸드 스트리트 조성 및 운영 :  520백만원 (국비 345, 시비 175)

□ 추진실적

◦ 지역특화형 친환경 숙박시설 조성사업 실시설계용역 착수	: `22. 5.

◦ 달빛정원 조성사업, 건축물 리모델링 및 증축 설계용역 착수	: `22. 7.

◦ 스마트 `LUNA` 건축 실시설계용역	: `23. 3.

◦ 지역특화형 친환경 숙박시설 운영자 선정[(주)스테이폴리오]	: `23. 3.

◦ 지역특화형 친환경 숙박시설 조성사업 실시설계용역 완료	: `23. 6.

◦ 지역특화형 친환경 숙박시설 조성사업 일상 및 원가심사 완료	: `23. 9.

◦ 지역특화형 친환경 숙박시설 건축공사 착공	: `23. 12.

◦ 스마트	`LUNA` 건축공사 착공	: `23. 12.

□ 금후계획

◦ 스마트 `LUNA` 조성 건축 준공	: `24. 5.

◦ 스마트 `LUNA` 개관 및 운영	: `24. 6.

◦ 지역특화형 친환경 숙박시설 조성 건축 준공	: `24. 8.

◦ 지역특화형 친환경 숙박시설 개관 및 운영	: `24. 9.

축제와 빛의 향연을 활용한 문화축제 테마조성

(공약사업)

작성부서: 관광과  과장: 노경록  팀장: 박봉용  담당자: 이한올  전화: 6186

□ 추진근거

◦ 민선8기 공약에 따른 사업 추진

□ 개    요

◦ 위    치 : 요천변 제방길 (동림교 ~ 수창해뜨래@) 및 요천 시민공원

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2032년(10년)

◦ 총사업비 : 5,500백만원 (국비 1,100 도비 300 시비 900 기타 3,200)

◦ 사업내용 : 요천권역 빛 테마 야간 볼거리 제공으로 체류형 관광지 조성

◦ 재원투자계획

(단위:백만원)

구분	합계	기투자 (~‘22)	재원투자기간					‘27 이후	비고
			소계	‘23	‘24	‘25	‘26
합계	5,500	900	4,600	3,200	1,400	0	0	0
국비	1,100	-	1,100		1,100
도비	300	300
시비	900	600	300	0	300	0	0	0
기타	3,200		3,200	3,200					보상비

※ 전라북도 대표관광지 육성사업(700백만원), 시내권 관광시설 연계 야간경관 기본계획 수립 용역(200백만원), 글로벌축제 육성지원사업(800백만원), 야간관광 특화도시 사업(600백만원)

□ 추진실적

◦ 협상에 의한 계약 타당성 검토(재정과, 감사실)	: `22. 4. 15.

◦ 용역 발주방식 결정(협상에 의한 계약)	: `22. 4. 19.

◦ 용역 원가심사 완료(시)	: `22. 9. 14.

◦ 용역 협상적격자 선정	: `22. 12. 5.

◦ 시내권 관광시설 연계 야간경관 기본계획 수립 용역 : `23.  1. ~ 12.

- 야간경관 기본계획에 맞춰 요천 벚꽃길 디자인(안) 결정

□ 금후계획

◦ 글로벌축제 육성지원사업 동향파악 및 관계자 미팅       : `23. 12. ~

◦ 대표관광지 육성사업「요천벚꽃길 야간명소화 사업」시행 : `24. 1. ~

◦ 글로벌축제 육성지원사업 공모 제안서 제출              : `24. 2. ~

◦ 야간경관 특화도시 사업 공모 대응                      : `24. 2. ~

스마트관광도시 조성사업

(계속사업)

작성부서 : 관광과  부서장 : 노경록  팀장 : 홍동원  담당자 : 전용남  전화 : 5706

□ 추진근거

◦ 관광진흥법 제47조의8(스마트관광산업의 육성)

◦ 관광과-7991(2023.11.2)호『남원 스마트관광도시 조성사업 후속지원 알림』

□ 개    요

◦ 위    치 : 광한루원 일원 ~ 요천 ~ (구)비사벌콘도

◦ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2025. 12.(구축 1년/80억원, 운영 3년/25억원)

◦ 총사업비 : 105억원(기 45, 도 10, 시 50) / 24년도 10억원(기5, 시5)

◦ 사업내용 : 민관협력을 통한 정보통신기술 기반의 관광콘텐츠 및 인프라 육성

- (구축단계) 스마트 LUNA, AR앱, 관광웹, 3D디스플레이, 미디어아트, 메타버스,        버스킹키오스크, k스타일룸(한복, 가상피팅), 포토박스, 향이몽이 캐릭터 등

- (운영단계) 웹툰 등 콘텐츠 제작, 체험공간 구축, 홍보/마케팅, 운영/ 개선

□ 추진실적

◦ 춘향제 기간 사업홍보부스 운영 및 서비스 시범운영      : ‘23. 5.

◦ 스마트관광도시 고도화단계 운영사업자 선정(리앙에이지)  : ‘23. 9.

◦ 남원세계드론제전 스마트관광도시 홍보체험부스 운영     : ‘23. 10.

◦ 코리아 메타버스 페스티벌 참가 부스운영(서울 코엑스)    : ‘23. 10.

◦ 복합문화공간 스마트 LUNA 건축, 통신, 전기 공사 착공   : ‘23. 12.

□ 금후계획

◦ 지역특화 제작웹툰 연재 개시 및 콘텐츠 오프라인 런칭쇼 :　‘24. 3.

◦ 스마트 LUNA(식음료 판매, 미디어월, LUNA트리) 오픈     :　‘24. 5.

남원관광지 RE-PLUS사업(경상)

(계속사업)

작성부서: 관광과  과장: 노경록  팀장: 홍동원  담당자: 김세민  전화: 6175

□ 추진근거

◦ 관광진흥법 제76조(재정지원) 및 관광자원개발사업 보조금 관리지침

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2024년(5년)

◦ 사 업 비 : 60억원(국 30, 시 30) *24년도 19억원(국 9.6, 시 9.6)

◦ 사업내용 : 지역 관광 특화콘텐츠 개발 및 지속가능한 관광 생태계 구축

(핵심사업) 관광브랜드 개발, 연계관광코스, 공연 프로그램, 요천 푸드 스트리트, 온․오프라인 마케팅 5식

(관리․운영사업) 주민참여 일자리사업, 달빛정원 거버넌스 구축․운영, 달빛정원 추진조직 운영 3식

□ 추진실적

◦ 남원 관광지 RE-PLUS사업 기본계획 수립 완료	: ‘21. 11. 9.

◦ 21년도 연계관광코스 기획 연구용역 시행	: ‘22. 11. 29.

◦ 22년도 RE-PLUS사업 보조금 교부(관광협의회)	: ‘22. 12. 19.

◦ 리플러스사업 추진단 총괄PM 위촉 및 직원 공개채용	: ‘23. 2.

◦ 요천 비치 페스티벌 연계 공연 프로그램 운영	: ‘23. 8.

◦‘여행에미치다’협업 SNS 홍보마케팅(조회수 85만)	: ‘23. 9.

◦ 23년도 RE-PLUS사업 추진단 보조금 교부	: ‘23. 8. ~ 11.

□ 금후계획

◦ 발렌타인데이‘커플스데이’공연 프로그램 운영	: ‘24. 2.

◦ 스마트관광도시(PLAY남원) 연계 MD상품 개발·제작	: ‘24. 3.

남원 관광지 RE-PLUS사업(자본)

(계속사업)

작성부서: 관광과  과장: 노경록  팀장: 박봉용  담당자: 송기곤  전화: 6852

□ 추진근거

◦ 관광진흥법 제76조(재정지원) 및 관광자원개발사업 보조금 관리지침

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원 관광지 일원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2024년(5년)

◦ 사 업 비 : 11,350백만원(국 3,000, 도 3,000, 시 5,350)

- 2023년도 사업비 : 5,708백만원(국 1,179, 도 1,000 시 3,529)

- 2024년도 사업비 : 2,592백만원(국   796, 도 1,000 시  796)

◦ 사업내용 : 달빛정원 조성 및 방문자 센터 건립, 실감 몰입형 미디어아트 전시

□ 추진실적

◦ 계획공모형 지역관광개발사업 공모 선정	: ‘20. 3. 20.

◦ 남원 관광지 RE-PLUS사업 기본계획 수립 완료	: ‘21. 11. 9.

◦ 달빛정원 건축 설계용역 시행	: ‘22. 7. ~ ‘23. 12.

◦ 실감 몰입형 미디어아트 콘텐츠 개발·설치 용역	: ‘23. 1.

◦ 실감 몰입형 미디어아트 설치용역 1차 완료	: ‘23. 12.

◦ 달빛정원 조성공사 착공	: ‘23. 12.

□ 금후계획

◦ 실감 몰입형 미디어아트 설치용역 2차 완료	: ‘24. 7.

◦ 달빛정원 조성 및 방문자센터 조성공사 완료	: ‘24. 8.

◦ 달빛정원 조성 및 방문자센터 개관 및 운영	: ‘24. 10.

제2차 대표관광지 육성사업(경상)

(계속사업)

작성부서 : 관광과  부서장 : 노경록  팀장 : 홍동원  담당자 : 김지수  전화 : 6163

□ 추진근거

◦ 관광진흥법 제76조(재정지원) 및 관광자원개발사업 보조금 관리지침

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 광한루원~남원관광지

◦ 사업기간 : 2020~2024년

◦ 총사업비 : 2,680백만원(국비 200, 도비 2,100, 시비 380)

* 24년도 사업비 : 480백만원 (도비 400, 시비 80)

◦ 사업내용 : 남원의 문화적 특성을 살린 상설체험 및 공연 운영

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업내용	사업횟수 (2023)	사업비 (2024)	비고
	계		107	480
관광 진흥	마당극 흥부뎐 상설공연	⚪변사극 춘향전 판소리 공연, 전통연희 공연 등	25	72.5	‘20~’24
	남원 꽃담길 아트장터	⚪플리마켓 운영 및 문화예술거리 활성화 사업	40	115	‘20~’24
	전통문화 체험프로그램	⚪LED전통타악 퍼포먼스 공연, 판소리 소리꾼 체험, 국악공연 등	42	102.5	‘20~’24
	스마트 관광정보체계 구축/운영	⚪대표관광지 육성사업 홍보콘텐츠(홈페이지) 개선	-	10	‘20~’24
	대표관광지 홍보 마케팅	⚪SNS 서포터즈 교육 및 팸투어 운영ㆍ관리	-	180	‘20~’24

□ 추진실적

◦ 관광진흥사업 사업신청서 검토 및 보조금 교부        : ‘23. 5.

◦ 대표관광지 육성사업 성과평가 및 발전방안 연구용역  : ‘23. 6. ~ 7.

◦ 관광진흥 사업 추진(5식)	: ‘23. 6. ~ 11.

◦ 전통문화 콘텐츠 페스티벌 「남원이 참 좋아!」 개최   : ‘23. 11. 12.

□ 금후계획

◦ 관광진흥사업 운영보조금 정산 검사 보고	: ‘23. 12.

◦ 2024 대표관광지 사업 계획 수립                    : ‘24. 1.

제2차 대표관광지 육성사업(자본)

(계속사업)

작성부서: 관광과  과장: 노경록  팀장: 박봉용  담당자: 이희열  전화: 6178

□ 추진근거

◦ 관광진흥법 제76조(재정지원) 및 관광자원개발사업 보조금 관리지침

◦ 전라북도 지방보조금 관리 조례 제4조(보조대상 사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 광한루원~남원관광지

◦ 사업기간 : 2020~2024년

◦ 총사업비 : 5,800백만원(도비 2,900, 시비 2,900)

* 24년도 사업비 : 600백만원(도비 600)

◦ 사업내용 : 관광기반 7개사업

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업내용	총사업비	2024	추진계획	비고
	계		5,800	600
관광 기반 (7)	관광편의개선 (주차장, 도로확장)	⚪주차장 4곳, 화장실 리모델링 데크설치 1식	2,600	-	`20~`22	추진중
	사랑의 정원 조성	⚪관광지 주변정비및 화단 조성	1,600	400	`21~`24	추진중
	요천 벚꽃길 야간명소화사업	⚪수목투사등 1식, 전기배선 1식	700	-	`22~`24	추진중
	덕음산 에코 어드벤처 조성	⚪뉴미디어관측돔 및 4D영상제작	500	-	`23~`24	추진중
	매력더하기 한옥정자 조성	⚪한옥정자 설치 1개소	200	200	`24	추진중
	심야포차단지 조성	⚪야간관광활성화를 위한 심야 포장마차거리 조성	100	-	`23	완료
	AR 실감형 체험관광존 구축	⚪AR 체험존 구축 등	100	-	`23	완료

□ 추진실적

◦ 2024년 기본계획 협의 및 발전방안 추진 협의	: ‘23. 1. ~ 10.

- [전북도 관광총괄과] 2024년 이후 대표관광지 조성사업 종료 후 연계사업 협의

◦ 광한루원 경외상가 경관조명 설치공사 (LED투광바, L=203m)	: ‘23. 1. ~ 6.

◦ 남원 관광지 주차장 재포장 공사 시행	: ‘23. 4. ~ 10.

◦ 심야포차단지 조성사업 (초가부스 30개소 제작)	: ‘23. 5. ~ 6.

◦ 천문대 진입도로 경관조명 설치공사 시행	: ‘23. 10. ~ 12.

◦ 천문대 뉴미디어 관측돔 설치사업 시행	: ‘23. 12. ~

◦ 사랑의광장 앞 요천변 국악광장 조성 시행	: ‘23. 12. ~

◦ 달빛정원 조성사업(조경) 시행	: ‘23. 12. ~

□ 금후계획

◦ 전북도 관광총괄과 협의 및 사업 기간 연장 시행	: ‘23. 12. ~ ‘24. 1.

◦ 요천벚꽃길명소화 사업시행	: ‘24. 1. ~

◦ 천문대 뉴미디어 관측돔 설치사업 준공	: ‘24. 6.

◦ 사랑의광장 앞 요천변 국악광장 조성 준공	: ‘24. 6.

남원 요천 벚꽃축제

(계속사업)

작성부서 : 관광과  부서장 : 노경록  팀장 : 이영규  담당자 : 김혜린 전화 : 5787

□ 추진근거

◦ 관광진흥법 제48조

□ 개    요

◦ 기    간 : 2024. 4. / 2일간

◦ 장    소 : 요천둔치 (승월교 아래)

◦ 사 업 비 : 99백만원 (시비 99)

◦ 내    용 : 축하공연, 버스킹, 먹거리 장터 운영, 쉼터 제공 등

□ 추진방향

◦ 지역 경제 활성화에 기여하는 축제

- 지역 예술인이 참여하는 공연 추진

- 지역민이 참여하는 음식 및 체험부스 운영

◦ 관광객과 시민이 편안히 즐길 수 있는 축제

- 요천둔치에 파라솔 등을 설치하여 공연 관람석, 쉼터로 이용

◦ 다양한 공연으로 관광객과 시민이 만족하는 축제

- 주간은 버스킹, 야간은 주무대 공연 등 다양한 공연 추진

□ 금후계획

◦ 벚꽃 축제 기본계획 수립                           : ‘24. 2.

◦ 벚꽃 축제 개최 및 결과 보고                       : ‘24. 4. ~ 5.

제94회 춘향제

(계속사업)

작성부서 : 관광과  부서장 : 노경록  팀장 : 이영규  담당자 : 김혜린 전화 : 5787

□ 추진근거

◦ 관광진흥법 제48조

◦ 남원시 춘향제조례 제11조

□ 개    요

◦ 기    간 : 2024. 5. 10.(금) ~ 5. 14.(화) / 5일간

◦ 사 업 비 : 3,128백만원 (도비 500 시비 2,628)

◦ 장    소 : 광한루원, 요천둔치, 사랑의광장, 남문로~광한서로 일원

◦ 슬 로 건 : 춘향, 컬러 愛 반하다

◦ 사업내용 : 춘향제향, 춘향선발대회, 공연예술, 시민참여행사 등

□ 추진실적

◦ 제94회 춘향제 사전준비 : `23. 10. ~ 12.

- 공간계획, 홍보마케팅, 축제기획 기본계획(안) 수립

- 춘향선발대회 해외선발 프로그램 추진

- 사전홍보물 제작 (포스터, 현수막, 배너, 티저영상 등)

- 2024 제1회 남원세계축제포럼 기획 및 추진

□ 금후계획

◦ 전략적 축제 사전 홍보마케팅 추진 (온·오프라인)        : ‘24. 1. ~

◦ 프로그램 보완 및 신규 콘텐츠 발굴 등 축제 기획안 구체화 : ‘24. 1. ~

◦ 축제장 조성 및 축제 개최	: ‘24. 5.

남원 막걸리축제

(계속사업)

작성부서 : 관광과  부서장 : 노경록  팀장 : 이영규  담당자 : 김성준 전화 : 5787

□ 추진근거

◦ 관광진흥법 제48조

□ 개    요

◦ 기    간 : 2024. 5.

◦ 장    소 : 광한서로

◦ 사 업 비 : 72백만원 (시비 72)

◦ 내    용 : 막걸리 퍼포먼스, 막걸리·안주 시식, 대중공연 등

□ 추진방향

◦ 지역생산품 연계 축제로 홍보 및 소비 촉진에 기여

◦ 지역민이 참여하는 음식 및 체험부스 운영으로 지역경제 활성화

◦ 관광객과 시민이 직접 참여하는 축제

- 비수기 관광객과 시민이 참여하고 즐기는 축제 구성

◦ 춘향제와 병행 개최로 관광객 유치 제고

□ 금후계획

◦ 막걸리 축제 기본계획 수립                        : ‘24. 3.

◦ 참여업체 선정 및 간담회                          : ‘23. 4.

◦ 막걸리 축제 개최 및 결과 보고                    : ‘23. 5. ~ 6.

제32회 흥부제

(계속사업)

작성부서 : 관광과  부서장 : 노경록  팀장 : 이영규  담당자 : 김성준 전화 : 5783

□ 추진근거

◦ 관광진흥법 제48조

◦ 남원시 흥부제조례 제5조

□ 개    요

◦ 기    간 : 2024. 10. 4. (금) ~ 10. 6. (일) / 3일간

◦ 사 업 비 : 362백만원 (시비 362)

※ 도비 : ‘23.12.20. 대표축제 평가 후 결과에 따라 차등지원 (40~100백만원)

◦ 장    소 : 사랑의 광장 및 요천 둔치 일원

◦ 사업내용 : 시민의 날, 기념식, 나눔행사, 공연 및 체험프로그램 등

□ 추진실적

◦ 제31회 흥부제 개최                          : ‘23. 10.7. ~ 10.9.

구 분	계	지역주민	타 지역	비 고
방문자 수	52,326명	36,524명	15,802명	4개소 계측
1인당 소비액	-	12,437원	45,141원
경제효과	1,167,567,070원	454,248,988원	713,318,082원

※ 만족도조사 및 외부평가 용역 시행 중 (경기대학교 산악협력단)

□ 금후계획

◦ 제32회 흥부제 기본계획 수립	: ‘24. 2.

◦ 제32회 흥부제 사전 홍보	: ‘24. 3. ~ 10.

◦ 제32회 흥부제 행사 개최	: ‘24. 10. 4. ~ 10. 6.

요천 미디어아트 축제

(계속사업)

작성부서 : 관광과  부서장 : 노경록  팀장 : 이영규  담당자 : 김성준 전화 : 5783

□ 추진근거

◦ 관광진흥법 제48조

□ 개    요

◦ 기    간 : 2024. 10.

◦ 장    소 : 요천둔치

◦ 사 업 비 : 290백만원 (시비 290)

◦ 내    용 : 미디어파사드, 레이저, 무빙라이트, 프로젝션 매핑, LED

조형물 설치 및 문화공연, 체험공간 조성

□ 추진방향

◦ 천혜의 자원인 요천의 야간경관 활성화

◦ 미디어아트와 빛이 결합한 야간 축제

- 시민과 관광객에게 다양한 문화예술 체험 기회 확대

- 체류형 관광객 증가에 기여하여 지역경제 활성화 제고

◦ 흥부제와 병행 개최로 관광객 유치 제고

□ 금후계획

◦ 요천 미디어아트 축제 기본계획 수립             : ‘24. 8.

◦ 요천 미디어아트 축제 개최 및 결과 보고         : ‘24. 10. ~ 11.

동･동 이글루 축제

(계속사업)

작성부서 : 관광과  부서장 : 노경록  팀장 : 이영규  담당자 : 최용석 전화 : 5783

□ 추진근거

◦ 관광진흥법 제48조

□ 개    요

◦ 사업기간: 2024. 12.

◦ 위    치: 예촌 일원

◦ 사 업 비: 120백만원 (시비 120)

◦ 사업내용: 애니메이션 얼음조각 전시, 대동EDM Patry, 이글루 놀이터, 동네방네 예촌 콘서트, X-max 나눔 기프트, 골목길 산타 버스킹, 겨울아이마켓(체험·먹거리) 등

※ 기존 (~2023) 동□동□동화축제를 남원시 신규 대표 겨울 축제로 확장·강화

□ 추진방향

◦ 남원시 대표 겨울철 관광 축제 성장을 위한 특색있는 콘텐츠 발굴

◦ 성탄절 나눔 실천 프로그램 개발 필요

◦ 다문화가족 참여 확대

□ 금후계획

◦ 기본계획 수립 및 준비	: `24. 7. ~ 11.

◦ 축제 개최	: `24. 12월 중

남원관광지 민간개발사업 추진현황

(계속사업)

작성부서: 관광과  과장: 노경록  팀장: 박봉용  담당자: 이동훈  전화: 6177

□ 추진근거

◦ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제86조 및 제88조, 시행령 제97조

◦ 「관광진흥법」제54조

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원관광지 및 함파우유원지 일원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년

◦ 사 업 비 : 383억원(민간자본)

◦ 사업내용

- 모노레일(8인승 20대, 총연장 2.44㎞), 짚와이어(총연장 1.26㎞)

- 어드벤처 : 짚타워(H=78m), 스카이워크

□ 추진실적

◦ 남원관광지 민간개발사업 투자협약 체결	: ‘19. 6. 5.

◦ 남원관광지 민간개발사업 실시협약(안) 의회 동의	: ‘20. 5. 8.

◦ 남원관광지 민간개발사업 실시협약 체결	: ‘20. 6. 4.

◦ 모노레일 및 짚와이어 공사 추진	: ‘20. 8 ~

◦ 남원관광지 민간개발사업 완료	: ‘22. 6. 27.

◦ 기부채납 및 사용수익허가 신청	: ‘22. 6. 28.

◦ 남원관광지 민간개발사업 특정감사 실시 안내	: ‘22. 7. 7.

◦ 남원관광지 민간개발사업 소송 제기	: ‘22. 7. 25.

- 손실·손해배상(금574,280천원) 지급 소송

◦ 특정감사 결과 및 영업 안내에 따른 유의사항 알림	: ‘22. 8. 29.

◦ 영업안내에 따른 운영개시 알림(남원테마파크)	: ‘22. 8. 31.

◦ 손해배상 소송 1차 변론준비기일	: ‘22. 10. 17.

◦ 전라북도행정심판위원회 심판청구 기각	: ‘22. 12. 28.

- 사건명 : 사용수익허가 의무이행 청구 [청구인 남원테마파크(주)]

◦ 준비서면 청구취지 및 청구원 변경	: ‘23. 1.

- 손실·손해배상(금574,280천원⟹금719,721천원) 지급 소송

◦ 손해배상 소송 변론준비기일(2차~5차)	: ‘23. 1. 16 ~ 7. 10.

◦ 손해배상 소송 변론기일(1차)	: ‘22. 9. 7.

◦ 손해배상 소송 변론기일(2차)	: ‘23. 10. 26.

□ 금후계획

◦ 손해배상소송 진행	: ‘23. 12. ~

남원 드래곤관광단지 조성사업

(계속사업)

작성부서: 관광과  과장: 노경록  팀장: 박봉용  담당자: 이동훈  전화: 6177

□ 추진근거

◦ 「관광진흥법」제52조 제6항 및 제54조 제3항

◦ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조 및 제32조, 시행령 제25조 제5항

□ 개    요

◦ 위    치 : 대산면 옥율리 산131번지 일원

◦ 총사업비 : 190,272백만원(민자100%)

◦ 사업내용 : 드래곤 관광단지 조성(A=801,785㎡)

- 가족･한옥호텔, 골프장(9홀), 실내·외 수영장, 아트뮤지엄 등

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2025년

◦ 사업시행자 : 신한레저㈜

□ 추진실적

◦ 관광단지 지정 및 조성계획 승인(전라북도) 통보/고시(남원시) : ‘18. 9. 3. / 9. 7.

◦ 관광단지 조성사업 착공	: ‘19. 1. 2.

◦ 드래곤관광단지 조성계획(변경) 고시(1차)	: ‘20. 6. 12.

◦ 드래곤관광단지 지정 및 조성계획(변경) 고시(2차)	: ‘21. 3. 12.

◦ 드래곤 관광단지 조성계획(변경) 고시(3차)	: ‘22. 6. 27.

◦ 체육시설업 조건부 등록 변경(공동명의 등록 ㈜골프존카운티)	: ‘22. 7.

◦ 드래곤 관광단지 조성계획(변경) 고시(4차)	: ‘22. 12. 30.

- 사업기간 연장(2022.12.31. ⟹ 2025.12.31.)

◦ 골프장 9홀 체육시설업(조건부)변경 등록(전북도 체육정책과): ‘22. 12. 30.

- 조건부 승인기간 연장(2022.12.31. ⟹ 2025.06.16.)

◦ 드래곤 관광단지 건축 계획설계(안) 설명회 개최	: ‘23. 5. 4.

◦ 드래곤 관광단지 지정(변경) 및 조성계획(변경) 고시 5차 : ‘23. 10. 6.

- 구역경계 변경없이 지적측량에 따른 면적조정(795,133㎡⟹801,785㎡)

□ 금후계획

◦ 관광단지 조성계획(변경)접수 및 완료(건축사항 반영)	: ‘23. 12.~ ‘24. 6.

◦ 건축 기본설계 완료 및 건축 인허가 절차 진행	: ‘23. 12.~ ‘24. 6.

남원 한옥 체험시설 조성사업

(계속사업)

작성부서: 관광과  과장: 노경록  팀장: 박봉용  담당자: 송기곤  전화: 6852

□ 추진근거

◦ 관광진흥법 제49조 제2항 및 같은 법 시행령 제42조

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원 쌍교동 191번지 일원(예루원 뒤편)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 4,724백만원(도비 1,750, 시비 2,974)

- 2023년도 사업비 : 1,000백만원(도비 500 시비 500)

- 2024년도 사업비 : 1,000백만원(도비 500 시비 500)

◦ 사업내용 : 숙박시설 및 지역 공예품 및 특산물 판매점 조성

□ 추진실적

◦ 제7차 전라북도 관광종합개발계획 수립 반영	: ‘21. 8.

◦ 2021년 제2차 지방재정투자심사의뢰	: ‘21. 11.

◦ 한옥 체험시설 활용방안 상세계획 수립	: ‘22. 3.

◦ 사업부지 매입(쌍교동 185번지 외 3필지)	: ‘22. 5. ~ ‘23. 5.

◦ 중기지방재정계획 반영	: ‘22. 10.

◦ 사업지 변경에 따른 공공건축 사업계획 재협의	: ‘22. 10.

◦ 관광자원개발사업 계획(사업지)변경 승인	: ‘23. 1.

◦ 한옥 체험시설조성사업 콘텐츠 개발용역 시행	: ‘23. 5.

◦ 한옥 체험시설 기본 및 실시설계용역 시행	: ‘23. 10.

㈜지랩건축사사무소 공모 선정(‛23. 10.)

□ 금후계획

◦ 한옥 체험시설 기본 및 실시설계용역 완료	: ‘24. 2.

◦ 한옥 체험시설 조성공사 착수 및 준공	: ‘23. 4. ~ ‘24. 12.

◦ 한옥 체험시설 조성공사 개관	: ‘25. 1.

지역 특화형 친환경 숙박시설 조성사업

(계속사업)

작성부서: 관광과  과장: 노경록  팀장: 박봉용  담당자: 송기곤  전화: 6852

□ 추진근거

◦ 관광진흥법 제76조(재정지원) 및 관광자원개발사업 보조금 관리지침

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원 금동 45번지 외 3필지(금동 52, 48-6, 쌍교동 118)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 9,400백만원(국 3,900, 시 5,500)※금동지구 특화재생(15억원) 포함

- 2023년도 사업비 : 7,500백만원(국비 3,000 시비 4,500)

◦ 사업내용 : 한옥 리모델링 및 증축, 한옥전통호텔조성

- 12동[연면적 869㎡/14객실(명지각 1관 4동 9실, 2관 8동 5실)]

□ 추진실적

◦ 22년 지역특화형 친환경 숙박시설 조성사업 공모선정 : ‘22. 2. 15.

◦ 도 재정투자 심사 승인	: ‘22. 6. 7.

◦ 건축 설계용역 착수	: ‘22. 7. ~ ‘23. 7.

◦ 명지각·명지호텔 상표출원	: ‘23. 2. 8.

◦ 사용수익허가가 선정[(주)스테이폴리오]	: ‘23. 3. 15.

◦ 건축 설계용역 납품	: ‘23. 7.

◦ 원가심사(전북도청) 및 일상감사(시)	: ‘23. 8.

◦ 지역특화형 친환경 숙박시설 조성공사 착공	: ‘23. 11.

□ 금후계획

◦ 지역특화형 친환경 숙박시설 조성공사 준공	: ‘23. 11. ~ ‘24. 8.

◦ 숙박시설 개관 및 운영	: ‘24. 9.

함파우유원지 디지털 테마파크 조성사업

(계속사업)

작성부서: 관광과  과장: 노경록  팀장: 박봉용  담당자: 이한올  전화: 6186

□ 추진근거

◦ 관광진흥법 제49조 제2항 및 같은 법 시행령 제42조

□ 개    요

◦ 위    치 : 함파우 유원지 일원(춘향테마파크)

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(3년)

◦ 총사업비 : 8,500백만원 (균이 4,250 시비 4,250)

- `24년 예산 : 1,100백만원(균이 550 시비 550)

◦ 사업내용

- 디지털테마파크 조성(춘향테마공원 리모델링, 야간경관 설치, 디지털 테마로드길 설치 등)

◦ 재원투자계획

(단위:백만원)

구분	합계	기투자 (~‘23)	재원투자기간				비고
			소계	‘24	‘25	‘26 이후
합계	8,500	200	8,300	1,100	7,200	0
균이	4,250	100	4,150	550	3,600	0
시비	4,250	100	4,150	550	3,600	0

□ 추진실적

◦ 제7차 전북권 관광개발계획 신규사업 반영	: ‘21. 7.

◦ 2022년 제3차 지방재정투자심사(전북도) 반영             : `22. 10.

◦ 함파우 유원지 · 남원관광지 마스터플랜 사전협의(6회)    : `23. 3. ~

◦ 제7차 전북권 관광개발사업 변경 승인 요청              : `23. 10. 4.

□ 금후계획

◦ 관련부서(관광시설사업소) 협의                     : `24. 1.

◦ 함파우 유원지 디지털테마파크(토목) 실시설계 용역 추진 : `24. 2. ~ 4.

◦ 행정절차 이행                                     : `24. 3. ~ 6.

◦ 함파우 유원지 디지털테마파크(토목) 공사 추진      : `24. 5. ~ 12.

고소바위공원 국민여가캠핑장 조성사업

(계속사업)

작성부서: 관광과  과장: 노경록  팀장: 박봉용  담당자: 이희열  전화: 6178

□ 추진근거

◦ 관광진흥법 제5조(허가와 신고) 및 관광진흥법 시행령제5조[(야영장)등록 기준]

◦ 관광진흥법 제76조(재정지원) 및 관광자원개발사업 보조금 관리지침

□ 개    요

◦ 위    치 : 산동면 고소암공원 (대기리 404-1번지 일원)

◦ 사업기간 : 2022. 01. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 :「관광진흥법 시행령」제5조[(야영장)등록 기준] 시설 조성

⇒ △화장실, △샤워장, △관리동, △주차장, △상·하수도 시설

◦ 사 업 비 : 1,100백만원(도비 500 시비 600)

- ‘24년 사업비 : 600백만원 (명시이월, 도비 300 시비 300)

□ 추진실적

◦ 캠핑장 조성관련 2021년 랜선 시정설명회 건의	: ‘21. 3. 25.

◦ 관련부서 협의 실시	: ‘22. 9.

- 개발행위, 산지전용, 하천, 상·하수도 관련 등

◦ 사업 부지 측량 및 감정평가 후, 매입 (2필지)	: ‘22. 12.

◦ (주민공청회) 3회 실시	: ‘23. 4. ~ 12.

◦ (건축) 실시설계 용역 추진	: ‘23. 4 ~

◦ (용역) 산지전용, 소규모환경 및 재해평가 용역 완료  : ‘23. 4. ~ 12.

◦ (토목) 상·하수도 매설공사 시행	: ‘23. 5. ~  12.

◦ (토목, 전기·통신, 건축) 조성사업 시행	: ‘23. 12. ~

□ 금후계획

◦ (토목,건축,전기·통신) 야영장 시설조성 공사 준공	: ‘24.  7.

◦ 야영장 인·허가 등록 [관광진흥법상–일반야영장]	: ‘24.  8.

함파우아트밸리 조성사업(키즈랜드,아카이브관)

(신규사업)

작성부서: 관광과  과장: 노경록  팀장: 박봉용  담당자: 박슬기  전화: 6179

□ 추진근거

◦「공유재산 및 물품관리법」제10조 및 같은법 시행령 제7조

◦「전라북도 동부권 발전지원에 관한 조례」제4조

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원관광지 및 함파우유원지 일원

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 17,900백만원(균이 9,050, 도비 4,325, 시비 4,525)

◦ 사업내용 : 키즈 아트랜드, 아트 아카이브 전시

□ 추진계획

◦ 함파우 복합문화관 전시시설 입찰공고(재)       : ‘23. 12월 중

◦ 함파우 복합문화관 전시시설 조성 용역 착수   : ‘23. 12월 중

◦ 함파우 복합문화관 전시시설 추진             : ‘23. 12. ~ ‘24. 12.

◦ 키즈랜드 실시설계용역 추진                  : ‘24. 2. ~

□ 기대효과

◦ 인터렉티브 콘텐츠를 통한 유니크한 경험 제공

- 콘텐츠 생산 및 활용의 경험을 통해 관광객 스스로 관광지를 변화시키는 유니크한 경험을 할 수 있음

◦ 관광객 체류시간 증대 및 편의성 향상

- 산재한 관광지의 공간적 연계를 통해 관광객 체류시간 증대 및 관광 편의성을 향상시켜 지역 관광사업 성장 도모

옛다솜이야기원 조성사업

(계속사업)

작성부서: 관광과  과장: 노경록  팀장: 박봉용  담당자: 박슬기  전화: 6179

□ 추진근거

◦「관광진흥법」제49조 제2항

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원관광지 및 함파우유원지 일원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 22,506백만원(국비 8,558, 시비 13,948)

◦ 사업내용

- 기반 : 정원 조성(A=34,112㎡) / 기반시설(도로, 주차장) 조성(A=24,368㎡)

- 건축 : 사랑체험관 건립(면적, 대지- : 12,123㎡, 건축- 2,203.55㎡, 연- 2,168.73㎡)

□ 추진실적

◦ 옛다솜이야기원 기본 및 실시설계 용역 완료	: ‘19. 6. 24.

◦ 옛다솜이야기원 사랑체험관 건립공사 착공	: ‘21. 3. 4.

◦ 옛다솜이야기원 사랑체험관 건립공사 1차분 준공	: ‘22. 8. 25.

◦ 옛다솜이야기원 사랑체험관 건립공사 2차분 착공	: ‘22. 9. 5.

◦ 전시시설 설계등을 위한 제1차 추가경정예산 편성 (10억원)       : ‘23. 3. 27.

◦ 옛다솜이야기원 사랑체험관 건립공사 3차분 착공	: ‘23. 5. 3.

◦ 옛다솜이야기원 사랑체험관 건립공사(건축) 준공	: ‘23. 12. 9.

□ 금후계획

◦ 사랑체험관 전시시설계획 용역 추진	: `23. 12.

◦ 내부 전시시설 설치 추진	: `24년 중

◦ 사랑체험관 개관	: `24년 중

산악용 친환경 운송시스템 시범사업

(계속사업)

작성부서 : 관광과  부서장 : 노경록  팀장 : 황이연  담당자 : 권신명 전화 : 6159

□ 추진근거

◦ 궤도운송법 제4조의2(산악벽지형 궤도에 대한 궤도사업의 승인)

◦ 궤도운송법 제31조의2 (산악벽지형 궤도사업자에 대한 지원)

□ 개    요

◦ 위    치 : 주천면 고기삼거리 ~ 고기댐 일원 (L=1km)

◦ 사 업 비 : 31,706백만원 (국비 27,852, 시비 3,854)

◦ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.

◦ 시행기관 : 국토교통부(소관부처)·한국철도기술연구원(주관연구기관)·남원시(유치기관)

◦ 사업내용 : 시범노선 건설, 차량 제작(3량 1편성), 시스템 검증 및 시범운영

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 착수	:‘23.  3. 31.

◦ 시범사업 관련 관련기관(전북도청 도로공항철도과) 협의	:‘23.  4. 20.

◦ 국토부 시범사업 대상지 제2차 현지답사	:‘23.  5. 17.

◦ 시범사업 기반 조성공사 지반조사 용역 착수	:‘23.  6. 12.

◦ 소규모 환경영향평가, 소규모 재해영향평가 용역 착수	:‘23.  7.~ 8.

◦ 비관리청 사업 인허가 관련 도청 출장(4회)	:‘23.  8.~10.

◦ 비관리청 사업 인허가 관련 철기연 방문 협의(의왕)           :‘23. 10. 26.

◦ 비관리청 사업 인허가 사전협의 완료	:‘23. 11. 17.

□ 금후계획

◦ 인허가 절차 이행	:‘23. 12.~‘24. 3.

◦ 시범노선 기반시설 조성 공사 발주	:‘23. 3. ~‘24. 4.

◦ 시범노선 부설 및 완성 차량 제작	:‘23. 4. ~‘24. 12.

◦ 시범노선 시범운행 및 시스템 성능 검증	:‘25. 1. ~‘26. 12.