상수도사업소

□ 2023년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

연번	감사결과			지 적 사 항	추 진 상 황	처리결과
	시정	처리	권고			진행	완료	불가
계 13건	2건	4건	7건			7건	6건	0건
1	○			◦오류, 누락 등 자료검토 미흡한 점 있음 ◦추후 자료 제출 시 철저히 검토할 것(공통)	◦추후 자료 제출 시 철저히 검토하겠음		○
2	○			◦각종 위원회 위촉직 위원 중 특정 성별이 60%를 초과하지 않도록 구성하여야 함 [양성평등기본법 준수] ◦전문성을 고려해 위촉할 것(공통)	◦수돗물 수질평가위원회 구성 - 위원 10명 (당연직3, 위촉직7) 중 7명 전문위원 위촉 *위촉직 7명 (남성3, 여성4)		○
3		○		◦사용하지 않는 조례는 폐지하고, 필요시 시행규칙을 정하여 사용할 것(공통)	◦사용하지 않는 조례는 폐지하고 필요시 시행규칙을 정하여 업무를 추진하도록 노력하겠음		○
4			○	◦연말이 다가오는 시점임에도 집행률이 저조함 ◦조기집행에 만전을 기할 것 ◦연내 집행 가능여부를 면밀히 검토하여 예산을 편성할 것(공통)	◦연내 집행 가능 여부를 면밀히 검토하여 예산을 편성하고 조기 집행 할 수 있도록 노력하겠음.	○
5			○	◦각종 위원회 운영실적이 저조함 ◦시기별 운영에 만전을 기할 것(공통)	◦수돗물 수질평가위원회를 2023년 상·하반기 2회 실시하였으며, 2024년도에도 시기에 맞게 실시하겠음.		○
6			○	◦세외수입 체납액 징수에 만전을 기할 것(공통)	◦효율적인 체납관리를 위해 상시 징수팀을 운영하여 분납 독려 및 고질 체납자에 대한 강력한 행정처분 및 단수 조치를 통해 체납액 징수에 최선을 다하고자 함. ◦ 징수 불가능한 체납액은 상반기 중 결손처리를 통해 불필요한 예산 및 행정력 낭비를 지양하겠음		○
7			○	◦수질검사결과를 적극적으로 홍보할 것	◦매월 1회 수질검사 결과를 시 홈페이지, 시내 전광판, 아파트 게시판 등 홍보를 시행하고 있음. ◦개량사업이 완료되는 하반기부터 정수장 견학을 적극 추진 하여 수돗물 공급과정 및 수돗물 우수성에 대해 홍보가 될 수 있도록 하겠음.	○
8			○	◦현재 다자녀 요금 감면 기준 3명임 ◦다자녀 기준 2명으로 변경 검토할 것	◦다방면으로 급증하는 요금 감면 요구는 일반 회계 지원 폭을 키워 그 부담이 고스란히 시민의 몫으로 전가 될 수 있으며, ◦지난 12년간 상수도 요금 동결로 현실화율이 37.1%로 저조하여 경영적자 개선이 필요한 상황으로 ◦상수도 요금 인상 방안 계획 용역 결과 이후 종합적으로 다자녀 감면을 검토하겠음	○
9			○	◦시민들이 믿고 마실 수 있도록 국제규격 인증취득할 것	◦현 개량공사 진행 중으로 인증 취득 불가능. ◦개량공사가 완료되면 추진 검토 하겠음.	○
10			○	◦귀농귀촌자의 정착을 위해 독립가구 상수도 공급 검토할 것	◦현재 예산의 한계로 집단화를 이루고 있는 마을 단위에 대하여 상수도 공급을 추진하고 있음. ◦독립가옥은 관내 산발적으로 광범위하게 분포하고 있어 상수도 공급에 어려움이 있으나, 향후 가옥의 분포도가 높고, 기존 관로와 인접하여 위치한 지역을 위주로 공급이 될 수 있도록 노력하겠음.	○
11		○		◦시민들의 근린공원 이용량 많음 ◦경관을 고려해 월락정수장 담장을 조성할 것	◦경관을 고려해 담장을 선택하여 ‘24.4월 중 설치 완료 예정임.	○
12		○		◦소외 받는 시민이 없도록 단독가구 상수도 공급을 검토해야 함 ◦예산 절감을 위해 단독가구 상수도 공급 시 환경사업소와 협의해 공사할 것	◦현재 예산의 한계로 집단화를 이루고 있는 마을 단위에 대하여 상수도 공급을 추진하고 있음. ◦독립가옥은 관내 산발적으로 광범위하게 분포하고 있어 상수도 공급에 어려움이 있으나, 향후 가옥의 분포도가 높고, 기존 관로와 인접하여 위치한 지역을 위주로 공급이 될수 있도록 노력하겠음. ◦ 공사시 예산이 낭비 되지 않도록 타부서(환경사업소 등)와 병행으로 사업추진토록 노력하겠음	○
13		○		◦2022년 사고이월사업 예산이 불용 되지 않도록 업무 추진에 만전을 기할 것	◦2022년 사고이월사업 추진 완료하였음		○

□ 2023년도 명시․사고 이월사업 추진상황

(단위 : 천원)

연번	사업명	예산액 (A)	집행액 (B)	이월액(C=A-B)			추진상황 및 금후계획
				계(C)	명시	사고
	합 계	22,397,623	13,028,527	9,369,096	732,686	8,636,410
1	광역상수도마을권 상수도사업 (아영 율동)	732,686	0 (0%)	732,686 (100%)	732,686 (100%)	0 (0%)	◦2023. 12.~ 실시설계 ◦2024. 10. 준공예정
2	2023년 회계연도 상수도공기업 특별회계감사인 선임 및 용역	7,000	0 (0%)	7,000 (100%)	0 (0%)	7,000 (100%)	-기초자료 수집 : 2024. 02 ~ 03. -회계감사 및 원가산정 : 2024. 04 -상수도공기업 특별회계(검토) 결산 : 2024. 06
3	취정수시설물 유지관리보수	2,598,246	2,353,963 (91%)	244,283 (9%)	0 (0%)	244,283 (9%)	◦동절기 공사 중지 ◦재착공예정 : 2024. 3월초 예정 ◦2024. 5. 준공 예정
4	노후정수장 정비	4,449,931	1,466,891 (33%)	2,983,040 (67%)	0 (0%)	2,983,040 (67%)	◦동절기 공사 중지 ◦재착공예정 : 2024. 2월중순 예정 ◦2024. 6. 준공 예정
5	상수도시설 확충사업	904,260	723,000 (80%)	181,260 (20%)	0 (0%)	181,260 (20%)	◦2024. 12. 준공 예정 (수도정비기본계획변경수립용역)
6	배수관포설 공사	1,793,520	1,722,730 (96%)	70,790 (4%)	0 (0%)	70,790 (4%)	◦2024. 1. 완료(gis db 용역) ◦2024. 1. 준공(주천 용담)
7	농어촌생활 용수 개발사업	3,985,600	1,418,931 (36%)	2,566,669 (64%)	0 (0%)	2,566,669 (64%)	◦동절기 공사 중지 ◦재착공예정 : 2024. 3월초 예정 ◦2024. 10. 준공 예정
8	노후 상수도관 교체사업	2,984,700	2,005,397 (67%)	979,303 (33%)	0 (0%)	979,303 (33%)	◦2024. 사업 준공 : 979백만원 지출 - 4월 : 노암 3통, 312백만원 - 5월 : 도통동우체국, 430백만원 - 9월 : 관망도 정확도 개선, 237백만원
9	누수다발지역 상수관로 정비사업(자본)	461,652	448,949 (97%)	12,703 (3%)	0 (0%)	12,703 (3%)	◦2024. 6. 관급자재 대금지급 - 3월: 누수다발지역 사업추진을 위한 관급자재(상수도관) 구입 - 5월: 관급자재(상수도관) 검수금 지급
10	스마트 관망관리 인프라 구축사업	2,005,596	1,369,055 (68%)	636,541 (32%)	0 (0%)	636,541 (32%)	◦2024. 5. 사업 준공 (스마트 관망)
11	마을 상수도 시설개량	198,560	126,204 (63%)	72,356 (37%)	0 (0%)	72,356 (37%)	◦2024. 6. 관급자재 대금지급(아영 율동)
12	소규모 수도 노후화시설 개량사업지원	566,409	318,639 (56%)	247,770 (44%)	0 (0%)	247,770 (44%)	◦2023. 12. 19. 공사중지 ◦2024. 6. 준공예정 (주생 내동)
13	송동 동양마을 상수도정비공사	380,000	228,050 (60%)	151,950 (40%)	0 (0%)	151,950 (40%)	◦2023. 12. 1. 공사중지 ◦2024. 6. 준공예정 (인월 도장)
14	개인급수공사	833,063	718,973 (86%)	114,090 (14%)	0 (0%)	114,090 (14%)	◦2024. 6. 관급자재 대금 지급 및 설계비 지급예정(주생 내동)
15	광역상수도마을권상수도사업	496,400	127,745 (26%)	368,655 (74%)	0 (0%)	368,655 (74%)	◦2024. 1. 3. 공사중지 ◦2024. 6. 준공예정 (운봉 용산)