2025. 1.

2025년도 주요업무 계획

환 경 사 업 소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2024년 주요업무 결산

□ 2025년 중점 추진방향

□ 2025년 주요업무 계획

◦ 물 재이용 관리계획 수립용역

◦ 요천생태습지공원 운영·관리

◦ 하수도 세입재원 확충

◦ 인월 노후 하수관로 정비사업

◦ 남원처리구역 하수관로 정비사업

◦ 아영 인풍지구 하수관로 정비사업

◦ 노암 노후 하수관로 정비사업

◦ 산내 부운 공공하수처리시설 설치사업

◦ 운봉지구 하수관로 정비사업

◦ 남원 농어촌마을하수도 하수관로 정비사업

◦ 사매 대율지구 마을하수도 설치사업

◦ 수지 용강지구 마을하수도 설치사업

◦ 남원하수·소규모하수·하수슬러지처리시설 관리대행

◦ 하수슬러지처리시설 악취방지시설 개선공사

◦ 수지 호곡 마을하수처리시설 방류관로 사업

일  반  현  황

□ 기    구

			환경사업소장
			김 경 진
하수경영팀장			하수시설팀장			하수처리팀장
주 병 열			김 상 규			이 재 근
∘행정 종합계획 수립 ∘ 공기업특별회계 운영·관리 (입찰, 계약, 지출, 결산, 예산 등) ∘공공시설물 관리 ∘ 하수도요금 부과징수 및 현실화 ∘ 하수도 경영평가 및 실태점검 ∘요천생태습지공원 관리 ∘물재이용시설 관리			∘하수도정비 기본계획 수립 ∘하수관로 정비사업 추진 (남원처리구역외 5곳, 운봉지구 등) ∘하수중계펌프장 관리 ∘ 하수도 유지관리 및 긴급보수 ∘ 배수설비 설치 신고 및 관리 ∘ 하수도 원인자부담금 부과·징수 ∘ 하수관로 GIS DB 구축 및 관망도 정비			∘하수처리 종합계획 수립 ∘ 남원하수 ․ 분뇨 ․ 음식물처리시설 관리대행 감독 ∘ 슬러지처리시설 관리대행 감독 ∘ 운봉 ․ 인월 ․ 소규모하수처리장 관리대행 감독 ∘ 소규모마을하수시설 개량사업 ∘ 하수처리장 기술진단 및 악취기술진단 ∘ 하수처리장 구조물, 전기설비 정밀진단 ∘ 남원 ․ 운봉 ․ 인월하수처리장 수질TMS 관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	13	1	3	3	4	2	청 경 1 환경관리원 2 공 무 직 3
현 원	13	1	6	3	2	1	청 경 1 환경관리원 2 공 무 직 3
증 감	-	-	3	-	△2	△1

2024년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ (하수관로 정비) 하수도 인프라 확충 및 주거환경 개선 - 하수관로 정비 6건 180억, 노후 하수관로 정비 2건 7.6억 - 하수처리시설 신축 1건 8억, 농촌마을 하수처리 3건 26억원 ◦ (하수처리장 운영 전문화) 안정적 처리장 운영으로 수질 환경 보전 - 공공하수처리시설 관리대행 3건 63억, 스마트 처리장 구축 40억원 - 수질원격감시스시템(TMS) 운영 3건 1.56억, 노후시설물 정비 5.2억원 ◦ (국·도비 확보) 하수관로 확충 및 악취방지 시설 국·도비 확보 - 하수슬러지 처리시설 악취방지시설(RTO) 도비 특별교부금 5억원 확보 - 하수관로 정비사업 국·도비(국비 100억, 도비 27억) 확보 ◦ (효율적 공기업 경영) 경쟁력 있는 하수도 공기업 운영관리 - 행안부 공기업 신속집행 평가 결과 ⇒ “장관상” 수상

□ 하수도 인프라 확충 및 주거환경 개선

정비사업 대상	사업량	대상가구	총 사업비 (백만원)	공정률	비고
합 계	L=75.21km	1,680	110,941
남원처리구역 하수관로	L=25.75km	664	27,253	40.9%
아영 인풍지구 하수관로	L=18.70km	499	19,556	37.1%
남원일반산업단지 주변마을	L= 5.53km	103	7,735	100%
운봉지구 하수관로	L= 8.20km	200	8,700	설계용역
농어촌마을 하수관로	L= 4.53km	-	6,300	설계용역
사매 대율지구 하수관로	L= 3.08km	105	6,247	발주중
수지 용강지구 하수관로	L= 2.96km	109	5,664	발주중
산내 부운 공공하수처리시설	Q=800㎥/일	-	14,486	설계용역
노암 노후 하수관로	L= 9.11km	-	15,000	설계용역

◦ 국가예산확보 : `25년 신규사업 인월노후 하수관로 정비

(총사업비 168억원 / 국비 101, 도비 33, 시비 33)

◦ 정주여건개선 : 일반산업단지 주변마을 하수관로 정비완료

(사매 덕평 외 3개마을 103가구 하수도연결 완료)

□ 안정적인 하수처리장 운영으로 수질 환경 보전

◦ 인공지능 제어․계측기능을 갖춘 스마트 하수처리장 구축(40억원)

◦ 실시간 수질원격감시제어 시스템(TMS) 운영 : 3개소(남원, 운봉, 인월)

◦ 바이오가스 활용으로 연간 에너지 절감 2.4억원

◦ 소규모 하수처리 효율개선 기술진단 : 8개소 / 181백만원

◦ 운봉, 인월 악취기술진단 : 2개소 / 37백만원

◦ 남원공공하수처리시설 노후 건물·시설물 정비 추진 : 6건 / 520백만원

□ 농촌 마을 하수처리 환경개선

◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업 추진으로 안정적 수질관리

- 주천면 내기 하수처리장 전면 개량 : 30㎥/일, 455백만원

- 산내면 대정 하수처리장 공법 개량 : 130㎥/일, 4억원

◦ 민간 관리대행을 통한 전문성 확보 : 하수처리장 64, 중계펌프장 78

◦ 노후화시설 정비로 효율적이고 체계적인 환경기초시설 운영

□ 경쟁력 있는 하수도 공기업 운영․관리

◦ 하수도요금 및 원인자부담금 부과․징수로 하수도 세입재원 확충

◦ 하수도요금 현실화 추진 및 공기업특별회계 안정적 운영

◦ 물의 재이용을 계획적, 체계적으로 관리하기 위한 종합계획 수립 용역 착수

□ 환경기초시설 인식 전환프로그램 추진 및 생태복원 체험장 운영

◦ 유아, 초․중․고등학생 대상 하수처리장 견학 프로그램 운영 : 12회(212명)

◦ 요천생태습지공원 및 애견놀이터 운영관리 : 145,298㎡

- 방문객 현황 : ‵22년 30,993명 < ‵23년 28,633명 < ‵24년 46,577명(12월 기준)

- 생태탐방로, 수생식물 관찰데크, 취사구역 등 지속 운영관리

- 반기별 방문객 만족도 조사를 통한 의견수렴 및 시설개선 추진

	아쉬운 점
◦ 지속적인 하수시설 공사를 통한 주거환경 개선 및 삶의 질 제고 ◦ 도시숲 재생사업으로 생태공원 주요시설(파크 골프장,야구장 등) 공원화 추진 ◦ 악취방지시설 개선을 통화 쾌적한 생태습지 공원 여가힐링 공간제공

2025년 중점 추진방향

수질개선 SOC 확충을 통한 안정적인 하수처리

	중 점 추 진 과 제
◦ 하수도 세입재원 및 국가예산 확보를 통한 하수도 사업 확대 추진 - 하수도 수용가 전수조사를 통한 누락 사용료 부과․징수 - 체납자 독촉고지 및 압류처분 등을 통한 미납세입 확보 - 국가예산 확보를 통한 하수도 신규사업 추진 □ 인월 노후 하수관로 정비사업(굴착보수 L=7.1km, 부분보수 696개소) ◦ 하수기반시설 정비를 통한 지역주민 하수도 복지실현 및 정주여건 개선 - 하수관로 정비사업 지속 추진(2개소, 168억) □ 남원처리구역, 아영 인풍지구 하수관로 정비 - 농어촌 취약지역, 소외지역 하수관로 정비사업 진행(4개소, 43억) □ 운봉, 사매 대율, 수지 용강, 농어촌 마을하수도 정비사업 - 노후 하수관로 정비(노암 노후 하수관로 외 1개소, 20억) ◦ 공공하수처리시설(남원하수, 분뇨, 음식물) 관리대행을 통한 전문화 - 전문적인 민간업체에 시설 운영 관리대행으로 수질 서비스 질 상승 - 효율성 증대에 따른 에너지 절감 및 시설 유지비용 감소 ◦ 하수슬러지처리시설 악취방지시설 개선공사를 통한 악취 저감 추진 - 25년 6월 악취방지시설 개선공사 완료하여 쾌적한 환경조성 - 생태공원(파크골프장, 야구장, 애견놀이터 등) 및 인근 마을 악취 민원 해소

2025년 주요업무 계획

물 재이용 관리계획 수립용역

(계속사업)

작성부서 : 환경사업소  부서장 : 김경진  팀장 : 주병열  담당자 : 유종민 전화 : 5803

□ 개    요

◦ 법적근거 : 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」제6조

◦ 사업기간 : 2024. 7. ~ 2025. 9.

◦ 사 업 비 : 546백만원(시비 546)

◦ 계획기간 : 20년, 5년단위 타당성평가 실시

◦ 사업내용 : 남원시 전체 행정구역 대상 물 재이용 관리계획 수립

- 기초조사

- 물 재이용 현황 및 목표설정

- 물 재이용에 따른 하천영향 분석

- 물 재이용 사업계획 수립

- 물 재이용 사업시행 및 재정계획

- 물 재이용 교육 및 홍보, 추진성과 평가

□ 추진실적

◦ 예산편성을 위한 학술용역 심의(가결)	: ‘23. 11.

◦ 2024년 본예산 편성 요구	: ‘23. 12.

◦ 용역 추진계획 수립	: ‘24. 1.

◦ 물 재이용 관리계획 수립용역 시행	: ‘24. 2. ~ 12.

◦ 물 재이용 관리계획 착수보고회	: ‘24. 8.

◦ 물 재이용 관리계획 수립용역 공정보고(매월)	: ‘24. 9. ~ 12.

□ 금후계획

◦ 중간보고 및 준공보고회	: ‘25. 1. ~ 5.

◦ 준공예정일	: ‘25. 7월까지.

요천생태습지공원 운영·관리

(계속사업)

작성부서 : 환경사업소  부서장 : 김경진  팀장 : 주병열  담당자 : 김지훈 전화 : 5809

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 중동리 1295번지 일원

◦ 공원규모 : 145,298㎡(공원부 75,562㎡ / 습지부 69,736㎡)

- 주요시설 : 야구장, 생태탐방로, 모정, 애견놀이터, 수생식물 등 관찰데크 등

◦ 관리인력 : 환경관리원 2명	*공공근로 (2명)

◦ 방문객 수 : 31,626명(공원 22,367명, 애견놀이터 9,259명)   *‘23. 12월 기준

□ 추진실적

◦ 생태습지 및 애견놀이터 시설물 보수 및 정비

- 생태습지공원 주차안내 등 알림현수막 보강

- 주변지역(중동마을 8명) 주민과 연계한 잡초제거 시행

- 시설물 보수(모정 도색 ․ 음수대 ․ 제수변, 산책길재포장, 징검다리 등)

- 모정, 개수대, 데크보수, 시비작업(1,559㎡), 수목 약재살포(32,193㎡)

◦ 파크골프장(18홀) 준공에 따른 운영‧관리 업무 이관(교육체육과)

◦ 춘향제 기간 무료 차박 캠핑장 및 취사 시설 운영(3,000㎡)

◦ 야구장 사용협약체결( ́22.2.~ ́25.2.) 및 동호인 연중 리그전 개최 운영

◦ 습지부 기후대응 도시숲 조성사업 시행(24. 11. 27 ~ 25. 05. 27)

□ 금후계획

◦ 시설물 보수 및 예초작업 등 요천생태습지공원 지속 정비

◦ 하수처리장과 연계한 생태환경학습장 운영 : 유치원, 초·중·고등학교 등

◦ 생태복원 현황 파악을 위한 수질검사 실시(7개 항목 / 분기별 4개소)

하수도 세입재원 확충

(계속사업)

작성부서 : 환경사업소  부서장 : 김경진  팀장 : 주병열  담당자 : 김  건 전화 : 5804

□ 추진근거

◦「하수도법」제65조(사용료 등)

◦「남원시 하수도 사용 조례」제13조(공공하수도 사용료)

□ 개    요

◦ 하수도 세입재원 부과․징수 현황

2024. 1. 1. ~ 11. 30. 기준 (단위 : 천원)

구 분	부과액	징수액	징수율	체납액	비 고
합 계	5,591,623	5,433,674	98.5%	243,948
상수도분	4,290,306	4,141,903	96.5%	148,403
지하수분	388,878	379,332	97.5%	95,545
원인자부담금	857,733	857,733	100.0%	-
기타수입	54,706	54,706	100.0%	-	불용품 매각 등

□ 추진실적

◦ 하수도 사용료 및 원인자부담금 단가 공고	: ‘24. 1.

- 3단계 하수도 요금단가 인상 완료(평균 인상률 18.4%)

◦ 하수도 수용가 검침계 전수조사를 통한 요금 조정액 징수	: 24. 2.~12.

- (‘24.11월 기준) 33개 신규수용가 등록 후 요금 징수

□ 금후계획

◦ 광역상수도 보급에 따라 하수도 사용료 미부과 지역 신규 부과 추진

- 인월(장평), 아영(일대), 산내(달궁, 대정, 반선, 부운 등)

◦ 체납자 독촉고지 및 압류처분 등을 통한 하수도 사용료 미납분 징수

인월 노후 하수관로 정비사업

(신규사업)

작성부서 : 환경사업소  부서장 : 김경진  팀장 : 김상규  담당자 : 김황연  전화 : 5820

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 2021. 3. ~ 2023. 3. 시행한 노후 하수관로 정밀조사 결과

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2025년 ~ 2028년(4개년)

◦ 위    치 : 남원시 인월면 일원

◦ 총사업비 : 16,873백만원(국비 10,124 / 도비 3,375 / 시비 3,375)

- 25년 사업비 : 667백만원(국비 400 / 도비 133.3 / 시비 133.3)

◦ 사업내용 : 굴착보수 L=7.1km, 부분보수 696개소 등

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 노후 하수관로 정밀조사 용역	: ‘21. 3. ~ ‘23. 3.

◦ 신규사업 선정	: ‘24. 12.

□ 추진계획

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: ‘25. 1. ~ 25. 12.

◦ 환경부 재원협의	: ‘25. 9. ~ 10.

◦ 원가심사(조달청) 및 계약의뢰	: ‘25. 11. ~ 12.

◦ 공사 시행	: ‘26. 1. ~ ‘28. 12.

□ 기대효과

◦ 하수관로 정비 및 보수로 인월면 주민들의 쾌적한 정주여건 개선

◦ 불명수 저감 등 안정적인 하수처리로 하천생태계 보전

남원처리구역 하수관로 정비사업

(계속사업)

작성부서 : 환경사업소  부서장 : 김경진  팀장 : 김상규  담당자 : 박봉용  전화 : 5811

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 남원시 하수도정비 기본계획(2017.2.)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2026년(6개년)

◦ 위    치 : 남원시 주천면 용담 외 15개 마을

- 주천(용담ㆍ안곡), 송동(태동), 주생(부동ㆍ중동ㆍ상동ㆍ대지ㆍ소지ㆍ제천ㆍ서만), 대산(서원초), 산동(목동), 신촌동, 왕정동(화정ㆍ한우물), 광치동(광석)

◦ 총사업비 : 27,253백만원(국비 19,079 / 시비 8,174)

- ‘25년 사업비 : 5,937백만원(국비 4,156 / 시비 1,781)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=25.754km, 배수설비 664가구

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 착수	: ‘20. 6.

◦ 환경부 재원 협의	: ‘22. 3. ~ 4.

◦ 실시설계 경제성 검토(VE) 용역 시행	: ‘22. 5. ~ 6.

◦ 지방건설기술심의(전북특자도)	: ‘22. 9. 27.

◦ 공사 시행(1차분)                            : ‘23. 3. 06. ~ 12. 10.

◦ 공사 시행(2차분)                            : ‘24. 3. 11. ~ 12. 25.

- 공정율(40.93%) : 광석, 목동마을 사업추진 중

□ 추진계획

◦ 전체분 공사완료	: ‘26. 12.

아영 인풍지구 하수관로 정비사업

(계속사업)

작성부서 : 환경사업소  부서장 : 김경진  팀장 : 김상규  담당자 : 박봉용  전화 : 5811

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 남원시 하수도정비 기본계획(2017.2.)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2026년(6개년)

◦ 위    치 : 남원시 아영면, 인월면 일원

- 아영 : 봉대ㆍ외인ㆍ내인ㆍ매산ㆍ서갈ㆍ동갈

- 인월 : 덕실ㆍ연실ㆍ자래ㆍ외건ㆍ내건ㆍ지산ㆍ흥부놀부촌ㆍ흥부골

◦ 총사업비 : 19,556백만원(국비 12,585 / 시비 6,971)

- ‘25년 사업비 : 10,921백만원(국비 7,645 / 시비 3,276)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=18.7km, 배수설비 499가구

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 착수	: ‘20. 6.

◦ 환경부 재원 협의	: ‘22. 3. ~ 4.

◦ 실시설계 경제성 검토(VE) 용역 시행	: ‘22. 5. ~ 6.

◦ 지방건설기술심의(전북특자도)	: ‘22. 9. 27.

◦ 공사 시행(1차분)                            : ‘23. 1. 16. ~ 09. 29.

◦ 공사 시행(2차분)                            : ‘24. 3. 11. ~ 12. 25.

- 공정율(37.12%) : 외건, 자래, 내인마을 사업추진 중

□ 추진계획

◦ 전체분 공사완료	: ‘26. 12.

노암 노후 하수관로 정비사업

(계속사업)

작성부서 : 환경사업소  부서장 : 김경진  팀장 : 김상규  담당자 : 김상규  전화 : 5810

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 2021. 3. ~ 2023. 3. 시행한 노후 하수관로 정밀조사 결과

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2024 ~ 2028년(5개년)

◦ 위    치 : 남원시 노암동 일원

◦ 총사업비 : 15,000백만원 (국비 9,000 /도비 3,000 /시비 3,000)

-‘25년 사업비 : 1,360백만원 (국비 816 /도비 272 /시비 272)

◦ 사업내용 : 노후하수관로 L=9.11㎞, 부분 보수 2,465개소

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 노후 하수관로 정밀조사 용역	: ‘21. 3. ~ ‘23. 3.

◦ 신규사업 선정	: ‘23. 10. 21.

◦ 실시설계 업체 선정 입찰공고	: ‘24. 4. ~ 5.

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: ‘24. 6. ~ 25. 9.

□ 추진계획

◦ 환경부 재원협의	: ‘25. 9. ~ 11.

◦ 원가심사(조달청) 및 계약의뢰	: ‘25. 11. ~ 12.

◦ 공사 시행	: ‘26. 1. ~ ‘28. 12.

산내 부운 공공하수처리시설 설치사업

(계속사업)

작성부서 : 환경사업소  부서장 : 김경진  팀장 : 김상규  담당자 : 김상규  전화 : 5810

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 남원시 하수도정비 기본계획(2017.2.)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2024 ~ 2028년(5개년)

◦ 위    치 : 남원시 산내면 부운리 144번지(달궁ㆍ덕동ㆍ학천 외2)

◦ 총사업비 : 14,486백만원(국비 8,692, 도비 2,897, 시비 2,897)

- ‘25년 사업비 : 722백만원(국비 433 /도비 144.3/ 시비 144.3)

◦ 사업내용 : 하수처리시설 설치 1개소(Q=800㎥/일)

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 하수처리장 기술진단	: ‘19. 8. ~ ‘20. 6.

◦ 신규사업 선정	: ‘23. 10. 20.

◦ 실시설계 업체 선정 입찰공고	: ‘24. 4. ~ 5.

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: ‘24. 6. ~ ‘25. 9.

□ 추진계획

◦ 환경부 재원협의	: ‘25. 9. ~ 11.

◦ 원가심사(조달청) 및 계약의뢰	: ‘25. 11. ~ 12.

◦ 공사 시행	: ‘26. 1. ~ ‘28. 12.

운봉지구 하수관로 정비사업

(계속사업)

작성부서 : 환경사업소  부서장 : 김경진  팀장 : 김상규  담당자 : 김상규  전화 : 5810

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 남원시 하수도정비 기본계획(2017.2.)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4개년)

◦ 위    치 : 남원시 운봉읍 일원(엄계, 삼산, 행정, 산덕, 유평, 용은, 가장, 덕산, 공안, 수월)

◦ 총사업비 : 8,700백만원(국비 5,220 / 도비 1,740 / 시비 1,740)

- ‘25년 사업비 : 1,753백만원(국비 1,052 / 도비 350.6 / 시비 350.6)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=8.2km, 배수설비 200여가구

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 신규사업 신청	: ‘22. 3. 11.

◦ 하수관로 정비사업 가내시 통보	: ‘22. 9. 21.

◦ 사업능력평가 시행	: ‘23. 2. ~ 5.

◦ 기본 및 실시설계 추진	: ‘23. 5. ~ `24. 12.

◦ VE(설계경제성검토)용역 추진	: ‘24. 11. ~ 12.

□ 추진계획

◦ 전북특자도 건설기술 심의회 추진	: `25. 1. ~ 2.

◦ 환경부 재원협의	: `25. 2. ~ 3.

◦ 원가심사(조달청) 및 계약의뢰	: ‘25. 3.

◦ 공사 시행	: ‘25. 3. ~ ‘26. 12.

남원 농어촌마을하수도 하수관로 정비사업

(계속사업)

작성부서 : 환경사업소  부서장 : 김경진  팀장 : 김상규  담당자 : 김상규  전화 : 5810

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 남원시 하수도정비 기본계획(2017.2.)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4개년)

◦ 위    치 : 남원시 주천(내기), 보절(진목‧양촌), 산동(부절‧중절), 산내(대정‧백일)

◦ 총사업비 : 6,300백만원(국비 3,780 / 도비 1,260 / 시비 1,260)

- ‘25년 사업비 : 1,258백만원(국비 755 / 도비 251.6 / 시비 251.6)

◦ 사업내용 : 하수관로 개량 L=4.53km

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 신규사업 신청	: ‘22. 3. 11.

◦ 하수관로 정비사업 가내시 통보	: ‘22. 9. 21.

◦ 사업능력평가 시행	: ‘23. 2. ~ 5.

◦ 기본 및 실시설계 추진	: ‘23. 5. ~ `24. 12.

◦ 환경부 재원협의	: ‘24. 10. ~ 12.

□ 추진계획

◦ 원가심사(조달청) 및 계약의뢰                  : ‘25. 1. ~ 2.

◦ 공사 시행                                    : ‘25. 3. ~ ‘26. 12.

사매 대율지구 마을하수도 설치사업

(계속사업)

작성부서 : 환경사업소  부서장 : 김경진  팀장 : 김상규  담당자 : 박봉용  전화 : 5811

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 남원시 하수도정비 기본계획(2017.2.)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4개년)

◦ 위    치 : 남원시 사매면(대율ㆍ화정) 일원

◦ 총사업비 : 6,247백만원(도비 2,482, 시비 3,765)

- ‘25년 사업비 : 676백만원(도비 676)

◦ 사업내용 : 하수처리시설 Q=40㎥/일, 하수관로 L=3.08km, 배수설비 109가구

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 지방소멸대응기금 투자사업 선정	: ‘22. 9. 22.

◦ 계약심의 위원회	: ‘22. 11. 2.

◦ 사업능력평가 시행	: ‘23. 2. ~ 5.

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진	: ‘23. 5. ~ `24. 12.

◦ 전북특자도 인가신청 및 기술검토	: ‘24. 9. ~ 11.

◦ 공사발주 및 계약(전체분 및 1차분)	: ‘24. 12.

□ 추진계획

◦ 공사 시행	: ‘25. 1. ~ ‘25. 12.

수지 용강지구 마을하수도 설치사업

(계속사업)

작성부서 : 환경사업소  부서장 : 김경진  팀장 : 김상규  담당자 : 박봉용  전화 : 5811

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 남원시 하수도정비 기본계획(2017.2.)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4개년)

◦ 위    치 : 남원시 수지면(용강ㆍ남창) 일원

◦ 총사업비 : 5,664백만원(도비 2,111 / 시비 3,553)

- ‘25년 사업비 : 658백만원(도비 658)

◦ 사업내용 : 하수처리시설 Q=40㎥/일, 하수관로 L=2.96km, 배수설비 107가구

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 지방소멸대응기금 투자사업 선정	: ‘22. 9. 22.

◦ 계약심의 위원회	: ‘22. 11. 2.

◦ 사업능력평가 시행	: ‘23. 2. ~ 5.

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진	: ‘23. 5. ~ `24. 12.

◦ 전북특자도 인가신청 및 기술검토	: ‘24. 9. ~ 11.

◦ 공사발주 및 계약(전체분 및 1차분)	: ‘24. 12.

□ 추진계획

◦ 공사 시행	: ‘25. 1. ~ ‘25. 12.

남원하수·소규모하수·하수슬러지처리시설 관리대행

(계속사업)

작성부서 : 환경사업소  부서장 : 김경진  팀장 : 이재근  담당자 : 안병석, 하정민, 길홍재  전화 : 5812,5825,5831

□ 추진근거

◦ 「하수도법」제19조의2(공공하수도 관리대행업)

◦ 공공하수도시설 관리업무 대행지침(2023. 10. 환경부)

□ 개    요

구 분	남원하수･분뇨･음식물처리시설	소규모하수처리시설	하수슬러지처리시설
위 탁 비	2,585백만원	2,051백만원	1,894백만원
위 탁 기 간	2023.12.1.~2027년(4년 1개월)	2023년~2027년(5년)	2025년~2027년(3년)
위 탁 시 설	하수,분뇨,음식물처리시설	마을하수 64개소, 중계펌프장 75개소	하수슬러지처리시설
관리대행사	(유)일토씨엔엠(80%), ㈜테크로스환경서비스(20%)	(유)일토씨엔엠(70%), ㈜에코비트워터(30%)	(유)일토씨엔엠(51%), ㈜에코비트워터(49%)
관 리 인 원	17명	16명	10명

□ 추진실적

[남원하수·분뇨·음식물처리시설]

◦ 남원하수처리시설 관리대행	: ‘24. 1. ~ 12.

◦ 내부반송설비 설치를 통한 질소 저감	: ‘24. 1.

◦ 총인처리시설 보수 및 정상화를 통한 수질 향상	: ‘24. 7. ~ 12.

[소규모하수처리시설]

◦ 공공하수도시설 관리대행(운봉, 인월, 소규모, 중계펌프)	: ‘24. 1. ~ 12.

◦ 공공하수도시설 관리대행 성과평가(2023년도분)	: ‘24. 3.

[하수슬러지처리시설]

◦ 하수슬러지처리시설 관리대행	: ‘24. 1. ~ 12.

◦ ‘25년 하수슬러지처리시설 관리대행 업체 공고 및 선정	: ‘24. 8. ~ 11.

□ 금후계획

[공공하수처리시설]

◦ 2025년도분 관리대행 계약 체결 및 시행	: ‘25. 1.

◦ 관리대행 성과평가(2023.12.1.~2024.12.31.)	: ‘25. 3.

[소규모하수처리시설]

◦ 관리대행 성과평가(2024년)	: ‘25. 3.

[하수슬러지처리시설]

◦ 관리대행 성과평가(2024년)	: ‘25. 3.

하수슬러지처리시설 악취방지시설 개선공사

(계속사업)

작성부서 : 환경사업소  부서장 : 김경진  팀장 : 이재근  담당자 : 길홍재  전화 : 5831

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 요천로 1036-207(하수슬러지처리시설)

◦ 사업기간 : 2024. 5. ~ 2025. 6.

◦ 총사업비 : 1,264백만원(도비 500 / 시비 764)

-‘25년 사업비 : 12억원 (시비 700 도비 500)

◦ 사업내용

- 축열식연소산화장치(RTO) 교체

- 악취방지설비 (사이클론, 백필터 등) 개선

- 바이오가스 배관 교체

□ 추진실적

◦ 기본설계 및 실시설계	: `24. 6.

◦ 악취저감장치(탈취설비) 선정	: `24. 11. 27.

◦ 선정기술 설계 반영	: `24. 11. 28. ~ 12. 16.

◦ 행정절차 이행	: `24. 12. 16. ~ 31.

□ 추진계획

◦ 설계준공	: `24. 12.

◦ 악취방지설비 개선공사 착공	: `25. 1.

◦ 악취방지설비 개선공사 준공	: `25. 6.

□ 기대효과

◦ 악취저감설비 개선에 따른 환경사업소 인근 악취 민원 감소

수지 호곡 마을하수처리시설 방류관로 사업

(계속사업)

작성부서 : 환경사업소  부서장 : 김경진  팀장 : 이재근  담당자 : 안병석  전화 : 5812

□ 개    요

◦ 사 업 명 : 수지면 호곡 마을하수처리시설 방류관로 사업

◦ 위    치 : 남원시 수지면 호곡리 일원

◦ 기    간 : 2024년 ~ 2025년

◦ 사 업 비 : 800백만원(도 800)

◦ 사업내용 : 방류관로사업(1.6km) 및 중계펌프장(2개소)

□ 추진실적

◦ ‘23년 특별교세 하반기 교부결정 통보(도)	: ‘23. 12. 21.

◦ 기본 및 실시설계 용역	: ‘24. 4. ~ 7.

◦ 일상감사 및 원가 심사	: ‘24. 7.

◦ 공사 착공	: ‘24. 11.

□ 추진계획

◦ 공사 시행	: ‘24. 11. ~ ‘25. 5.

◦ 공사 준공	: ‘25. 5.

□ 기대효과

◦ 수지면 호곡마을하수처리시설 방류수 수지천 방류수 안정적 수질관리