2025. 1.

2025년도 주요업무 계획

상수도사업소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2024년 주요업무 결산

□ 2025년 중점 추진방향

□ 2025년 주요업무 계획

◦ 정수장 위생 안전 인증제도 추진

◦ 정수장 소형생물 대응체계 구축사업

◦ 지리산권역 농어촌생활용수 개발사업

◦ 소규모 배수관로 포설사업

◦ 소규모 수도시설 정비사업

◦ 후속 노후 상수도 정비사업

◦ 노후 상수관로 교체사업

◦ 누수다발지역 상수관로 정비사업

◦ 상수도 관망 DB 구축사업

◦ 마을권 광역상수도 공급사업

◦ 상수도 공기업의 안정적 경영기반 강화

일  반  현  황

□ 기    구

						상수도사업소장
						강 자 청
수도경영팀장					급수시설팀장							수도시설팀장
유 경 자					이 현 석							임 희 철
∘ 상수도 공기업 특별회계관리 ∘ 상수도 공기업 경영개선 ∘ 상수도 사용료 부과 징수 ∘ 지방공기업 경영평가 ∘ 상수도 통계					∘ 광역상수도 마을권 급수 공사 ∘ 소규모수도 시설 관리 ∘ 개인 급수공사 ∘ 상수도 관망 유지 관리 ∘ 노후 급·배수관 교체 ∘ 긴급 누수 복구							∘ 월락정수장 운영․관리 ∘ 배수지 운영․관리 ∘ 가압장 운영․관리 ∘ 상수원 보호구역 관리 ∘ 배수관로 포설 사업

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	22	1	4	6	4	7
현 원	21	1	9	3	5	3	청원경찰 2 공무직 9
증 감	△1	-	5	△3	1	△4

□ 2025년 예산규모  : 27,306백만원

				＜2025 예산 >			(단위 : 백만원)
	구 분		2025년		2024년			증 감(%)
	합 계		27,306		28,345			△1,039(3.7%)
	일반회계		872		804			68(8.5%)
	특별회계		26,434		27,541			△1,107(4.0%)

※ 일반회계 자본전출금(10,051백만원) 미포함

▷ 2025년 특별회계 : 26,434백만원

					＜세 입＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2025년		2024년			증 감(%)
	합 계			26,434		27,541			△1,107(4.0%)
	자체수입			7,892		8,106			△214(2.6%)
	의존수입		국도비	8,491		7,875			616(7.8%)
			지원금 (자본전출금)	10,051		11,560			△1,509(13.1%)

					＜ 세 출 ＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2025년		2024년			증 감(%)
	합 계			26,434		27,541			△1,107(4.0%)
	사업비		소계	19,999		21,108			△1,109(5.3%)
			투자사업	19,516		20,709			△1,193(5.8%)
			경상사업	483		399			84(21.1%)
	비사업		소계	6,435		6,433			2(0.03%)
			행정운영	6,367		6,362			5(0.07%)
			예 비 비	68		71			△3(4.2%)

※ 행정운영 : 인건비 + 물건비 + 경상이전

□ 급수현황

(’24. 10. 31. 기준)

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	1인1일 급수량(ℓ)	평균생산량 (㎥/일)	유수율 (%)
75,573	72,172	95.5	357.6	27,322	73.6

□ 수도시설 현황

◦ 생 산 시 설 : 38,800㎥/일(월락정수장 15,000/광역상수도 23,800)

◦ 상수도 관로 : 1,168㎞(도수․송수․배수관 649, 급수관 519)

◦ 배  수  지 : 10개소(29,250㎥)

◦ 가  압  장 : 57개소

◦ 감  압  변 : 43개소

◦ 검침급수전 : 30,317전

□ 상수원 보호구역 현황

◦ 위    치 : 월락․도통․신촌․고죽동, 이백면

◦ 지정면적 : 414,525㎡

◦ 지 정 일 : 1985. 12. 24.(0.418㎢) → 2008. 12. 12.(0.415㎢)

□ 소규모 수도시설 현황

시설수 (개소)	규 모 별		급수인구	비 고
	마을상수도	소규모급수시설
47	15	32	3,401명 (1,966세대)	□마을상수도 - 20㎥/일 이상 500㎥/일 미만 - 100명 이상 2,500명 이내 급수인구 □소규모급수시설 - 20㎥/일 미만 - 100명 미만의 급수인구

□ 상수도 관로

(단위: km, ’24. 10. 31. 기준)

구분	총연장	재 질 별				매설연한별			비고
		금속	PE.PVC	내충격 수도관	기타	20년미만	20~29년	30년이상
계	1,168.1	226	186	747	9.1	959.1	114	95
도수관	0.1	-	-	-	0.1	0.1	-	-
송수관	15	10	2	3	-	8	6	1
배수관	634	210	-	417	7	530	93	11
급수관	519	6	184	327	2	421	15	83

2024년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 상수도 공기업의 재정 안정성 강화 방안 마련 : 상수도 요금 인상 추진 ◦ 맑고 깨끗한 수돗물 안정적 생산 및 공급 ▸월락정수장 4,166천톤, 광역 4,587천톤(2024.1~11월 말) ◦ 월락정수장 현대화 전면 개량사업 준공 ▸총사업비 : 35,116백만원, 사업기간 : 2019.~2024년(6개년) ◦ 후속 노후 상수도 정비사업 단계별 추진 ▸위수탁 체결(남원시⟺한국수자원공사/‘24. 3. 26.) ▸기본 및 실시설계용역 착수 ◦ 유수율 증대를 위한 상수도 관망 정비사업 추진 ◦ 농촌 지역 광역상수도 공급 기반 확충 ▸광역상수도 보급: 운봉(용산), 인월(도장), 아영(율동·일대·부동·송리) ▸지리산권 농어촌 생활용수 개발사업 1차분 준공 (8.2km) ▸배수관포설 공사 추진 (4개사업, 5.2km)

□ 상수도 공기업의 재정 안정성 강화 방안 마련

◦ 상수도 요금인상 추진:‘29년 요금현실화율 60%목표, 톤당 연평균 17.2%인상

- 2025~2029(5년간) 요금인상에 따른 사용료수익 증가 : 연평균 1,897백만원(예상)

◦ 상수도 급수구역 확대 및 체납징수로 세외수입 확보 : 618백만원

□ 맑고 깨끗한 수돗물 안정적 생산 및 공급

◦ 생산 및 공급 : 8,753천톤(월락정수장 4,166천톤, 광역 4,587천톤)

◦ 수질검사 결과 : 정수⇒적합(일일7, 월간59), 원수⇒Ⅰa등급(월간8, 분기30)

◦ 수돗물 수질검사 결과 홍보(지역정보지, 전광판 등) : 매월

◦ 수돗물 수질 평가위원회 운영(10명) : 2회/년

□ 월락정수장 현대화 전면 개량사업 준공

◦ 총사업비 : 35,116백만원(국비 17,058, 도비 3,411, 시비 13,647, 특교세 1,000)

◦ 사업내용 : 정수시설 전면개량 Q=15,000톤/일

◦ 사업기간 : 2019. ~ 2024.(6개년) ※준공일: 2024. 6. 29.

□ 후속 노후 상수도 정비사업 단계별 추진

◦ 남원시와 한국수자원공사간 위‧수탁 협약 체결 :`24. 3. 26.

◦ 기본 및 실시설계 용역 착수 : `24. 10. 11.

◦ 우선사업 대상지 선정 및 협의 추진 (환경부 등)

□ 유수율 증대를 위한 상수도관망 정비사업

◦ 노후 상수관로 교체사업 완료(3개소, L=2.2㎞) :‘24. 7. ~ 9.

- 노암초교 뒤(L=0.5㎞), 대산 상대실(L=0.7㎞), 주생 효동마을(L=1.0㎞)

◦ 누수다발지역 상수관로 정비사업(송동 척동~신기 :L=2.6㎞) :‘24. 12.

◦ 타부서 병행 상수도 정비사업 완료    :‘24. 12.

- 운봉 북천 회전교차로 ~ 운봉중 (L=1.0㎞)

◦ 상수도 관망 DB 구축사업 완료 :‘24. 12. 예정

- 덕과·이백·산동 배수지권(L=50㎞) : 공정률 95%

□ 농촌지역 광역상수도 공급 기반 확충

◦ 마을권 광역상수도 공급사업 완료 (6개마을)

- 운봉(용산), 인월(도장), 아영(율동·일대·부동·송리) : 3,025백만원

※ 남원시 마을별 수돗물 보급현황 : 385개 마을(보급완료 338, 미보급 47)

◦ 지리산권(인월,아영,산내) 농어촌 생활용수 개발사업 추진

- 1차분 준공 : 5개마을(송리, 부동, 도장, 덕실, 중군), L=8.2km : 11,200백만원

*총사업비 : 26,800백만원(도비 18,760, 시비 8,040) / 2021~2026년(6개년)

*사업내용 : 배수지 1개소(V=1,400톤), 송․배수관로(D80~300), L=34.5km

◦ 배수관포설 공사 추진(남원 글로컬캠퍼스 등 4건, 5.2㎞ : 956백만원)

	아쉬운 점
◦ 후속 노후 상수도 정비사업 우선 사업대상지 선정 및 협의(환경부)의 신속 결정 필요 ◦ 유수율 제고 및 맑은 물 공급을 위한 단위 사업별 예산 증액 필요 ▸20년 이상 노후 관로 점유율 대비 신규 교체율 저조로 실효성 미비 ▸노후 관로의 녹물·이물질 주요 발생 구간에 대한 우선 교체 사업 필요

2025년 중점 추진방향

시민 모두가 안심하고 마실 수 있는

지속 가능한 물 공급 시스템 구축

	중 점 추 진 과 제
◦ 상수도 공기업 재정 자립도 향상 - 상수도 요금 인상(현실화)을 통한 안정적인 재정 확충 - 급수구역 확대 및 체납관리를 통한 세외수입 확대 ◦ 지방상수도 현대화 및 유수율 제고 - 지방상수도 현대화를 통한 후속 노후 상수도 정비 추진 - 기존 매설된 노후관 교체를 통해 깨끗한 물 복지 실현 - 상수도관망 DB 최신화를 통한 상수도 업무 능률 향상 ◦ 균형적이며 안정적인 맑은 물 공급 확대 - 농촌지역 물 복지 향상을 위한 급·배수시설 저변 확대 - 미급수 지역 “소규모 수도시설” 현대화 및 유지관리 대응체계 구축 - 급수 보급률 100% 목표로 지역 간 물 복지 실현 - 지리산권 농어촌 생활용수 개발사업의 조기 준공과 광역상수도 공급 ◦ 수돗물 신뢰도 회복 - 시민이 안심하고 사용할 수 있는 맑고 깨끗한 수돗물 안정적 생산 - 최고의 수돗물 생산 및 안전 공급을 위한 정수장 위생 안전 인증 취득 - 수돗물 신뢰도 향상을 위한 적극 홍보 실시

2025년 주요업무 계획

정수장 위생안전 인증제도 추진

(신규사업)

작성부서 : 상수도사업소  부서장 : 강자청  팀장 : 임희철  담당자 : 이우식, 정용선  전화 : 6890

□ 추진근거

◦ 「수도법」 제33조의2(정수장의 위생 안전 인증): 2025. 1. 24.(시행예정)

- 정수장의 위생 안전 인증 세부 운영 기준

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 정수장 위생 및 수돗물 안전관리 인증(한국상하수도협회)으로 보다 안전하고 신뢰받는 수돗물 공급

◦ 인증대상 : 월락정수장(Q=15,000㎥/일)

◦ 평가기간 : 2025. 3 ~ 7.

◦ 소요예산 : 5백만원

◦ 평가내용 : 정수처리 공정별 시설 및 수처리 방법 적정성 등

□ 추진계획

◦ 정수장 위생 및 안전관리계획 제출                     : `25. 3.

◦ 안전관리계획 서류평가 승인                           : `25. 3. ~

◦ 현장평가팀 현장점검                                  : `25. 5. ~

◦ 개선사항 및 인증여부 종합평가                        : `25. 6. ~

◦ 인증완료                                             : `25. 7.

□ 기대효과

◦ 정수장 운영 및 관리 체계를 강화하여 위해 요소를 사전 차단함으로써

수질 안전성 확보

◦ 전문기관(한국상하수도협회)의 인증을 통해 수돗물 신뢰성 향상 정수장 소형생물 대응체계 구축사업

(신규사업)

작성부서 : 상수도사업소  부서장 : 강자청  팀장 : 임희철  담당자 : 김용하   전화 : 6885

□ 추진근거

◦ 수도법 제26조(수질기준) 및 제75조(국고보조 등)

◦ 수도법 제33조(위생상 등의 조치)

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 깨끗한 수돗물 공급 및 신뢰성 향상을 위해 깔따구 유충 유출 방지를 위한 여과장치 설치

◦ 위    치 : 월락정수장, 월락배수지

◦ 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.(1개년)

◦ 총사업비 : 566백만원 (국비 50%, 시비 50%)

◦ 사업내용 : 마이크로스트레이너(D300mm 4개소, D500mm 2개소)

정밀여과장치 D600mm 1개소 설치

□ 추진계획

◦ 실시설계 용역 추진	: `25. 1. ~  3.

◦ 정밀여과장치 설치	: `25. 5. ~ 10.

◦ 여과장치 시운전 추진	: `25. 9. ~ 11.

□ 기대효과

◦ 이상기온 등으로 늘어나는 소형생물에 대한 유충 유출 원천 차단

◦ 유충 제거를 위해 화학 물질을 사용하지 않고 반영구적 여과장치 설치를 통해 운영 비용 및 환경에 미치는 영향 최소화

◦ 시민들이 더욱 안심하게 먹을 수 있는 시스템 구축으로 수돗물에 대한 신뢰 향상

지리산권역 농어촌생활용수 개발사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소  부서장 : 강자청  팀장 : 임희철  담당자 : 김용하   전화 : 6885

□ 추진근거

◦「수도법」 제2조(책무) 및 제39조(급수의무)

◦「수도법」 제5조(수도정비계획의 수립) 7항(수도 공급구역에 관한 사항)

□ 개    요

◦ 위    치 : 19개 마을(인월면 2, 아영면 2, 산내면 15)

※ 인월면(도장,덕실), 아영면(부동,송리), 산내면(하황,백일,중기,대정,매동,장항,원천,입석,삼화,중황,상황,내령,외령,장자터,원백일)

◦ 사업기간 : 2021. ~ 2026.(6개년)

◦ 총사업비 : 26,800백만원 (도비 70%, 시비 30%)  ※‘25년 사업비 : 6,000백만원

(단위: 백만원)

구분	합계	재원투자내역				비고
		소계	기투자	‘25	‘26
총 계	26,800	26,800	16,500	6,000	4,300
도 비	18,760	18,760	11,550	4,200	3,010
시 비	8,040	8,040	4,950	1,800	1,290

◦ 사업내용 : 배수지 1개소, 배수관로 L=24,4km, 송수관로 L=10,0km, 가압장 3개소      -‘25년 계획 : 운봉배수지, 상수관로 L=8.8km 추진(산내 장항·매동·상황·중황·하황·중기·백일)

□ 추진실적

◦ 지리산권역(인월,아영,산내) 실시설계용역 완료(19개마을)     : `21. 11. ~ `23. 03.

- 경제성 검토VE(`22. 11.), 건설기술심의(`23. 1.), 원가심가(`23. 3.) 완료

◦ 위·수탁 업무 협약 체결(남원시-한국수자원공사/10,451백만원)     : `24. 03.

◦ 배수시설 1차분 추진(L=8.2km, 5개마을 완료)        : `23. 12. ~ `24. 10.

◦ 배수시설 2차분 착공                                : `24. 10. 4.

□ 금후계획

◦ 배수시설 2차분 추진(L=8.8km, 6개마을, 운봉배수지)    : `24. 10. ~ `25. 10.

◦ 배수시설 3차분 추진(L=7.4km, 8개마을)                : `25. 08. ~ `26. 06.

◦ 송수시설 추진                                         : `24. 12. ~ `26. 12.

소규모 배수관 포설사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소  부서장 : 강자청  팀장 : 임희철  담당자 : 이형진   전화 : 6882

□ 추진근거

◦「수도법」 제2조(책무) 및 제39조(급수의무)

◦「수도법」 제5조(수도정비계획의 수립) 7항(수도 공급구역에 관한 사항)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 전지역

◦ 사업기간 : 2022. ~ 2026.(연례반복)

◦ 총사업비 : 8,845백만원 (시비 100%)

- ‵25년 사업비 : 1,200백만원

(단위: 백만원)

구분	합계	재원투자내역				비고
		소계	기투자	‘25	‘26
시비	8,845	8,845	5,245	1,200	2,400

◦ 사업내용 : 배수관로 포설(L=25㎞) 및 가압장 설치

-‘25년 계획 : 가압장 1개소, 배수관로 포설 3개소(L=2.3㎞)

□ 추진실적

◦ 이백 초촌지구 배수관로 매설공사 완료(L=1.9㎞)	: `24. 3. ~  6.

◦ 주천 각골지구 배수관로 포설공사 완료(L=1.1㎞)	: `24. 4. ~  6.

◦ 남원 글로컬캠퍼스 배수관 포설공사 완료(L=1.6㎞)	: `24. 8. ~ 12.

□ 금후계획

◦ 운봉 방현마을 가압장 설치공사 추진	: `25. 2. ~ 4.

◦ 남원 교정시설 배수관로 포설공사 추진(L=0.6㎞)	: `25. 2. ~ 5.

◦ 구룡폭포길 배수관로 포설공사 추진(L=0.5㎞)	: `25. 2. ~ 5.

◦ 주천 범실마을 주변 배수관 포설공사 추진(L=1.2㎞) : `25. 2. ~ 6.

소규모 수도시설 정비사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소  부서장 : 강자청  팀장 : 이현석  담당자 : 김만곤  전화 : 6896

□ 추진근거

◦「수도법」제55조(소규모급수시설)

◦「남원시 마을상수도□소규모급수시설 관리 조례」제9조(유지보수) 및 제10조(긴급복구)

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 소규모수도시설 유지관리를 통한 마을 수도사고(누수 및

단수 등) 방지 및 맑고 안정적인 생활용수 공급

◦ 대    상 : 관내 소규모수도시설 47개소 (마을 15, 소규모 32)

◦ 사업기간 : 2025. 1 ~ 12.(연례반복)

◦ 사 업 비 : 140백만원(시비)

◦ 사업내용 : 노후관로 교체, 긴급(누수 등)복구 및 생활용수 수질검사 실시

-‘25년 계획 : 긴급 누수복구 및 두수공, 염소투입기 교체 등 시설개선

□ 추진실적

◦ 소규모 수도시설 점검 및 정비(1~4분기 수질검사 등)	: `24. 1. ~ 12.

◦ 소규모 수도시설 긴급복구 추진	: `24. 1. ~ 12.

- 누수복구(수지 신덕 외 5개소), 관정교체(산내 내령 외 6개소)                          정수장치 여재교체(수지 신덕), 염소투입기 교체(산내 부운 외 24개소)

□ 금후계획

◦ 노후로 인한 누수 발생 시 긴급복구 추진	: `25. 1. ~ 12.

◦ 산내 달궁 소규모수도시설 집수정(두수공) 정비      : `25. 3. ~ 5.

◦ 소규모수도시설(47개소) 물탱크 내 소독약 보충      : `25. 2. ~ 12.

◦ 염소투입기 및 수위조절기 교체 3개소              : `25. 4. ~

후속 노후 상수도 정비사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소  부서장 : 강자청  팀장 : 이현석  담당자 : 진금호  전화 : 6875

□ 추진근거

◦「수도법」제21조(수도시설의 관리) 및 제21조의2(상수도관망의 관리)

◦환경부「지방상수도 현대화사업 업무처리지침」(2023. 11. 개정)

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 노후 시설 개선을 통한 목표 유수율(85%) 달성과 깨끗한 물 복지 향상

- 안전하고 깨끗한 수돗물 공급 및 수도사업 선순환 구조 구축을 통해

지방공기업 재무 여건 개선

◦ 위    치 : (관망정비) 월락‧남원 배수지권, (블록구축) 관내 전지역

◦ 사업기간 : 2024. ~ 2029.(6개년) ※ 위탁기간 : 2024. ~ 2028.(5개년)

◦ 총사업비 : 444억원【국비(50%) 222, 지방비(50%) 222】

※ `25년도 예산 : 6,666백만원【(국 50%) 3,333 / (도 10%) 666 / (시 40%) 2,667】

◦ 사업내용 : 관망정비 L=20.2㎞, 블록 및 유지관리시스템 구축 등

◦ 추진방식 : 공공전문기관 위□수탁 협약

- 위탁기관(남원시), 수탁기관(한국수자원공사)

□ 추진실적

◦ 위‧수탁 협약 체결	: `24. 3. 26.

◦ 기본 및 실시설계 용역 착수                      : `24. 10. 11.

◦ 1차분 용역 완료	: `24. 12. 9.

◦ 우선사업대상지 검토 중	: `24. 12. ~

□ 금후계획

◦ 우선사업대상지 확정 및 승인(환경부)	: `25. 1. ~ 6.

◦ 우선사업대상지 사업추진(관망정비공사, 누수탐사·복구 등) : `25. 7. ~

노후 상수관로 교체사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소  부서장 : 강자청  팀장 : 이현석  담당자 : 진금호  전화 : 6875

□ 추진근거

◦「수도법」제21조(수도시설의 관리) 및 제21조의2(상수도관망의 관리)

◦「도로법」시행령 제62조(도로관리심의회)

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 수도사고(누수 및 이물질 발생)가 빈번한 노후된 상수관로

교체로 유수율□관로 교체율 제고 및 물 복지 향상

◦ 위    치 : 관내 급수구역(소규모 수도시설 제외)

◦ 사업기간 : 2013. ~ 2030.(연례 반복)

◦ 총사업비 : 33,600백만원(시비)  ※ `25년도 예산 : 1,000백만원(시비)

◦ 사업내용 : 노후 상수관(시설물) 교체 (L=195㎞)

-‘25년 계획 : 대산 반송교~주생 영천교 L=2㎞, 효동~제천 0.9㎞ 및 덕평 1.1㎞

□ 추진실적

◦ `24년까지 관로 교체 L=191.6㎞                      : `13. ~ `24.

◦ `24년도 노후 상수관로 교체사업 완료                : `24. 12. 10.

- 4개소(노암초교 뒤, 대산 상대실, 주생 효동마을, 운봉 북천 회전교차로~운봉중) : L=3.2㎞

◦ `25년도 사업대상지(대산 반송교 ~ 주생 영천교) 설계 완료      : `24. 12. 16.

□ 금후계획

◦ 노후 상수관로 교체사업 추진(1개소, L=2.0㎞)         : `25. 1. ~ 10.

- 대산 반송교 ~ 주생 영천교 : 2㎞

- 주민설명회 개최, 공사 발주, 공사 추진(착공~준공)

◦ 타부서 병행 상수도 정비사업 추진(2개소, L=2.0㎞)    : `25. 1. ~ 10.

- 주생지구(효동~제천, 0.9㎞) , 덕인선 농어촌도로(덕평, 1.1㎞)

- 관련부서 협의, 설계용역(주민설명회 포함), 공사 발주, 공사 추진(착공~ 준공)

누수다발지역 상수관로 정비사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소  부서장 : 강자청  팀장 : 이현석  담당자 : 진금호  전화 : 6875

□ 추진근거

◦「수도법」제21조(수도시설의 관리) 및 제21조의2(상수도관망의 관리)

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 상수관로(PVC, PE관 등)의 노후화로 누수 등 상수도 사고가                  다발적으로 발생하는 지역의 관로를 정비하여 유수율 제고 추진

◦ 위    치 : 관내 급수구역(소규모 수도시설 제외)

◦ 사업기간 : 2014. ~ 2027.(연례 반복)

◦ 총사업비 : 12,125백만원(시비)   ※ `25년도 예산 : 400백만원(시비)

◦ 사업내용 : 누수다발 상수관 교체 (L=66㎞)

-‘25년 계획 : 금지 호산마을 L=1.5㎞ 및 송동 태산마을 L=0.5㎞

□ 추진실적

◦ ’24년까지 관로 총 29개 지구 교체 (L=61.5㎞)	: `14. ~ `24.

◦ ’24년도 누수다발지역 상수관로 정비사업 완료	: `24. 12. 17.

- 송동 척동~신기 (L=2.6㎞)

◦ ’25년도 사업대상지(금지 호산 및 송동 태산마을) 설계 완료	: `24. 12. 17.

□ 금후계획

◦ 주민설명회 개최 및 관련 부서 협의	: `25. 1. ~ 3.

◦ 공사 추진(2개소, L=2.0㎞)	: `25. 4. ~ 7.

- 금지 호산마을(L=1.5㎞), 송동 태산마을(L=0.5㎞)

상수도 관망 DB 구축 사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소  부서장 : 강자청  팀장 : 이현석  담당자 : 진금호  전화 : 6875

□ 추진근거

◦「국가공간정보 기본법」제28조 및 「공공측량 작업규정」제182조(시설물 탐사 대상)

◦「남원시 공간정보에 관한 조례」제15조(공간정보 자료 구축)

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 현지와 일치하지 않는 상수도관망 DB를 최신화하여 상수도

업무 능률 향상 및 타기관(부서)간 협의 능력 향상 도모

◦ 위    치 : 관내 급수구역(소규모 수도시설 제외)

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2027.(5개년)

◦ 총사업비 : 5,000백만원(시비)  ※ `25년도 예산 : 500백만원(시비)

◦ 사업내용 : 상수도시설물 탐사 및 DB 구축, 기 운영시스템 내 로딩(L=265㎞)

-‘25년 계획 : 송동배수지권 25㎞ DB구축 및 로딩

□ 추진실적

◦ ‵23년도 추진사업 완료                           : `24. 11. 29.

- 운봉·대강·대산 배수지권(L=53㎞) DB 구축 및 로딩

◦ ‵24년도 추진사업 완료                           : `24. 12. 26.(예정)

- 덕과·이백·산동 배수지권(L=50㎞) DB 구축 및 로딩

□ 금후계획

◦ 사업대상지 검토(관로 현황 검토 및 현장 조사)       : `25. 1. ~ 3.

◦ `25년도 사업 용역 추진	: `25. 4. ~ 12.

- 송동 배수지권(L=25㎞)

마을권 광역상수도 공급사업

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소  부서장 : 강자청  팀장 : 이현석  담당자 : 진금호  전화 : 6875

□ 추진근거

◦「수도법」제2조(책무) 및 제39조(급수의무)

□ 개    요

◦ 필 요 성 : 수원 고갈 및 수질오염 등으로 상수도 공급이 절실한 지역으로, 광역상수도 공급을 통해 안정적이고 깨끗한 생활용수 공급

◦ 대    상 : 관내 미급수지역

◦ 사업기간 : 2002 ~ 2030.(연례 반복)

◦ 사 업 비 : 21,978백만원(시비)   ※ `25년도 예산 : 420백만원

◦ 사업내용 : 소규모 수도시설 385개 마을 급수공사

-‘25년 계획 : 4개소(수지면 신덕□갈촌□포암마을 및 인월 중군마을)

□ 추진실적

◦ `23년까지 356개 마을 광역상수도 공급	: `02. ~ `24.

◦ `24년도 마을권 광역상수도 공급사업 완료(6개 마을)	: `24. 12.

- 운봉(용산), 인월(도장) 및 아영(율동·일대·부동·송리)

◦ `25년도 사업대상지 3개소 설계 완료	: `24. 12.

- 수지 (신덕, 갈촌, 포암마을)

□ 금후계획

◦ 광역상수도 동의서 접수 및 설계 추진(인월 중군마을)	: `25. 1. ~ 2.

◦ 마을 주민설명회 및 관련 부서 협의	: `25. 1. ~ 2.

◦ 공사 추진(4개 마을)	: `25. 3. ~ 6.

- 수지(신덕, 갈촌, 포암), 인월(중군)

상수도 공기업의 안정적 경영기반 강화

(계속사업)

작성부서 : 상수도사업소  부서장 : 강자청  팀장 : 유경자  담당자 : 이수민  전화 : 6863

□ 추진근거

◦「지방공기업법」제14조(독립채산), 제22조(요금)

◦「남원시 상수도 급수조례」제24조(수도사용요금)

□ 개    요

◦ 경영기반강화를 위한 합리적 상수도 요금인상

- 인상시기 : 2025. 1월 사용량분부터

- 방    법 : 업종별, 5년간 단계적 인상

- 내    용 : 요금 현실화율 60% 목표로, 2029년까지 매년 톤당 평균 17.2% 인상

◦ 체납요금 징수 및 급수구역 확대 : 사업수익 등 세외수입 확충

□ 추진실적

◦ 상수도 급수 조례 개정(요금인상) 완료                : `24. 11.

◦ 상수도 급수구역 확대에 따른 사업수익 (315전)         : 465백만원

◦ 과년도 사용료 체납금 징수활동 강화로 자주재원 확보  : 153백만원

- 체납특별징수반 운영 : 체납 독려 예고(4,191건), 고액체납자 가압류 독촉(950건)

※요금 징수내역(24.12.12기준)                                             (단위 : 천원)

구분	부과액	수납액	체납액	징수율
계	6,374,512	6,098,655	275,857	95.6%
현년도	6,134,133	5,944,993	189,140	96.9%
과년도	240,379	153,662	86,717	63.9%

□ 금후계획

◦ 수도요금 인상 시민 홍보                            : `24. 12. 20 ~

- 읍면동장 설명 자료 배부 : 요금 인상 필요성등에 대한 주민 안내 및 홍보

- 가구별 안내문, 홈페이지, 이통장회보, 소식지, IPTV, 플래카등 등 홍보

◦ 수도요금 인상 시행                                         : `25. 1월  사용량분부터

- 1차년도(2025년) 상수도 사용료 수익 예상 증가액 :  1,162백만원

◦ 사용료 체납금 징수활동 강화로 세외수입 확보(체납징수반운영): 연중