2025. 1.

2025년도 주요업무 계획

도   시   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2024년 주요업무 결산

□ 2025년 중점 추진방향

□ 2025년 주요업무 계획

◦ 만인공원 조성사업

◦ 장기미집행 도시공원 내 사유지 매입

◦ 교룡공원 숲속야영장 운영 및 관리

◦ 쾌적한 도시공원 유지관리

◦ 도시숲 및 가로수 조성사업

◦ 기후대응 도시숲 조성사업

◦ 생활밀착형 숲 조성사업

◦ 자녀안심 그린숲 조성사업

◦ 함파우 지방정원 조성사업 및 운영관리

◦ 도시관리계획(고도지구 재정비 수립)

◦ 구암지구 도시개발사업

◦ 남원시 도시재생 지원센터 및 거점시설운영

◦ 도시재생 인정사업(구. 미도탕)

◦ 남원청년피움공간 in 지리산(고향올래)

◦ 금동 노후주거지 우리동네살리기 사업

◦ 동문밖마을 지역특화 재생사업

◦ 터미널지구 도시재생 뉴딜사업

◦ 지리산 활력타운 조성사업

◦ 동부권 학교복합시설 건립사업

일  반  현  황

□ 기    구

							도 시 과 장
							박승용
도시디자인 팀장								도시관리 팀장											도시재생 팀장
양 진 호								정 병 욱											김 진
⁃도시디자인 마스터플랜 수립 ⁃ 경관·공공디자인 관리 ⁃함파우 지방정원 조성 ⁃도시공원 조성 사업추진 ⁃장기미집행 사유지 매입 ⁃ 도시공원 유지관리 ⁃도시숲·가로수 조성 ⁃기후대응 도시숲· 생활밀착형 숲 조성								⁃도시기본계획 수립 ⁃도시관리계획 수립 ⁃ 도시계획시설 결정 ⁃ 도시계획시설 인가 ⁃지구단위계획 수립 ⁃ 개 발 행 위 허 가 ⁃ 전문건설업 관리											⁃도시재생 종합기획 ⁃ 도시재생 전략계획 수립 ⁃지역활력타운 조성 ⁃동부권 학교복합시설 ⁃NYBS in 지리산(고향올래) ⁃동문밖 지역특화재생사업 ⁃금동 노후주거지 우리동네살리기 ⁃ 도시재생 공모사업 대응 ⁃ 도시재생 지원센터 운영

□ 인    력

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	16	1	1	3	5	4	2
현 원	18	1	1	3	7	3	3	공무직2 휴직자1
증 감	2	-	-	-	2	△1	1

2024년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦도시디자인의 입체적인 미래상 구현과 실질적인 가이드라인 지침 수립 ◦만인공원 조성을 위한 코레일 토지매입 완료(‘24. 3. / 98억원) 및 시·발굴조사 완료(‘24.10.24.) ◦교룡공원 숲속야영장 조례 제정 및 야영장 조성(야영장 29면, 글램핑장 3동) - 임시(10.7~10.30.) [191사이트/550명], 정식 개장(11.1~12.16.) [205사이트/695명] ◦산림청 도시숲 공모사업 선정(2건) : 생활밀착형 숲, 자녀안심그린숲 / 7억원 ◦제1회 전국 맨발걷기 축제 1,300여명 참여 / 10.19.(토), 덕음산 ◦ `23년 선정 공모사업의 원활한 추진으로 지역 활성화 기반 마련 - 지리산 활력타운, 동문밖마을 지역특화재생, 금동 노후주거지 우리동네살리기 ◦ 연계 사업효과 확대를 위한 ‘24년 중앙부처 공모사업 적극 대응 - (교육부) 학교복합시설 공모 선정, (행안부) 고향올래 공모 선정

□ 2024년 공모사업 선정 : 4개 사업 / 219억원 (국 149.5, 시 69.5)

◦ 생활밀착형 숲 조성사업	:  5억원(국 2.5, 시 2.5)

◦ 자녀안심 그린숲 조성사업	:  2억원(국 1, 시 1)

◦ 남원청년피움공간 in 지리산(고향올래)	:  16억원(국 8,  시 8)

◦ 동부권 학교복합시설 공모사업	: 196억원(국 138,  시 58)

□ 미래 도시디자인 마스터플랜 및 가이드라인 수립

◦ 미래지향형 도시공간 특화 및 도시디자인 추진 전략 설정

◦ 새로운 도시 현안에 맞춰 변화해 나가는 미래 도시디자인 계획 및 가이드라인 마련

◦ 공공디자인 민간전문가 지원 제도 추진(문체부 공모 2년 연속 지원)

□ 남원의 역사와 충혼, 생태가 어우러진 테마공원(만인공원) 조성

◦ 코레일 소유 토지 매입 (향교동 232번지 / 19,011㎡) / 98억

◦ 문화재 시‧발굴 조사 완료(‘24.10.24.)

□ 교룡공원 숲속 야영장 조성 및 운영

◦ 캠핑장 29면(데크 야영장 12면, 일반 야영장 14면, 트레일러 야영장 3면), 글램핑 돔 3동, 야외 공연장, 놀이시설 등 도심 속에서 즐길 수 있는 숲속야영장 조성

- 숲속야영장 운영관리 조례 제정(‘24. 4. 2.), 개장(‘24. 11. 1.)

- 임시(10.7~10.30.) [191사이트/550명], 정식 개장(11.1~12.16.) [205사이트/695명] 방문

□ 여름철 안전한 물놀이 시설 운영

◦ 유아 ~ 초등학생까지 즐길 수 있는 물놀이 시설 운영 : ‘24. 7. 2. ~ 8. 31.

- 여름철 시민 3,468명(일평균 60명)이 방문하여 도심 속 무더위 해소

□ 탄소중립도시 실현을 위한 다양한 숲, 정원 조성

◦ 도시열섬 완화, 탄소 흡수, 미세먼지 저감 등 기후위기 대응을 위한 도시숲·가로수 조성

- (도시숲) 요천생태습지공원, 달빛 정원, 서남대 / (가로수) 요천로, 춘향로

◦ 함파우 지방정원 조성으로 함파우 아트밸리 활성화 및 정원문화 확산 기여

□ 보존과 개발이 조화를 이루는 도시관리계획 수립 및 정비

◦ 난개발 방지와 안전하고 살기 좋은 도시관리를 위한 도시계획위원회 운영

- 23명 (전체 23명, 1분과 9명, 2분과 9명, 3분과 9명)

◦ 건전한 도시 성장과 난개발 예방을 위한 도시개발 추진

- 도시관리계획 추진 23건[도시13, 관광4, 문화예술4, 환경1, 교통1]

(도시계획시설 20, 용도지구 2, 국립공원구역 해제에 따른 변경 1)

- 도시계획 심의(1분과위원회) 및 개발행위허가 : 17회 330건

(태양광 발전시설 280, 동·식물 관련 시설 27, 기타 23)

◦ 지속 발전 가능한 미래도시 조성을 위한 고도지구 재정비 수립

□ 특색있고 살기좋은 도시를 만들기 위한 도시재생사업 추진

◦ 지역 활력 제고를 위한‘23년 선정 공모사업 추진

- 지역활력타운 조성사업, 동문밖마을 특화재생사업, 금동 노후주거지 우리동네살리기 사업

◦시민 정주환경 개선을 위해 지역특성에 부합한 도시재생사업 추진

- (터미널지구) 숲정이마을 공유마당 공사착공(5월), 이음센터 준공(9월), 상생협력상가 준공(8월)

- (미도탕 문화저장소) 문화저장소 리뉴얼사업 준공(12월)·주민역량강화사업 추진

- (S/W사업) 4개 사업지구 도시재생대학 시행(동문밖, 금동, 운봉, 미도탕)

□ 연계 파급효과 창출을 위한‘24년 중앙부처 공모사업 적극 추진

◦ (고향올래) 공모 신청(5월) ⇒ 공모 선정(7월) ⇒ 건축기획 착수(10월)

◦ (학교복합시설) 공모 신청(7월) ⇒ 공모 선정(8월) ⇒ 건축기획 착수(11월)

◦ (운봉 도시재생) 공모 신청(9월) ⇒ 실사 및 발표평가(10월) ⇒ 미선정

◦ (뉴빌리지) 공모 신청(10월) ⇒ 실사 및 발표평가(11월) ⇒ 미선정

	아쉬운 점
◦ 도시경관 및 공공디자인 공모사업* 대응 필요 - 도시디자인 마스터플랜 수립 용역 결과에 따른 공모사업 적극 대응 추진 *문체부 「2025 공공디자인으로 행복한 공간만들기」 조성, 전북특자도 「2025 경관디자인」 조성 ◦ 금암공원 활성화를 위한 시설 보완 및 접근성 강화 - 금암공원 카페전망대 활용 방안 및 인도교~함파우 유원지 연결을 위한 공모사업(무장애 나눔길) 대응 ◦‘24년 도시재생 공모사업에 적극적으로 대응했으나‘23년 다수 선정으로 인해 미선정 - 평가 시 제기된 의견 등을 보완하여‘25년 도시재생 공모사업 재도전 및 신규 공모사업 추진

2025년 중점 추진방향

문화와 미래가 있는 살고 싶은 도시 조성

	중 점 추 진 과 제
◦ 도시디자인 가이드라인 본격 추진으로 매력적인 도시 공간 조성 - 도시디자인 혁신을 통한 미관 및 기능성 개선 - 지속 가능한 공간 구축 및 사회적 통합 ◦ 머물고, 쉬고, 즐길 수 있는 공원 및 녹지공간 조성 [생활인구 유치 전략] - 충혼과 역사의 만인공원 조성사업 추진 - 함파우 지방정원, 생활밀착형 숲 및 자녀안심 그린숲 조성 추진 - 교룡공원 숲속 야영장 운영 및 물방개 워터파크 운영 등 - 도시공원 조성 및 유지관리 사업 지속 추진 ◦ 지속발전 가능한 도시관리계획 수립으로 도시 경쟁력 강화 - 지역 여건 변화를 고려한 선제적 도시관리계획 수립 - 관내 계획적 개발유도를 위한 성장관리계획 수립 - 도심의 활력부여 및 정주환경조성을 위한 구암지구 도시개발사업 추진 ◦ 지역맞춤형 재생사업 추진으로 도시경쟁력 강화 - 중앙부처 선정 공모사업 연계시행으로 생활인구 유입 최대화 - 지역 특성을 반영한 맞춤형 도시재생사업 추진 ◦ 도시재생 공모사업 전략적 대응으로 지역 발전기회 확대 - 2035 도시재생전략계획을 통해 권역별로 특색있는 도시재생방안 도출 - 신규 주택수요 유도를 위한 민생 중심 도시재생 사업계획 수립

2025년 주요업무 계획

만인공원 조성사업

(계속사업)

작성부서 : 도시과 부서장 : 박승용 팀장 : 양진호 담당자 : 송현덕  전화 : 6476

□ 추진근거

◦「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제19조(도시공원의 설치 및 관리) 규정에 따라 시장이 공원조성계획에 따라 설치․관리하여야 한다

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충동 197-1번지 일원(만인공원)

◦ 사업면적 : 82,635㎡

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2027년

◦ 총사업비 : 30,441백만원(국비 3,887 시비 31,554) / ‘25 (2,000백만원)

※ 국비확보 :「지역개발 및 지원에 관한 법률」에 의한 발전촉진형 지역개발사업

◦ 사업내용 : 역사주제공원, 생태공원, 쉼터 조성 등 만인공원 조성

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자 (~‘22)	재원투자기간					‘27 이후	비고
			소계	‘23	‘24	‘25	‘26
합계	30,441	10,241	20,200	10,900	400	2,000	6,900	-
국비	3,887	-	3,887	-	-	-	3,887	-	공사비
시비	26,554	10,241	16,313	10,900	400	2,000	3,013	-	매입비 문화재조사비 용역비 공사비

※ 면적 변경에 따른 기본설계 후 총사업비 변경(증액)예상

□ 추진실적

◦ 부지매입(한국철도공사 ⇒남원시, 38,562㎡ / 97.81억)	: ‘17. 06

◦ 만인공원 조성사업 부지 유적 시굴, 발굴조사	: ‘18. 10 ~ ‘21. 12

◦ 한국철도공사 토지 매입(향교동 232/ 19,011㎡)	: ‘24. 3. 27.

- 매입대금 : 9,823,333천원[토지(9,752,643천원)/ 물건(70,690천원)]

◦ 남원 도시관리계획(도시계획시설:공원)결정(변경) 고시	: ‘24. 4. 5.

- 면적변경 : 당초 51,300㎡ → 변경 82,635㎡

◦ 만인공원 급수탑 철거공사 착공 및 준공	: ‘24. 4. 8. ~ 5. 2.

◦ 문화재 현상변경허가 심의(국가유산청)	: ‘24. 7. 24.

- 역사문화환경 보존지역 내 행위허가 신청 결과(보류)

◦ 문화재 현상변경허가 심의 보류에 따른 현장심사	: ‘24. 8. 30.

◦ 기본 및 실시설계 용역(1차분)완료	: ‘23. 10. 17. ~ ‘24. 9. 30.

◦ 구역사 및 플랫폼 철거공사 실시설계 용역 완료	: ‘24. 8. 5. ~ 10. 18.

◦ 문화재 시·발굴조사 용역 완료	: ‘23. 12. ~ ‘24. 10. 24.

◦ 만인공원 조성사업 기본 및 실시설계 용역(2차분) 착수	: ‘24. 10. 25.

□ 금후계획

◦ 매장유산 정밀발굴조사 용역 추진	: ‘24. 12.~ ‘25. 12.

◦ 환경영향평가 등 제반용역 추진	: ‘25. 1.~ 12월

- 기본 및 실시설계 관련기관(국가유산청, 국토부, 전라북도 지역정책과) 협의

• 공원조성계획 현상변경허가협의(국가유산청)

• 지역개발계획수립(변경) 및 개발구역지정(변경), 국토정책위원회 심의, 지역개발조정위원회 심의 등 지역개발사업 관련기관 협의(국토부, 전라북도 지역정책과)

- 소규모환경영향평가, 재해영향평가 등 제반용역 및 기본 및 실시설계 용역 연계부서(문화예술과, 환경과, 기획실 등) 협조 추진

◦ 중앙 투자심사 의뢰	: ‘25. 3.

◦ 2025년 추가경정예산 반영(구역사 및 플랫폼 철거공사)    :  ~ ‘25. 6.

◦ 구역사 및 플랫폼 철거공사 시행	: ‘25. 6. ~ 11.

◦ 사업착공 및 준공	: ‘25. 12. ~ ‘27. 12.

장기미집행 도시공원 내 사유지 매입

(계속사업)

작성부서 : 도시과 부서장 : 박승용 팀장 : 양진호 담당자 : 송현덕  전화 : 6476

□ 추진근거

◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제48조(도시․군계획시설결정의 실효등)에 의해 결정된 도시·군계획 시설 중 결정 고시 후 20년 이상 된 장기 미집행 시설은 실효하여야 한다.

□ 개    요

◦ 대    상 : 근린공원 6개소 (금암, 월락, 향교, 교룡, 신촌, 노암)

◦ 면    적 : 2,173천㎡ (사유지 1,298천㎡, 국・공유지 874천㎡)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2025년 (8년)

◦ 사 업 비 : 16,000백만원 (시비) / 2025년 예산 : 600백만원(시비)

□ 추진실적

(단위: 백만원)

구 분	지정면적 (㎡)	소유별(㎡)		매입현황(㎡)				비 고 (매입율)
		국공유지(필지)	사유지(필지)	기매입 (필지)	24년(필지)		총 매입금액 (24년매입금액)
					공유지	사유지
계	2,173,114	874,376(273)	1,298,738(600)	786,285(176)	-	58,792(25)	15,327(1,900)
향교공원	486,786	217,932(68)	268,854(134)	173,907(67)	-	38,699(18)	4,630(1,557)	64.7%
교룡공원	1,405,206	576,039(149)	829,167(378)	486,585(79)	-	19,769(6)	7,625(317)	58.7%
월락공원	64,054	3,496(17)	60,558(22)	8,422(5)	-	324(1)	334(26)	13.9%
노암공원	108,114	12,487(14)	95,627(35)	11,582(5)	-	-	293(0)	12.1%
금암공원	39,047	10,754(19)	28,293(23)	24,348(17)	-	-	942(0)	86.1%
신촌공원	69,907	53,668(6)	16,239(8)	7,394(1)/사유지 74,047(2)/ 전라북도교육감	-	-	1,503(0)	45.5%

* 2024.11.30.기준

□ 금후계획

◦ 장기미집행 도시공원 관리방안 및 관리계획 수립용역 추진  : ‘25.1.~

◦ 장기미집행 도시공원 사유지 매입 지속 추진	: ‘25.1.~ 6.

◦ 장기미집행 도시공원 실효 고시	: ‘25.6.30.한

교룡공원 숲속 야영장 운영 및 관리

(계속사업)

작성부서 : 도시과 부서장 : 박승용 팀장 : 양진호 담당자 : 송현덕  전화 : 6476

□ 추진근거

◦「남원시 교룡공원 숲속야영장 운영 및 관리조례」(2024.04.02.) 제1조(목적)에 의해 남원시 교룡공원 숲속야영장 운영 ·관리에 필요한 사항을 규정함으로써 야영장의 효율적 운영 및 체계적 관리를 목적으로 한다.

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산성길 172번지 일원(숲속야영장 조성 28,069㎡)

◦ 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.

◦ 사업내용 : 일반야영장 29면, 글램핑장 3동 운영 및 관리

◦ 사 업 비 : 211백만원(시비)

□ 추진실적

◦ 숲속야영장 운영관리 조례 제정                 : ‘24. 04. 02.

◦ 숲속야영장 보완사업 추진                       : ‘24. 04. ~ 09.

- 관리사무소 1개소, 샤워장 1개소, 주차선 도색 등

◦ 숲속야영장 운영관리 기간제근로자 채용         : ‘24. 10. 07. ~ 12. 31.

◦ 숲속야영장 개장                               : ‘24. 11. 01. ~

◦ 숲속야영장 온라인 예약시스템 운영(시 홈페이지)    : ‘24. 12. 01. ~

◦ 야영장 안전시설물(안전휀스, 울타리 식재, 수목식재 등) 및 이용객

불편사항 반영한 시설물 정비	: ~ ‘24. 12.

□ 금후계획

◦ 숲속야영장 기간제근로자 채용 및 운영 관리   : ‘25. 1. ~ 12.

쾌적한 도시공원 유지관리

(계속사업)

작성부서 : 도시과 부서장 : 박승용 팀장 : 양진호 담당자 : 박정나  전화 : 6469

□ 추진근거

◦「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제19조(도시공원의 설치 및 관리) 규정에 따라 시장이 공원조성계획에 따라 설치․관리하여야 한다.

□ 개    요

◦ 대상공원 : 교룡공원 외 22개소

◦ 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 173백만원(시비)

◦ 사업내용 : 도시공원 내 시설물, 수목 유지관리 및 예초·제초·전정 등

□ 추진실적

◦ 도시공원 녹지대 및 등산로 유지관리(예초, 전정)	: ‘24. 5. ~ 9.

◦ 도시공원 병충해, 황톳길 소수선 등	: ‘24. 5. ~ 10.

◦ 어린이공원 화장실 정비사업	: ‘24. 10. ~

□ 2개소(도통 1호, 도통 4호)

□ 금후계획

◦ 도통근린공원 외 12개소 수목관리(예초, 수목전정)	:  ‘25. 2. ~ 12.

◦ 어린이 놀이시설 안전검사(도통1호 외 7개소)	: ‘25. 2 ~  5.

◦ 도통 1호 외 12개소 수목 병충해방제	: ‘25. 6.

◦ 공원 내 수목, 녹지대 시설물 보수 및 유지관리	: 계속

도시숲 및 가로수 조성사업

(계속사업)

작성부서 : 도시과  부서장 : 박승용  팀장 : 양진호  담당자 : 박정나  전화 : 6469

□ 추진근거

◦「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」제11조 및 제12조

- 지방자치단체의 장은 도시숲 등의 생태적․경관적․경제적 기능 등이 효율적으로 발휘될 수 있도록 도시숲 등을 조성․관리하여야 한다

- 지방자치단체 장은 아름다운 경관의 조성 및 생활․교통환경 개선 등을  위하여 가로수를 다른 도시숲 등과 연계되도록 조성․관리하여야 한다

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도시숲 1.6ha, 가로수 조성 5.5㎞

◦ 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,000백만원(도비 500, 시비 500)

◦ 사업내용 : 경관개선, 공간활용성을 고려한 도시숲 및 가로수 조성

(단위 : 백만원)

위 치		사업량	예산액	비고
합 계		1.6ha/5.5㎞	1,000
도시숲	광치동 산223번지 일원 (전북대학교 글로컬캠퍼스 부지)	1.6ha	600
가로수	왕정동 1-1(국토정보공사) ~ 대산면 운교리 1091(북남원교차로)	5.5km	400

□ 추진실적

※ 24년 추진실적

- 도시숲 조성(전북대 남원글로컬캠퍼스외 1개소/ 1.0ha) : 소나무 외 13종 4,307주 등

- 가로수 조성(누른대 삼거리 ~ 조산교차로 외 2개소/ 9.0㎞) : 느티나무 식재(R15) 50주, 철쭉 재식재 8,762주 등

◦ 25년 도시숲‧가로수 조성사업 대상지 선정	: ‘24. 12.

□ 금후계획

◦ 도시숲 ·가로수 실시설계용역 발주 및 시행       : ‘25. 1. ~  3.

◦ 남원시 도시숲위원회 심의                        : ‘25. 3.

◦ 공사시행	: ‘25. 5. ~ 12.

◦ 사후관리	: ‘25. 5. ~ ‘27. 5.

기후대응 도시숲 조성사업

(계속사업)

작성부서 : 도시과  부서장 : 박승용  팀장 : 양진호  담당자 : 오민혜  전화 : 6467

□ 추진근거

◦ 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」제11조(도시숲등의 조성․관리)

- 미세먼지 발생원 주변 미세먼지 저감, 탄소흡수, 도시열섬 완화 등 기후 위기 대응

□ 개    요

◦ 위    치 : 요천생태습지공원(주생면 중동리 260번지 일원)

◦ 사업규모 : 2.5ha

◦ 사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 5.

◦ 사 업 비 : 2,500백만원(국비 1,250, 시비 1,250)

◦ 사업내용 : 생활권 주변 숲 조성 및 쉼터, 산책로, 편의시설 등 설치

□ 추진실적

◦ 사업대상지 선정	: `23. 09. 12.

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행                     : `24. 06. ~ 11.

◦ 기후대응 도시숲 조성사업 시행                  : `24. 12.

◦ 기후대응 도시숲 조성사업 전기공사 시행         : `24. 12.

□ 금후계획

◦ 기후대응 도시숲 조성사업 준공                   : `25. 5.

◦ 기후대응 도시숲 조성사업 전기공사 준공          : `25. 6.

생활밀착형 숲 조성사업

(신규사업)

작성부서 : 도시과  부서장 : 박승용  팀장 : 양진호  담당자 : 박정나  전화 : 6469

□ 추진근거

◦ 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」제11조(도시숲등의 조성․관리)

- 미세먼지 발생원 주변 탄소흡수, 미세먼지 저감, 도시열섬 등 기후 위기 대응

□ 개    요

◦ 위    치 : 고죽동 200-4번지 일원(남원 공공산후조리원)

◦ 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 500백만원(기금 250, 시비 250)

◦ 사업내용 : 옥상정원 및 실내정원 조성

□ 추진실적

◦ 생활밀착형 숲 조성사업 공모 추진계획 시달(전북특자도)   : ‘24. 2.

◦ 사업대상지 선정 및 신청(남원시 → 전북특자도)	: ‘24. 2.

◦ 공모 선정 통보                                        : ‘24. 10.

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계 시행                             : ‘25. 1. ~  6.

◦ 공사 시행 및 사후관리                             : ‘25. 7. ~ 12.

※ 공공산후조리원 준공 이후 사업 추진 가능(준공예정 : ‘25. 6.)

□ 기대효과

◦ 다양한 주제정원 조성을 통해 생활권 주변, 소읍지역 다중이용시설 중심으로 지역주민들의 일상 속 녹지공간 확대 및 다양한 유형의 녹색 경관 제공

자녀안심 그린숲 조성사업

(신규사업)

작성부서 : 도시과  부서장 : 박승용  팀장 : 양진호  담당자 : 박정나  전화 : 6469

□ 추진근거

◦ 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」제11조(도시숲등의 조성․관리)

- 미세먼지 발생원 주변 탄소흡수, 미세먼지 저감, 도시열섬 등 기후 위기 대응

□ 개    요

◦ 위    치 : 월락동 449-1번지 일원(월락초등학교 부근)

◦ 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 200백만원(균특 100, 시비 100)

◦ 사업내용 : 등하굣길 내 생활숲 조성

□ 추진실적

◦ 자녀안심 그린숲 조성사업 공모 추진계획 시달(전북특자도)  : ‘24. 3.

◦ 사업대상지 선정 및 신청(남원시 → 전북특자도)	: ‘24. 3.

◦ 공모 선정 통보                                         : ‘24. 10.

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계 시행                           : ‘25. 1. ~  3.

◦ 공사 시행 및 사후관리                           : ‘25. 3. ~ 12.

□ 기대효과

◦ 보행로와 차도 분리로 등하굣길을 이용하는 학생들이 안전하고 쾌적하게 통학할 수 있는 환경 조성

◦ 관목 및 초화류 식재를 통한 녹색공간 제공으로 도시 미관 향상

함파우 지방정원 조성 및 운영관리

(계속사업)

작성부서 : 도시과  부서장 : 박승용  팀장 : 양진호  담당자 : 오민혜 전화 : 6467

□ 추진근거

◦「수목원․정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」제6조의 2(수목원조성 예정지의       지정․해제 등), 제18조의 2(정원의 조성 등)

- 정원조성예정지의 지정(산림청장승인), 정원조성계획의 승인(전라북도)

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암동 산13번지 일원

◦ 조성면적 : 4ha(구역면적 11.3ha)

◦ 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 240백만원(시비)

◦ 사업내용 : 주제정원 및 산책로, 전망대, 편의시설 등 조성

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계용역 등 완료	: ‘20. 09. 03. ~ ‘24. 12. 15.

◦ 함파우 지방정원 조성사업(토목․조경) 시행

- 1차분 준공                             : ‘22. 12. 27. ~ ‘23. 12. 18.

- 2차분 시행                             : ‘24. 03. 19.

◦ 함파우 지방정원 조성사업(전기‧통신) 시행 : ‘23. 04. 24.

◦ 조경 식재 수종 검토를 위한 전문가 자문  : ‘23. 03./ ‘24. 05./ ‘24. 11.

※ 한국수목원정원관리원(한국전통문화대 조경학과 이선 교수, 녹지조경학 어양준 박사), 한국산림복원협회 최상규부회장

□ 금후계획

◦ 함파우 지방정원 조성계획(안) 확정              : ‘24. 12월 한

◦ 함파우 지방정원 조성사업(전기․통신) 준공         : ‘25. 06.

◦ 함파우 지방정원 조성사업(토목․조경) 준공         : ‘25. 06.

◦ 정원관리원 채용 및 관리                      : ‘25. 06. ~ 12.

도시관리계획(고도지구 재정비 수립)

(계속사업)

작성부서 : 도시과 부서장 : 박승용 팀장 : 정병욱 담당자 : 홍성표 전화 : 6452

□ 추진근거

◦ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제37조(용도지구의 지정)

- 쾌적한 환경 조성 및 토지의 효율적 이용을 위하여 건축물 높이의 최고한도를 규제할 필요가 있는 지구에 대하여 고도지구 결정

□ 개    요

◦ 위 치 도

◦ 사업범위 : 관내 고도지구(34개소 - 3.17㎢)

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2025년

◦ 사 업 비 : 350백만원

◦ 사업내용

- 도시여건 변화를 고려하여 합리적인 고도지구 수립 방향 및 기준 설정

- 지속 발전 가능한 미래도시 조성을 위해 고도지구 재정비 수립

□ 추진실적

◦ 남원시 고도지구 최초 결정	: ‘97. 5. 13.

◦ 도시관리계획 고도지구 일부 변경 고시	: ‘20. 5. 8.

◦ 협상에 의한 계약 추진(2차), 착수	: ‘24. 3. ~ ‘24. 4

◦ 용도지구 변경 입안 보고	: ‘24. 10. 21.

◦ 용도지구 변경 입안 보고(2차)	: ‘24. 12. 9.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 도시관리계획 고도지구 결정(변경) 사항은 전라북도지사 권한으로, 고도지구 결정(변경) 당위성 확보 필요

□ 철저한 기초조사 및 현황분석 후, 제반 법규(제도, 정책) 및 도시여건 변화를 전반적으로 검토하여 고도지구 재정비 기준 수립, 당위성 확보

◦ 제반 기능(스카이라인, 경관 및 조망권 확보, 도시 균형발전 등)이 조화를 이룰 수 있도록 우리 시 실정에 맞는 고도지구 재정비 수립

□ 역사도시 기본구상에서 제시하는 남원 천년축을 기준으로 남원읍성권 역사골격정비, 정비구역 설정 등 남원읍성권 역사도시 조성과 연계, 미래 성장동력 확충을 위하여 구도심을 중심으로 고도지구 재정비 기준 마련

※ 시뮬레이션을 활용, 주요 조망권 확보 및 재개발 여건 조성

□ 금후계획

◦ 주민의견 및 시의회 의견청취, 관계기관 협의	: ‘25. 01.

◦ 남원시 도시계획위원회 자문	: ‘25. 03.

구암지구 도시개발사업

(계속사업)

작성부서 : 도시과  부서장 : 박승용  팀장 : 정병욱  담당자 : 양정우  전화 : 6454

□ 추진근거

◦ 「도시개발법」제3조, 제4조(도시개발계획수립 및 도시개발구역 지정), 제17조(실시계획인가), 제29조(환지방식의 경우 환지계획인가 수립 등)

- 기존 시가지와 연접하여 난개발이 우려되는 구암지구에 대해 「도시개발법」에 따라 사업을 추진하여 체계적인 도시개발 및 주거·상업·생태·문화·복지 등 복합 기능을 가진 단지 조성

□ 개    요

◦ 위    치 : 전북 남원시 향교동, 도통동 일원

◦ 시 행 자 : 한국토지주택공사

◦ 사업방식 / 사업비 : 환지방식 / 406억원

◦ 토지이용계획(안)

구 분	계	공동주택	단독주택	준주거시설	공공청사	비고
토지이용	171,702.5㎡	67,336㎡	11,111㎡	5,860㎡	19,081㎡	도로, 공원, 녹지, 저류지 등
수용인구·세대수		2,807인 / 1,080세대

※ 토지소유자 128명(주민대표 8명)

□ 추진실적

◦ 도시개발구역 지정 제안(수용 및 사용방식)	: ‘17. 09. 01.

◦ 사업방식 전환에 따른 구역지정 제안(환지방식)	: ‘18. 04. 20.

◦ 구역지정 및 개발계획 승인(남원시↔전북도)	: ‘18.12.31. ~ ‘19.05.30.

◦ 구역지정(변경) 및 개발계획(변경) 고시(남원시↔전북도)	: ‘20. 08. 14.

◦ 실시계획 인가 고시	: ‘20. 08. 21.

◦ 문화재 시굴조사 추진	: ‘20.12.14 ~ ‘21.06.

◦ 개발계획(변경)(2차) 추진 및 승인	: `21. 02. ~ 10.

◦ 문화재 정밀발굴조사 착수(중층발굴, 4구역 추가발굴)	: `21. 07.

◦ 실시계획 변경 인가 고시(1차)	: `22. 02. 25.

◦ 문화재청 의견에 따른 개발계획 변경 협의(LH↔남원시,전북도)	:  `23.  05. ~

◦ 조성공사 착공[(주)아산종합건설]	: `23. 11.

◦ 문화재 현지조사 완료	: `24. 02.

◦ 개발계획 변경(3차) 고시(사업기간 연장)	: `24. 11.

◦ 실시계획 변경(2차) 고시(사업기간 연장)	: `24. 12.

□ 금후계획

◦ 개발계획 변경(4차) 추진(전북특자도청)	: `24. 12. ~

◦ 개발계획 변경(4차) 승인 및 실시계획 변경(3차) 추진	: `25. 05.

◦ 환지계획 수립 및 인가	: `25. 07. ~ `26. 01.

◦ 조성공사 준공 및 환지처분 공고	: `27. 11. ~ `28. 02.

□ 참고자료[토지이용계획 변경(안)]

남원시 도시재생지원센터 및 거점시설 운영

(계속사업)

작성부서 : 도시과  부서장 : 박승용  팀장 : 김 진  담당자 : 박장순  전화 : 6459

□ 추진근거

◦「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」제11조(도시재생지원센터의 설치)

□ 개    요

<도시재생지원센터>

◦ 운영기간 : 2016년 ~ 도시재생사업 종료 시

◦ 운영예산 : 465백만원 (인건비, 일반운영비 등)

◦ 직원현황 : 총9명 (센터장 1명, 팀장 3명, 팀원 5명)

◦ 담당업무 : 주민역량강화사업, 거버넌스(주민협의체 등) 운영관리, 사업홍보 등

<도시재생거점시설>

◦ 운영기간 : 2022. 01. ~

◦ 사 업 비 : 116백만원 (거점시설 운영 및 유지관리비)

◦ 거점시설 : 커먼스페이스, 사랑나눔어울림센터, 청년창업공간(2개소) 등

□ 추진실적

◦ 커먼스페이스 및 청년창업공간 입주 및 운영    : ‘22. 01. ~

입주공간	상호(대표)	사업아이템	비고
창업공간	고샅(오종하)	카페(제철특산물 활용)
	추냔이네(김민화)	남원 굿즈 편집샵
	㈜도킹씨네마떼끄(김형준)	영화 및 문화 체험공간조성
커먼스페이스	Red Bricks Studio(최한범)	음악과 영상기반 콘텐츠 제작 및 교육

◦ 나우원(NOWWON) 페스티벌 개최(4회)	: ‘22. 04. ~ ‘23. 09.

◦ 2024 도시재창조 한마당 참가 및 남원시 도시재생 홍보	: ‘24. 10. 31. ~ 11. 1.

□ 금후계획

◦ 생활인구 유치를 위한 문화 축제 및 도시재생 홍보 진행       : ‘25. 1. ~

도시재생 인정사업(구.미도탕)

(계속사업)

작성부서 : 도시과  부서장 : 박승용  팀장 : 김  진  담당자 : 김  민  전화 : 6468

□ 추진근거

◦「도시재생 활성화 및 지원에 대한 특별법」제26조의2(도시재생 인정사업)

-  쇠퇴한 도시의 활성화를 위하여「도시재생 활성화 및 지원에 대한 특별법」에 의해 자생적 성장 기반을 확충하고 도시의 경쟁력을 제고하기 위하여 시행

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 금동 22-1번지

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2024년 (4년간)

◦ 총사업비 : 4,389백만원 (국비 2,633, 도비 439, 시비 1,317)
◦ 사업규모 : 대지면적 886㎡ / 연면적 834㎡(지상4층)
◦ 사업내용 : 주민을 위한 문화·예술·상업·체험 복합 공간 조성

□ 추진실적

◦ 도시재생 인정사업 공모 선정	: ‘20. 12. 21.

◦ 문화저장 도시재생대학(9회, 39과목, 303명 수료)	: ‘21. ~ 현재

- ‘21년 : 1기(7과목 59명수료), 2기(7과목 39명수료)

- ‘22년 : 3기(5과목 32명수료). 4기(4과목 32명수료), 5기(3과목 24명수료)

- ‘23년 : 6기(5과목 42명수료). 7기(3과목 32명 수료), 리뉴얼(2과목 16명 수료)

- ‘24년 : 8기(3과목 27명수료)

◦ 2023 문화저장소 문화예술협업한마당 행사(1,620명 참석)   : ‘23. 9. 8 ~ 9.

◦ 주민역량강화사업(S/W) 추진	: ‘24. 5. ~ ‘24. 12.

- 문화저장 도시재생대학, 주민공모사업 등

□ 금후계획

◦ 문화저장소 리뉴얼 사업(H/W) 준공	: ‘24. 12.

남원청년피움공간 in 지리산(고향올래)

(계속사업)

작성부서 : 도시과  부서장 : 박승용  팀장 : 김 진  담당자 : 오병주  전화 : 6472

□ 추진근거

◦「지방분권균형발전법」제21조(인구감소지역에 대한 시책 추진)

- 2024 행정안전부 고향올래(GO鄕ALL來) 공모사업 선정

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 용산리 724-1번지 일원 [구)허브체험장]

◦ 사업기간 : 2024 ~ 2026년 (3년간)

◦ 총사업비 : 16억원(국비 8, 시비 8)

◦ 사업내용 : 청년 생활인구 유입을 위한 복합레지던스 공간 조성

□ 추진실적

◦ 행정안전부 고향올래(GO鄕ALL來) 공모사업 최종선정	: ‘24. 7. 9.

◦ 행정안전부 특별교부세 교부	: ‘24. 7. 26.

◦ 2024년도 제3회 추가경정예산 편성	: ‘24. 9. 19.

◦ 건축기획용역 착수	: ‘24. 10. 24.

◦ 공공건축 사업계획 사전검토 신청	: ‘24. 11. 9.

□ 금후계획

◦ 설계공모 심사 및 실시설계 착수	: `25. 2.

◦ 프로그램안 도출을 위한 사전 수요조사	: `25. 3.

◦ 남원청년피움공간 착공	: `25. 8.

◦ 공간 운영원척 결정 및 제1기 이용자 모집	: ‘25. 10.

◦ 남원청년피움공간 준공 및 프로그램 운영	: ‘26. 3.

금동노후주거지 우리동네살리기 사업

(계속사업)

작성부서 : 도시과  부서장 : 박승용  팀장 : 김  진  담당자 : 박장순  전화 : 6459

□  추진근거

◦「도시재생 활성화 및 지원에 대한 특별법」제12조(도시재생전략계획의 수립)

및 제25조(도시재생사업의 시행)

-  쇠퇴한 도시의 활성화를 위하여「도시재생 활성화 및 지원에 대한 특별법」에 의해 자생적 성장 기반을 확충하고 도시의 경쟁력을 제고하기 위하여 시행

- 「2023 도시재생사업 신청 가이드라인(국토부)」에 의해 공모 선정

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 금동 14통 일원 (면적 : 35,000m2)

◦ 사업기간 : 2024 ~ 2027년 (4년간)

◦ 총사업비 : 79.86억(국비 42.87, 도 7.14, 시 29.85)

◦ 사업내용 : 노후주거 집수리지원, 골목길 경관개선, 거점공간 조성 등

□ 추진실적

◦ 공모 사업 최종 선정	: ‘23. 09.

◦ 집수리 지원사업 전수조사 및 신청카드 작성	: ‘24. 03. ~ 09.

◦ 도랑마을 어울림골목길 정비공사 실시설계 용역 발주	: ‘24. 05. 21.

◦ 도랑마을 어울림센터 조성사업 공공건축 기획용역 발주      : ‘24. 06. 24.

◦ 도랑마을 활력센터 조성사업 실시설계 용역 착수    : ‘24. 07. 10.

- 용역중지 (진입로 및 BF 인증 불가로 인한 중지)	: ‘24. 08. 08.

- 대체부지 매입 완료	: ‘24. 12.

□ 금후계획

◦ 집수리 지원 및 어울림 골목길 정비공사 시행	: ‘25. 03. ~

◦ 도랑마을 활력센터 실시설계 완료	: ‘25. 06.

◦ 도랑마을 활력센터 조성사업 공사 시행	: ‘25. 07.

◦ 전체사업 완료	: ‘27. 12.

동문밖마을 지역특화 재생사업

(계속사업)

작성부서 : 도시과  부서장 : 박승용  팀장 : 김  진  담당자 : 김  민  전화 : 6468

□ 추진근거

◦「도시재생 활성화 및 지원에 대한 특별법」제12조(도시재생전략계획의 수립) 및 제25조(도시재생사업의 시행)

-  쇠퇴한 도시의 활성화를 위하여「도시재생 활성화 및 지원에 대한 특별법」에 의해 자생적 성장 기반을 확충하고 도시의 경쟁력을 제고하기 위하여 시행

- 「2023 도시재생사업 신청 가이드라인(국토부)」에 의해 공모 선정

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 중앙초교 북측 일원 (면적 : 170,000m2)

◦ 사업기간 : 2024 ~ 2027년 (4년간)

◦ 총사업비 : 213.73억원(국비 120.04, 지방비 92.5, 민간 1.19)

◦ 사업내용 : 지역특화재생(목공예 특화 공동플랫폼 조성, 목재테마 정주환경 정비)

□ 추진실적

◦ 2023년 하반기 도시재생사업 공모선정	: ’23. 12.

◦ 안심놀이터 2개소 실시설계용역 착수	: ’24. 06. 05.

◦ 목공예특화 플랫폼조성 건축기획용역 착수	: ’24. 06. 14.

◦ 안심골목길 조성사업 실시설계용역	: ’24. 07. 12.

□ 금후계획

◦ 목공예특화 플랫폼조성 실시설계용역 착수	: ’25. 02.

◦ 안심골목길 정비사업 공사추진	: ’25. 02.

◦ 집수리지원 사업 추진	: ’25. 03.

◦ 목재테마 생활가로 정비사업 실시설계용역 추진      : ’25. 03.

◦ 전체사업 완료	: ‘27. 12.

터미널지구 도시재생 뉴딜사업

(계속사업)

작성부서 : 도시과  부서장 : 박승용  팀장 : 김  진  담당자 : 김  민  전화 : 6468

□ 추진근거

◦「도시재생 활성화 및 지원에 대한 특별법」제12조(도시재생전략계획의 수립)

및 제25조(도시재생사업의 시행)

-  쇠퇴한 도시의 활성화를 위하여「도시재생 활성화 및 지원에 대한 특별법」에 의해 자생적 성장 기반을 확충하고 도시의 경쟁력을 제고하기 위하여 시행

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충․죽항동 일원(시외버스터미널주변 A=14만㎡)

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2024년 (6년간)

◦ 총사업비 : 14,722백만원 (균특 8,500, 도비 1,416, 시비 4,806)

◦ 사업내용 : 이음센터․숲정이마을 공유마당․상생협력상가 조성,

골목길개선사업(포켓주차장,마을쉼터 등), 주민역량강화사업 등

□ 추진실적

◦ 활성화계획 변경 승인 및 고시	: ‘24. 2. 29.

◦ 상생협력상가 설계 완료	: ‘24. 2. 29.

◦ 숲정이마을 공유마당 조성사업 공사 착공(39%)	: ‘24. 5. 3.

◦ 상생협력상가 공사 완료	: ‘24. 8. 17.

◦ 남원 이음센터 준공	: ‘24. 9. 20.

□ 추진계획

◦ 숲정이마을 공유마당 조성사업 공사 완료	: ‘25. 12.

[참고]

도시재생 뉴딜사업(터미널지구) 총괄 사업 계획표

[단위:백만원]

사업명	사업내용	사업비	추진상황	비고
계	6개 사업	13,872
골목길 경관개선	⁃ 터미널주변 골목길 개선 ⁃ 포켓주차장 마을쉼터	1,013	⁃ 바닥포장 완료 ⁃ 벽화, CCTV·가로등설치 ⁃ 마을쉼터 및 포켓주차장 조성	사업 완료
숲정이마을 공유마당	⁃ 마을쉼터 ⁃ 주민편의시설 ⁃ 커뮤니티공간 등 (연면적 2,199㎡,5층)	2,899	⁃ 철거공사 완료 ⁃ 설계공모 완료 ⁃ 실시설계 용역 완료 ⁃ 공사 착수	공사 진행중 (39%)
남원이음센터	⁃ 마을카페 ⁃ 교통회관 ⁃ 사회적생산품판매장 ⁃ 공영주차장 등 (연면적 : 1,914㎡,3층)	7,985	⁃ 공사 완료	사업 완료
상생협력 상가	⁃ 청년 및 소상공인 경제활동공간 조성 (연면적 277㎡, 2층)	1,175	⁃ 구조안전진단 (E등급, 구조불안정) ⁃ 건축물 철거 완료 ⁃ 공사 완료	사업 완료
도시재생 지원센터 운 영	⁃ 현장지원센터 운영	800	⁃ 현장지원센터 운영 (2019. 12. ~ 현재)	사업 완료

지리산 활력타운 조성사업

(계속사업)

작성부서 : 도시과  부서장 : 박승용  팀장 : 김  진  담당자 : 오병주  전화 : 6472

□ 추진근거

◦「지역 개발 및 지원에 관한 법률」제7조(지역개발계획의 수립)

◦「지방분권균형발전법」제31조(지역발전투자협약의 체결 등)

- 지역 특성에 맞는 자립적 발전을 통하여 모든 국민이 어디에 살든 균등한 기회를 누리는 지방시대를 구현하기 위한 지역활력타운 조성

- 2023년 제1기 지역활력타운 공모사업(8개 중앙부처 합동) 선정

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 용산리 717-4번지 일원 / 33,392㎡(시유지)

◦ 사업기간 : 2024 ~ 2026년 (3년간)

◦ 총사업비 : 220억원(국비 90, 시비 60, 기타 70)

◦ 사업내용 :“주거ㆍ생활인프라ㆍ생활서비스”가 복합된 생활거점 조성 (약 78호)

□ 추진실적

◦ 지역활력타운 공모사업 최종선정	: ‘23. 6. 2.

◦ 지역투자발전협약 체결(국토부ㆍ행안부ㆍ문체부ㆍ전북도ㆍ남원시)	: ‘23. 10. 30.

◦ 지역개발계획 변경 승인 고시                         : ‘23. 12. 29.

◦ 지역개발사업구역 지정 및 실시설계 용역 착수	: `24. 6. 26.

* 대표도급사 도화ENG / 사업비 404백만원 / 사업기간 12개월

◦ 재해영향평가 및 환경영향평가 용역 착수	: ‘24. 11.

□ 추진계획

◦ 실시설계 완료 및 기반공사 발주	: `25. 5.

◦ 지역개발사업구역 지정 및 실시계획 승인	: `25. 6.

◦ 기반시설 분야 사업 완료 및 건축분야 사업 착수	: ‘26. 3.

◦ 건축분야 사업 완료 및 입주 시작	: ‘26. 12.

동부권 학교복합시설 건립사업

(계속사업)

작성부서 : 도시과  부서장 : 박승용  팀장 : 김  진  담당자 : 오병주  전화 : 6472

□ 추진근거

◦「학교복합시설 설치 및 운영·관리에 관한 법률」제5조(학교복합시설의 설치)

- 2024 교육부 학교복합시설 공모사업 선정

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 운봉읍 용산리 721-4번지 일원(지역활력타운 조성 예정지 / 시유지)

◦ 사업기간 : 2024 ~ 2026년 (3년간)

◦ 총사업비 : 196억원(국비 138, 시비 58)

◦ 사업내용 : 교육·체육·문화 복합시설 2동 건립

구 분	주요공간
꿈키움미래공간 (교육·문화)	- AI･코딩 교육 프로그램 운영공간, 스터디 카페, 공유주방 등
지리산 체육센터 (체육)	- 다목적 체육관, AR 스포츠 체험시설, 드론교육시설 등

◦ 시행기관 : 남원시(주관), 남원교육지원청(협조)

□ 추진실적

◦ 학교복합시설 공모사업 MOU체결(남원시-교육지원청)	: ‘24. 5. 22.

◦ 교육부 학교복합시설 공모사업 최종선정	: ‘24. 8. 8.

◦ 학교복합시설 건립사업 건축기획 용역 착수	: ‘24. 11. 7.

□ 추진계획

◦ 학교복합시설 건립사업 실시협약 체결(남원시-교육지원청)	: ’25. 2.

◦ 설계공모 심사 및 실시설계 착수	: ’25. 3.

◦ 동부권 학교복합시설 건립 착공	: ’25. 10.

◦ 학교복합시설 준공 및 개관	: ’27. 3.