2025. 1.

2025년도 주요업무 계획

교   통   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2024년 주요업무 결산

□ 2025년 중점 추진방향

□ 2025년 주요업무 계획

◦ 시내버스 노선체계 개편(신규)

◦ 시내버스 재정지원

◦ 공공형 버스(행복버스) 운영

◦ 교통약자 특별교통수단 운영

◦ 택시 운송사업 활성화 지원

◦ 대중교통 취약지역 DRT 택시 운영

◦ 대중교통 시설 환경개선

◦ 저상버스 승강장 시설개선(신규)

◦ 화물공영차고지 운영

◦ 공영주차장 조성

◦ 원도심 공영주차장 유료화 추진

◦ 교통안전시설물 설치 및 관리

◦ 어린이보호구역 개선 및 속도제한 정비

◦ 스마트 어린이보호구역 조성(신규)

◦ 교통이용약자 보호구역 개선사업

◦ 자전거 이용환경 조성

◦ 스마트 교통체계 운영·관리

◦ 선진 주차질서 확립

◦ 과태료 체납자 관리 및 세입 확충

◦ 친절하고 신속한 차량등록

일  반  현  황

□ 기    구

							교 통 과 장
							이 선 욱
교통행정팀장				교통지도팀장							교통시설팀장				차량등록팀장
안 은 정				박 기 정							김 성 철				오 미 자
대중교통정책 교통안전계획 대중교통관리 터미널관리 택 시 관 리 화물자동차관리 여객자동차관리				교통질서유지 주정차지도단속 주정차 민원처리 과태료 부과징수 무단방치차량관리 자동차관리사업							교통안전시설물관리 공영주차장 조성 어린이·노인 보호구역관리 지능형교통체계 자전거도로 관리 교통공원관리				자동차 등록 이륜자동차등록 의무보험 관리 자동차 압류등록 자동차 제증명 건설기계등록관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	19	1	5	6	5	2
현 원	19	1	5	4	5	4
증 감	-	-	-	△2	-	2	공무직7

	주 요 성 과
◦ 시내버스 운영체계 전환 타당성 용역을 통한 대중교통 효율성 제고 ◦ ‵24년 남원여객 대중교통 경영 및 서비스 평가 2위 인센티브 확보(94,017천원) ◦ 저상버스 1대, 특별교통수단 6대 증차를 통한 교통약자 운송수단 확충 ◦ 시민 편익 증진을 위해 스마트 승강장4개소 사업 시행 및 편의시설 설치 ◦ 지리산과 관내 주요 관광지를 연계한 정령치 순환버스(2코스)운영(연 13,070명 이용) ◦ 대중교통 소외지역 최소화를 위해 행복마을버스(8대), 행복콜택시(12대), 통학택시(택시12, 버스1)운영 ◦ 교통정보 어플 개발 및 주차정보시스템 구축으로 스마트 교통체계 확립 ◦ 공영주차장 조성 및 보호구역 개선사업을 위한 `25년 국도비 30억원 확보 ◦ 교통혼잡지역 주차난 해소를 위한 공영주차장 4개소(219면) 조성 ◦ 장기주차 해소 및 주차회전율 제고를 위한 공영주차장 3개소 유료화 실시 ◦ 공영주차장 유료화 자동 요금 감면 시스템 도입(국가유공자, 경차, 친환경차, 장애인) ◦ 쾌적한 교통환경 조성을 위한 교통안전시설물 유지보수 및 설치 ◦ 자전거보험 시행(수혜자 59명) 및 안전한 자전거 이용환경 조성(L=0.9Km 정비) ◦ 교통약자를 위한 보호구역 개선 사업 추진(17개소) ◦ 규제 완화 정책에 따른 어린이 보호구역 속도제한 시스템 정비사업 시행(한울학교, 오동초)

2024년 주요업무 결산

□ 시민수요 맞춤형 교통환경 조성

◦ 교통정보 어플리케이션* 개발 구축으로 시민이용 편익 증진

* 시내버스 실시간 운행정보(버스 위치, 도착정보, 노선 검색 등) 및 공영주차장 실시간 잔여 면수 제공

◦ 대중교통 소외지역 최소화를 위한 행복마을버스*, 행복콜택시*, 통학택시** 운영으로 주민들의 실질적인 이동권 확보

* 행복마을버스(8대) 연간 61,076명, 행복콜택시(12대) 30,602명 이용

** 통학택시 13대(택시12, 버스1), 중·고등학생 10개 학교 90명 이용

◦ 시민 대중교통 이용 편의 제공을 위한 버스승강장 이용환경 구축*

* 승강장 신규 설치 47건, 온열의자 56개소, 버스정보안내기 12개소 등

◦ 광한루원 등을 경유하여 지리산과 관내 주요 관광지를 연계한 정령치 순환버스(2코스) 운영(연간 13,070명 이용)

□ 교통약자 이동편의 제공 및 안전한 보행권 확보

◦ 교통약자를 위한 특별교통수단* 6대 증차·운영으로 이용 대기시간 단축

* 특별교통수단(19대) 연간 18,038명 이용

◦ 쾌적한 교통환경 조성을 위한 교통안전시설물 유지보수 및 설치*

* 교통안전 시설물 단가공사 12건, 횡단보도 투광기 7개, 불법주정차 및 과속단속카메라 11대 설치 등

◦ 교통약자를 위한 보호구역 개선사업 추진*

* 보호구역 17개소 시설개선사업 추진(어린이 13, 노인 2, 마을주민 2)

◦ 자전거보험 시행* 및 안전한 자전거 이용환경 조성**노력

* ’24년 보험수혜자 59명, 약 37백만원 / **자전거도로 정비(L=0.9㎞)공사 추진

□ 주차환경 개선 및 선진 주차문화 조성

◦ 장기주차 해소 및 주차회전율 제고를 위한 공영주차장 3개소* 유료화 실시

* 도통지구 주차타워, 시청 제1주차장, 시장4가 공영주차장

◦ 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성*

* 향교지구 주차타워(96면), 아영 청계지구(73면), 운봉 1·2지구(50면) 공영주차장 조성

◦ 실시간 주차 잔여 면수 표출을 위한 주차정보제공시스템* 구축

* 주차정보제공시스템 9개소 추가 구축 및 어플, 시홈페이지, 전광판 연계

◦ 공영주차장 유료화 자동 요금 감면 시스템 도입*

* 국가유공자, 경차, 친환경차, 장애인

◦ 불법주정차 지도단속 및 사전문자알림서비스 추진*

* 불법주정차 지도단속 4,412건 / 사전알림서비스 가입 3,576대 / 문자발송 14,556건

◦ 춘향제, 드론제전 등 각종 행사 교통지도 근무지원으로 성공적 개최 일조

□ 친절하고 신속한 차량등록 서비스 제공

◦ 차량등록 민원처리 111,307건(신규,이전,말소 등)

* 자동차 104,643건 / 건설기계 5,297건 / 이륜차 1,367건

◦ 차량등록(자동차, 이륜차, 건설기계) 대수 : 54,904대

◦ 국민신문고 민원 처리 : 337건

* 승용차 138건 / 이륜차 34건 / 화물차 165건

	아쉬운 점
◦ 버스 노선의 복잡성과 낮은 접근성 등으로 시내버스 이용 만족도 저하 ◦ 동부생활권 시민 및 동지역 등하교시간 학생 대중교통 수요 미충족 ◦ 정령치순환버스 수요 노선 미충족 및 KTX 도착 시간 연계 부족 ◦ 교통정보의 불확실성으로 인한 신속한 교통정보제공 미흡 ◦ 공영주차장 조성에도 주차장 내 장기주차 등으로 인한 불편민원 지속발생 ◦ 6대불법주정차 금지구역 확대에 대한 홍보 부족으로 인한 주민신고제 민원 증대

2025년 중점 추진방향

편리하고 효율적인 수요자 중심

교통혁신 구현

	중 점 추 진 과 제
◦ 시민 편안한 대중교통환경 조성 - 효율적인 노선체계 구축(동부생활권 노선개선, 동지역 노선 추가공급) - 시민 수요에 부응하는 효율적인 교통체계 모색(남원의료원 회차지 조성) - 교통소외지역 주민 맞춤형 교통서비스 지원(행복콜버스·택시 추가 투입) - 교통약자 이동지원 서비스 강화(저상버스 3대 도입, 대·폐차 4대 확충) - 시민이 편안한 대중교통 이용시설 개선(버스 승강장 시설개선 등) ◦ 안전하고 편리한 교통인프라 확충 - 주차환경 개선을 위한 공영주차장 조성(인월·죽항지구) - 스마트 교통체계 확립(자동요금감면시스템, 교통정보 어플리케이션) - 보호구역 지정 및 개선사업 추진(보호구역 23개소 시설개선) - 안전하고 편리한 자전거 이용환경 조성(자전거도로 정비, 보험가입) ◦ 선진 교통질서 확립 - 교통사고 예방과 교통질서 확립을 위한 주정차 단속 실시 - 문자알림 서비스 가입을 통한 주정차 계도·홍보 - 주요행사 교통질서 유지를 통한 관광남원 이미지 제고 ◦ 친절한 차량등록 민원처리 - 신속·정확한 민원 처리로 시민 만족도 제고 - 건설기계 등록 및 조종사 안전교육 안내 - 불법개조 차량 신속한 원상복구로 교통사고 사전 예방

2025년 주요업무 계획

시내버스 노선체계 개편

(신규사업)

작성부서 : 교통과  부서장 : 이선욱  팀장 : 안은정  담당자 : 한  진  전화 : 6562

□ 추진근거

◦ 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 제3조(국가 등의 책무)

- 국가 및 지방자치단체는 모든 국민이 편리하고 안전하게 대중교통을 이용할수 있도록 정책을 수립하고 이를 시행하여야 한다.

□ 개    요

◦ 사업기간 : ‵25. 1. ~ 12.

◦ 사업목적 : 시내버스 운행 효율 극대화

◦ 사 업 비 : 453.2백만원

◦ 사업내용 : 시내버스 노선 개편 및 노선정보 제공 체계 보완

□ 추진계획

구 분	사업내용	사업량	주요내용	소요예산 (백만원)	추진일정
동지역 대중교통 개선	저상버스 추가 투입	1대	· 등하교시간 순환버스 추가운행 * 그 외 시간대 동부권역 운행	180	‘25. 1.~2.
노인승객 대중교통 이용 확대	남원의료원 회차지 조성	1개소	· 의료원 부지내 회차지 조성 및 노선연장 배차 증가(169회→331회)	30	‘25. 1.~3.
동부생활권 시내버스 노선개선	아영면 버스노선 개선	11회	· (기존노선) 복지센터↔하성 (변경노선) 복지센터-하성-송리- 서정-복지센터	2	‘25. 1.~3.
	정령치 버스노선 조정	6회	· 정령치-허브밸리 노선추가	1.2	‘25. 4.
	정령치 버스 KTX연계		· 정령치 버스 KTX연계 시간조정	비예산	‘25. 4.
	산내면 행복버스 투입	1대	· 기존 시내버스 운행에 행복버스 추가투입 *인월시장-상황-달궁(1일 8회)	240	‘25. 1.~10.

□ 기대효과

◦ 노선개편을 통한 효율적 운행으로 시민들의 대중교통 수요 충족

시내버스 재정지원

(계속사업)

작성부서 : 교통과  부서장 : 이선욱  팀장 : 안은정  담당자 : 한  진  전화 : 6562

□ 추진근거

◦ 여객자동차 운수사업법 제50조(재정 지원)

◦ 남원시 여객자동차운수사업 재정지원 조례 제3조(재정 지원)

□ 개    요

◦ 사업기간 : ‵25. 1. ~ 12.

◦ 위    치 : 남원시 전역

◦ 사 업 비 : 6,719백만원(‘24교통량 조사 및 재정심의 결과 반영)

구 분

합 계

국 비

도 비

시 비

비 고

벽지노선

2,200

660

0

1,540

손실보상금

천원단일요금제

2,149

0

0

2,149

손실보상금

어르신무상교통

913

0

0

913

손실보상금

비수익노선

1,457

0

422

1,035

재정지원금

합  계

6,719

660

422

5,637

* 손실액 보전 산출식(2024년 교통량조사 용역 결과)

총 손실보전액	=	벽지노선 손실보상	+	단일요금제 손실보상	+	어르신 무상교통 손실보상	+	비수익노선 재정지원

	< 운수업체 현황 >
□ 현 황 : ㈜남원여객 / 직원수(85명) / 차량수(44대) □ 운행계통 : 112개노선, 10,510km운행(1일) □ 벽지노선 : 58개 구간, 구간연장 549.4km

□ 추진실적

◦ 시내버스 외부회계감사 및 교통량조사 용역 시행	: ‵24. 3. ~ 10.

◦ ‵24년 시내버스 재정지원 심의	: ‵24. 11.

◦ ‵24년 남원여객 대중교통 경영 및 서비스 평가(2위) 인센티브(94,017천원)지원

□ 금후계획

◦ 시내버스 종사자 불친절 개선 교육 실시               : 반기

◦ ‵25년 시내버스 외부회계감사·교통량조사 용역 시행    : ‵25. 3. ~ 8.

공공형 버스(행복버스) 운영

(계속사업)

작성부서 : 교통과  부서장 : 이선욱  팀장 : 안은정  담당자 : 한  진  전화 : 6562

□ 추진근거

◦ 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 제3조(국가 등의 책무)

◦ 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌 지역개발 촉진에 관한 특별법 제 35조의 2(농어촌지역 교통편의 증진 지원)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 5개 읍·면(대강·인월·아영·운봉·산내) 및 시내 일원

◦ 사업기간 : ‵25. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 600백만원(국 300 도 60 시 240)

◦ 운행대수 : 8대 / 중형(25인승) 1대, 소형버스(19인승) 6대, 소형승합(12인승) 1대

◦ 운행방법 : 고정노선형 및 수요응답형

운행방식	운행지역	차 종(인승)	차량대수	주요 용도
고정노선형	시내	중형버스(25인승)	1대	등·하교
	운봉읍	소형버스(19인승)	1대	소재지 이동
	인월면		1대	소재지 이동
	아영면		1대	소재지·인월시장 이동
	정령치 순환		2대	주요 관광지 방문
수요응답형	대강면	소형승합(12인승)	1대	면 내 이동
예비차량	예비	소형버스(19인승)	1대	고장 시 대체투입

□ 추진실적

◦ 행복 시내순환버스 노선 개편(남원중 하교시간 고려)	: ‵24. 3.

◦ 대강면 DRT 대·폐차 구입 완료(1대)	: ‵24. 4.

◦ 공공형버스 운영 및 보조금 지급	: ‵24. 1. ~ 12.

◦ 이용현황

(단위 : 명 / 2024. 1. ~ 11.)

합 계	운행지역	시내순환	운봉읍	인월면	아영면	대강면	정령치
61,076	이용객	21,171	6,626	6,938	7,204	6,067	13,070

□ 금후계획

◦ 시내버스 노선체계 개편에 따른 행복버스 연계 조정	: ‵25. 1. ~ 12.

- (산내면) 행복버스 1대 추가 투입 ⇒ 연간 승객 약 16,700명 교통복지 증진 예상

◦ 정령치 순환버스 노선 개편 및 시간 변경	: ‵25. 2. ~

교통약자 특별교통수단 운영

(계속사업)

작성부서 : 교통과  부서장 : 이선욱  팀장 : 안은정  담당자 : 한  진  전화 : 6562

□ 추진근거

◦ 교통약자의 이동편의 증진법 제16조(특별교통수단의 운행 등)

◦ 남원시 특별교통수단 등의 운영에 관한 조례

□ 개    요

◦ 사업기간 : ‵25. 1. ~ 12.   * 위탁기간 : ’22. 7. 1. ∼ ‘25. 6. 30.(3년)

◦ 사 업 비 : 1,092백만원(기269 국98 도49 시676)

- 특별교통수단 운영 : 895백만원 / 대·폐차 구입비(4대) 196백만원

◦ 사업규모 : 특별교통수단(6인승 승합차) 19대

◦ 수탁단체 : 전북지체장애인협회 남원시지회(센터장 1, 사무 2, 운전 21)

□ 추진실적

◦ 교통약자 특별교통수단 만족도 조사                   : ‵24. 6.

◦ 특별교통수단 차량 6대 증차(법정대수 충족)	: ‵24. 7.

◦ 「남원시 특별교통 수단 등의 운영에 관한 조례」일부 개정  : ‵24. 10.

◦ 특별교통수단 이용자 등록 (533명)                     : 연중

◦ 이용현황

(단위 : 건 / 2024. 1. ~ 11.)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
이용객	18,038	1,376	1,275	1,617	1,606	1,782	1,582	1,766	1,622	1,578	1,963	1,871
일/1대	3.5	3.4	3.4	4.0	4.1	4.4	4.1	3.0	2.8	2.8	3.4	3.3

□ 금후계획

◦ 특별교통수단 차량 대·폐차 구입(4대)	: ‵25. 1. ~ 6.

◦ 특별교통수단 이용등록 접수처 확대 및 홍보	: 년중

- 이동지원센터 방문신청 ⇒ 읍·면·동 행정복지센터 접수처 확대

◦ 특별교통수단 이동지원 센터 민간위탁 수탁운영자 모집  : ‵25. 4.

택시 운송사업 활성화 지원

(신규·계속사업)

작성부서 : 교통과  부서장 : 이선욱  팀장 : 안은정  담당자 : 김지연  전화 : 6564

□ 추진근거

◦ 남원시 택시운송사업 발전에 관한 조례 제6조(재정지원)

- 시장은 택시운송사업의 발전을 위하여 운송사업자 및 운수종사자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예산의 범위에서 필요한 사업비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

□ 개    요

◦ 사업기간 : ‵25. 1. ~ 12.

◦ 사업대상 : 관내 택시 321대 (개인 242대, 법인 79대 6개 업체)

◦ 사 업 비 : 597.9백만원 (도 61.1, 시 550.8)

◦ 사업내용

(단위 : 백만원)

구분	합계	도비	시비	비고
계	596	47.1	548.9
콜관제료	92.4	-	92.4	월 4만원 한도
카드수수료	115.6	34.7	80.9	전액지원
카드통신료	21.4	6.4	15	월 5,500원
시정홍보비	250.3	-	250.3	월 6만원
택시 감차지원	-	-	-
택시 대폐차 지원*	20	6	14	20대 (개14, 법6)
블랙박스 설치지원*	96.3	-	96.3	대당 30만원

* 신규사업

□ 추진실적

◦「남원시 개인택시운송사업 면허사무처리 규정」 일부개정	: ‵24. 4. 10.

- 개인택시 양수·대리운전·상속 시 주민등록상 거주기간 1년 제한 삭제

◦ 2024년 남원 국제드론제전 래핑 홍보 시행 (100대)	: ‵24. 7. ~ 10.

□ 금후계획

◦‘25년 택시사업 추진을 위한 간담회 개최	:  ‵24. 12.

◦ 제5차 택시총량제 계획 수립 용역 완료	:  ‵25. 1.

대중교통 취약지역 DRT 택시 운영

(계속사업)

작성부서 : 교통과  부서장 : 이선욱  팀장 : 안은정  담당자 : 김지연  전화 : 6564

□ 추진근거

◦ 남원시 행복콜택시 운행에 관한 조례

◦ 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법 제23조

□ 개    요

◦ 행복콜택시 운영사업

- 사업기간 : ‵25. 1. ~ 12.

- 사 업 비 : 415.5백만원(국 150, 시 265.5)

- 사업규모 : 택시 12대 (1대 130천원/일)

- 사업내용 : 대중교통 취약지역(면) 주민을 위한 콜택시 운영

◦ 농촌지역 중고등학생 통학택시 지원사업

- 사업기간 : ‵25. 3. ~ 12. (방학기간 제외)

- 사 업 비 : 88.4백만원(도 59, 시 29.4)

- 사업규모 : 매년 2월 교육청 수요조사 결과 반영 결정

- 사업내용 : 농촌지역 중·고등학생 통학차량 이용 지원

□ 추진실적

◦ 행복콜택시 수혜자 만족도 조사	: ‵24. 6. 24. ~ 28.

◦ 행복콜택시 운전기사 친절교육 시행	: ‵24. 9. 30.

◦ 행복 콜택시 운영실적                                   (단위 : 건)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
이용자수	30,602	2,981	2,776	2,753	2,823	2,674	2,797	2,638	2,587	2,919	2,727	2,927
일/1대 평균이용자수	10.7	10.8	11	10.9	10.7	9.7	11.7	9.6	9.8	11.6	9.9	11.6

※ 농촌지역 중고등학생 통학 택시지원 : 차량 13대(택시 12, 버스 1) / 10개 학교 / 학생 90명

□ 금후계획

◦ 통학택시 수요조사 및 운행 협약 체결	: ‵25. 2.

◦ 시내버스 노선 변경에 따른 행복콜택시 추가 투입(3대)	: ‵25. 3.

대중교통 시설 환경개선

(계속사업)

작성부서 : 교통과  부서장 : 이선욱  팀장 : 안은정  담당자 : 김지연  전화 : 6564

□ 추진근거

◦ 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 제3조

- 국가 및 지방자치단체는 모든 국민이 편리하게 안전하게 대중교통을 이용할 수 있도록 대중교통을 육성하고 지원하기 위하여 정책을 수립하고 이를 시행하여야 한다.

□ 개    요

◦ 사업기간 : ‵25. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 992백만원 (국 136, 도 43.5, 시 812.5)

◦ 사업내용 : 대중교통 승강장 및 편의시설물 교체·신규 설치 등

□ 추진실적

◦ 버스승강장 및 시설물 설치현황

(단위 : 백만원)

구 분	시내버스 승강장	스마트 쉼 터	택시 승강장	온열의자	버스 정보 안내기 (BIT)	태양광 조명시설	에어커튼	온기 사랑방 (바람막이문)	승차대기 알림시설
현 황	577개소	5개소	17개소	269개소	71개소	260개소	99개소	103개소	22개소
사업비	346	340	-	160	80	-	6	60	-
‘25년(계획)	25개소	4개소 (사고이월)	-	40개소	10개소	-	10개소	30개소	-
‘24년(실적)	17개소	-	-	56개소	12개소	10개소	-	30개소	-

◦ 승강장 관련 민원 처리(120건)

- 버스정차 표시주 설치 26개소, 시설물 보수 79건, 기타 15건

□ 금후계획

◦‘25년 승강장 시설개선 읍면동 수요조사 시행	: ‵24. 12.

◦‘24년 스마트 쉼터 버스승강장 설치(사고이월) 완료	: ‵25. 5.

◦ 민원에 따른 승강장 유지보수 및 시설개선 사업 추진	: 수시

저상버스 승강장 시설개선

(신규사업)

작성부서 : 교통과  부서장 : 이선욱  팀장 : 안은정  담당자 : 김지연  전화 : 6564

□ 추진근거

◦ 제4차 남원시 교통약자 이동편의 증진계획 (2022~2026)

◦ 교통약자의 이동편의 증진법 제14조제5항

- 도로관리청은 저상버스등의 원활한 운행 및 교통약자의 접근성 개선을 위하여 필요한 경우에는 버스정류장과 도로를 정비하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

□ 개    요

◦ 사업기간 : ‵25. 1. ~ 12.

◦ 사업규모 : 관내 시내버스 승강장 3개소

◦ 사 업 비 : 45백만원(도 13.5, 시 31.5)

◦ 사업내용 : 시내버스 승강장 주변 인도정비(안내판설치, 점자블록 등) 및 시설물 개선

□ 추진계획

◦ 저상버스 도입(‘24년 1대, ‘25년 3대)	: ‵25. 2.~10.

◦ 대상지 선정 협의(장애인 단체 등)	: ‵25. 1.

◦ 저상버스 승강장 시설개선사업 실시설계 추진	: ‵25. 1. ~ 2.

◦ 공사착공 및 준공	: ‵25. 3. ~ 6.

□ 기대효과

◦ 저상버스 승강장 시설개선 사업을 통한 교통약자 대중교통 이용          활성화 및 안전사고 예방

화물공영차고지 운영

(계속사업)

작성부서 : 교통과 부서장 : 이선욱  팀장 : 안은정  담당자 : 장재호  전화 : 6563

□ 추진근거

◦ 화물자동차 운수사업법 제45조 및 남원시 화물자동차 공영차고지

관리 및 운영 조례에 의거

- 운수사업을 효율적으로 관리하고 건전하게 육성하여 화물의 원활한

운송을 도모하고 운수종사자들의 사업편의 증진 및 복지 향상 목적

□ 개    요

◦	위 치	:	주생면 상동리 75번지 일대
◦	사업기간	:	‵25. 1 ~ 12월
◦	사 업 비	:	14백만원
◦	시설규모	:	주차장 219면(대형166, 승용50), 관리소 1동, 정비소 1동
◦	운영인력	:	1명(공공근로)
◦	차고지 이용 및 계도·단속현황

□ 추진실적

◦	화물공영차고지 정비사업 주차관제 시스템 설치	:	‵24. 8월
◦	화물자동차 공영차고지 주변 환경정비 2회(제초작업)	:	‵24. 5월, 10월
◦	화물공영차고지 등록제 운영(167대)	:	수시
◦	차고지 이용 및 계도·단속현황	:	‵24. 1~12월

(`24.12.기준)

구분	이용현황				계도·단속현황 (건)
	일평균	월평균	이용률	비고	단속	부과	계도	이첩	비고
2024년	211대	6,357대	96%		23	7	-	16

□ 금후계획

◦	화물자동차 불법 밤샘주차 단속	:	연중 수시
◦	화물자동차 공영차고지 관리 및 환경정비	:	연중

공영주차장 조성

(계속사업)

작성부서 : 교통과  부서장 : 이선욱 팀장 : 김성철 담당자 : 김건중 전화 : 6577

□ 추진근거

◦ 주차장법 시행규칙 제1조의2(실태조사 방법 및 주기)

- 남원시 주차장 수급실태조사 및 주차환경개선 기본계획은 3년마다 실시하며, 이에 따라 주차장 조성을 추진

□ 개    요

◦ 사업기간 : ‵25. 1. ~ 12월

◦ 위    치 : 남원시 관내(인월지구, 죽항지구)

◦ 총사업비 : 2,600백만원(도비 1,000 시비 1,600)

◦ 사업내용 : 인월지구 공영주차장(50면) , 죽항지구 공영주차장(12면)

* 관내 공영주차장 59개소(2,816면)

□ 추진실적

◦ 향교지구 주차타워 건립사업 공사 착공(96면)	: ‵24. 3. 15.

◦ 아영 청계지구 공영주차장 조성사업 준공(73면)	: ‵24. 6. 9.

◦ 운봉 1지구 공영주차장 조성사업 준공(27면)	: ‵24. 11월

◦ 운봉 2지구 공영주차장 조성사업 착수(23면)	: ‵24. 12월

◦ ‵25년 공영주차장 조성 도비 확보(도비 1,000백만원)	: ‵24. 12월

□ 금후계획

◦ 향교지구 주차타워, 운봉2지구 공영주차장 준공	: ‵25. 4월

◦ 인월, 죽항지구 공영주차장 조성사업 실시설계 용역 시행	: ‵25. 1~2월

◦ 인월, 죽항지구 공영주차장 조성사업 편입토지 감정 및 보상	: ‵25. 2~3월

◦ 인월, 죽항지구 공영주차장 조성사업 시행	: ‵25. 4~7월

원도심 공영주차장 유료화 추진

(계속사업)

작성부서 : 교통과  부서장 : 이선욱  팀장 : 김성철  담당자 : 박정혁  전화 : 6578

□ 추진근거

◦ 남원시 주차장 조례, 주차장법 제13조 제2항(노외주차장의 관리)

주차장법 제14조 제1항(노외주차장의 주차요금 징수 등)

- 노외주차장을 관리하는 자는 주차하는 사람으로부터 주차요금을 받을 수 있다

□ 개    요

◦ 사업기간 : ‵25. 1. ~ 12월

◦ 위    치 : 관왕묘 옆 주차장(55면), 구 군청 주차장(105면)

◦ 총사업비 : 220백만원(시비)

◦ 운영일시 : 매일(주말, 공휴일 포함) / 08:00~18:00

◦ 운영관리 : 무인정산시스템 / 기간제 근로자 근무(주차관리 및 환경정비)

◦ 주차요금 : 1시간 미만 무료 / 최초 1시간 초과 시 500원, 10분당 200원

□ 추진실적

◦ 공영주차장 유료화 운영(시청 제1주차장, 도통지구 주차타워, 시장4가)	: ‵24. 5. 1.~

- ‵24년도 유료화 공영주차장 세외수입액 : 25백만원

- 주차공간 확보 및 일 평균 회전율 상승(1일 1구획 당 이용차량 : 시청 4.45대, 시장4가 3.17대)

◦ ‵25년도 공영주차장 유료화 추진계획 보고              : ‵24. 7. 30.

□ 금후계획

◦ ‵25년도 유료화 시설 정비사업 실시설계 시행	: ‵25. 1월 ~

◦ ‵25년도 유료화 확대 운영 주민설명회 시행	: ‵25. 1월 ~

◦ ‵25년도 유료화 시설 정비사업 시행	: ‵25. 2월 ~

◦ 유료화 확대 운영 안내 홍보 시행	: ‵25. 2월 ~

- 플래카드, 팸플릿 등의 다양한 매체 활용

◦ 유료화 확대 운영 개시	: ‵25. 5월 ~

교통안전시설물 설치 및 관리

(계속사업)

작성부서 : 교통과  부서장 : 이선욱 팀장 : 김성철 담당자 : 김건중 전화 : 6577

□ 추진근거

◦ 도로교통법 제3조(신호기 등 설치 및 관리), 제4조(교통안전시설의 종류 및 설치·관리기준)

- 시장·군수는 신호기 및 안전표지를 설치·관리하여야 한다

□ 개    요

◦ 사업기간 : ‵25. 1. ~ 12월(연중)

◦ 위    치 : 남원시 관내

◦ 사 업 비 : 1,212백만원(시비)

◦ 사업내용 : 교통안전시설물 현지점검 및 시설물 설치·보수 정비

◦ 사업내역

(단위:백만원)

구 분	사업비	사업내용		위 치	비 고
		설치	유지
합 계	1,212	17대	724대
신호등	300	-	459대	관내
조명등	50	7대	110대	관내
무인단속카메라	212	10대	155대	관내
차선도색	450	-	123㎞	관내
기 타	200	교통표지판, 점검수수료, 전기·통신요금

□ 추진실적

◦ 불법주정차 및 과속 단속 카메라 설치(11개소)	: ‵24. 1~12월

- 남원시 교통사고 건수 : ‵23년 258건 → ‵24년 158건(39% 감소)

◦ 교통안전시설물 유지관리(차선, 신호등, 표지판 등) 단가공사 시행	: ‵24. 1~12월

- 차선도색(12,000㎡), 신호등 보수 및 교체(80개소), 표지판 신설 및 교체(120개소)

◦ 2024년 교통안전시설물 읍면동 사업대상지 조사	: ‵24. 12월

- 시․군도, 농어촌도로 차선도색 필요구간 조사 (시가지 2년주기, 읍․면 3년주기)

□ 금후계획

◦ 교통안전시설물(신호등, 차선, 표지판) 정비 실시설계 용역 시행	: ‵25. 1월

◦ 교통안전시설물(신호등, 차선, 표지판 등) 유지관리 단가공사 시행	: ‵25. 1~12월

◦ 보행자 안전을 위한 무인단속카메라 설치(신호, 과속, 주정차)	: ‵25. 1~12월

- 사고 다발지역 및 수요조사를 통해 대상지 선정 후 경찰서·도로교통공단 협의 후 카메라 설치

어린이보호구역 개선 및 속도제한 정비

(계속사업)

작성부서 : 교통과 부서장 : 이선욱  팀장 : 김성철  담당자 : 이귀현  전화 : 6985

□ 추진근거

◦ 도로교통법 제12조 제5항(어린이 보호구역의 지정·해제 및 관리)

- 시장등은 어린이 보호구역에 어린이의 안전을 위하여 시설 또는 장비를 설치하여야 한다

□ 개    요

◦ 사업기간 : ‵25. 1 ~ 12월

◦ 위    치 : 남원시 관내 11개소(초등학교9, 어린이집2)

◦ 사 업 비 : 2,315백만원(도비 1,140, 시비 1,175)

◦ 사업내용

(단위 : 백만원)

구 분	어린이보호구역 개선사업	속도제한 정비사업
사 업 비	2,035(도비 1,000, 시비 1,035)	280(도비 140, 시비 140)
위치	9개소(중앙초 외 7, 지산 어린이집)	2개소(남원초, 딩동댕 어린이집)
사업내용	- 교통안전시설물 설치 보호구역 시설물 유지보수	시간대별 어린이보호구역 속도제한 적용 (07:00~20:00 : 30km/h, 20:00~07:00 : 50km/h)
사업량	교통표지판 및 음성안내장치 설치, 미끄럼방지 포장 등	가변형 속도제한 표지판 설치 및 무인단속 시간 조정 등

□ 추진실적

◦ ‵24년 보호구역 실태조사 용역 시행(어린이, 노인, 마을)	: ‵24. 2~6월

◦ ‵24년 어린이보호구역 개선사업 시행	: ‵24. 3~12월

- 교룡초 외 12개소(교통표지판 6개, 미끄럼방지포장 5,615㎡ 등)

◦ ‵24년 속도제한 정비사업 도비 확보 및 설문조사 시행(오동초, 한울학교)	: ‵24. 8월

◦ ‵24년 속도제한 정비사업 실시설계 용역 시행	: ‵24. 10월

◦ ‵24년 속도제한 정비사업 시행	: ‵24. 12..~‵25. 2.

◦ ‵25년 어린이보호구역 개선 및 속도제한 정비사업 도비 확보(도비 1,140백만원)	: ‵24. 12월

□ 금후계획

◦ ‵25년 어린이보호구역 개선 및 속도제한 정비사업 실시설계 시행	: ‵25. 1~2월

◦ 교통관련 유관기관 협의(전북경찰청, 남원경찰서, 도로교통공단)	: ‵25. 3월

◦ ‵25년 어린이보호구역 개선 및 속도제한 정비사업 시행	: ‵25. 4~12월

스마트 어린이보호구역 조성

(신규사업)

작성부서 : 교통과 부서장 : 이선욱  팀장 : 김성철  담당자 : 이귀현  전화 : 6985

□ 추진근거

◦ 도로교통법 제12조 제5항(어린이 보호구역의 지정·해제 및 관리)

- 시장등은 어린이 보호구역에 어린이의 안전을 위하여 시설 또는 장비를 설치하여야 한다

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 초등학교 7개소(남원초, 도통초, 오동초, 용성초, 월락초, 중앙초, 한울학교)

◦ 사업기간 : ‵25. 1 ~ 6월

◦ 총사업비 : 1,300백만원(국비 650, 시비 650)

◦ 사업내용 : 어린이보호구역 내 방호울타리 및 스마트횡단보도 설치

구분	사업내용
방호울타리	통학로와 도로 구분을 위한 방호울타리 설치(1,000m)
스마트횡단보도	인공지능 센서를 적용한 스마트횡단보도 설치(바닥신호등, 신호연장 등)

□ 추진계획

◦ 스마트 어린이보호구역 조성사업 실시설계 시행	: ‵25. 1~2월

◦ 교통관련 유관기관 협의(전북경찰청, 남원경찰서, 도로교통공단)	: ‵25. 2월

◦ 스마트 어린이보호구역 조성사업 시행	: ‵25. 3~6월

- 방호울타리 관급자재 구입 및 스마트횡단보도 설치 공사 시행

□ 기대효과

◦ 어린이보호구역 신뢰 향상과 어린이 보행 환경 안전 확보

◦ 스마트 횡단보도 설치를 통해 보행자 안전을 확보하여 교통사고 감소 기대

교통이용약자 보호구역 개선사업

(계속사업)

작성부서 : 교통과 부서장 : 이선욱  팀장 : 김성철  담당자 : 이귀현  전화 : 6985

□ 추진근거

◦ 도로교통법 제12조의2(노인 및 장애인 보호구역의 지정·해제 및 관리)

◦ 마을주민 보호구간 설치 및 관리지침(2.1 보호구간 지정 및 해제절차)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내 5개소(노인 3, 마을주민 2)

◦ 사업기간 : ‵25. 1 ~ 6월

◦ 사 업 비 : 500백만원(도비 210 시비 290)

◦ 사업내용

(단위 : 백만원)

구 분	노인 보호구역	마을주민 보호구역
사업비	300(도비 150, 시비 150)	200(도비 60, 시비 140)
위 치	3개소(동북노인복지센터 외 2)	2개소(인월면 인월마을, 아영면 오산마을)
사업량	비규격 표지판 정비 노면표시 개선 미끄럼방지 포장	시종점 및 교통안전표지판 설치 노면표시 개선 미끄럼방지 포장

□ 추진실적

◦ ‵24년 보호구역 개선사업 추진	: ‵24. 3~12월

- 보은의집 외 4개소(교통표지판 27개소, 미끄럼방지포장 2,426㎥ 등)

◦ ‵25년 보호구역 개선사업 대상지 조사 및 도비 확보(도비 210백만원)	: ‵24. 8월

□ 금후계획

◦ ‵25년 보호구역 개선사업 실시설계 시행	: ‵25. 1~2월

◦ ‵25년 보호구역 개선사업 시행	: ‵25. 3~6월

자전거 이용환경 조성

(계속사업)

작성부서 : 교통과 부서장 : 이선욱  팀장 : 김성철  담당자 : 이귀현  전화 : 6985

□ 추진근거

◦ 자전거 이용 활성화에 관한 법률 제10조(자전거이용시설의 정비)

-  자전거 이용시설은 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 도로관리청이 정비한다

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내

◦ 사업기간 : ‵25. 1 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 284백만원(시비)

◦ 사업내용

(단위 : 백만원)

구 분	자전거 도로 정비사업	자전거 보험
위 치	축전교~동림교 노암사거리	남원시 전시민 대상
사업비	224(시비)	60(시비)
사업량	-노후‧파손 자전거도로 재포장 -자전거 표지판 점검‧보수	자전거 보험 1식 (진단위로금 4주이상 20만원부터, 사망 1,000만원, 후유장해 1,000만원, 벌금 2,000만원 한도 등)

□ 추진실적

◦ ‵24년 남원시민 자전거보험 가입 시행	: ‵24. 2.~‵25. 1.

※ 2024년 보험 지급 : 59명, 37백만원

◦ ‵24년 자전거도로 정비사업 준공(한빛중앞 사거리)	: ‵24. 5. 27.

- 자전거도로 아스콘 및 도막형바닥재 재포장 L=390m

◦ ‵24년 자전거도로 정비사업 준공(백공산~동디사거리)	: ‵24. 6. 24.

- 자전거도로 아스콘 및 도막형바닥재 재포장 L=486m

□ 금후계획

◦ ‵25년 남원시민 자전거보험 가입 시행 및 안내 홍보	: ‵25. 1월~

◦ 개인형이동장치(PM) 관련 계도 및 교육 시행(교육청 안내 등)	: ‵25. 1월~

◦ ‵25년 자전거도로 정비사업 실시설계 용역 시행	: ‵25. 1~2월

- 축전교~동림교, 노암사거리 자전거도로 아스콘 및 도막형바닥재 재포장 : L=1km

◦ ‵25년 자전거도로 정비사업 시행	: ‵25. 3~6월

스마트 교통체계 운영·관리

(계속사업)

작성부서 : 교통과 부서장 : 이선욱  팀장 : 김성철  담당자 : 오선빈  전화 : 6579

□ 추진근거

◦ 국가통합교통체계효율화법 제77조(교통체계지능화사업의 시행)

- 지능형교통체계를 구축·운영하고 활용하는 사업은 지방자치단체의 장이 시행

□ 개    요

◦ 사업기간 : ‵25. 1 ~ 12월

◦ 총사업비 : 195백만원(시비)

◦ 사업위치 : 시내권 주요 도로

◦ 사업내용 : 교통정보 어플(시내버스, 공영주차장) 및 교통정보센터 운영·관리

(단위 : 개소)

구분	사업내용
교통정보 어플	시내버스 실시간 운행 정보 및 공영주차장 실시간 잔여 면수 제공
교통정보센터	주차정보제공(17), 신호 온라인화(10), 스마트교차로(7), 돌발상황관리(1), 교통정보제공(1) 시스템 운영을 통해 교통 데이터 수집·분석

□ 추진실적

◦ 교통정보 어플 개발(공영주차장 17개소, 시내버스 44대)	: ‵24. 4 ~ 12월

◦ 유료화 공영주차장 자동 요금 감면 시스템 구축	: ‵24. 8 ~ 12월

- 국가유공자, 장애인, 경차, 친환경차를 대상으로 주차 요금 자동 50% 감면

□ 금후계획

◦ 교통정보 어플 홍보 시행	: ‵25. 1 ~ 3월

- 학생들이 등하굣길에 적극 이용할 수 있도록 교육청 홍보 시행

- SNS, 전광판, 보도자료 등의 다양한 매체 활용

◦ 어플 및 교통정보센터 시스템 유지관리 용역 시행	: ‵25. 1 ~ 12월

◦ 스마트 교통체계 확립을 위한 교통 데이터 수집·분석	: ‵25. 1 ~ 12월

- 스마트교차로(교통량, 대기행렬, 차종) 및 신호 온라인화(프로그램을 통해 신호 주기 조절) 등

선진 주차질서 확립

(계속사업)

작성부서 : 교통과  부서장 : 이선욱  팀장 : 박기정  담당자 : 이인섭  전화 : 6567

□ 추진근거

◦ 도로교통법 제32조(정차 및 주차의 금지), 제33조(주차금지의 장소), 제160조(과태료)

- 불법주정차 금지 구역, 과태료 부과에 관한 규정

◦ 남원시 불법 주정차 단속 지침

- 주민신고제 운영, 불법주정차 단속 및 과태료 부과·징수에 관한 규정

□ 개    요

◦ 사업목적 : 불법 주정차 계도 및 단속으로 선진교통문화 질서 확립

◦ 단속인력 : 2개반 6명(공무원2, 공무직4)

◦ 운영장비

- 고정식 CCTV : 59개소(전통시장, 터미널, 예가람길 등)

- 지도단속 차량 운영: 2대

□ 추진실적

◦ 이동형·고정형 CCTV를 통한 불법주정차 단속실적        : 2,846건

- 전통시장, 터미널 등 교통혼잡구역 집중 단속

◦ 주민신고제를 통한 불법주정차 단속실적                  : 2,340건

- 6대불법주정차 신고가능구역에 대한 안내문 배포로 적극 홍보

◦ 불법주정차 사전알림 문자서비스 가입                    : 3,576대

□ 금후계획

◦ 6대 불법주정차 금지 구역 및 주민신고제 홍보 실시       : 연중

◦ 불법주정차 교통혼잡구역 중점 계도 및 지도 단속 실시    : 연중

◦ 시민단체, 유관기관과 합동으로 교통안전캠페인 추진       : 반기별

과태료 체납자 관리 및 세입 확충

(계속사업)

작성부서 : 교통과  부서장 : 이선욱  팀장 : 박기정  담당자 : 이인섭  전화 : 6567

□ 추진근거

◦ 질서행위규제법 제24조(가산금 징수 및 체납처분 등) 및 지방세징수법 제106조(정리보류 등)

- 과태료 체납에 따른 가산금 징수 및 정리보류에 관한 규정

□ 개    요

◦ 시행목적 : 체납자에 대한 지속적인 관리와 적극적인 징수활동으로 안정적 자주재원 확보 및 세입증대

◦ 체납현황

구분 회계별	부 과 액		징 수 액		체 납 액		징수율 (%)	비고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
계	10,052	355,733	8,281	282,306	1,771	73,275	82.3%
24년	5,186	182,468	3,985	135,710	1,201	46,757	74.4%
23년	4,866	173,265	4,296	146,596	570	26,518	84.6%

(단위 : 천원)

□ 추진실적

◦ 과년도 체납액에 대한 독촉고지서 발송                 : 6,070건

◦ 100만원 이상 고액체납자(25명)에 대한 공문 및 문자 발송 : 559건

◦ 징수 불가능한 체납(27백만원)에 대한 정리보류 실시        : 688건

□ 금후계획

◦ 체납세외수입 특별징수반(지도팀장외 7명) 운영               : 반기별

- 고액체납자 명단 관리 및 독촉 공문·문자 발송

- 거주지 현장 출장을 통한 고액체납자 납부 독려 및 재산압류 조치

◦ 과태료 체납분에 대한 정리보류 실시                   : 25. 12월

- 재산 발견시 정리보류 취소후 압류처분

친절하고 신속한 차량등록

(계속사업)

작성부서 : 교통과 부서장 : 이선욱  팀장 : 오미자  담당자 : 김상미  전화 : 6120

□ 추진근거

◦ 자동차관리법 제5조(등록), 제12조(이전등록), 제13조(말소등록), 제43조(자동차검사)

◦ 건설기계관리법 제3조(등록 등), 제6조(등록의 말소 등), 제13조(검사 등)

◦ 자동차 손해배상보장법 제5조(보험 등의 가입의무)

□ 개    요

◦ 대상(6종) : 승용차, 승합차, 화물차, 특수차, 건설기계, 이륜차

◦ 등록구분 : 신규, 이전, 말소(폐차), 저당, 압류, 보험, 검사 등

◦ 차량등록현황

(단위 : 대)

구 분	계	자동차	건설기계	이륜차	증/감
2024년 11월	54,904	45,039	3,167	6,698	+1.10%(증606)
2023년	54,298	44,547	3,052	6,699

※ 자동차 : 45,039대(승용차 30,233, 승합차 1,426, 화물차 13,116, 특수차 264)

◦ 차량등록 신규·이전·압류·말소(폐차) 등 민원처리			:	111,307건
◦ 자동차 정기검사, 책임보험 가입촉구 안내(우편발송)			:	22,500건
◦ 자동차 정기검사, 책임보험 지연 과태료 부과	:	2,916건 / 364백만원
◦ 건설기계 조종사 면허발급 및 정기 적성검사 처리			:	1,117건
◦ 건설기계관리법 위반 과태료 부과	:	47건 / 48백만원
◦ 건설기계 조종사 대면 안전교육 실시			:	2회
◦ 무보험 운행차량 사건송치 및 통고처분(내사종결)			:	95건
◦ 국민신문고 민원처리			:	337건

□ 추진실적

□ 금후계획

◦ 차량등록 업무추진[신규, 이전, 변경, 말소(폐차) 등]	:     연중

◦ 자동차 정기검사 사전안내 및 책임보험 가입 촉구 등	:     매월

◦ 무보험 운행차량 운전자 사건수사 등 특사경 업무추진	:     수시

◦ 건설기계 등록, 정기검사 안내 등 건설기계 업무 추진     :     연중